9077/2020-139146(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-54502/2019 

г.Нижний Новгород 30 июля 2020 года  Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Бычихиной С. А. (шифр 31-1767), при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

администрации городского округа г. Бор в лице Управления жилищно-коммунального  хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор Нижегородской  области  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Конструктив Монтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

третье лицо: некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов, расположенных на территории Нижегородской области  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании завершить работы по договору и взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 170-180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования администрации городского округа г. Бор удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Конструктив Монтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 01 сентября 2020 года завершить  работы по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме № 945147 от 15.05.2018 в отношении многоквартирного жилого  дома, расположенного по адресу: городской округ 

<

...> части  работ по капитальному ремонту кровли.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Конструктив Монтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации городского округа  г.Бор (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения  обязательств в размере 60 612 (шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать) руб. 16 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Конструктив Монтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 8 424 (восемь тысяч четыреста двадцать четыре) руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) в течение месяца со дня его  принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 АПК РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течении двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 АПК РФ при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы (в том числе и в электронном виде)  подаются через Арбитражный суд Нижегородской области.  

Судья С.А. Бычихина