138/2017-36737(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов «11» июля 2017 года Дело № А64-4226/2016 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Е.В. рассмотрел дело № А64-4226/2016 по исковому заявлению Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, г. Тамбов 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Промсоцстрой», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо: Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального  обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Петровского района»  

о безвозмездном устранении недостатков работ по государственным контрактам на  долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 - представитель, доверенность № 011577 от 02.02.2017 от ответчика: не явился, извещен от третьего лица: не явился, извещен отводов не заявлено 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

2. Обязать ООО «Промсоцстрой» в течение 30 календарных дней с момента  вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по  государственным контрактам: от 26.08.2013г. № 0164200003013003075_158254/355; от  20.09.2013г. № 0164200003013003410_158254/420; от 23.10.2013г. №  0164200003013003412_158254/515; от 23.10.2013г. № 0164200003013003414_158254/516;  от 28.10.2013г. № 0164200003013003411_158254/526; от 28.10.2013г. №  0164200003013003413_158254/527, а именно, выполнить следующий перечень работ:  выполнить усиление фундамента, с глубиной заложения до отметки, предусмотренной  строительными правилами (СП); привести в рабочее состояние вентиляцию в  совмещенном сан.узле, а также вывести вентиляцию кухни выше карниза крыши с  исключением опрокидывания тяги; произвести полную замену пола; выполнить утепление  наружных стен; толщину чердачного утеплителя довести до 200 мм; стропильные  конструкции крыши выполнить в соответствии с СП.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Промсоцстрой» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

11 июля 2017 года 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со  дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.  Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд  Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу,  через арбитражный суд Тамбовской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда www.19aac.ru или Арбитражного суда  Центрального округа.  

Судья Тишин А.А.