АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                      Дело № А65-11949/2022 

Дата принятия решения –  21 марта 2023 года.

Дата объявления резолютивной части –  14 марта 2023 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Публичного  акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 8 206 918 рублей 99 коп. неустойки

и по встречному исковому заявлению   Общества с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Публичному  акционерному обществу "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 3 598 693 руб. 59 коп. долга,

с привлечением к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно спора - ООО «Торгспецсервис»,

с участием:

от истца  – ФИО2 представитель по доверенности от 10.01.2022,

от ответчика  – не явился, извещен.

от третьего лица – не явился, извещен.

эксперт - ФИО3

установил:

Истец - Публичное  акционерное общество "Камгэсэнергострой - обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику –  Обществу с ограниченной ответственностью "Барс - о взыскании 8 206 918 рублей 99 коп. неустойки.

Определением от 10.08.2022г. встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны вх. № 9603  от 04.08.2022  к Публичному  акционерному обществу "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны о взыскании 7 599 834 руб. 44 коп. долга принято к производству. 

Определением от 11.10.2022г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Торгспецсервис».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07 ноября 2022 года по делу  №А65-11949/2022  назначена судебная  экспертиза, производство которой поручено эксперту ФИО3 ИП ФИО3

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) Соответствует ли объем и качество выполненных работ по актам №№35, 36 и 37 условиям договора строительного подряда №057/224825171/19 от «30» декабря 2019г. №1 от 01.06.2018 г. («Реконструкция и техническое перевооружение механсборочного и гальванического производства двигателя РД-191») и иным нормативно – правовым актам.

2) Если да,  определить стоимость выполненных работ?

3) Если нет, определить стоимость устранения недостатков?

4) Кем выполнены спорные работы ООО «Барс» либо ООО «Торгспецсервис»?

Определением от 10.02.2023г. производство по делу возобновлено.

Определением от 27.02.2023г. принято уменьшение исковых требований по встречному иску. 

По ходатайству истца эксперт вызван в судебное заседание. 

Эксперт в судебном заседании представил письменные ответы на вопросы истца, дал пояснения. 

Истец по первоначальному иску требования поддержал.

Ответчик по первоначальному иску заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Истец по встречному иску в судебное заседание не явился, направил письменное ходатайство о рассмотрении дела без его участия. 

Ответчик по встречному иску высказал возражения.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено в порядке статьи 123 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ч.5 ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело без участия третьего лица и ответчика. 

Ранее истец заявил ходатайство о привлечении Прокуратуры к участию в деле. 

Ходатайство о привлечении Прокуратуры в порядке ст. 52 АПК РФ отклонено.

Исследовав материалы  дела, суд находит правовые основания для частичного удовлетворения  первоначальных требований истца и удовлетворения встречных исковых требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между генподрядчиком АО «Камгэсэнергострой» и подрядчиком ООО «БАРС» заключен   договор   №057/224825171/19   от   30.12.2019 г.

Согласно п.2.1 договора, Предметом настоящего Договора является выполнение работ по выполнению кирпичной кладки, согласно графика производства работ в рамках реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» (Шифр проекта 1117). Идентификатор договора 00000000730160550002.

Согласно п.2.2 договора, по настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика в установленный настоящим договором срок, своими и привлеченными силами и средствами Работы на Объекте согласно Проектной документации и передать Результат выполненных Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять Результат выполненных Работ и оплатить его.

Согласно п. 3.1 договора, стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ПСД, утвержденной Генподрядчиком, и составляет 4 880 000 (Четыремиллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% из расчета:

кирпичная кладка - 3 300 000 руб. в т.ч. 20% НДС (5 500 руб. за 1 мЗ). Количество товара - 600 мЗ кладки;

перебазировка опорных усиленных строительных лесов - 500 000 руб. с уч. НДС 20%. Количество рейсов - 10;

работа крана манипулятора на объекте - 432 000 руб./30 дней;

аренда квартир для рабочих - 108 000 руб./мес с уч. НДС 20%. Количество рабочих - 30 человек;

командировочные рабочим - 540 000 руб./мес с уч. НДС 20% из расчета 600 руб./чел в день. Количество рабочих - 30 человек.

Согласно п.4.1 договора, осуществление платежей регламентируется лимитами и сроками поступления средств в рамках Федеральной целевой программы. Согласно Распоряжению Правительства от 18.07.2019 № 1585-р все расчеты по настоящему договору подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона « О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и пунктом 6 подпунктами «а», «б», «в», «г», «д» включительно Постановления Правительства от 30.12.18г К° 1765

Из п.4.4.2.2 следует, что на основании подписанного Генподрядчиком Журнала учета выполненных объемов работ по форме КС-6, Подрядчик не позднее 29 числаотчетного месяца оформляет и представляет Генподрядчику для подписания Реестр актов о приемке выполненных работ за отчетный месяц(Приложению Х° 3), Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетныймесяц в пяти экземплярах, составленных на основании смет.

Уполномоченный представитель Генподрядчика в течение 5-и рабочих дней с даты представления Подрядчиком указанных в настоящем пункте документов, рассматривает и подписывает их или представляет Подрядчику мотивированный отказ в письменной форме. В случае не направления в указанный срок подписанных актов либо мотивированного отказа, работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.

Подписанные документы: Реестр актов о приемке выполненных работ за отчетный месяц (Приложению Хэ 3), акт выполненных объемов работ по форме КС-6, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в четырёх экземплярах остаются у Генподрядчика, один экземпляр передается Подрядчику.

В случае задержки предъявления Подрядчиком указанных в настоящем пункте документов на срок более 2 (двух) рабочих дней, указанные документы рассмотрению в текущем месяце не подлежат.

Пунктом 4.4.2.4  установлено, что Оплата выполненных в отчетном месяце работ производится Генподрядчиком на основании предъявленного счета-фактуры в течение 15 календарных дней при условии наличия средств у Генподрядчика на счетах УФК, полученных из федерального бюджета по федеральной целевой программе. При расчетах за выполненные Работы Генподрядчик оплачивает 95% (Девяносто пять процентов) от стоимости выполненных Работ, предъявленных ему Подрядчиком и принятых Генподрядчиком, в соответствии со справкой по форме КС-3. Оставшиеся 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных работ по Объекту выплачиваются Подрядчику Генподрядчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончательной приемки полного объема работ по настоящему договору. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчиком или отказа от Договора по причине существенного неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору удержания в размере 5% Подрядчику не выплачиваются.

Согласно п.5.1, Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного срока), выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1).

Подрядчик в течение 30 календарных дней с момента заключения договора предоставляет на утверждение Генподрядчику Графика производства работ (Приложение № 1), содержащий понедельные сроки, объемы и стоимость работ, который с момента утверждения Генподрядчиком становится обязательным к исполнению Подрядчиком.

Согласно п.16.2, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором (общего срока выполнения работ, сроков выполнения этапов (подэтапов) работ по Графику производства работ, сроков выполнения этапов (подэтапов) работ по Графику производства работ, срока предоставления Детализированного Графика производства работ, установленному п. 5.1. настоящего Договора, а так же иных сроков, предусмотренных настоящим Договором, иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором), Подрядчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25 ноября 2013 г.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП, где:

Сцц - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП : ДК х 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы.

Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 48 800 (Сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек:

Неустойка подлежит взысканию как в период невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, так и после приемки выполненных работ.

Дополнительным соглашением №1 от  4.04.2020г. стороны изменили п. 4.4.2. Договора: «Ежемесячные платежи Генподрядчик осуществляет за выполненные в отчетном месяце Подрядчиком Работы по этапу 1 на условии подпунктов 4.4.2.1.-4.4.2.4. и пункта 4.5 настоящего Договора по факту выполнения работ при условии поступления денежных средств из федерального бюджета по федеральной целевой программе посредством перевода денежных средств на лицевой счет Подрядчика с зачетом paнее выплаченного аванса. При этом сумма выплаченною Подрядчику аванса засчитывается в счет оплаты выполненных работ от стоимости работ, указанной в соответствующем принятом к оплате Акта  приемке выполненных работ по форме КС-2. С момента использования суммы авансового платежа, указанного в пункте 4.3.1 настоящего договора, оплата выполненных работ производится в размере стоимости работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ».

Распространить изменение условий и. 4.4.2. Договора на взаимоотношения сторон  возникшие с апреля 2020 года.

Дополнительным соглашением №2 от 17.04.2020г. стороны пришли к обоюдному соглашению о внесении следующих изменений к Договору: Генподрядчик поручает Подрядчику выполнить дополнительные работы по устройству кирпичной кладки в объеме 1500 кубических метров стоимостью 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 %. из расчета 6 000 рублей за 1 кубический метр.

В связи с введением в договор дополнительного объема работ по устройству кирпичной кладки стоимостью 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 20% изменить пункт 3.1. Договора раздела №3 «Цена договора» и читать его в новой редакции : «3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ПСД. утвержденной Генподрядчиком, и составляет 13 880 000 Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% из них:

2.1. стоимость основного объема работ по кирпичной кладке в размере 4 880 000 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек . в т.ч. НДС 20% из расчета:

кирпичная кладка - 3 300 000 руб. в т.ч. 20% НДС (5 500 руб. за 1 мЗ) в объеме 600 мЗ;

перебазировка опорных усиленных строительных лесов - 500 000 руб. в т.ч. НДС 20%. Количество рейсов - 10:

работа крана манипулятора на объекте - 432 000 руб./30 дней;

аренда квартир для рабочих - 108 000 руб./мес с уч. НДС 20%. Количество рабочих - 30 человек;

командировочные рабочим - 540 000 руб./мес с уч. НДС 20%. Количество рабочих - 30 человек:

2.2. Стоимость дополнительного объема работ по кирпичной кладке в размере 9 000 000 (Девять миллионов) руб. в т.ч. НДС 20% из расчета:

- кирпичная кладка - 9 000 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 % (6 000 рублей за 1 мЗ объемом) в объеме 1 500 мЗ кладки.

3. установить срок выполнения дополнительных работ по кирпичной кладке: начало - 20.04.2020 г.,  окончание - 15.07.2020 г. в соответствии с графиком производства работ Приложение № 1.2. к Договору.

Дополнительным соглашением №3  от 28.04.2020 г. Стороны пришли  к обоюдному соглашению о внесении следующих изменений к Договору:

Внести изменения в п.3.1. Договора раздела «Цена договора» и читать его в следующей редакции: «3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ПСД. Утвержденной Генподрядчиком, и составляет 13 879 998 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 2 313 333 (Два миллиона триста тринадцать триста тридцать три) рубля. 00 копеек из них:    

3.1.1 Стоимость работ по кирпичной кладке основной объем в размере 4 879 998 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% -813 333 (Восемьсот тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля, 00 копеек из расчета 8133,33 рублей за 1 кубический метр кирпичной кладки объемом 600 кубических метров.         

3.1.2 Стоимость дополнительного объема работ по кирпичной кладке 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. 00 копеек из расчета 6 000 рублей за один кубический метр кирпичной кладки объемом 1 500 кубических метров.»

2. Распространить условие об исчислении стоимости работ основного объема кирпичной кладки в размере 4 879 998 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 813 333 (Восемьсот тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля. 00 копеек, на взаимоотношения сторон, возникшие с 30 декабря 2019 года.

Дополнительным соглашением №4 от 19.06.2020г. Стороны пришли к обоюдному соглашению о внесении в Договор следующих изменений: 1. Ввести в Договор дополнительный объем работ по штукатурке стен механизированным способом, согласно выданной проектной документации и действующих нормативов, а именно:

- работ по нанесению гипсовой штукатурки на стены производственных площадей, встроек, вспомогательных площадей, лестничных клеток, с/у. колонн и т.д. в объеме 1 1 300 м2 по цене 615 руб/м2, в т.ч. НДС 20%. обшей стоимостью 6 949 500.00 рублей, в т.ч. НДС 20%;

- работ по нанесению цементной штукатурки на стены производственных площадей, встроек, вспомогательных площадей, лестничных клеток, с/у. колонн и т.д. в объеме 7300 м2 по цене        700 руб м2. в т.ч. 11ДС 20%. общей стоимостью 5 110 000.00 рублей, в т.ч. НДС 20%.

с учетом необходимого материала для выполнения работ (штукатурная смесь, грунтовка, бетоноконтакт. уголки, маяки, сетки, а также сопутствующие расходные материалы), механизмов, лесов, затрат на вывоз мусора, электроэнергию и т.д.. в рамках реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» (Шифр проекта 1117). Идентификатор договора 00000000730160550002.

2. В связи с введением в Договор дополнительного объема увеличить стоимость работ на 12 059 500 (Двенадцать миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, и читать п. 3.1. Договора в новой редакции: «Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ПСД. утвержденной Генподрядчиком, и составляет 25 939 498 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% в размере 4 323 249.67 рублей».

   3.   Включить в п. 3.2.1. Договора затраты на услуги водоснабжения на Объекте.

Срок выполнения работ по настоящему соглашению определяется в соответствии с Графиками производства paбот (Приложение 1 и Приложение 2).

Оплата работ, предусмотренных настоящим соглашением, осуществляется посредством уплаты  Генподрядчиком аванса на материал в размере 500 000,00 рублей. Оставшиеся расчеты производятся по факту выполнения Подрядчиком указанных в п.1. настоящего соглашения работ и предоставления актов выполненных работ (по форме КС-2). справки о стоимости работ.    

Изменить п. 16.2. Договора в следующей части:

«Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчикомобязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором.    

Размер штрафа устанавливается от конечной цены Договора из расчета:

а)10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей:

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей,

в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей:

г) 0.5 процента пены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Дополнительным соглашением №5 от 31.08.2020г. внесены изменения в части наименования Генподрядчика в связи с изменением организационно  -правовой формы.

Дополнительным соглашением №6 о 29.09.2020г. Стороны пришли к обоюдному соглашению о внесении в Договор следующих изменении:

В связи с увеличением размера аванса для выполнения дополнительных работ но штукатурке стен механизированным способом, стороны согласовали,  что оплата предусмотренных дополнительным соглашением № 4 от 19.06.2020 к договору № 057/224825171/19 от 30.12.2019 осуществляется   посредством  уплаты   Генподрядчиком аванса   на  материал  в размере 1 000 000 рублей. Оставшиеся расчеты производятся но факту выполнения Подрядчиком указанных в п.1. настоящего соглашения работ и предоставления актов выполненных работ (но форме КС-2). справки о стоимости работ (по форме КС-3) счет-фактуры.

Дополнительным соглашением  №7 от 27.10.2020г. дополнить предмет Договора (п.2.1.) объемом дополнительных работ по кирпичной кладке перегородок толщиной 120 мм обшей стоимостью 2 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% в размере 433 333,33 рублей, определяемой на основании Протокола стоимости работ (Приложение 1 к соглашению).      

Стоимость     дополнительных     работ     включает     в     себя     армирование,     установку железобетонных перемычек, затраты на механизмы, электроэнергию и уборку.

Пересмотреть общую стоимость Договора и читать первое предложение п. 3.1. в новой редакции: «Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ПСД, утвержденной Заказчиком, и составляет 28 539 498,00 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей, в т.ч. НДС 20% в сумме 4 756 583,00 рублей».

Учитывая условия дополнительного соглашения № 4 от 19.04.2020 года, а также настоящего соглашения, дополнить пункт 3.1. Договора следующими видами работ:

«...3.1.3. стоимость работ по нанесению гипсовой штукатурки на стены производственных площадей, встроек, вспомогательных площадей, лестничных клеток, с/у. колонн и т.д. в объеме 11 300 м2 по цене 615 руб/м2, в т.ч. НДС 20%, обшей стоимостью 6 949 500,00 рублей, в т.ч. НДС %-  158 250.00 рублей:       

3.1.4.     стоимость работ по нанесению цементной штукатурки на стены производственных площадей, встроек, вспомогательных площадей, лестничных клеток, с/у, колонн и т.д. в объеме 7300 м2 по цене 700 руб/м2. в т.ч. НДС 20%, обшей стоимостью 5 110 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%-851 666.67 рублей:

3.1.5. стоимость работ по кирпичной кладке перегородок толщиной 120 мм общейстоимостью 2 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - 433 333,33 рублей, определяемой согласноПротоколу стоимости работ (Приложение 1 к дополнительному соглашению № 7 от 27.10.2020.

4. Оплата указанных в п.1. настоящего соглашения работ производится Генподрядчиком в полном объеме после подписания актов по форме КС-2, КС-3. счет-фактуры и предоставления полного комплекта ИТД в количестве 5 (Пять) экземпляров.

5. Срок выполнения указанных в п.1. настоящего соглашения работ определяется на основании Графика производства работ (Приложение 2 к соглашению). Начало работ - 09.11.2020   и окончание работ - 09.02.2021 г.

Дополнительным соглашением №8 от 16.12.2020 г. Стороны пришли к обоюдному соглашению о внесении в Договор следующих изменении:  «Предметом настоящего Договора является выполнение строительно-монтажных работ по кирпичной кладке, согласно графика производства работ, на объекте: «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» (Шифр проекта 1117). Идентификаторы договора; 00 000 000 730 160 550 002; 00 000 000 730 17Р 090 002: 00 000 000 730 956.

Дополнительным соглашением №9 от 12.01.2021 стороны изменили п.4.4 Договора.

Дополнительным соглашением от 26.02.2021 №10 п.3.4. исключен из текста Договора.

В связи с необходимостью уплаты аванса на дополнительные работы сверх суммы, установленной в Договоре, дополнить п.4.3.1. Договора следующим положением: «В случае необходимости уплаты Подрядчику аванса за выполнение дополнительною объема работ. Стороны определяют размер аванса в рамках дополнительного соглашения о введении соответствующего объема работ. Согласование Сторонами аванса на дополнительные работы не противоречит, а дополняет условия Договора».         

В связи с изменением организационно-правовой формы Заказчика внести изменения в Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему в части наименования Заказчика и вместо «Публичное акционерное общество «Протон - Пермские моторы» читать «Акционерное общество «Протон - Пермские моторы» в соответствующем падеже.

Дополнить предмет Договора (п.2.1.) объемом дополнительных работ по устройству черновой отделки полов по проекту 1117-82-АР изм.12 общей стоимостью 13 224 619,77 рублей, шт.н. НДС 20% в размере 2 204 103.30 рублей, определяемой на основании Протокола согласования расценок (Приложение 1 к настоящему соглашению).

Стоимость дополнительных работ включает в себя расходы на материалы (основные и расходные), механизмы, электроэнергию и прочие затраты, необходимые для выполнения полного комплекса работ.

Генподрядчик уплачивает Подрядчику аванс на указанные в п.4. настоящего соглашения работы в размере до 50% от стоимости дополнительных работ. Последующие взаиморасчеты осуществляются после подписания актов по форме КС-2. КС-3. счет - фактуры и предоставления полного комплекта ИТД в 5 (Пять) подлинных экземплярах.    

Срок выполнения указанных в п.4. настоящего соглашения работ определяется на основании Графика производства работ (Приложение 2 к настоящему соглашению). Начало работ - 01.03.2021 г; окончание работ - 31.08.2021 г.

 7. Изменить и.2.1. Договора и утвердить его в новой редакции:

«Предметом настоящего договора является выполнение, согласно графика производства работ,   на   объекте:    «Реконструкция    и   техническое   перевооружение    механосборочного   и гальваническою   производства   двигателя   РД-191»   (Шифр   проекта    1117).   идентификаторы договора № 00000000730160550002: № 0000000073017Р090002; № 00000000730956180183. работ:

по выполнению кирпичной кладки общей стоимостью 4 879 998.00 рублей, в т.ч. НДС 20%-813 333.00 рублей:           

по устройству кирпичной кладки общей стоимостью 9 000 000.00 рублей, в т.ч. НДС 2#/о - 1 500 000,00 рублей;

по штукатурке стен механизированным способом обшей стоимостью 12 059 500.00 рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 009 916.67 рублей:

по кирпичной кладке перегородок толщиной 120 мм общей стоимостью 2 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - 433 333,33 рублей;       

2.1.5.     по   устройству   черновой   отделки   полов   по   проекту   1117-82-ЛР   изм.12   обшей стоимостью 13 224 619.77 рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 204 103,30 рублей».

8. Пересмотреть общую стоимость Договора, в связи с чем утвердить первое предложение п. 3.1. в новой редакции: «Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с ПСД. утвержденной Заказчиком,  и составляет 41 764 117,77 (Сорок один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи сто семнадцать) рублей 77 копеек, в т.ч.  НДС 20% в сумме 6 960 686.30 рублей».

 9. Дополнить пункт 3.1. Договора следующими видами работ:

«...3.1.6. стоимость работ по устройству черновой отделки полов по проекту 1117-82-АР изм.12 общей стоимостью 13 224 619,77 рублей, в т.ч. НДС 20% в размере 2 204 103.30 рублей. определяемой на основании Протокола согласования расценок (Приложение 1 к ДС №10 от 26.02.2022 г.) ».

Дополнительным соглашением №11 от 30.03.2021 стороны установили распространить действие п.1 Дополнительного соглашения №10 от 26.02.2021 к Договору на взаимоотношения Сторон с даты полписания Договора.

Дополнительным соглашением №12 от 9.04.2021г. Стороны, в соответствии со ст. 450 ГК РФ и п. 26.3. Договора, пришли к обоюдному решению о внесении в договор № 057/224825171/19 от 30.12.2019 г. следующих изменений:

1. Дополнить предмет Договора (п.2.1.) объемом дополнительных работ по финишнойотделке полов по проекту 1117-82-АР изм.13 общей стоимостью 8 919 150,00 рублей, в т.ч. НДС20% - 148 658,33 рублей, определяемой на основании Протокола согласования расценок(Приложение 1 к настоящему соглашению).       "  '

Стоимость дополнительных работ включает в себя расходы на материалы (основные и расходные), механизмы, электроэнергию и прочие затраты, необходимые для выполнения полного комплекса работ.

2. Генподрядчик уплачивает Подрядчику аванс на указанные в п.1. настоящего соглашения работы в размере до 50% от стоимости дополнительных работ. Последующие взаиморасчеты осуществляются после подписания актов по форме КС-2, КС-3, счет-фактуры и предоставления полного комплекта ИТД в 5 (Пять) подлинных экземплярах за минусом гарантийного удержания 5 (Пять)%.

3. Срок выполнения указанных в п.1. настоящего соглашения работ определяется на основании Графика производства работ (Приложение 2 к настоящему соглашению). Начало работ - ?.04.2021 г; окончание работ - 15.06.2021 г.

4. Изменить п.2.1. Договора и утвердить его в новой редакции:

«Предметом настоящего договора является выполнение, согласно графику производства работ, на объекте: «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» (Шифр проекта 1117), идентификаторы договора № 00000000730160550002; № 0000000073017Р090002; № 00000000730956180183, работ:

по выполнению кирпичной кладки общей стоимостью 4 879 998,00 рублей, в т.ч. НДС 20%-813 333,00 рублей;

по устройству кирпичной кладки общей стоимостью 9 000 000,00 рублей, в т.ч- НДС 20% - 1 500 000,00 рублей;

по штукатурке стен механизированным способом общей стоимостью 12 059 500,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 009 916,67 рублей;

по кирпичной кладке перегородок толщиной 120 мм общей стоимостью 2 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - 433 333,33 рублей;

2.1.5.   по   устройству   черновой   отделки   полов   по   проекту   1117-82-АР   изм.12   общей стоимостью 13 224 619,77 рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 204 103,30 рублей;

В обоснование иска истцом указано, что ответчиком нарушены условия заключенного договора (в редакции дополнительного соглашения №4 от 19.06.2020г.) в части срока окончания работ. 

Общая сумма неустойки составляет 8 206 918,99 рублей из них:

5 232 655,21 руб. - пени за нарушение сроков окончания работ;

602 975 руб. - штраф за нарушение п.5.1, 5.4 Договора;

602 975 руб. - штраф за нарушение п.6.13 Договора;

562 363,78 руб. - пени за нарушение сроков окончания работ;

602 975 руб. - штраф за нарушение п.5.1, 5.4 Договора;

602 975 руб. - штраф за нарушение п.6.13 Договора.

Встречные исковые требования мотивированы следующими обстоятельствами.

        В рамках договора ответчиком выполнены СМР на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение механсборочного и гальванического производства двигателя РД-191». на общую сумму 31 476 924.77 руб.

Факт выполнения СМР подтверждается следующими документами: 

Акт формы КС-2 №1 от 13.02.2020г. на сумму 385 000 руб., КС-2 №2 от  1.02.2020г. на сумму 550 000  руб., КС-2 №3 от 05.03.2020г. на сумму 550 000руб., КС-2 №4 от 9.03.2020г. на сумму 660 000 руб., КС-2 №5 от 10.04.2020г. на сумму 738 100  руб., КС-2 №6 от 30.04.2020г. на сумму 184 333.10 руб., КС-2 №7 от 30.04.2020г. на сумму 263 333 руб., КС-2 №8 от 30.04.2020г. на сумму 263 333 руб., КС-2 №9 от 30.04.2020г. на сумму 315 999.60 руб.  КС-2 №10 от 30.04.2020г. на сумму 353 392.89 руб. КС-2 №12 от 30.04.2020г. на сумму 1 200 000 руб., КС-2 №11 от 30.04.2020г. на сумму 616 506.41. руб., КС-2 №13 от 26.05.2020г. на сумму 1 200 000 руб., КС-2 №14 от 23.06.2020г. на сумму 1 800 000 руб., КС-2 №16 от 12.08.2020г. на сумму 758 049.00 руб., КС-2 №17 от 14.08.2020г. на сумму 95 200.00 руб., КС-2 №18 от 18.09.2020г. на сумму 1 200 000 руб., КС-2 №19 от 14.10.2020г. на сумму 157 850 руб., КС-2 №20.1 от 23.11.2020г. на сумму 444 600 руб., КС-2 №20.2 от 23.11.2020г. на сумму 473 070.00 руб., КС-2 №21 от 30.11.2020г. на сумму 717 562.50 руб., КС-2 №22.1 от 12.01.2021г. на сумму 42 600 руб., КС-2 №22.2 от 12.01.2021г. на сумму 179 920.00 руб., КС-2 №23 от 29.01.2021г. на сумму 762 333  руб., КС-2 №24 от 29.01.2021г. на сумму 653 253 руб.,  КС-2 №25.1 от 04.02.2021 г. на сумму 40 200 руб., КС-2 №25.2 от 04.02.2021г. на сумму 560 950  руб.,  КС-2 №26 от 15.02.2021г. на сумму 427 117.50 руб., КС-2 №27 от 28.02.2021г. на сумму 814 760.50. руб., КС-2 №28 от 07.04.2021г. на сумму 623 727 руб., КС-2 №29 от 07.04.2021г. на сумму 545 173.50 руб., КС-2 №30 от 13.04.2021 г. на сумму 256 668.00 руб., КС-2 №31 от 30.04.2021г. на сумму 1 896 549.50 руб., КС-2 №32 от 30.04.2021г. на сумму 2 206 515.00 руб., КС-2 №33 от 15.05.2021г. на сумму 2 206 515 руб., КС-2 №34 от 15.05.2021г. на сумму 645 811.50 руб. (Истцом приняты, частичная оплата на сумму 553 317.71 руб., задолженность по акту - 92 493.79руб.);   КС-2 №35 от 09.07.2021г.  на сумму 2 024 037.25руб.  (Истцом приняты, нет оплаты);  КС-2 №36 от 19.07.2021г. на сумму 1 Н09 233.90 руб. (Истцом не приняты, нет оплаты);  КС-2 №37 от 30.07.2021г. на сумму 1 467 554.50 руб. (Истцом не приняты, нет оплаты).

Акты выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ №36 от 19.07.2021г. на сумму 1 809 233 руб. 90 коп. и №37 от 30.07.2021г. на сумму 1 467 554 руб. 50 коп. были вручены Генподрядчику 25.05.2022г. посредством направления их на электронную почту kychina@kamges.com; yalakov@kamges.com; fedorich@kamges.com; musina@kamges.com. вместе с тем.. по состоянию на 01.08.2022г. указанные документы Генподрядчиком не подписаны, экземпляры Подрядчика не возвращены, мотивированный отказ от их подписания Подрядчику не направлен.

Статьями 307 – 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07 ноября 2022 года по делу  №А65-11949/2022  назначена судебная  экспертиза, производство которой поручено эксперту ФИО3 ИП ФИО3

Поставить перед экспертом следующий вопрос:

1) Соответствует ли объем и качество выполненных работ по актам №№35, 36 и 37 условиям договора строительного подряда №057/224825171/19 от «30» декабря 2019г. №1 от 01.06.2018 г. («Реконструкция и техническое перевооружение механсборочного и гальванического производства двигателя РД-191») и иным нормативно – правовым актам.

2) Если да,  определить стоимость выполненных работ?

3) Если нет, определить стоимость устранения недостатков?

4) Кем выполнены спорные работы ООО «Барс» либо ООО «Торгспецсервис»?

Согласно ответу на первый вопрос, на объекте РФ, г Пермь, Свердловский район, пос. Новые Ляды, АО «Протон-Пермские моторы» «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» Корпус механосборочного и гальванического производства (сооружение 82) виды и объемы работ отражённые в акте № 35 от 09.07.2021 г. фактически выполненным соответствуют.

Выявлено расхождение по объему отраженной в акте о приемке выполненных работ № 36 от 19.07.2021 г. и фактически выполненной работы по облицовке плиткой полов в осях Н-Я/45-47 на отм. +6.600 количестве 452,82 кв.м.

Виды и объемы работ отражённые в акте № 37 от 30.07.2021 г. фактически выполненным на объекте соответствуют.

Согласно ответу на второй вопрос, по исследованному объему стоимость фактически выполненных работ рассчитанная по согласованным расценкам на работы и материалы составила 4 493 491,45 (Четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи четыреста девяносто один) рубль 45 копеек.

Согласно ответу на третий вопрос, в связи с тем, что на объекте РФ, г Пермь, Свердловский район, пос Новые Ляды, АО «Протон-Пермские моторы» «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» Корпус механосборочного и гальванического производства (сооружение 82) отступлений от нормативных требований по качеству работ черновой отделки пола на отм +6.500 в осях Г-Я/45-47; в осях П-Ф/1-3; в осях А-Б/5-9; в осях Я-Э/21-23; в осях Н-У/21-23; в осях А-Б/19-24 и финишной отделки пола на отм+6.500 в осях А-Б/5-9; в осях Н-Р/21-23; в осях А-Б/19-23 не выявлено, стоимость устранения недостатков не рассчитывалась.

Согласно ответу на четвертый вопрос, в основу суждения об исполнителе работ положена представленная в материалы Арбитражного дела и дополнительно по запросу эксперта Исполнительная документация.

По полному комплекту документов можно сделать вывод, что работы отраженные в акте № 35 от 09.07.2021 г. выполнил ООО «БАРС» в полном объеме.

По полному комплекту документов двух Подрядчиков можно сделать вывод, что позиции 1 и 4 акта о приемке выполненных работ № 36 от 19.07.2021 года выполнялись ООО «БАРС», а позиции 2 и 3 акта выполнялись ООО «ТоргСпецСервис».

По полному комплекту документов двух Подрядчиков можно сделать вывод, что позиции 3-16 акта о приемке выполненных работ № 37 от 30.07.2021 года выполнялись ООО «БАРС», а позиции 1 и 2 акта выполнялись ООО «ТоргСпецСервис».   

По исследованному объему стоимость работ выполненных ООО «БАРС» рассчитанная по согласованным расценкам на работы и материалы составила 3 506 199,80 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 80 коп.

Истцом по встречному исковому заявлению по результатам судебной экспертизы заявлено об уменьшении исковых требований: 92 493.79 руб. задолженность по акту №34 от 15.05.2021г. + 3 506199.80 задолженность по актам №35 от 09.07.2021г., №36 от 19.07.2021г, №37 от 30.07.2021г., установленная судебной строительно-технической экспертизой.

Экспертом представлены пояснения на вопросы истца по представленному экспертному заключению, на стр. 16-17 Заключения указано:

По работам отраженным в этом акте у ООО «ТоргСпецСервис» имеются подписанные сторонами:

Акт освидетельствования скрытых работ № 4 от 10.11.2021 г. об устройстве полов из керамической плитки в осях 2-3/П-Ю; 45-47/Г-Ж; 45-47/Н-С; 45-47/Ю-Я на отм +6.600

Акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 26.08.2021 г. об устройстве полов из керамической плитки в осях 1-3/П-Ф; 21-23/Н-У; 21-23/Э-Я на отм + 6.600

Следовательно можно сделать вывод, что позиции 1 и 4 акта о приемке выполненных работ № 36 от 19.07.2021 года выполнялись ООО «БАРС», а позиции 2 и 3 акта выполнялись ООО «ТоргСпецСервис».

На чем строит суждения истец считая, что данные объемы работ отнесены на ООО «БАРС» усыновить не представляется возможном.

По работам, отраженным в этом акте у ООО «ТоргСпецСервис» имеются пописанные сторонами-            Акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 28.07.2021 г. об устройстве 

Армирования из сетки в осях 1-3/С-Ф на отм +6.500 и устройстве стяжки цементно-песчаной в осях 1-3/С-Ф на отм + 6.500

- Акт освидетельствования скрытых работ № 1-2 от 09.08.2021 г. об устройстве армирования из сетки в осях 1-3/П-С на отм +6.500 и устройстве стяжки цементно-песчаной в осях 1-3/П-С на отм + 6.500

Акты сопровождаются исполнительными схемами.

Следовательно можно сделать вывод, что позиции 3-16 акта о приемке выполненных работ № 37 от 30.07.2021 года выполнялись ООО «Барс», а позиции 1 и 2 акта выполнялись ООО «ТоргСпецСервис» .

На чем строит суждения истец считая, что данные объемы работ отнесены на ООО «БАРС» усыновить не представляется возможном.

По всем представленным ООО «ТоргСпецСервис» Актам освидетельствования скрытых работ объемы из актов выполненных работ ООО «БАРС» исключены.

Расчет стоимости работ ООО «БАРС» принят только по представленной ООО «БАРС» Исполнительной документации. В этом можно убедиться ознакомившись с содержанием расчетных таблиц Заключения при ответе на 4 вопрос суда.

Судом  исследовано  заключение судебной экспертизы.  

Арбитражный суд приходит к выводу, что выводы эксперта являются обоснованными и подтвержденными документально, а экспертное заключение с точки зрения полноты и обоснованности - соответствующим требованиям ст. 82 АПК РФ. При этом в заключении отражены содержание и результаты исследований с указанием примененных методов и нормативных актов, оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование.

 Оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе заключение судебной экспертизы, суд приходит к выводу, что заключение судебной экспертизы не содержит каких-либо противоречий, сомнений в его достоверности у суда не возникло, экспертиза проведена с предупрежденным экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в силу чего данное заключение признается судом надлежащим доказательством по делу.

Учитывая изложенное, требование истца по встречному иску о взыскании 3 598 693 руб. 59 коп. долга является правомерным и подлежит удовлетворению судом. 

Истцом по первоначальному иску заявлено требование о взыскании с ответчика 8 206 918 руб. 99 коп. за нарушение сроков.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Основанием для применения неустойки является факт нарушения обязательства.

При этом, как разъяснено в п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация  при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст.2, п. 1 ст. 6, п.1 ст. 333 ГК РФ).

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки  ввиду ее несоразмерности.

В соответствии с п. 73 Постановления Пленума  ВС РФ от 24.03.2016г. №7 «О применении судами  некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. №17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ», критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др. 

Предусмотренная договором неустойка  является высокой.

С учетом изложенного, требование истца по первоначальному о взыскании  неустойки согласно ст. 330 ГК РФ является правомерным. Однако, учитывая ее явную несоразмерность последствиям нарушения обязательства, ходатайство ответчиков о ее снижении, высокую ставку  начисления пени суд, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, уменьшает размер неустойки  до 1 500 000 руб.

Такой размер ответственности является адекватным по отношению к последствиям нарушения ответчиком неденежного обязательства и обеспечивает сохранение баланса интересов сторон. 

Расходы по судебной экспертизе согласно ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика по встречному иску.

Согласно частям 1, 2 ст.  109 АПК РФ, денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда по выполнении ими своих обязанностей.

Согласно частям 1, 2 ст.  109 АПК РФ, денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда по выполнении ими своих обязанностей.

Поскольку экспертным учреждением ИП ФИО3 подготовлено и представлено суду экспертное заключение, арбитражный суд полагает обоснованной выплату экспертному учреждению на основании счета № 9 от 26.01.2023г. денежную сумму в размере 320 000 руб., перечисленную на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан  ООО "Автобат" за ООО "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по  платежному поручению № 823 от 13.09.2022г., №1018 от 10.10.2022г., №1149 от 28.10.2022г. 

Расходы по госпошлине по первоначальному иску согласно ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика по первоначальному иску.

Расходы по госпошлине по встречному иску согласно ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика по встречному иску.

 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства о привлечении Прокуратуры отказать. 

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Публичного  акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 500 000 руб. неустойки.

В остальной части первоначального иска отказать.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с Публичного  акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 3 598 693 руб. 59 коп. долга, 320 000 руб. расходов по судебной экспертизе.

В результате зачета взысканных денежных средств взыскать с Публичного  акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 418 693  руб. 59 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета 64 035 руб. госпошлины.

Взыскать с   Публичного  акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета 40 993 руб. госпошлины.  

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан  ИП ФИО3  на основании счета № 9 от 26.01.2023г. денежную сумму в размере 320 000 руб., перечисленную на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан  ООО "Автобат" за ООО "Барс", Новошешминский район, с.Простые Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по  платежному поручению № 823 от 13.09.2022г., №1018 от 10.10.2022г., №1149 от 28.10.2022г. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Председательствующий судья                                                                        Ю.Н. Галеева