АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

16 марта 2020 года

Дело № А33-1179/2020

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования администрации города Сосновоборска удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектура Профиль» в пользу администрации города Сосновоборска 105 920,09 руб. долга, в том числе:

20 559,61 руб. пени за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту от 26.11.2018 № 0119300024618000063.2018.553949, исходя из следующего расчета: 1) 1 481 181,82 руб. (цена контракта) х 7,75% (ключевая ставка, действующая на дату сдачи работ заказчику) х 1/300 х 31 (количество дней просрочки за период с 15.12.2018 по 14.01.2019) = 11 861,80 руб.; 2) 801 641,02 руб. (1 481 181,82 (цена контракта) – 964 626 (стоимость фактически выполненных работ) – 285 085,20 (стоимость устранения недостатков)) х 7,75% (ключевая ставка, действующая на дату расторжения контракта) х 1/300 х 42 (количество дней просрочки за период с 15.01.2019 по 25.02.2019) = 8 697,81 руб.;

44 435,45 руб. штрафа за выполнение работы ненадлежащего качества; 

40 925,03 руб. убытков за проведение экспертизы.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектура Профиль» в доход федерального бюджета 4 112,68 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее  решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. 

Судья

Е.Р. Смольникова