1 5 

045/2018-78599(1) 

 н о 

 я 

 б р 

Арбитражный суд Рязанской области я 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; 

2 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 

0 

Именем Российской Федерации 

1 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 8 

г. Рязань Дело № А54-2553/2017 г 15 ноября 2018 года о  д 

а 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 ноября 2018 года.  

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Афанасьевой И.В.,  руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального ко- декса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Фасады города"  (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) безвозмездно устранить недостатки выполненных  работ по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу:  Рязанская область. г. Сасово, мкр. Северный, д.32 по договору № 120518 от 17 мая  2012 года и договору подряда № б/н от 17 сентября 2012 года, выполнив в соответ- ствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ  указанные в приложении № 1 (локальном сметном расчете) к заключению эксперта  от 11.08.2017г. работы в 30-ти дневный срок с момента вступления решения суда в  законную силу, а именно:  

- разборку деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков  с прозорами, 690 м.кв. кровли;  

- разборку деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и  подкосами, из досок 690 м.кв. кровли;  

- демонтаж рулонной кровли 690 м.кв. кровли; - демонтаж стяжки 690 м.кв. стяжки; - демонтаж утеплителя из керамзита 8,2 м.куб. изоляции; 

- кладку из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте эта- жа, до 4, МВ объеме 7,72 м.куб. кладки;  

- устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 690 м.кв. стяжки; 

- устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 690 м.кв.  стяжки;  

- огрунтовку оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кро- вельный ковер готовой эмульсией битумной 690 м.кв. кровли;  

- установку стропил в объеме древесины в конструкции 46,82 м.куб.;  

- устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков на площади 756  м.кв.;  

- монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте  

здания до 25 м. 756 м.кв. покрытия; - устройство 4 слуховых окон; 

- устройство карнизов 112,8 м.кв. стен, фронтонов (за вычетом проемов) и  

развернутых поверхностей карнизов; 

- устройство мелких покрытий (свесов) с использованием наружной цемент- 

ной плиты "Аквапанель" по деревянному каркасу 33 м.кв. облицовки; 

- герметизацию противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов,  

фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 длиной 134 метра;  

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"  

любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечи- 

вания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 на площади 1795  

м.кв. обрабатываемой поверхности; - монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля длиной 1202 метра; 

- монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при  

высоте здания до 30 м на площади 356.8 м.кв.; 

- изоляцию покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых  

материалов насухо объемом 36,89 м.куб.; - ограждение кровель перилами длиной 129 метров; - очистку участка от мусора на площади 530 м.кв.; - очистку помещений от строительного мусора весом 260 тонн; - затаривание строительного мусора весом 9,9 тонн в мешки. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фасады города"  (ОГРН 

<

***>; г. Рязань) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное управление" (ОГРН 

<

***>, Рязанская  область, г. Сасово) расходы по оплате услуг представителя в сумме 30 000 руб., расходы за проведение исследования по качеству выполненных работ в сумме 15 000  руб., расходы по оплате судебной экспертизы в размере 60 000 руб., судебные расходы по госпошлине в сумме 6 000 руб.  

Решение

 может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сро- ки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.В. Афанасьева