ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-44804/2020-63-326

г. Москва

21 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 21 июля 2020 года

Арбитражный суд  г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "АЛЬТЭКСАЛЮМИНИЙ", 143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2009, ИНН: 

<

***>

к АО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 1", 123007, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ХОРОШЁВСКИЙ 3-Й, ДОМ 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 51, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 

<

***>

о взыскании задолженности в размере 1 458 292 руб. 99 коп.

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 17.02.2020 №1, 

от ответчика – ФИО3 по дов. от 10.02.2020г. №11; 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "АЛЬТЭКСАЛЮМИНИЙ", 143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2009, ИНН: 

<

***> обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 1", 123007, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ХОРОШЁВСКИЙ 3-Й, ДОМ 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 51, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 

<

***> о взыскании задолженности в размере 1 458 292 руб. 99 коп.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 09.01.2018 между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор субподряда №1/18.

В соответствии с п. 2.1 договора, подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства собственными силами выполнить работы на объекте в сроки, установленные дополнительными соглашениями к договору и сдать результат работ подрядчику в порядке, установленном договором и дополнительными соглашениями к нему. Субподрядчик вправе привлечь к выполнению своих обязательств по договору других лиц (субподрядчиков) только с предварительного письменного согласия подрядчика.

Согласно п. 2.3 договора, адреса объектов, в которых будут выполняться работы, объем, перечень, цена и сроки выполнения работ, определяются сторонами в дополнительных соглашениях, составленных по согласованной сторонами форме (приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п. 3.1 договора, стоимость выполняемых работ устанавливается в дополнительных соглашениях к договору.

Согласно п. 4.1 договора, сроки выполнения работ на конкретном объекте (начало, окончание работ, промежуточные сроки) согласуются сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.3 договора).

09 января 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж навесных козырьков на вантах со стеклом на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 6Б. Срок выполнения работ: начало работ 03 сентября 2018 года, окончание работ 30 октября 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 составляет 1 247 800 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 873 460 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями

05 февраля 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 2 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж фасада и витражного остекления на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 2. Срок выполнения работ: начало работ 26 февраля 2018 года, окончание работ 31 августа 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 2 составляет 13 482 002 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 12 900 000 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

21 марта 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 3 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка и монтаж внутренних дверных блоков в теплом алюминиевом профиле с полимерным покрытием RAL 7016. Заполнение стеклопакет триплекс. Ручка алюминиевая окрашенная "Скоба" на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 2. Срок выполнения работ: начало работ 21 марта 2018 года, окончание работ 31 августа 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3 составляет 2 175 436 руб. 16 коп. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 813 000 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

02 апреля 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 4 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж навесных козырьков на вантах со стеклом на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 2. Срок выполнения работ: начало работ 02 апреля 2018 года, окончание работ 31 декабря 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 4 составляет 801 102 руб. 85 коп. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 500 000 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

29 мая 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 5 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж тамбуров с остеклением в теплом алюминиевом профиле с полимерным покрытием RAL 7016 на металлическом каркасе на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 2. Срок выполнения работ: начало работ 29 мая 2018 года, окончание работ 30 сентября 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 5 составляет 818 907 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 818 907 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

18 июня 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 6 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж остекления первого этажа в теплом алюминиевом профиле с полимерным покрытием RAL 7016 на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 3. Срок выполнения работ: начало работ 18 июня 2018 года, окончание работ 25 февраля 2019 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 6 составляет 14 229 936 руб. 47 коп. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 14 093 027 руб. 28 коп. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

18 июня 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 7 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж навесных козырьков на вантах со стеклом на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 6Б-4 (2 секции). Срок выполнения работ: начало работ 03 сентября 2018 года, окончание работ 30 октября 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 7 составляет 581 400 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 406 980 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

24 июля 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 8 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж навесных козырьков на вантах со стеклом на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 3. Срок выполнения работ: начало работ 03 сентября 2018 года, окончание работ 30 октября 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 8 составляет 1 106 400 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 774 480 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

14 августа 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 9 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж навесных козырьков на вантах со стеклом на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 6А, г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 7, г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 8, г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 10. Срок выполнения работ: начало работ 14 августа 2018 года, окончание работ 31 декабря 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 9 составляет 2 037 495 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 1 537 500 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

14 августа 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 10 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж навесных козырьков на вантах со стеклом на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв. 17, корп. 9. Срок выполнения работ: начало работ 14 августа 2018 года, окончание работ 31 января 2019 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 10 составляет 208 719 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 157 500 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

24 сентября 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 11 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: разработка технической документации, изготовление, комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж тамбуров с остеклением в теплом алюминиевом профиле с полимерным покрытием RAL 7016 на металлическом подкаркасе и монтаж ограждений из нержавеющей стали AISI-304 на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 3. Срок выполнения работ: начало работ 24 сентября 2018 года, окончание работ 31 декабря 2018 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 11 составляет 781 800 руб. Ответчик должен перечислить авансовый платеж в размере 547 260 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

17 декабря 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 12 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашенияпредметом являются виды работ: демонтаж и монтаж алюминиевых витражныхконструкций на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп.3, секции № 2, 4, 5. Срок выполнения работ: начало работ 17 декабря 2018 года, окончание работ 28 февраля 2019 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению №12 составляет 151 590 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

17 декабря 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 13 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: монтаж и регулировка дверных доводчиков в алюминиевом корпусе на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 3. Срок выполнения работ: начало работ 17 декабря 2018 года, окончание работ 28 февраля 2019 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 13 составляет 57 168 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

17 декабря 2018 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 14 к указанному договору. Согласно дополнительного соглашения предметом являются виды работ: комплексная поставка (включая крепеж) и монтаж водосточной системы на кровле тамбуров, ограждений из нержавеющей стали AISI-304 внутри тамбуров на объекте АО "ДСК-1". Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Южное, ул. Генерала Белова, вл. 28, корп. 2. Срок выполнения работ: начало работ 17 декабря 2018 года, окончание работ 28 февраля 2019 года. Стоимость работ по дополнительному соглашению № 14 составляет 103 642 руб. Данный факт подтверждается копией дополнительного соглашения с приложениями.

Как указывает истец, за период действия договора истцом были выполнены и сданы ответчику работы по каждому дополнительному соглашению (ДС) на общую сумму 36 124 836 руб. 59 коп., что подтверждается копиями актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанными сторонами без разногласий.

Во исполнение своих обязательств по оплате, ответчик, перечислил денежные средства в размере 36 005 539 руб. 23 коп., что подтверждается представленными в материалы дела, платежными поручениями. 

Истец указывает, что при сопоставлении актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 с оплатой по платежным поручениям выявлено, что по некоторым дополнительным соглашениям к спорному договору оплата производилась в полном объеме, а по некоторым частично. Сумма оплаты по договору без определения наименований дополнительных соглашений или ссылок на акты КС-2 и справки КС-3 составляет 25 980 419 руб. 95 коп.

Исходя из фактических обстоятельств по оплате выполненных работ, истец относит оплату за выполненные работы без определения наименований дополнительных соглашений или ссылок на акты КС-2 и справки КС-3 в целом по договору накопительным итогом.

Вместе с тем, в рамках дополнительного соглашения № 2 истцом были выполнены работы на сумму 1 339 049 руб. 63 коп., что подтверждается копией акта о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 30.09.2018 года и копией справки о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2018 года. Указанные документы направлялись в адрес ответчика 16.05.2019 года письмом исх. № 1605, которое получено ответчиком 05.06.2019 года. Однако, до настоящего времени ответа на данное обращение либо оплаты по указанному акту КС-2 и справке КС-3 в адрес истца не поступило.

В связи с чем, истец считает работы выполненными и принятыми, ответчиком без замечаний, на сумму 1 339 049 руб. 63 коп. 

Истец указывает, что таким образом, задолженность ответчика по оплате выполненных работ по договору № 1/18 от 09 января 2018 года составляет: сумма по актам КС-2 и справкам КС-3 в размере 36 124 836 руб. 59 коп. + сумма по акту КС-2 №3 от 30.09.2019 года в размере 1 339 049 руб. 63 коп. - сумма по платежным поручениям в размере 36 005 593 руб. 23 коп. = 1 458 292 руб. 99 коп.

22 января 2020 года в адрес ответчика направлена претензия с требованием об оплате выполненных работ по договору, которая оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии  с п.1. ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно положениям статьи 753 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

 При рассмотрении спора по настоящему делу, суд руководствуется ст. 421 ГК РФ, из которой следует, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422), и ст. 431 ГК РФ, согласно которой  при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Факт выполнения работ на сумму 1 458 292 руб. 99 коп., подтвержден актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, направленными ответчику в порядке, предусмотренном договором для сдачи-приемки работ. 

Результат работ предъявлен к сдаче, мотивированного отказа от подписания актов о приемке выполненных работ ответчик не заявил.

Доводы ответчика в части гарантийного удержания, изложенные в отзыве на исковое заявление, признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что ответчик мотивированного отказа от приемки работ не заявил, при том, что истец исполнил обязательства по выполнению работ на сумму 1 458 292 руб. 99 коп., суд приходит к выводу о том, что указанные работы выполнены истцом и подлежат оплате.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные ООО "АЛЬТЭКСАЛЮМИНИЙ", 143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2009, ИНН: 

<

***> к АО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 1", 123007, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ХОРОШЁВСКИЙ 3-Й, ДОМ 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 51, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 

<

***>.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая ст.ст. 8, 12, 307-310, 330, 333, 421, 431, 702, 711, 720, 753  ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 1", 123007, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ХОРОШЁВСКИЙ 3-Й, ДОМ 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 51, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 

<

***> в пользу ООО "АЛЬТЭКСАЛЮМИНИЙ", 143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2009, ИНН: 

<

***> сумму задолженности в размере 1458292 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч двести девяносто два) руб. 99 коп.

Взыскать с АО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 1", 123007, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ХОРОШЁВСКИЙ 3-Й, ДОМ 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 51, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в размере 27583 (двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

СУДЬЯ                       Э.Б. Ликшиков