именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

10. 08. 2017 года.                                             Дело № А40-99027/17-151-901

Резолютивная часть решения объявлена 08. 08. 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 10. 08. 2017 года.

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе председательствующего Чекмарёва Г.С., единолично, 

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Коробков К.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело № А40-99027/17

по иску ООО "СТАР-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>)

к АО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М.Н." (ИНН 

<

***>)

о взыскании 492 657,12 руб. – оплаты выполненных работ, 49 632, 86 руб. – гарантийного удержания, 54 228,98 руб. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, дов. от 12.01.2017 г.;

от ответчика – не явился, извещен.

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 492 657,12 руб. – оплаты выполненных работ, 49 632, 86 руб. – гарантийного удержания, 54 228,98 руб. – неустойки на основании статей 307, 309, 310, 740, 746, 753 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, о времени месте проведения судебного заседания извещен в установленном порядке.

Отзыв на иск не поступал.

Поскольку лица, участвующие в деле, заявили об отсутствии других доказательств, заявлений и ходатайств, и не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, руководствуясь ст. 136, ч. 4 ст. 137 АПК РФ, суд определил: завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Дело рассмотрено по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствие возражений ответчика и представителя ответчика.

20.11.2015 года между АО «Энергострой - М.Н.» (Генподрядчик) и ООО «Стар-Строй» (Субподрядчик) был заключен договор №ЭС-15/403с.

В соответствии  с п. 2.1 Договора Генподрядчик  поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы и передать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик - принять результат выполненных Субподрядчиком в полном объеме работ и оплатить обусловленную Договором цену.

Цена Договора является твердой и составляет 992 657 руб. 39 коп.

Согласно условиям Договора, стоимость подтверждается Актами сдачи-приемки работ по форме КС-2. Стоимость материалов, учтенных в сметной документации по цене поставщика (или по расценке, но применительно), принимается к оплате в актах формы КС-2 и КС-3 по документам, подтверждающим их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, при необходимости накладная).

Пунктом 4.1. Договора предусмотрено, что оплата работ производится Генподрядчиком в следующем порядке:

-Генподрядчик перечисляет на расчетный счет Субподряд аванс в размере не более 50%;

-погашение аванса производится путем целевого расходования сумм авансовых платежей пропорционально стоимости выполненных и принятых работ по актам, подтверждающим приемку работ по Договору;

- оплата выполненных Субподрядчиком работ по Договору в размере 45 % от стоимости выполненных и принятых по Актам о приемке выполненных работ (КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и подписанного Генеральным подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 10 рабочих дней, следующих за датой получения Генеральным подрядчиком исполнительной документации.

Истец обязательства по Договору выполнил надлежащим образом и в полном объеме, о чем свидетельствует подписанный 14.12.2015 года Акт выполненных работ по Договору №ЭС-15/403с от 20.11.2015 года. 

В соответствии с указанным Актом, работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с требованиями и заданиями Генподрядчика. Претензий к Субподрядчику нет. 

В соответствии с пунктами 4.6.- 4.8. Договора, в целях обеспечения и выполнения Субподрядчиком мероприятий по качеству, срокам работ, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 5% от цены Договора. Гарантийный резерв удерживается Генподрядчиком в размере 5% от стоимости выполненных и принятых по актам о приемке выполненных работ (КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ (КС-3). Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется в размере 5% от пены Договора в течение 30 календарных дней с момента подписания Генподрядчиком и Субподрядчиком Акта об окончании всех работ по Договору. 

Акт подписан 14.12.2015 года, значит, Гарантийный резерв в размере 49 632 руб. 86 коп. подлежал оплате до 25.01.2016 года.

До настоящего времени АО «Энергострой-М.Н.» свои обязательства по оплате не исполнило, доказательств обратного суду не представило.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании оплаты выполненных работ в сумме 492 657,12 руб. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Также подлежит удовлетворению и требование истца о взыскании 49 632, 86 руб. – гарантийного удержания

Пунктом 24.11. Договора установлено, что в случае если Генподрядчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 20 календарных дней, при условии выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Субподрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 54 228,98 руб. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом, не оспоренным и не опровергнутым ответчиком.

Расходы  по уплате  госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст.ст. 110,112 АПК РФ.

Поскольку при принятии искового заявления к производству, истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, согласно п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статьями  4, 41, 65, 66, 70, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с АО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М.Н." (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "СТАР-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>) 492 657,12 руб. – оплаты выполненных работ, 49 632, 86 руб. – гарантийного удержания, 54 228,98 руб. – неустойки.

Взыскать с АО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М.Н." (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину по иску в сумме 14 930, 38 руб. 

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                              Г.С. Чекмарёв