АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-18213/2018

г. Уфа

04 октября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2018 года

Полный текст решения изготовлен 04 октября 2018 года

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Байковой А.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по иску

 

общества с ограниченной ответственностью "ХОЛЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к акционерному обществу "Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 946 758 руб. 21 коп.

 

при участии:

от  истца – ФИО2  по доверенности от 02.06.2018 г., ФИО3 по доверенности от 18.05.2018 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛЛ"   (далее – истец, ООО «ХОЛЛ») обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан  с иском к акционерному обществу "Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее – ответчик, АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан») о взыскании 2556923 руб. долга по договорам подряда, 389854 руб. 54 коп. процентов  за пользование  чужими  денежными  средствами и проценты до   момента фактической уплаты основного долга.

Заявлением от 27.09.2018г., принятым судом в порядке ст. 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования в части процентов за пользование чужими денежными средствами, просил взыскать в сумме 458 609 руб. за период с 03.11.2016г. по 27.09.2018г. и проценты до   момента фактической уплаты основного долга.

Ответчик отзыв не представил, к моменту проведения судебного заседания от ответчика по электронной почте поступило ходатайство об отложении судебного заседания. 

Истец возразил против удовлетворения ходатайства, поскольку считает, что ответчик злоупотребляет своими процессуальным правами, причины для отложения приведены неуважительные.

Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания по основаниям, указанным ответчиком, поскольку частями  3, 4 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено право, а не обязанность суда по отложению судебного заседания  по ходатайству участвующего в деле лица.  Приведенное  представителем   ответчика обстоятельство  основанием для применения ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является. Невозможность участия в судебном заседании  не служит   препятствием к реализации   ответчиком  его процессуальных прав;  при   неявке   в судебное заседание  он  не лишен возможности представлять доказательства, подтверждающие свои возражения, а также письменные пояснения в обоснование своих доводов. 

Исследовав представленные доказательства, суд

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из материалов дела, между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №12 от 15.06.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №12 по улице Мубарякова (подъезд 2,3), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 340324,73 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.06.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 29.06.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 340324,73 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 340324,73 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.07.2017 по 26.09.2018 в сумме 3452 руб. 48 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №13 от 01.06.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №8/9 по улице Кавказская (кв.16), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 23626,13 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.06.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 29.06.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 23626,13 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 23626,13 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 30.06.2017 по 28.09.2018 в сумме 2164 руб. 91коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №14 от 15.06.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №23/1 по улице С.Перовской (подъезд 2), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 310415 руб. 28 коп.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.06.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 29.06.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 310415 руб. 28 коп

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 310415 руб. 28 коп, в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2017 по 30.08.2018 в сумме 3687 руб. 99 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №16 от 15.06.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/4 по улице Авроры, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 137969,93 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.06.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 29.06.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 137969,93 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 137969,93 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.07.2017 по 26.10.2018 в сумме 2877руб. 26 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №31 от 01.07.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5 по улице Авроры (подъезд 2), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 140945,58 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.06.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 03.07.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 140945,58 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 140945,58 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.07.2017 по 27.11.2018 в сумме 4076руб. 89 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №29 от 01.07.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/1а по улице Авроры, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 339284,02 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 31.08.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 10.07.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 339284,02 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 339284,02 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.07.2017 по 27.09.2018 в сумме 23 349 руб. 35 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №30 от 01.07.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/1б по улице Авроры, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 262859,08 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 31.08.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 10.07.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму 262859,08 руб..

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 262859,08 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.07.2017 по 27.09.2018 в сумме 23345 руб. 17 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №43 от 21.08.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №23 по улице Софьи Перовской, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 404071,4 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.09.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 21.08.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  404071,4 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 404071,4 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.09.2017 по 27.09.2018 в сумме 31573 руб. 69 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №44 от 21.08.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №27 по улице Софьи Перовской, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 305489,57 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.09.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 31.08.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  305489,57 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 305489,57 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.09.2017 по 27.09.2018 в сумме 23870 руб. 62 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №77/4 от 21.08.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №12/2 по улице Мубарякова, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 369725,19 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 01.10.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  369725,19 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 369725,19 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.11.2017 по 27.09.2018 в сумме 24 496 руб. 86 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №77/2 от 05.10.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/12 по улице Авроры, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 13819,76 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 16.10.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  13819,76 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 13819,76 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.11.2017 по 27.09.2018 в сумме 915 руб. 66 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №77/1 от 21.08.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №1 по улице Муксинова (подъезды №1,2,4 частично), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 329949,79 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 01.10.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  329949,79 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 329949,79 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.11.2017 по 27.09.2018 в сумме 21595 руб. 67 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №77/3 от 01.10.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №40 по улице Октябрьской революции, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 395590,85 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 01.10.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  395590,85 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 395590,85 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.11.2017 по 27.09.2018 в сумме 21596 руб. 67 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №77/5 от 25.09.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №8 по улице Мубарякова (подъезд №1,4), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 342917,26 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 01.10.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  342917,26 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 342917,26 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.11.2017 по 27.09.2018 в сумме 22444 руб. 41коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №87/5 от 16.11.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №11/1 по улице Софьи Перовской (квартира 88), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 9288,04 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 30.11.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  9288,04 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 9288,04 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.12.2017 по 27.09.2018 в сумме 555 руб. 54 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №87/4 от 16.11.2017, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №6/10 по ул. Кавказская (квартира 36), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 27696,41 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2017г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 30.11.2017, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  27696,41 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 27696,41 руб.., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.12.2017 по 27.09.2018 в сумме 1656 руб. 59 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №131 от 14.11.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №12 по улице Мубарякова (подъезд 1,2,3), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 25763,21 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 30.11.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  25763,21 руб..

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 25763,21 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.12.2016 по 06.07.2017 в сумме 1371 руб. 89 коп.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №130 от 14.11.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №12 по улице Мубарякова (подъезд 1), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 241924,21 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 30.11.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  241924,21 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 241924,21 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.12.2016 по 28.07.2017 в сумме 13657руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №128 от 10.11.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №2/3 по улице Муксинова (подъезд 2), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 346101,25 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 31.07.2017.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 30.11.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  346101,25 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 346101,25 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.12.2016 по 06.07.2017 в сумме 17651,85 руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №127 от 10.11.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/12 по улице Авроры, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 162306,23 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 14.11.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  162306,23 руб..

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 162306,23 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.12.2016 по 01.06.2017 в сумме 7423,26 руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №70/3 от 07.09.2016г., согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №3/1 по ул. Авроры (подъезд №4), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 121462,77 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 19.09.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  121462,77 руб..

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 121462,77 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2016 по 29.03.2017 в сумме 3881,75 руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №112 от 18.10.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №2/5 по улице Мубарякова (подъезд 1), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 263195,47 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 31.10.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 21.10.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  263195,47 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 263195,47 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.11.2016 по 03.03.2017 в сумме 8773,18 руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №111 от 18.101.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/7 по улице Авроры (подъезд 2), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 137765,68 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 31.10.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 22.10.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  137765,68 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 137765,68 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.10.2016 по 31.01.2017 в сумме 3673,75 руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №110 от 18.10.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №5/4 по ул. Авроры, а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 181736,63 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 31.10.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 24.10.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  181736,63 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.10.2016 по 31.01.2017 в сумме 3350,13 руб.

 

между АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (заказчик) и ООО «ХОЛЛ» (подрядчик) был заключен договор подряда №129 от 01.07.2016, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту кровли жилого дома №11 по улице Муксинова (подъезд №3), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно п.2.1 договора цена договора составила 178801,79 руб.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 3.2 Договора: до 30.11.2016г.

Согласно п. 9.1 договора сдача выполненных работ происходит ежемесячно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В соответствии с п.11.1 оплата выполненных работ производится после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления средств и с учетом индекса изменения сметной стоимости действующего на момент выполнения работ.

Сторонами к указанному договору подписаны Акт по форме КС-2 от 14.07.2016, справка по форме КС-3, согласно которым работы выполнены на сумму  178801,79 руб.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, по расчёту истца за ответчиком числится задолженность 178801,79 руб., в связи с неоплатой на которую начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2016 по 23.05.2017 в сумме 7902 ,05 руб.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в суд с рассматриваемым иском. 

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда, может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Принятие ответчиком спорных работ по актам является достаточным основанием для возникновения у ответчика обязательства по оплате выполненных работ.

Оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт выполнения работ по договору подтвержден актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), указанные документы подписаны сторонами и скреплены печатями в отсутствие замечаний, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта выполнения работ.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (пункт 1 статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Ответчик оплату выполненных работ в полном объеме не произвел, по расчету истца задолженность составила 2 556 923 руб.

В нарушение вышеуказанного, ответчик документов, подтверждающих факт исполнения обязательств перед истцом, не представил. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий. 

Поскольку доказательства оплаты фактически выполненного объема работ ответчик не представил, исковые требования о взыскании долга являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленных на основании ст. 395 ГК РФ.

Согласно положениям ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

На основании изложенных правовых норм, учитывая, что ответчиком не были исполнены обязательства по своевременной оплате выполненных работ, суд приходит к выводу об обоснованности требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истцом проценты за пользование чужими денежными средствами начислены за период с 03.11.2016г. по 27.09.2018г. в общей сумме 458 609 руб.

Представленные в материалы дела расчеты процентов проверены судом, установлено их соответствие периоду просрочки, сумме долга и установленному законом порядку начисления. Ответчик контррасчет не представил.

Возражений относительно периода начисления процентов и арифметического расчета суммы процентов ответчиком не представлено.

Доказательств того, что начисленная сумма процентов за пользование чужими денежными средствами несоразмерна последствиям просрочки оплаты основного обязательства, ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Исходя из изложенного, требование истца о взыскании процентов подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 395 ГК РФ, а также правоприменительному подходу отраженному в пункте 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" истец вправе требовать взыскания процентов по день фактической уплаты должником основного долга. Суд, в резолютивной части такого решения, указывает сумму взыскиваемых процентов, а также указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства.

Таким образом, проценты подлежат дальнейшему начислению на сумму основного долга (с учетом указанной статьи 103 АПК РФ) с 04.07.2018 до дня фактической уплаты денежных средств по ключевой ставке ЦБ РФ, за каждый день просрочки.

Истец также просит взыскать с ответчика судебные расходы по оплате юридических услуг в сумме 10000 руб., в обоснование представил договор оказания юридических услуг от 18.05.2018г., акт приема-передачи денежных средств от 18.05.2018г. на сумму 10000 руб.

К судебным издержкам относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебные издержки возникают в сфере процессуальных отношений и должны быть реально понесены стороной для восстановления нарушенного права в судебном порядке.

Взысканию с другой стороны подлежат только те расходы, которые относятся к категории судебных издержек и непосредственно связаны с судебной защитой в конкретном деле. Также при взыскании судебных расходов следует принимать во внимание обстоятельства, свидетельствующие о том, что расходы стороны вызваны объективной необходимостью по защите нарушенного права, при этом для решения вопроса о размере взыскиваемых расходов на представителя необходимо исследовать представленные документы, подтверждающие как факт оказания услуг, так и размер понесенных стороной затрат. Право на возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя возникает при условии фактического несения стороной (доверителем) затрат, получателем которых является лицо (организация), оказывающее юридические услуги.

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, подтверждающие реальность и размер судебных издержек, должна представить сторона, требующая их возмещения.

Из представленных документов следует, что истцу оказаны услуги по подготовке и составлению искового заявления, представление интересов, истцом оплачены услуги в размере 10000 руб.

Таким образом, истец доказал факт несения судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 10000 руб., в то время как ответчик доказательств чрезмерности взыскиваемых расходов не представил.

При указанных обстоятельствах, оценив представленные документы и учитывая фактический объем оказанных истцу юридических услуг, принимая во внимание, что ответчик возражений о неразумности предъявленной к возмещению суммы не заявил, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в сумме 10000 руб.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования     удовлетворить.

Взыскать с  акционерного общества "Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ХОЛЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) долг в сумме 2556 923 руб. , проценты   за   пользование   чужими   денежными   средствами   за период с 03.11.2016г. по 27.09.2018г.  в общем размере 458 609 руб., проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами, начисленные на сумму основного долга  в   размере   2556 923 руб.,   за   период   с   28.09.2018   до   момента фактической уплаты основного долга, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 38078 руб., расходы по оплате юридических услуг в сумме 10000 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ХОЛЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 871 руб., уплаченную по чек-ордеру от 27.06.2018г.  

            Исполнительные листы  выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                   Байкова А.А.