93/2017-72763(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-4663/2017

г. Чебоксары

27 июля 2017 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи  Данилова А.Р.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

администрации Ибресинского района Чувашской Республики,  (

<

...>, ОГРН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Санар-Строй»,  (

<

...>, ОГРН 

<

***>),  

о понуждении выполнить строительные работы и взыскании 25392 руб. 51 коп.,  при участии  

представителя истца ФИО2 на основании доверенности от 06.06.2017   № 1625,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» в  течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу выполнить  следующие работы:  

1) по разделу кровля: 

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс»  любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для  обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 в  количестве 881 кв.м.;  

- антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины в количестве  182,367 кг;  

2) по разделу двери:  

- замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом в количестве  

15 компл.; 3) по разделу внутренняя отделка: 

- оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и  

средней плотности в количестве 1436,2 кв.м.; - обои виниловые моющиеся ZEN в количестве 464,317 кв.м.; 

- обои обыкновенного качества в количестве 1158,589 кв.м.;  

- окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  

по покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности  

за 2 раза - плинтусов в количестве 41,1 кв.м.; 4) по разделу полы: тип 7 

- устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в  

стыках в количестве 362,3 кв.м.; плинтуса - устройство плинтусов цементных в количестве 0,7 м.; 

- устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 134,3 м.;  - устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 587,3 м.;  5) по разделу сантехнические работы:  

оборудование 

- установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным в  

количестве 15 компл.; 

- подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм в количестве 15 шт.;  

установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в  

количестве 16 компл.; 

- смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой  

смешения с аэратором в количестве 16 компл.; 

- установка ванн купальных прямых стальных в количестве 15 компл.;  - установка смесителей в количестве 15 шт.;  

- смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком  

шланге с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом в  

количестве 15 компл.; 

- установка моек на одно отделение в количестве 15 компл.;  

- смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой  

смешения с аэратором в количестве 15 компл.; (вентиляция) 

- установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м. в  

количестве 34 решетки; - решетка АМР 150x150 (507,75/1,18x1,03/1,98=223,84) в количестве 19 шт.; - решетка АВР 250x250 (310/1,18x1,03/1,98=136,66) в количестве 15 шт.; 

- установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р),  

номер 200, размер 200x200 мм в количестве 1 решетка; 

- установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р),  

номер 150, размер 150x150 мм в количестве 2 решетки. 6) по разделу сети пожарной сигнализации: 

- извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический  

радиоизотопный световой в нормальном исполнении в количестве 53 шт.; 

- извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М) в количестве  

53 шт.; 

- прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг. по стене кирпичной 110 м.;  

- кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными  

жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической рензины в оболочке из  

ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением  

марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x1x0,5 в количестве 110 м.; 7) по разделу сети радиовещания: 

- громкоговоритель или звуковая колонка в помещении в количестве 15 шт.;  - радиоприемник Нейва РП-221 (756/11,18x1,03/8.15=80,97) в количестве  

15 шт.; 8) по разделу сети телефонизации: 

- коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой  

оболочкой в количестве 1 коробка; 

- коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 в количестве 1 шт.;  9) по разделу доступ:  

- замок кодовый (867,54/1,18x1,03/8,15=92,92) в количестве 1 шт.;  10) металлический шкаф ШМ-1:  

- изготовление металлического шкафа в количестве 0,14634 т. конструкций;  - петли накладные размером 70x55 мм в количестве 6 комплектов;  

- монтаж металлического шкафа из полосовой и тонколистовой стали в  

количестве 0,14634 т. конструкций; - конструкции стальные в количестве 0,14634 т.; - замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ в количестве 6 шт.; 

- окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в  

количестве 7,1 кв.м. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» в  

пользу администрации Ибресинского района Чувашской Республики 196783 (Сто  

девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 90 коп. пеней за период  

с 01.12.2016 по 19.05.2017. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» в  

доход федерального бюджета 12904 (Двенадцать тысяч девятьсот четыре)  

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  

суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  

кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  

Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  

арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  

арбитражного суда. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  

Чувашии. 

Судья А.Р. Данилов