ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-32571/17-96-304

г. Москва

12 мая 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 мая 2017 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12 мая 2017 года

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Гутник П.С., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по исковому заявлению Государственного казенного учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС»

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «МАНСТАР II»  

о взыскании 4 256 684 руб.

в судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 31.03.2017 

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ГКУ «УКРиС» о взыскании с ООО «МАНСТАР II» неустойки в размере 4 256 684 руб.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

В судебное заседание не явился ответчик, считается извещенным надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в порядке ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец не возражает против рассмотрения дела в отсутствие ответчика.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что между Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (Государственный заказчик) и ООО «Манстар И»  (Генподрядчик) был заключен Государственный контракт № 14Р19/0373200004215000120 от 10.08.2015г. на завершение работ по устранению дефектов и недостатков после проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Бестужевых, 

<

...> Куусинена, д. 4А, корп. 4.

В соответствии с п. 2.1. Контракта - Государственный заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по устранению дефектов и недостатков после проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по адресам, согласно Адресному перечню, включая выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу каждого Объекта по Акту о приемке законченных работ на Объекте, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Государственный заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

В соответствии с п. 2.3.1. контракта генподрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по контракту, в соответствии с действующими в российской федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

На основании п. 3.1. контракта цена контракта определяется на основании утвержденной проектно-сметной документации и согласно результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол № 2 от «29» июля 2015 г.; РНТ 0373200004215000120) составляет 7 715 130,36 руб. 

Согласно п. 7.2. контракта работы по контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на объекте(-ах) по акту о приемке законченных работ на объекте. риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит от генподрядчика к государственному заказчику только после подписания акта о приемке законченных работ на объекте. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, согласованной сторонами в графике производства работ, генподрядчик информирует государственного заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, при этом генподрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации согласно положения по организации контроля за выполнением работ на объектах.

В соответствие с п. 7.5. контракта - при завершении выполнения работ в полном объеме генподрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки письменно уведомляет государственного заказчика о необходимости проведения приемки.

02.12.2015г. ООО «Манстар II» направил ГКУ «УКРиС» уведомление о завершении работ по Контракту, и предложении назначить комиссию и направить ответственных представителей по приемке выполненных работ.

Данное уведомление получено ГКУ «УКРиС» 09.12.2015 г. и ему присвоен № у-05-5314/5.

На основании п. 7.8. Контракта основанием для формирования приемочной комиссии после завершения в полном объеме работ на объекте(-ах) является приказ государственного заказчика о создании приемочной комиссии. Приемочная комиссия создается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от генподрядчика, в соответствии с п. 7.5. контракта, письменного уведомления о готовности работ. В состав приемочной комиссии включаются представители сторон настоящего контракта, Мосжилинспекции, управы района, управляющей организации, проектной организации, эксплуатирующей организации, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием.

Истцом указано, что ГКУ «УКРиС» утверждены Приказы «О назначении Государственной комиссии по приемке выполненных работ по устранению дефектов и недостатков после проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> от 14.12.2015 г. № у-01-1182/5 Дата проведения комиссии - 14.12.2015 г.; 

<

...> от 14.12.2015 г. № у-01-1183/5 Дата проведения комиссии - 14.12.2015 г.; 

<

...> от 16.12.2015 г. № у-01-1203/5 Дата проведения комиссии - 18.12.2015 г.; 

<

...> от 16.12.2015 г. № у-01-1205/5 Дата проведения комиссии - 17.12.2015 г.

В соответствие с п. 7.9. контракта генподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения приемочной комиссии обязан передать государственному заказчику надлежащим образом оформленный акт о приемке законченных работ на объекте со всеми предусмотренными действующим законодательством приложениями в количестве 4 (четырех) экземпляров. При невыполнении данного обязательства генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями контракта.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика), определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что надлежащим образом оформленных актов о приемке законченных работ на объекте (объектах) генподрядчиком государственному заказчику не передано.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что 10.10.2016  ГКУ «УКРиС» направило факсограмму № у-18-2406/6 о вызове представителя генподрядчика 12.10.2016 г. для составления актов, фиксирующих количество дней просрочки за несвоевременное предоставление актов о приемке законченных работ на объекте (объектах) по контракту, после чего 12.10.2016  ГКУ «УКРиС» составило Акты, в которых зафиксировали количество дней просрочки за несвоевременное предоставление Актов о приемке законченных работ на Объекте (Объектах) по Контракту.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 12.3. Контракта за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании- документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Указанная неустойка (пени) начисляется за следующие нарушения по Государственному контракту.

Истцом заявлены требования по взысканию неустойки на основании п. 12.3 контракта за несвоевременное предоставление ответчиком Акта о приемке законченных работ на Объектах: по объекту 

<

...> в размере 1 073 950,35 руб., по объекту 

<

...> в размере 073 950,35 руб., по объекту 

<

...> в размере 1 056 169,71 руб., по объекту 

<

...> в размере 1 052 613,59 руб., а всего 4 256 684 руб.

Суд не может согласиться с позицией истца в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с ч. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Из представленного в материалы дела акта приемки-сдачи по спорному контракту усматривается, что стоимость выполненных работ составляет 6 529 754,70 руб., работы выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством  и в соответствии с иными нормами и требованиями государственного контракта.

Таким образом истцом не обоснован расчет требуемой ко взысканию неустойки, не представлено доказательств какие именно работы по каждому объекту не выполнены ответчиком.

Кроме того, согласно условий контракта подрядчик не может повлиять на сроки составления акта Государственной комиссии, так как данную комиссию создает не ответчик.

В соответствии с ч. 1 ст. 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что ответчик добросовестно выполнял обязательства, его вина отсутствует. Поэтому требование о взыскании неустойки является не обоснованным.

В связи с предоставлением истцу отсрочки по уплате госпошлины при обращении в суд, на основании ст. 333-22 Налогового кодекса Российской Федерации она подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 309, 310, 401, 406, 450, 702, 708, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст.ст. 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ГКУ «УКРиС» в доход федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в размере  44 283 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

  Судья                                                                                                     П.С. Гутник