Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-13898/2018 « 23 » сентября 2020 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению комитета строительства  Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании, с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью «Грат», администрации Среднеахтубинского муниципального  района Волгоградской области, государственного казенного учреждения  Волгоградской области «Управление капитального строительства»  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 15.01.2020 № 1; 

от ответчика – ФИО2, руководитель общества, лично, паспорт; ФИО3,  доверенность от 10.01.2020;  

от государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление  капитального строительства» - ФИО4, доверенность от 16.01.2020  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276389 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: 

<

...> выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата; 

- устранения промерзания и коррозийных разрушений входной двери;  - установки дополнительного кольца канализационного септика.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  3428982100, ОГРН 1023405163957) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276379 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Омская, д. 51, кв. 1 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  - утепления полов;  

- устранения промерзания и коррозийных разрушений входной двери; 

- проведения работ по заземлению системы электроснабжения (устранения  воздействия электрического тока при включении воды);  

- проведения ремонта отмостки по периметру дома. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276261 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Омская, д. 43, кв. 1 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- устранения щелей и трещин на стыках стен и полов и по наружным углам дома;  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  - проведения ремонта отмостки по периметру дома;  

- восстановления целостности облицовки из металлосайдинга над окном жилой  комнаты.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276245 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: 

<

...> выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- устранения щелей и трещин на стыках стен и полов и по наружным углам дома;  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  - ремонта кровли;  

- установки дополнительного кольца канализационного септика. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276375 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Омская, д. 45, кв. 2 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- замены оконных блоков на оконные блоки, отвечающие строительным нормам и  правилам;  

- утепления полов; - устранения протекания в системе отопления; 

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил систему  вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  

- проведения работ по заземлению системы электроснабжения (устранения  воздействия электрического тока при включении воды);  

- проведения ремонта отмостки по периметру дома; - замены перекрытия чердачного помещения и его утеплителя. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276259 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Омская, д. 45, кв. 1 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- замены оконных блоков на оконные блоки, отвечающие строительным нормам и  правилам;  

- утепления полов; 

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  - ремонта отмостки по периметру дома.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276461 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Омская, д. 33, кв. 2 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  - устранения промерзания и коррозийных разрушений входной двери;  

- утепления полов; 

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- ремонта отмостки по периметру дома. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276399 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

пер. Северный, д. 10, кв. 1 выявленные нарушения путем приведения жилого  помещения в соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания  жилые многоквартирные", а именно:  

устранения зазоров на стыках стен кухни; 

- проведения работ по заземлению системы электроснабжения (устранения  воздействия электрического тока при включении воды);  

- устранения неровностей пола и замены поврежденного линолеумного покрытия;  

- утепления пола; 

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276277 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

пер. Северный, д. 10, кв. 2 выявленные нарушения путем приведения жилого  помещения в соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания  жилые многоквартирные", а именно:  

- устранения трещины перегородки; - устранения отклонения от вертикали наружной стены; 

- заполнение полостей наружного сайдинга теплоизоляционным наполнителем;  - установки утепленной входной двери;  

- устранения неровностей пола и замены поврежденного линолеумного покрытия;  

- утепления пола; 

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276165 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Омская, д. 37, кв. 2 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276411 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

пер. Северный, д. 7, кв. 1 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения  в соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

 -устранения промерзания и коррозийных разрушений входной двери; 

- устранения затечных пятен на облицовочной панели в зоне установке входной  двери;  

- устранения отклонения от вертикали стены дома; 

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- ремонта отмостки по периметру дома. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276413 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: 

<

...> выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  

соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

устранения промерзания и коррозийных разрушений входной двери; 

- устранения затечных пятен на облицовочной панели в зоне установке входной  двери;  

- замены оконных блоков на оконные блоки, отвечающие строительным нормам и  правилам;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- ремонта отмостки по периметру дома. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276283 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: 

<

...> выявленные нарушения путем приведения жилого помещения в  соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- замены оконных блоков на оконные блоки, отвечающие требованиям  строительных норм и правила;  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  - ремонта отмостки по периметру дома.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 276423 от 02.09.2015г. за счет собственных средств в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить в жилом помещении по адресу: р.п. Средняя Ахтуба,  

пер. Северный, д. 9, кв. 2 выявленные нарушения путем приведения жилого помещения  в соответствие своду правил СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые  многоквартирные", а именно:  

- устранения причин и последствий образования грибка, плесени и конденсата;  

- устранения затечных пятен на облицовочной панели в зоне установке входной  двери;  

- ремонта отмостки по периметру дома; 

- приведения в соответствие с требованиями строительных норм и правил  системы вентиляции в указанном жилом помещении;  

- устранения последствий образования грибка и конденсата путем косметического  ремонта.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу комитета строительства Волгоградской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате  судебной экспертизы в размере 100 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Н» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину 6 000  руб.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Стрельникова Н.В.