АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года

Дело № А33-37879/2019

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 мая 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 29 мая 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петракевич Л.О., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Проектно-монтажная компания Сибири" (ИНН 2465208654, ОГРН 1082468023043, дата государственной регистрации – 06.05.2008, место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт/пом/ком 4/XXII/111)

к публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 04.07.2005, место нахождения: 660021, 

<

...>)

о взыскании задолженности в размере 47 635 042,36 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами  и пени на 22.11.2019 в размере 4 968 520,67 руб., 

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, действующего на основании доверенности от 08.04.2019 (в судебном заседании 22.05.2020), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.Д. Головастикой, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Проектно-монтажная компания Сибири" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 47 635 042,36 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на дату 22.11.2019 в размере 9 020 717,70 руб.

 Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23.12.2019 возбуждено производство по делу.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное разбирательство не явился.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в судебных заседаниях 18.05.2020 и 22.05.2020 объявлялись перерывы до 22.05.2020 (9 час. 30 мин.) и 22.05.2020 (16 час. 00 мин.) соответственно. 

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу ООО «ПМК Сибири» по договору 14.2400.9134.14 от 22.08.2014 года основной долг в размере 4 118 200,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 488 965,73 рублей; по договору 10.2400.528.15/31-15 от 29.01.2015 года основной долг в размере 1 719 635,24 рублей, проценты  за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 431 821,03 рублей; по Договору 11.2400.2331.16 от 25.03.2016 года основной долг в размере 1  274 400,00 рублей, пени за задержку расчетов в размере 63 720 рублей; по договору 14.2200.1670 от 27.04.2016 года основной долг в размере 489 800,00 рублей, пеню за задержку расчетов в размере 24 490 рублей; по договору 14.4000.157.16 от 26.05.2016 года основной долг в размере 487 508,99 рублей пеню за задержку расчетов в размере 24 375,45 рублей; по договору 18.4000.156.16 от 26.05.2016 года основной долг в размере 443 479,40 рублей, пеню задержку расчетов в размере 743,68 рублей; по договору 14.4000.189.16 от 30.06.2016 года основной долг в размере 297 657,36 рублей, пеню задержку расчетов в размере 14 882,87 рублей;  по договору 11.7500.1866.13/145-13 от 22.05.2013 года основной долг в размере 74 363,60 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 34 507,13 рублей; по договору 11.7500.1867.13/146-13 от 22.05.2013 года основной долг в размере 525 750,12 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 236 716,22 рублей; по договору 14.22.00.459.13/336-13 от 17.09.2013 года основной долг в размере 791 373,84 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 340 213,40 рублей; по договору 11.2200.024.14 от 30.12.2013 года основной долг в размере 179 352,05 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 77 022,79 рублей; по договору 11.2400.601.14/42-14 от 29.01.2014 года основной долг в размере 16 220 689,51. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 1 829 271,59 рублей; по договору 14.7500.3323.14 от 28.08.2014 года основной долг в размере 3 041 065,20 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на дату 22.11.2019 года, в размере 451 202,42 рублей; по договору 14.2400.7130.16 от 22.08.2016 года основной долг в размере 11 505,00 рублей, пеню за задержку расчетов в размере 575,25 рублей; по договору 10.2400.7269.16 от 29.08.2016 года основной долг в размере 155 990,73 руб., пеню за задержку расчетов в размере 7 799,54 руб.; по договору 14.7500.4121.16 от 21.11.2016 года основной долг в размере 17 804 271,32 руб., пеню за задержку расчетов в размере 890 213,57 руб.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшение размера исковых требований принято судом. Дело рассматривается с учётом принятых уточнений.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ПМК Сибири» (подрядчиком) и публичным акционерным обществом «МРСК Сибири» (заказчиком) заключены договора:

- от 22.08.2014 № 12.2400.9134.14 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить разработку проектно-сметной документации на строительство ПС 110 кВ Имени Сморгунова и питающей двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная – Центр С-217/С-218, и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 6.1 договора стоимость работ с НДС составляет 4 118 200 руб. 

Пунктом 7.1 договора предусмотрено, что платежи по разработке сметной документации, выплачиваются заказчиком в размере 100 % от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, что составляет 4 118 200 руб., в том числе НДС 18 % 628 200 руб., в течение 90 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ, но не ранее даты получения подрядчиком положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и предоставления его заказчику. 

В силу пункта 9.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

16.01.2018 составлены и подписаны акты № 1 сдачи – приемки выполненных работ на сумму 1 878 401,62 руб., № 2 на сумму 2 239 798,38 руб. Всего работы выполнены на сумму 4 118 200 руб.;

- от 29.01.2015 № 10.2400.528.15/31-15, в силу которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией (шифр проекта: 111-0.02-ПЗ) осуществить работы по устройству маслоприемников, маслоотводов и маслосборников на ПС 35/10 кВ № 44 «Бархатово», и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Согласно пункту 6.1 договора стоимость работ с НДС составляет 1 719 661, 20 руб. 

Расчёт за выполненные работы в размере 100% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и оборудования, что составляет 1 719 661, 20 руб., в том числе НДС 18% 262 321, 20 руб., выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (пункт 7.1 договора).

В силу пункта 16.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 91 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 18.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

25.07.2016 составлена и подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1, стоимость работ по которой определена в размере 1 719 635,24 рублей. 25.07.2016 подписаны акты о приемке выполненных работ за июль 2016 года № 1 на сумму 448 030,66 руб., № 2 на сумму 13 187,68 руб., № 3 на сумму 1 075 064,96 руб., № 4 от 25.07.2016 на сумму 89 825,14 руб., № 5 на сумму 68 139,10 руб., № 6 на сумму 25 387,70 руб.;

- от 25.03.2016 № 11.2400.2331.16 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить работы по разработке проектно-сметной документации на строительство здания базы и реконструкцию территории и ограждения базы Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала «МРСК Сибири»  «Красноярскэнерго» с проведением инженерно-геодезических изысканий, а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, оформить исходно - разрешительную документацию, правоустанавливающие документы, и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Стоимость работ по договору равна 1 274 400 руб. (пункт 6.1 договора). 

В силу п.7.1 договора: «Платежи по разработке проектно-сметной документации, выплачиваются заказчиком в размере 100% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, что составляет 1 274 400 руб., в т.ч. НДС 18% 194 400 руб., в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ, но не ранее даты получения подрядчиком положительного заключения экспертизы (при необходимости) проектно-сметной и рабочей документации и предоставления её заказчику».

В силу пункта 9.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

01.09.2017 составлен и подписан акт выполненных работ по договору, стоимость работ по акту составила 1 274 400 рублей.

- 27.04.2016 № 14.2200.1670.16 на выполнение проектных и изыскательских работ по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по устройству средств связи ПС 110 кВ Ковыльная с силовыми трансформаторами 2x16 МВА на 6 ячеек 110 кВ и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Стоимость работ по контракту равна – 489 800 руб. (пункт 6.1 договора).

Срок оплаты за выполненные этапы работ - в течение 45 календарных дней после выполнения всего комплекса работ, получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания сторонами первичных документов в соответствии с условиями договора (пункт 7.1 договора). 

В силу пункта 9.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

08.09.2016 подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат, согласно которой работы выполнены на сумму 489 800 руб., подписан акт о приемке выполненных работ № 1.

- 26.05.2016 № 14.400.157.16/137-16 на выполнение проектных и изыскательских работ, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по проектированию ВОЛС от ПС 220 кВ Власиха до ПС 110 кВ Ковыльная по ВЛ 110 кВ ВТ-111 Власиха-Топчихинская (ВЛ 110 Власиха- Топчиха ВТ-111 86.6 км, Б000045322), ВА-112 Власиха -Арбузовская (ВЛ 110 Власиха- Арбузовка ВА-112 59.2 км, Б000045319) с отпайками на ПС 110 кВ Ковыльная и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Стоимость работ по договору составляет 487 508,99 руб. (пункт 6.1 договора). 

Согласно пункту 7. 1 договора срок оплаты за выполненные этапы работ - в течение 45 календарных дней после выполнения всего комплекса работ, получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания сторонами первичных документов в соответствии с условиями договора.

В силу пункта 9.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

08.09.2016 сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ на сумму 487 508,99 руб., акт о приемке выполненных работ № 1. 

- 26.05.2016 № 18.4000.156.16/184-16 возмездного оказания услуг по условиям которого исполнитель обязуется по заданию оказать услуги: авторский надзор по объекту «Строительство ПС 110 кВ Имени Сморгунова и питающей двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная - Центр С-217/С-218», а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям настоящего договора (пункты 1.1, 1.2 договора).

Стоимость услуг по договору равна 443 479,40 руб. (пункт 4.1 договора).

В силу пункту 4.3 договора оплат по договору производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг и получения счета-фактуры, при условии, что услуги оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего договора. Основанием для оплаты является акт об оказании услуг.

Согласно п.8.3 договора определена договорная подсудность - в Арбитражном суде по месту нахождения ПАО «МРСК Сибири».

01.03.2018 сторонами подписан акт об оказании услуг по авторскому надзору № 1 на сумму 443 479,40 руб. 

- 30.06.2016 № 14.4000.189.16/277-16 на выполнение проектных и изыскательских работ по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по расчету противоаварийной автоматики на ПС Центр для строительства ПС 110 кВ Имени Сморгунова и питающей двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная - Центр С-217/С-218 по адресу: 

<

...> и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договора составляет 297 657 (двести девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 36 коп. (пункт 6.1 договора). 

Текущие платежи выплачиваются заказчиком в размере 100% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ (пункт 7.1 договора). 

В силу пункта 9.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 46 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

01.12.2018 сторонами подписан акт № 1 приемки выполненных работ (оказанных услуг) на сумму 297 657,36 руб.

- 22.05.2013 № 11.7500.1866.13/145-13 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Строительству заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 15 045 000 (пятнадцать миллионов сорок пять тысяч) рублей 00 коп. (пункт 6.1 договора).

Согласно пункту 7.1 договора заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Платежи, покрывающие расходы подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом. Текущие платежи выплачиваются заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № Приложения № 9, а также с момента подписания акта приемки реконструированных объектов по форме ОС-3. 

В силу пункта 18.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п.20.4 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство. реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

30.06.2014 сторонами подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- 22.05.2013 № 11.7500.1867.13/146-13 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Строительству заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 29 860 513 (двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот тринадцать)рублей 60 коп. (пункт 6.1 договора).

В соответствии с пунктом 7.1 договора заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № Приложения № 9, а также с момента подписания акта приемки реконструированных объектов по форме ОС-3».

В силу пункта 18.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п.20.4. договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

30.06.2014 между сторонами подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 

- 17.09.2013 № 14.22.00.459.13/336-13 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчка осуществить корректировку (доработку) рабочей документации и осуществление функций авторского надзора по объекту «Строительство ПС 110 кВ «Солнечная Поляна» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора). 

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 743 214 (четыре миллиона семьсот сорок три тысячи двести четырнадцать)рублей 85 коп. (пункт 6.1 договора).

Согласно пункту 7.2 договора первый платеж выплачиваются заказчиком в размере стоимости выполненных работ по I и II этапам, указанных в актах сдачи-приемки работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки рабочей документации в части КЛ ПО кВ, ПС ПО кВ, сетей связи и СОПТ с удержанием аванса за проектные работы. Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта (акт по форме № КС-11) и акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 по объекту «Строительство ПС ПО кВ «Солнечная Поляна».

В соответствии с пунктом 9.2 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4. Договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

30.09.2014 между сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат по I и II этапам № 1 на сумму 4 150 671,25 руб., акты о приемке выполненных работ № 1 на сумму 728 626,71 руб., № 2 на сумму 1 241 458,77 руб., № 3 на сумму 386 439,05 руб., № 4 на сумму 104 144,68 руб., № 5 на сумму 1 224 443,33 руб., № 6 на сумму 465 558,67 руб.

- 30.12.2013 № 11.2200.024.14 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика  и в соответствии с утвержденной проектной документацией (Рабочая документация (проект) №0023, выполненная ЗАО «Сибирский инжиниринговый центр») осуществить работы по строительству ПС 110/10/10 кВ «Солнечная Поляна» в г. Барнауле Алтайского края, ул. Энтузиастов, 41 и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Согласно дополнительному соглашению №1 от 17.05.2015 года п.6.1 договора изменен на следующую редакцию:

«Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 40 802 058 (сорок миллионов восемьсот две тысячи пятьсот восемь)рублей 70 коп.».

В силу пункту 7.1 договора заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов- фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, КС- 11.

В силу пункта 18.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п.20 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

30.09.2014 между сторонами подписаны акты приемки законченного строительством объекта.

- 29.01.2014 № 11.2400.601.14/42-14 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией (шифр проекта: 090-0.00-ПЗ) осуществить работы по строительству новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения ООО «Белые Росы» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 136 762 000 (сто тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп. (пункт 6.1 договора). 

В силу пункта 7.1 договора заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрялчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с момента предоставления счета, аванс в размере 15%. что составляет 7254 801 (семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот один) рубль 05 копеек, в том числе НДС 18% 1 106 664 (один миллион сто шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 57 копеек, от стоимости строительно-монтажных работ поэтапно, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Подрядчик выставляет счёт на аванс не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Платежи по окончании строительно-монтажных работ выплачиваются заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных работ поэтапно, что составляет 38 692 272 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят два) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% 5 902 211 (пять миллионов девятьсот две тысячи двести одиннадцать) рублей 02 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счет-фактур. Окончательный расчёт за выполненные работы в размере оставшихся 5% стоимости строительно- монтажных поэтапно, что составляет 2 418 267 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% 368 888 (триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 19 копеек, выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 

Согласно п. 17.4 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство. реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

02.04.2018 сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 22 на сумму 1 238 857,29  руб., акты о приемке выполненных работ № 158 на сумму 935 404,51 руб., № 154 на сумму 63 258,66 руб., № 155 на сумму 185 906,13 руб., № 156 на сумму 40 522,84 руб., № 157 на сумму 13 765,15 руб.

- 28.08.2014 № 14.7500.3323.14 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуи»» (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС)» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 6 478 200 (шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп. (пункт 6.1 договора).

В силу пункта 7.1 договора по проектно-изыскательским работам оплата производится в размере 100 % процентов от стоимости работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (этапов работ), в течение 90 (девяносто) календарных дней после выполнения этапов работ и подписания сторонами актов о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОИ».

Между сторонами подписаны акты сдачи-приемки № 1 от 26.12.2014 на сумму 506 844,21 руб., № 2 от 08.07.2016 на сумму 1 520 532,58 руб., № 3 от 28.08.2017 на сумму 3 041 065,20 руб.

- 22.08.2016 № 11.2400.7130.16 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и в соответствии с утвержденным Техническим заданием осуществить работы по строительству КЛ-6 кВ от яч. 30-33 3-ей секции ЗРУ-6 кВ ПС «Белые Росы» до яч. 30-14 2-ой секции ЗРУ-6 кВ ПС «Остров Отдыха», для обеспечения бесперебойного питания категорийных потребителей ПС №30 «Остров Отдыха» на период строительства ПС «Белые Росы», и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 230 100 (двести тридцать тысяч сто) рублей 00 коп. (пункт 6.1 договора).

В силу п.7.1 договора определен порядок оплаты работ: «Платежи по окончании строительно-монтажных работ выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и оборудования, что составляет 218 595 (двести восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 33 345 (тридцать три тысячи триста сорок пять) рублей 00 копеек, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Окончательный расчёт за выполненные работы в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и оборудования, что составляет 11 505 (одиннадцать тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, вытачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

В соответствии с пунктом 16.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 18.4 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

18.10.2016 сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 230 100 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года № 1 на сумму 224 928,57 руб., № 2 на сумму 5 171,43 руб.

- 29.09.2016 № 10.2400.7269.16 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией (шифр проекта: 510-2015-ПЗ) осуществить работы по реконструкции РУ-10кВ ПС № 17 «Тамтачет», строительству двух одноцепных ВЛ-10кВ от ПС «Тамтачет» до границы участка заявителя, для технологического присоединения объекта ЛАЭС «НПС-4», и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 42 054 885 (сорок два миллиона пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 99 коп. (пункт 6.1 договора).

В соответствии с пунктом 7.1 договора платежи по окончании строительно-монтажных работ выплачиваются заказчиком поэтапно в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оборудования, что составляет 5 576 845 (пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок пять рублей) 90 копеек, в том числе НДС 18% 850 705 (восемьсот пятьдесят тысяч семьсот пять рублей) 31 копейка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Окончательный расчёт за выполненные работы в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и оборудования, что составляет 293 518 (двести девяносто три тысячи пятьсот восемнадцать рублей) 20 копеек, в том числе НДС 18% 44 773 (сорок четыре тысячи семьсот семьдесят три рубля) 96 копеек, выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В соответствии с пунктом 16.1 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 18.4 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

25.12.2016 между сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 на сумму 42 561 633,12 руб., акты о приемке выполненных работ № 5 на сумму 12 403,28 руб., № 6 на сумму 16 387 850,70 руб., № 7 на сумму 920 931,73 руб., № 8 на сумму 34 452,39 руб., № 9 на сумму 349 083,75 руб., № 10 на сумму 621 497,85 руб.

- 21.11.2016 № 14.7500.4121.16 по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда, новому строительству двух цеп ной В Л 110 кВ от ПС Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ Наседкино и новому строительству ПС 110/6 кВ Наседкино и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора).

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 38 205 394 (тридцать восемь миллионов двести пять тысяч триста девяносто четыре) рубля 98 коп. (пункт 6.1 договора).

Заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора аванс в размере до 15% от стоимости общего объема работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса (пункт 7.1 договора).

Текущие платежи выплачиваются заказчиком в размере  65% от  стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заказчиком положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации. В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой (пункт 7.2 договора). 

В соответствии с пунктом 9.2 договора заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

Согласно п. 12.4 договора определена договорная подсудность - в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

31.05.2017 сторонами подписан акт сдачи-приемки № 1 результатов выполненных работ на сумму 767 477,12 руб., № 2 от 30.07.2017 на сумму 15 538 262,60 руб., № 3 от 30.07.2017 на сумму 383 738,57 руб., № 4 от 30.11.2017 на сумму 4 631 343 руб., № 5 от 31.07.2018 на сумму 5 112 915,34 руб., № 6 от 03.12.2018 на сумму 233 255,13 руб. 

Согласно представленному в материалы дела акту сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами без замечаний, у ответчика числится задолженность перед истцом в общей сумме 47 635 042,36 руб., в том числе:

- по договору № 14.2400.9134.14 от 22.08.2014 в сумме, равной 4 118 200 руб.;

- по договору № 10.2400.528.15/31-15 от 29.01.2015 в сумме, равной 1 719 635,24 руб.;

- по договору № 11.2400.2331.16 от 25.03.2016 в сумме, равной 1 274 400 руб.;

- по договору № 14.2200.1670.16 от 27.04.2016 в сумме, равной 489 800 руб.;

- по договору № 14.4000.157.16 от 26.05.2016 в сумме, равной 487 508,99 руб.;

- по договору № 18.4000.156.16 от 26.05.2016 в сумме, равной 443 479,40 руб.;

- по договору № 14.4000.189.16 от 30.06.2016 в сумме, равной 297 657,36 руб.;

- по договору № 17.500.1866.13/145-13 от 22.05.2013 в сумме, равной 74 363,60 руб.;

- по договору № 11.7500.1867.13/146-13 от 22.05.2013 в сумме, равной 525 750,12 руб.;

- по договору № 14.22.00.459.13/336-13 от 17.09.2013 в сумме, равной 791 373,84 руб.;

- по договору № 11.2200.024.14 от 30.12.2013 в сумме, равной 179 352,05 руб.;

- по договору № 11.2400.601.14/42-14 от 29.01.2014 в сумме, равной 16 220 689,51 руб.;

- по договору № 14.7500.3323.14 от 28.08.2014 в сумме, равной 3 041 065,20 руб.;

- по договору № 11.2400.7130.16 от 22.08.2016 в сумме, равной 11 505 руб.;

- по договору № 10.2400.7269.16 от 29.08.2016 в сумме, равной 155 990,73 руб.;

- по договору № 14.7500.4121.16 от 21.11.2016 в сумме, равной 17 804 271,32 руб.

Претензией от 06.09.2019 № 45 истец обратился к ответчику с требованием оплатить задолженность в общей сумме 47 635 042,38 руб.

Претензия ответчиком оставлена без удовлетворения. 

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, истец обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  о  взыскании с ответчика 47 635 042,36 руб. основного долга, 3 942 463,99 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 1 026 056,68 руб. договорной неустойки. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление с предъявленным исковым заявлением не согласился, указав на неверный размер неустойки. Кроме того, ответчиком заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с наличием в заключенных договорах третейской оговорки. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Ответчик заявил ходатайство  об оставлении искового заявления общества «ПМК Сибири» без рассмотрения в связи с наличием третейского соглашения между сторонами, содержащегося договорах, заключенных между сторонами, являющимся предметами рассмотрения настоящего спора.

Суд отклоняет как необоснованный названный выше довод ответчика в силу следующего. 

Пунктами спорных договоров, заключенных сторонами, содержащие аналогичные условия, предусмотрено, что в случае недостижения согласия между сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.  

В мае 2017 года Союзом «Энергострой» принято решение о передаче функций образованного при нем Третейского суда объединенному арбитражному учреждению - Центру энергетического арбитража при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК». Вместе с тем, до настоящего времени Правительством Российской Федерации решение по указанным документам и заявлению Фонда «Право и экономика ТЭК» не принято. 

Согласно части 13 статьи 52 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» с 01.11.2017 постоянно действующие третейские суды, не соответствующие требованиям статьи 44 данного закона и не получившие права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, не вправе осуществлять деятельность по администрированию арбитража.

Таким образом, с 01.11.2017 Третейский суд при Некоммерческом партнерстве «Энергострой» (все его органы и уполномоченные лица) утратили право администрировать третейские разбирательства, а Центр энергетического арбитража не имеет такого права до принятия соответствующего решения Правительством Российской Федерации. 

Вышеизложенное  свидетельствует о том, что  в отсутствие арбитражного соглашения о передаче данного спора на рассмотрение третейского суда, а также учитывая, что определенный в договоре третейский суд в настоящее время не функционирует, возникший  между сторонами спор с учетом гарантий, предусмотренных статьями 46, 47 Конституции Российской Федерации, подлежит  рассмотрению в арбитражном суде.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Как следует из материалов дела между сторона заключены договоры № 14.2400.9134.14 от 22.08.2014, № 10.2400.528.15/31-15 от 29.01.2015, № 11.2400.2331.16 от 25.03.2016, № 14.2200.1670.16 от 27.04.2016, № 14.4000.157.16 от 26.05.2016, № 14.4000.189.16 от 30.06.2016, № 17.500.1866.13/145-13 от 22.05.2013, № 11.7500.1867.13/146-13 от 22.05.2013, № 14.22.00.459.13/336-13 от 17.09.2013, № 11.2200.024.14 от 30.12.2013, № 11.2400.601.14/42-14 от 29.01.2014, № 14.7500.3323.14 от 28.08.2014, № 11.2400.7130.16 от 22.08.2016, № 10.2400.7269.16 от 29.08.2016, № 14.7500.4121.16 от 21.11.2016, являющиеся по своей правовой природе договорами подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, отношения по которому  регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат).

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Кроме того, между сторонами заключен договор от 26.05.2016 № 18.4000.156.16/184-16, который по своей природе является договором возмездного оказания услуг и регулируется положениями главы 39 части II Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу положений статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, из толкования положений статей 779 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на лицо, обратившееся с требованием о взыскании долга за оказанные по договору услуги, возложена обязанность по доказыванию факта выполнения работ (оказания услуг).

Как следует из материалов дела у ответчика числится перед истцом задолженность за выполненные работы и оказанные услуги истцом по вышеуказанным договорам на общую сумму 47 635 042,36 руб., что подтверждается подписанными актами о приемке выполненных работ (оказанных услуг), актами сверки взаимных расчетов. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление требования истца в указанной части не оспорил.

В соответствии с положениями статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, непредставление доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (правовая позиция сформулирована в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11, от 08.10.2013 №12857/12).

Учитывая вышеизложенное, требования истца о взыскании 47 635 042,36 руб.  основного долга является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 942 463,99 руб., неустойки в размере 1 026 056,68 руб. 

В отзыве на исковое заявление ответчик ссылается на наличие в договорах положений об имущественной ответственности заказчика, а именно возможность предъявления за просрочку оплату выполненных работ неустойки в виде пени, исчисленной в размере 0,02 %, но не более 5 % от суммы неоплаченной в срок задолженности. 

Согласно пункту 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

В тоже время согласно позиции, изложенной в обзоре Верховного суда Российской Федерации № 4 (2016) положения п. 4 ст. 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" не подлежат применению к договорам, заключенным до 1 июня 2015 года.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума N 7), положения ГК РФ в измененной Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 42-ФЗ) редакции, например ст. 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 г.); при рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией ГК РФ с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абзац второй п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ). Вместе с тем при решении вопроса о начислении процентов за неисполнение денежного обязательства, возникшего на основании заключенного до 1 июня 2015 г. договора, в отношении периодов просрочки, имевших место с 1 июня 2015 г., размер процентов определяется в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ.

Таким образом, к отношениям, возникшим из договоров, заключенных до вступления в силу Закона N 42-ФЗ, применяется ранее действовавшая редакция ГК РФ. Исключение составляет лишь п. 1 ст. 395 ГК РФ, которым регламентирован порядок определения размера начисляемых в соответствии с данной нормой процентов и который применяется и к названным договорам в отношении периодов просрочки, имевших место после вступления в силу Закона N 42-ФЗ.

Редакция ст. 395 ГК РФ, действовавшая до 1 июня 2015 г., не содержала запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства. Такое ограничение появилось только в связи с введением в действие с 1 июня 2015 г. Законом N 42-ФЗ п. 4 ст. 395 ГК РФ.

Согласно сложившейся до 1 июня 2015 г. практике применения ГК РФ в случае нарушения, возникшего из договора денежного обязательства, кредитор был вправе предъявить либо требование о взыскании с должника процентов на основании ст. 395 ГК РФ, либо требование о взыскании предусмотренной договором неустойки.

Учитывая вышеизложенные положения, истец правомерно по договорам, заключенным до 01.06.2015 воспользовался правом начисления процентов за пользование денежных средств по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, несмотря на наличие договорной ответственности. 

Согласно уточненному исковому заявлению истец просит взыскать с ответчика 3 942 463,99 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по следующим договорам:

- от 22.08.2014 № 14.2400.9134.14 в размере 488 965,73 руб. за период с 17.04.2018 по 22.11.2019;

- от 29.01.2015 № 10.2400.528.15/31-15 в размере 431 821,03 руб. за период с 23.10.2016 по 22.11.2019;

- от 22.05.2013 № 11.7500.1866.13/145-13 в размере 34 507,13 руб. за период с 31.05.2014 по 22.11.2019;

- от 22.05.2013 № 11.7500.1867.13/146-13 в размере 236 716,22 руб. за период с 31.07.2014 по 22.11.2019;

- от 17.09.2013 № 14.22.00.459.13/336-13 в размере 340 213,40 руб. за период с 29.10.2014 по 22.11.2019;

- от 30.12.2013 № 11.2200.024.14 в размере 77 022,79 руб. за период с 31.10.2014 по 22.11.2019;

- от 29.01.2014 № 11.2400.601.14/42-14 в размере 1 829 271,59 руб. за период с 17.05.2018 по 22.11.2019;

- от 28.08.2014 №  14.7500.3323.14 в размере 451 202,42 руб. за период с 27.11.2017 по 22.11.2019. 

Кроме того, по договору от 26.05.2016 № 18.4000.156.16 подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая отсутствие в договоре условий о договорной ответственности заказчика.

По указанному договору истец просит взыскать 52 743,68 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.04.2018 по 22.11.2019. 

В тоже время, проверив расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, суд установил наличие арифметической ошибки в произведенном расчете. 

Исчисляя сумму процентов за пользование чужими денежными средствами истец не верно определил начальный период просрочки, учитывая наличия в договорах условий об оплате задолженности по истечении банковских (рабочих) дней, в то время как истец исчисляет календарные дни. 

Таким образом, учитывая положения договоров за период с 30.06.2014 по 22.11.2019 подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 925 834,44 руб., исходя из следующего: 

- согласно пункту 7.1 договора от 29.01.2015 № 10.2400.528.15/31-15 расчет за выполненные работы производится в размере 100% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и оборудования по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 

25.07.2016 составлена и подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1,подписаны  акты о приемке выполненных работ за июль 2016 года № 1 № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.

Задолженность по договору составила 1 719 635,24 руб.

Принимая во внимание, условие об оплате по указанному договору подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 430 881,34 руб., исходя из следующего расчета:

c 25.10.2016 по 31.12.2016 (1719635,24 / 100  * 10 /366 * 68) = 31949,51 руб. 

c 01.01.2017 по 26.03.2017  (1719635,24 / 100  * 10 / 365 * 85) = 40046,3 руб. 

c 27.03.2017 по 01.05.2017 (1719635,24 / 100  * 9,75 / 365 * 36) = 16536,77 руб. 

c 02.05.2017 по 18.06.2017 (1719635,24 / 100 * 9,25 / 365 * 48) = 20918,3 руб. 

c 19.06.2017 по 17.09.2017 (1719635,24 / 100 * 9 / 365 * 91) = 38585,79 руб. 

c 18.09.2017 по 29.10.2017 (1719635,24 / 100 * 8,5 / 365 * 42) = 16819,45 руб. 

c 30.10.2017 по 17.12.2017 (1719635,24 / 100 * 8,25 / 365 * 49) = 19045,55 руб. 

c 18.12.2017 по 11.02.2018 (1719635,24 / 100 * 7,75 / 365 *56)= 20447,17 руб. 

c 12.02.2018 по 25.03.2018 (1719635,24 / 100 * 7,5 / 365 * 42) = 14840,69 руб. 

c 26.03.2018 по 16.09.2018 (1719635,24 / 100 * 7,25 / 365 * 175) = 59774,99 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (1719635,24 / 100 * 7,5 / 365 * 91) = 32154,82 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019 (1719635,24 / 100  * 7,75 / 365 * 182) = 66453,3 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (1719635,24 / 100 * 7,5 / 365  * 42) = 14840,69 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019 (1719635,24 / 100 *  7,25 / 365 * 42) = 14346 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (1719635,24 / 100  *  7 / 365  *   49) = 16159,86 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (1719635,24 / 100 * 6,5 / 365 * 26) = 7962,15 руб. ; 

- пунктом 4.3 договора от 26.05.2016 № 18.4000.156.16 оплат по договору производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг и получения счета-фактуры, при условии, что услуги оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего договора. Основанием для оплаты является акт об оказании услуг.

01.03.2018 сторонами подписан акт об оказании услуг по авторскому надзору № 1 на сумму 443 479,40 руб. 

Учитывая условие об оплате, по указанному договору подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 50541,47 руб., исходя из следующего расчета:

c 11.05.2018 по 16.09.2018 (443479,4 / 100  * 7,25 / 365 * 129) = 11363,4 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (443479,4 / 100 * 7,5 / 365 * 91) = 8292,46 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019 (443479,4 / 100 * 7,75 / 365 * 182) = 17137,75 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (443479,4 / 100  * 7,5 / 365 *42) = 3827,29 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019  (443479,4 / 100 * 7,25 / 365 * 42) = 3699,71 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (443479,4 / 100 * 7 / 365 * 49)= 4167,49 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (443479,4 / 100 * 6,5 / 365 * 26) = 2053,37 руб.;

- пунктом  7.1  договора № 11.7500.1866.13/145-13 от 22.05.2013 предусмотрено, что заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Платежи, покрывающие расходы подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом. Текущие платежи выплачиваются заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № Приложения № 9, а также с момента подписания акта приемки реконструированных объектов по форме ОС-3. 

30.06.2014 сторонами подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Согласно акту сверки взаимных расчетов задолженность по договору составила 74 363,60 руб. 

Учитывая вышеизложенное, по договору подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размер 32 946,61 руб., исходя из следующего расчета:

c 12.08.2014 по 31.05.2015 (74363,6 / 100 * 8,25 / 365  * 293)= 4924,81 руб. 

c 01.06.2015 по 14.06.2015 (74363,6 / 100  *  10,89 / 365  * 14) = 310,62 руб. 

c 15.06.2015 по 14.07.2015 (74363,6 / 100 * 10,81 / 365 * 30) = 660,72 руб. 

c 15.07.2015 по 16.08.2015 (74363,6 / 100 * 9,89 / 365 * 33) = 664,93 руб. 

c 17.08.2015 по 14.09.2015 (74363,6 / 100  * 9,75 / 365 * 29) =576,06 руб. 

c 15.09.2015 по 14.10.2015 (74363,6 / 100 * 9,21 / 365 * 30) = 562,92 руб. 

c 15.10.2015 по 16.11.2015 (74363,6 / 100 * 9,02 / 365  * 33) =606,44 руб. 

c 17.11.2015 по 14.12.2015 (74363,6 / 100 * 9 / 365 * 28) = 513,41 руб. 

c 15.12.2015 по 31.12.2015 (74363,6 / 100 * 7,18 / 365 * 17) = 248,68 руб. 

c 01.01.2016 по 24.01.2016 (74363,6 / 100 * 7,18 / 366 * 24) = 350,12 руб. 

c 25.01.2016 по 18.02.2016 (74363,6 / 100 * 7,81 / 366 * 25) =  396,71 руб. 

c 19.02.2016 по 16.03.2016 (74363,6 / 100  * 9 / 366  * 27) = 493,73 руб. 

c 17.03.2016 по 14.04.2016 (74363,6 / 100 * 8,81 / 366 * 29) =   519,1 руб. 

c 15.04.2016 по 18.05.2016 (74363,6 / 100 * 8,01 / 366 *  34) = 553,34 руб. 

c 19.05.2016 по 15.06.2016 (74363,6 / 100  * 7,71 / 366  * 28) = 438,62 руб. 

c 16.06.2016 по 14.07.2016 (74363,6 / 100 * 7,93 / 366 * 29) = 467,25 руб. 

c 15.07.2016 по 31.07.2016 (74363,6 / 100 * 7,22 / 366 * 17) = 249,38 руб. 

c 01.08.2016 по 18.09.2016 (74363,6 / 100 * 10,5 / 366 * 49) = 1045,36 руб. 

c 19.09.2016 по 31.12.2016 (74363,6 / 100 * 10 / 366 * 104) = 2113,06 руб. 

c 01.01.2017 по 26.03.2017 (74363,6 / 100 * 10 / 365 * 85) = 1731,76 руб. 

c 27.03.2017 по 01.05.2017 (74363,6 / 100 * 9,75 / 365 * 36) = 715,11 руб. 

c 02.05.2017 по 18.06.2017 (74363,6 / 100 * 9,25 / 365 * 48) = 904,59 руб. 

c 19.06.2017 по 17.09.2017 (74363,6 / 100 * 9 / 365 * 91) = 1668,6 руб. 

c 18.09.2017 по 29.10.2017 (74363,6 / 100 * 8,5 / 365 * 42) = 727,34 руб. 

c 30.10.2017 по 17.12.2017 (74363,6 / 100 * 8,25 / 365 * 49) = 823,6 руб. 

c 18.12.2017 по 11.02.2018 (74363,6 / 100 * 7,75 / 365 * 56) = 884,21 руб. 

c 12.02.2018 по 25.03.2018 (74363,6 / 100 * 7,5 / 365  * 42) = 641,77 руб. 

c 26.03.2018 по 16.09.2018 (74363,6 / 100 * 7,25 / 365 * 175) = 2584,9 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (74363,6 / 100 * 7,5 / 365 * 91) = 1390,5 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019  (74363,6 / 100 * 7,75 / 365 * 182) = 2873,7 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (74363,6 / 100 * 7,5 / 365 * 42) = 641,77 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019 (74363,6 / 100 * 7,25 / 365 * 42) = 620,38 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (74363,6 / 100 * 7 / 365 * 49) = 698,81 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (74363,6 / 100 * 6,5 / 365 * 26) = 344,31 руб.;

- в силу пункта 7.1 договора от 22.05.2013 № 11.7500.1867.13/146-13 заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № Приложения № 9, а также с момента подписания акта приемки реконструированных объектов по форме ОС-3».

30.06.2014 между сторонами подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов у ответчика по указанному договору числиться задолженность в размере 525 750,12 руб., следовательно, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению в размере 232 932,24 руб.  за период с 12.08.2014 по 22.11.2019, исходя из следующего расчета:

c 12.08.2014 по 31.05.2015 (525750,12 / 100  * 8,25 / 365  * 293) = 34818,34 руб. 

c 01.06.2015 по 14.06.2015 (525750,12 / 100  * 10,89 / 365  * 14) = 2196,05 руб. 

c 15.06.2015 по 14.07.2015 (525750,12 / 100  * 10,81 / 365  * 30) = 4671,25 руб. 

c 15.07.2015 по 16.08.2015 (525750,12 / 100  *  9,89 / 365 * 33) = 4701,07 руб. 

c 17.08.2015 по 14.09.2015 (525750,12 / 100 * 9,75 / 365 * 29)= 4072,76 руб. 

c 15.09.2015 по 14.10.2015 (525750,12 / 100 * 9,21 / 365 * 30) = 3979,86 руб. 

c 15.10.2015 по 16.11.2015 (525750,12 / 100 * 9,02 / 365  * 33) = 4287,53 руб. 

c 17.11.2015 по 14.12.2015 (525750,12 / 100  * 9 / 365 * 28) = 3629,84 руб. 

c 15.12.2015 по 31.12.2015 (525750,12 / 100 *7,18 / 365 * 17) = 1758,17 руб. 

c 01.01.2016 по 24.01.2016 (525750,12 / 100 * 7,18 / 366 * 24) = 2475,34 руб. 

c 25.01.2016 по 18.02.2016 (525750,12 / 100  * 7,81 / 366  * 25) = 2804,72 руб. 

c 19.02.2016 по 16.03.2016 (525750,12 / 100  * 9 / 366  *  27) = 3490,64 руб. 

c 17.03.2016 по 14.04.2016 (525750,12 / 100  * 8,81 / 366 * 29) = 3670,05 руб. 

c 15.04.2016 по 18.05.2016 (525750,12 / 100 * 8,01 / 366 * 34) = 3912,1 руб. 

c 19.05.2016 по 15.06.2016 (525750,12 /100 * 7,71 / 366 * 28) = 3101,06 руб. 

c 16.06.2016 по 14.07.2016 (525750,12 / 100 * 7,93 / 366 * 29) = 3303,46 руб. 

c 15.07.2016 по 31.07.2016 (525750,12 / 100 * 7,22 / 366 * 17) = 1763,13 руб. 

c 01.08.2016 по 18.09.2016 (525750,12 / 100 * 10,5 / 366 * 49) = 7390,67 руб. 

c 19.09.2016 по 31.12.2016 (525750,12 / 100 * 10 / 366 * 104) = 14939,35 руб. 

c 01.01.2017 по 26.03.2017 ( 525750,12 / 100 * 10 / 365  * 85) = 12243,5 руб. 

c 27.03.2017 по 01.05.2017 (525750,12 / 100 * 9,75 / 365  * 36) = 5055,84 руб. 

c 02.05.2017 по 18.06.2017 ( 525750,12 / 100  *  9,25 / 365 * 48) = 6395,43 руб. 

c 19.06.2017 по 17.09.2017 (525750,12 / 100 * 9 / 365 * 91) = 11796,97 руб. 

c 18.09.2017 по 29.10.2017 (525750,12 / 100 * 8,5 / 365 * 42) = 5142,27 руб. 

c 30.10.2017 по 17.12.2017 (525750,12 / 100  * 8,25 / 365 * 49) = 5822,86 руб. 

c 18.12.2017 по 11.02.2018 (525750,12 / 100 * 7,75 / 365 * 56) = 6251,39 руб. 

c 12.02.2018 по 25.03.2018 (525750,12 / 100 *  7,5 / 365 * 42) = 4537,3 руб. 

c 26.03.2018 по 16.09.2018 (525750,12 / 100  *  7,25 / 365  * 175)= 18275,22 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (525750,12 / 100  * 7,5 / 365  * 91) = 9830,81 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019 (525750,12 / 100  *  7,75 / 365 * 182) = 20317 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (525750,12 / 100 * 7,5 / 365  * 42) = 4537,3 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019 (525750,12 / 100 * 7,25 / 365  * 42) = 4386,05 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (525750,12 / 100 *  7 / 365 * 49) = 4940,61 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (525750,12 / 100 * 6,5 / 365 * 26) = 2434,3 руб.;

- пунктом 7.1 договора от 30.12.2013 № 11.2200.024.14 предусмотрено, что заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов- фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, КС- 11.

30.06.2014 сторонами подписан акт законченного строительства.

Согласно акту сверки взаимных расчетов задолженность по договору составила 179 352,05 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подлежат начислению в размере 75 650,86 руб. за период с 14.11.2014 по 22.11.2019, исходя из расчета:

c 14.11.2014 по 31.05.2015 (179352,02 / 100  * 8,25 / 365 *199) = 8067,16 руб. 

c 01.06.2015 по 14.06.2015 (179352,02 / 100 * 10,89 /365 *  14) = 749,15 руб. 

c 15.06.2015 по 14.07.2015 (179352,02 / 100 * 10,81 / 365 *  30)= 1593,53 руб. 

c 15.07.2015 по 16.08.2015 (179352,02 / 100  * 9,89 / 365 * 33) = 1603,7 руб. 

c 17.08.2015 по 14.09.2015 (179352,02 / 100 * 9,75 / 365 * 29)= 1389,36 руб. 

c 15.09.2015 по 14.10.2015 (179352,02 / 100  * 9,21 /365 * 30) = 1357,67 руб. 

c 15.10.2015 по 16.11.2015 (179352,02 / 100 * 9,02 / 365 * 33) = 1462,63 руб. 

c 17.11.2015 по 14.12.2015 (179352,02 / 100 * 9 / 365 * 28) = 1238,27 руб. 

c 15.12.2015 по 31.12.2015 (179352,02 / 100 * 7,18 / 365 * 17) = 599,77 руб. 

c 01.01.2016 по 24.01.2016 (179352,02 / 100 * 7,18 / 366 * 24) = 844,43 руб. 

c 25.01.2016 по 18.02.2016 (179352,02 / 100 *  7,81 / 366 * 25) = 956,79 руб. 

c 19.02.2016 по 16.03.2016 (179352,02 / 100  * 9 / 366  * 27) = 1190,78 руб. 

c 17.03.2016 по 14.04.2016 (179352,02 / 100  *8,81 / 366 * 29) = 1251,98 руб. 

c 15.04.2016 по 18.05.2016 (179352,02 / 100  *  8,01 / 366  * 34) = 1334,56 руб. 

c 19.05.2016 по 15.06.2016 (179352,02 / 100 *7,71 / 366 *  28) = 1057,88 руб. 

c 16.06.2016 по 14.07.2016 (179352,02 / 100 * 7,93 / 366 * 29) = 1126,93 руб. 

c 15.07.2016 по 31.07.2016 (179352,02 / 100 * 7,22 / 366  *  17) = 601,47 руб. 

c 01.08.2016 по 18.09.2016 (179352,02 / 100 * 10,5 / 366 * 49) = 2521,22 руб. 

c 19.09.2016 по 31.12.2016 (179352,02 / 100  *10 / 366 * 104) = 5096,34 руб. 

c 01.01.2017 по 26.03.2017 (179352,02 / 100  * 10 / 365 * 85) = 4176,69 руб. 

c 27.03.2017 по 01.05.2017 (179352,02 / 100  *  9,75 / 365 * 36) = 1724,73 руб. 

c 02.05.2017 по 18.06.2017 (179352,02 / 100  * 9,25 / 365  *   48) = 2181,71 руб. 

c 19.06.2017 по 17.09.2017 (179352,02 / 100  *  9 / 365  * 91) = 4024,37 руб. 

c 18.09.2017 по 29.10.2017 (179352,02 / 100  *   8,5 / 365 * 42) = 1754,21 руб. 

c 30.10.2017 по 17.12.2017 (179352,02 / 100  * 8,25 / 365 * 49) = 1986,39 руб. 

c 18.12.2017 по 11.02.2018 (179352,02 / 100 * 7,75 / 365 *56) = 2132,57 руб. 

c 12.02.2018 по 25.03.2018 (179352,02 / 100  * 7,5 / 365 * 42) = 1547,83 руб. 

c 26.03.2018 по 16.09.2018 (179352,02 / 100  *  7,25 / 365  * 175) = 6234,33 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (179352,02 / 100 * 7,5 / 365  *  91) = 3353,64 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019 (179352,02 / 100 *7,75 / 365 * 182) = 6930,85 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (179352,02 / 100 *  7,5 / 365 * 42)= 1547,83 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019 (179352,02 / 100 * 7,25 / 365 * 42) = 1496,24 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (179352,02 / 100  * 7 / 365  * 49) = 1685,42 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (179352,02 / 100  *  6,5 / 365  * 26) = 830,42 руб.;

- пунктом 7.2  договора от 17.09.2013 № 14.22.00.459.13/336-13 предусмотрено, что первый платеж выплачиваются заказчиком в размере стоимости выполненных работ по I и II этапам, указанных в актах сдачи-приемки работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки рабочей документации в части КЛ ПО кВ, ПС ПО кВ, сетей связи и СОПТ с удержанием аванса за проектные работы. Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта (акт по форме № КС-11) и акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 по объекту «Строительство ПС ПО кВ «Солнечная Поляна».

30.09.2014 между сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат по I и II этапам № 1 на сумму 4 150 671,25 руб., акты о приемке выполненных работ № 1 на сумму 728 626,71 руб., № 2 на сумму 1 241 458,77 руб., № 3 на сумму 386 439,05 руб., № 4 на сумму 104 144,68 руб., № 5 на сумму 1 224 443,33 руб., № 6 на сумму 465 558,67 руб.

Задолженность по договору составляет 791 373,84 руб. согласно акту сверки взаимных расчетов, проценты за пользование чужими денежными средствами на указанную сумму подлежат начислению в сумме, равной 336664,1 руб. 

c 29.10.2014 по 31.05.2015 (791373,84 / 100 *  8,25 / 365 * 215) = 38457,52 руб. 

c 01.06.2015 по 14.06.2015 ( 791373,84 / 100  * 10,89 / 365 * 14) = 3305,56 руб. 

c 15.06.2015 по 14.07.2015 (791373,84 / 100 * 10,81 / 365 *30) = 7031,3 руб. 

c 15.07.2015 по 16.08.2015 (791373,84 / 100 *9,89 / 365 * 33) = 7076,18 руб. 

c 17.08.2015 по 14.09.2015 (791373,84 / 100  * 9,75 / 365 * 29) = 6130,44 руб. 

c 15.09.2015 по 14.10.2015 (791373,84 / 100 * 9,21 / 365 * 30) = 5990,59 руб. 

c 15.10.2015 по 16.11.2015 (791373,84 / 100 * 9,02 / 365 * 33) = 6453,71 руб. 

c 17.11.2015 по 14.12.2015 (791373,84 / 100 *  9 / 365 *  28) = 5463,73 руб. 

c 15.12.2015 по 31.12.2015 (791373,84 / 100  * 7,18 / 365  *  17) = 2646,44 руб. 

c 01.01.2016 по 24.01.2016 (791373,84 / 100 * 7,18 / 366  * 24) = 3725,94 руб. 

c 25.01.2016 по 18.02.2016 (791373,84 / 100 * 7,81 / 366 * 25) = 4221,74 руб. 

c 19.02.2016 по 16.03.2016 (791373,84 / 100  * 9 / 366 * 27) = 5254,2 руб. 

c 17.03.2016 по 14.04.2016 (791373,84 / 100  *  8,81 / 366  * 29) = 5524,27 руб. 

c 15.04.2016 по 18.05.2016 (791373,84 / 100 * 8,01 / 366 * 34) = 5888,6 руб. 

c 19.05.2016 по 15.06.2016 (791373,84 / 100 * 7,71 / 366  *  28) = 4667,81 руб. 

c 16.06.2016 по 14.07.2016 (791373,84 / 100  *  7,93 / 366 *  29) = 4972,47 руб. 

c 15.07.2016 по 31.07.2016 (791373,84 / 100 * 7,22 / 366 * 17) = 2653,91 руб. 

c 01.08.2016 по 18.09.2016 (791373,84 / 100 *10,5 / 366  * 49) = 11124,64 руб. 

c 19.09.2016 по 31.12.2016 (791373,84 / 100 * 10 / 366 * 104) = 22487,13 руб. 

c 01.01.2017 по 26.03.2017 (791373,84 / 100  *10 / 365  * 85) = 18429,25 руб. 

c 27.03.2017 по 01.05.2017 (791373,84 / 100  * 9,75 / 365  *  36) = 7610,2 руб. 

c 02.05.2017 по 18.06.2017 (791373,84 / 100  * 9,25 / 365  *  48) = 9626,58 руб. 

c 19.06.2017 по 17.09.2017 (791373,84 / 100  * 9 / 365  * 91) = 17757,13 руб. 

c 18.09.2017 по 29.10.2017 (791373,84 / 100  *  8,5 / 365  * 42) = 7740,29 руб. 

c 30.10.2017 по 17.12.2017 ( 791373,84 / 100  * 8,25 / 365  * 49)= 8764,74 руб. 

c 18.12.2017 по 11.02.2018 (791373,84 / 100  * 7,75 / 365  *   56)= 9409,76 руб. 

c 12.02.2018 по 25.03.2018 ( 791373,84 / 100  *  7,5 / 365  *   42) = 6829,67 руб. 

c 26.03.2018 по 16.09.2018 (791373,84 / 100 * 7,25 / 365 * 175) = 27508,37 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (791373,84 / 100  * 7,5 / 365  * 91) = 14797,61 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019 (791373,84 / 100 * 7,75 / 365 * 182) = 30581,72 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (791373,84 / 100  * 7,5 / 365  * 42) = 6829,67 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019 ( 791373,84 / 100  *7,25 / 365  * 42) = 6602,01 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (791373,84 / 100  *  7 / 365  * 49) = 7436,75 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (791373,84 / 100  *  6,5 / 365 * 26) = 3664,17 руб.,

- в силу пункта 7.1 договора 29.01.2014 № 11.2400.601.14/42-14 заказчик на основании выставляемого подрядчиком счета уплачивает подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с момента предоставления счета, аванс в размере 15%. что составляет 7254 801 (семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот один) рубль 05 копеек, в том числе НДС 18% 1 106 664 (один миллион сто шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 57 копеек, от стоимости строительно-монтажных работ поэтапно, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Подрядчик выставляет счёт на аванс не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Платежи по окончании строительно-монтажных работ выплачиваются заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных работ поэтапно, что составляет 38 692 272 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят два) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% 5 902 211 (пять миллионов девятьсот две тысячи двести одиннадцать) рублей 02 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счет-фактур. Окончательный расчёт за выполненные работы в размере оставшихся 5% стоимости строительно- монтажных поэтапно, что составляет 2 418 267 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% 368 888 (триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 19 копеек, выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 

02.04.2018 сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 22 на сумму 1 238 857,29  руб., акты о приемке выполненных работ № 158 на сумму 935 404,51 руб., № 154 на сумму 63 258,66 руб., № 155 на сумму 185 906,13 руб., № 156 на сумму 40 522,84 руб., № 157 на сумму 13 765,15 руб.

Сумма задолженности по договору составила 16 220 689,51 руб., учитывая условие об оплате по договору, на сумму задолженности подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 826 049,67 руб., исходя из расчета:

c 18.05.2018 по 16.09.2018 (16220689,51 / 100  *  7,25 / 365  * 122) = 393073,97 руб. 

c 17.09.2018 по 16.12.2018 (16220689,51 / 100  * 7,5 / 365  * 91) = 303304,67 руб. 

c 17.12.2018 по 16.06.2019 (16220689,51 / 100  * 7,75 / 365 * 182) = 626829,66 руб. 

c 17.06.2019 по 28.07.2019 (16220689,51 / 100  *7,5 / 365  * 42) = 139986,77 руб. 

c 29.07.2019 по 08.09.2019 (16220689,51 / 100  *  7,25 / 365  * 42) = 135320,55 руб. 

c 09.09.2019 по 27.10.2019 (16220689,51 / 100  *7 / 365  *  49) = 152430,04 руб. 

c 28.10.2019 по 22.11.2019 (16220689,51 / 100  * 6,5 / 365 *26) = 75104,01 руб. 

Проверив расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам от 28.08.2014 № 14.7500.3323.14, от 22.08.2014 № 14.2400.9134.14 суд не обнаружил наличие ошибок при расчете, в связи с чем суммы процентов заявлены истцом обосновано в размере 488 965,73 руб. по договору от 22.08.2014, 451 202,42 руб. по договору от 28.08.2014.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию в размере 3 925 834,44 руб. по договорам:

- от 22.08.2014 № 14.2400.9134.14 в размере 488 965,73 руб. за период с 17.04.2018 по 22.11.2019;

- от 29.01.2015 № 10.2400.528.15/31-15 в размере 430 881,34 руб. за период с 25.10.2016 по 22.11.2019;

- от 22.05.2013 № 11.7500.1866.13/145-13 в размере 32 946,61 руб. за период с 12.08.2014 по 22.11.2019;

- от 22.05.2013 № 11.7500.1867.13/146-13 в размере 232 932,24 руб. за период с 11.08.2014 по 22.11.2019;

- от 17.09.2013 № 14.22.00.459.13/336-13 в размере 336 664,10 руб. за период с 29.10.2014 по 22.11.2019;

- от 30.12.2013 № 11.2200.024.14 в размере 75 650,86 руб. за период с 14.11.2014 по 22.11.2019;

- от 29.01.2014 № 11.2400.601.14/42-14 в размере 1 826 049,67 руб. за период с 18.05.2018 по 22.11.2019;

- от 28.08.2014 №  14.7500.3323.14 в размере 451 202,42 руб. за период с 27.11.2017 по 22.11.2019,

- от 26.05.2016 № 14.4000.156.16 в размере 50 541,47 руб. за период с 11.05.2018 по 22.11.2019. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени в сумме 1 026 056,68 руб., начисленных за неисполнение ответчиком обязательств по оплате оказанных истцом услуг охране объекта по договорам:

- от 25.03.2016 № 11.2400.2331.16 в размере 63 720 руб.;

- от 27.04.2016 № 14.2200.1670.16 в размере 24 490 руб.;

- от 26.05.2016 № 14.4000.157.16 в размере 24 375,45 руб.;

- от 30.06.2016 № 14.4000.189.16 в размере 14 882,87 руб.;

- от 22.08.2016 № 11.2400.7130.16 в размере 575,25 руб.;

- от 29.08.2016 № 10.2400.7269 в размере 7 799,54 руб.;

- от 21.11.2016 № 14.7500.4121.16 в размере 890 213,57 руб. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафов, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В договорах заложены аналогичные условия об ответственности заказчика, а именно за задержку расчетов за выполненные работы подлежат начислению пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от суммы просроченной задолженности. 

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд установил, что расчет произведен истцом верно, в соответствии с условиями договора, учитывая 5 % ограничение.  Контррасчет неустойки ответчиком не представлен, ходатайство о снижении неустойки на основании статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.

Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком обязательств по своевременной оплате выполненных работ (оказанных услуг), требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 925 834,44 руб. с 30.06.2014 по 22.11.2019, неустойки размере 1 026 056,68 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению. В остальной части в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 200 000 руб.

Платежным поручением от 16.07.2019 № 2475 истцом уплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб. 

Учитывая результат рассмотрения настоящего спора (удовлетворение исковых требований в части) судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере 199 937 руб. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 04.07.2005, место нахождения: 660021, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-монтажная компания Сибири" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 06.05.2008, место нахождения: 125040, 

<

...>, эт/пом/ком 4/XXII/111) 47 635 042,36 руб. основного долга, 3 925 834,44 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.06.2014 по 22.11.2019, 1 026 056,68 руб. пени, а также 199 937 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Л.О. Петракевич