ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-115009/2023

04 сентября 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     21 августа 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  04 сентября 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Бугорской Н.А.,

судей  Горбачевой О.В., Пономаревой О.С.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Шалагиновой Д.С.,

при участии:  

от истца: ФИО1 по доверенности от 03.03.2023,

от ответчика: представитель к/у ФИО2 по доверенности от ФИО3 по доверенности от 17.05.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-20941/2024)  конкурсного управляющего открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" ФИО2 на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.05.2024 по делу                            № А56-115009/2023, принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью "Ленспецавтоматика"

к  открытому акционерному обществу по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"

о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Ленспецавтоматика" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" о взыскании 2 695 576,17 руб. суммы гарантийного удержания.

Решением Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.05.2024 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик в лице конкурсного управляющего обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить обжалуемое решение, ссылаясь на ошибочность выводов суда о наступлении срока оплаты гарантийного удержания. 

Конкурсный управляющий отмечает, что срок оплаты гарантийного удержания по условиям договора № 123-НВЛ-ЛСА от 04.03.2021 привязан к окончанию гарантийного срока. 

Гарантийный срок, в свою очередь, согласно п. 4.6 договора составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Между тем, истец не представил доказательств ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями договора, пятилетний срок. 

В этой связи, как полагает конкурсный управляющий, у ответчика не возникла обязанность по выплате гарантийного удержания.

Конкурсный управляющий также полагает, что судом не принято во внимание, что спорный договор заключен между сторонами после возбуждения в отношении ответчика дела о его несостоятельности (банкротстве).

В отзыве на апелляционную жалобу истец отметил, что 31.08.2021 ответчик признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, соответственно, с указанной даты срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств ответчика считается наступившим. 

В этой связи, судом сделаны правомерные выводы о наступлении срока оплаты гарантийного удержания по договору.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои позиции.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 04.03.2021 между ОАО «Метрострой» (подрядчик) и ООО «Ленспецавтоматика» (субподрядчик) заключен договор                   № 123-НВЛ-ЛСА (далее - договор) по выполнению комплекса работ по монтажу, выполнению пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию инженерных систем и комплексных автоматизированных систем диспетчерского управления на объекте строительства «Строительство участка Невско-Василеостровскон линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская». 

Согласно пункту 1.2. договора работы по договору выполнялись ООО «Ленспецавтоматика» во исполнение обязательств ОАО «Метрострой» по Государственному контракту от 23.09.2015 № КСМ-12/2015 перед                                   Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Дирекция транспортного строительства» (далее - заказчик). 

Расчеты по договору от 04.03.2021 № 123-НВЛ-ЛСА производились по специальным счетам согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора общая стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, ориентировочно составляет 345 666 587, 77 руб., в том числе НДС 20 %, - 57 611 097, 96 руб., в соответствии с пунктом 3.3 договора стоимость работ по договору будет откорректирована подрядчиком после получения от заказчика (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства») рабочей документации в полном объеме в случае внесения заказчиком изменений в состав расчета цены договора. 

При указанной корректировке стоимости к итоговой цене работ, рассчитанной на основании утвержденного заказчиком Ведомости договорной цены, применяется понижающий коэффициент 0,925. 

Кроме того, субподрядчик обязуется в указанном случае внести соответствующие изменения в акты формы № КС-2 и справки № КС-3 по ранее сданным работам. Согласно абзацам 3, 4 пунктом 3.3 договора цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. 

При уменьшении предусмотренного договором объема работы, Субподрядчик обязан уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы и применения понижающего коэффициента 0,925. 

Согласно пункту 3.4 договора основанием для оплаты выполненных субподрядчиком работ являются сформированные в соответствии с локальными сметами, подписанные Сторонами акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также счета и счета-фактуры, выставляемые субподрядчиком. При расчете за выполненные работы в актах о приемке выполненных работ (форма №КС-2) стоимость работ определяется в базовом уровне цен с пересмотром в текущий уровень цен с применением индексов пересчета. 

К итоговой сумме в акте выполненных работ (форма № КС-2) до начисления НДС применяется коэффициент снижения 0,925. Подрядчик обеспечивает приемку выполненных работ не позднее 15 рабочих дней с момента предъявления выполненных работ и передачи оформленных субподрядчиком актов форм № КС-2 и № КС-3 и иных документов, согласно пункту 3.4 договора. 

В соответствии с пунктом 3.5.3 договора оплата выполненных субподрядчиком работ производится в размере стоимости выполненных работ, за вычетом гарантийного удержания, в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости подлежащих оплате выполненных работ в отчетном периоде, в качестве гарантийного удержания, обеспечивающего надлежащее исполнение субподрядчиком обязательств по договору и суммы погашаемого в отчетном периоде аванса. 

Сумма гарантийного удержания подлежит отражению отдельной строкой в справке по форме КС-3 за соответствующий период.

Выплата сумм гарантийного удержания, определяемая в соответствии с пунктом 3.5.3 договора, производится субподрядчику по окончанию гарантийного периода в соответствии с пунктом 4.6 договора. 

При возврате гарантийных удержаний в порядке, установленном пунктом 3.5.3. договора, из общей суммы гарантийных удержаний, подлежащих возврату, удерживается сумма компенсаций обоснованных затрат подрядчика. 

Согласно пункту 4.6 договора срок предоставления гарантии качества выполненных работ - 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта                     сдачи-приемки выполненных работ. 

Как пояснил истец, работы по договору выполнены ООО «Ленспецавтоматика» полностью на сумму 79 286 692,58 руб. и приняты ОАО «Метрострой», что подтверждается первичными и закрывающими документами в период с 14.05.2021 по 08.10.2021. Общая стоимость работ, выполненных ООО «Ленспецавтоматика» по договору от 04.03.2021 № 123-НВЛ-ЛСА, составила                79 286 692,58 руб. 

При оплате работ ООО «Ленспецавтоматика» по договору ОАО «Метрострой» удержана сумма гарантийного удержания в размере 2 695 576,17 руб. 

25.09.2023 ООО «Ленспецавтоматика» в адрес конкурсного управляющего ОАО «Метрострой» ФИО2 направлена претензия от 22.09.2023 № 252К с требованием возврата суммы гарантийного удержания по договору от 04.03.2021 № 123-НВЛЛСА в размере 2 695 576,17 руб. (а также акт сверки расчетов между ООО «Ленспецавтоматика» и ОАО «Метрострой» по договору от 04.03.2021 № 123-НВЛ-ЛСА за период 01.01.2021 - 22.09.2023). 

Претензию № 252К ООО «Ленспецавтоматика» от 22.09.2023 с требованием возврата суммы гарантийного удержания по договору № 123-НВЛ-ЛСА от 04.03.2021  в размере 2 695 576,17 руб. ОАО «Метрострой» добровольно не удовлетворило, в связи с чем истец обратился с иском в суд.

Суд первой инстанции, согласившись с позицией истца о наступлении срока оплаты гарантийного удержания по Договору, удовлетворил исковые требования.

Исследовав повторно по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, представленные в материалах дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва, заслушав позиции сторон, апелляционная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу приведенной нормы, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Выплата сумм гарантийного удержания, определяемая в соответствии с пунктом 3.5.3 Договора, производится Субподрядчику по окончанию гарантийного периода в соответствии с п. 4.6 Договора.

Гарантийные удержания обеспечивают исполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору в части качества выполнения работ; исправления недостатков; устранения нарушений и дефектов, выявленных при приемке работ, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектной документации и СНиП; оформления и сдачи исполнительной документации, а также в части исполнения гарантийных обязательств Субподрядчика.

Подрядчик вправе за счет гарантийных удержаний компенсировать обоснованные; затраты, вызванные ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по качеству работ по договору, в частности: оплатить либо компенсировать расходы на устранение допущенных Субподрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в работах, компенсировать расходы на устранение нарушений и дефектов. 

При этом Подрядчик предварительно письменно уведомляет Субподрядчика о намерении привлечь для их выполнения третьих лиц и предоставляет ему разумный срок для исправления допущенных нарушений.

При возврате гарантийных удержаний в порядке, установленном п. 3.5.3. Договора, из общей суммы Гарантийных удержаний, подлежащих возврату, удерживается сумма компенсаций обоснованных затрат Подрядчика.

Согласно п. 4.6 Договора срок предоставления гарантии качества выполненных работ - 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Работы по договору № 123-НВЛ-ЛСА от 04.03.2021 г. были выполнены ООО «Ленспецавтоматика» полностью на сумму 79 286 692,58 руб. и приняты ОАО «Метрострой», что подтверждается первичными и закрывающими документами в период с 14.05.2021 по 08.10.2021.

Общая стоимость работ, выполненных ООО «Ленспецавтоматика» по договору № 123-НВЛ-ЛСА от 04.03.2021, составила 79 286 692,58 руб.

При оплате работ ООО «Ленспецавтоматика» по договору № 123-ИВЛ-ЛСА от 04.03.2021  ОАО «Метрострой» была удержана сумма гарантийного удержания в размере 2 695 576,17 руб., что подтверждается:

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.05.2021 по форме  КС-3 гарантийное удержание предусмотрено в размере 645 842.10 руб. (Акт о приемке выполненных работ  № 231ка/КС-2 по форме № КС-2 от 14.05.2021),

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 11.06.2021 по форме КС-3 гарантийное удержание предусмотрено в размере 180 879,33 руб. (Акт о приемке выполненных работ № 277/КС-2 по форме № КС-2 от 11.06.2021, Акт № 283/КС-2 по форме № КС-2 от 11.06.2021),

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 01.07.2021 по форме КС-3 гарантийное удержание предусмотрено в размере 600 782,76 руб. (Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 01.07.2021),

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 16.07.2021 по ферме КС-3 гарантийное удержание предусмотрено в размере  321 505,01 руб. (Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 16.07.2021),

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 17.08.2021 по форме КС-3 гарантийное удержание предусмотрено в размере 381 209,56 руб. (Акты о приемке, выполненных работ по форме № КС-2 от 17.08.2021),

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.08.2021 по форме КС-3 гарантийное удержание предусмотрено в размере 565 357,41 руб. (Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 25.08.2021).

Итого размер гарантийного удержания - 2 695 576,16 руб.

Как верно установлено судом первой инстанции, объект «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», введен в эксплуатацию 26.05.2018 (станция «Новокрестовская» - в настоящий момент станция «Зенит», станция «Улица Савушкина» - станция «Беговая»), что подтверждается открытыми данными, опубликованными в сети «Интернет», признается судом общедоступным фактом, не подлежащим отдельному доказыванию.

ООО «Ленспецавтоматика» в 2020-2021 гг. проводило дополнительные работы на данном объекте, работы выполнены в полном объеме и приняты Генподрядчиком ОАО «Метрострой» и Заказчиком СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», что подтверждается первичными документами, представленными в материалы дела (актами о приемке выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат).

Согласно пункту 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим.

Денежное обязательство по уплате 2 695 576,17 руб. гарантийного удержания по договору № 123-НВЛ-ЛСА от 04.03.2021 возникло у ответчика с момента подписания справки КС-3, а также акта КС-2. Срок исполнения указанного обязательства – по окончании пятилетнего гарантийного периода, предусмотренного пунктом 4.6 Договора.

Ответчик признан несостоятельным (банкротом) на основании решения арбитражного суда от 03.09.2021 по делу № А56-432/2019, резолютивная часть которого объявлена 31.08.2021, соответственно, у ответчика возникла обязанность по возврату суммы гарантийного удержания по договору № 123-НВЛ-ЛСА от 04.03.2021 г. в размере 2 695 576,17 руб.

Доказательств перечисления в адрес истца суммы гарантийного удержания ответчик в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

По изложенным мотивам выводы суда первой инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований следует признать правомерными, апелляционная жалоба конкурсного управляющего удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 16.05.2024 по делу №  А56-115009/2023  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

 

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд                         Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Н.А. Бугорская

Судьи

 

О.В. Горбачева

 О.С. Пономарева