Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

16. 02. 2018 года.                                            Дело № А40-223555/17-43-1944

Резолютивная часть решения объявлена 09. 02. 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16. 02. 2018 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " Радиотехнические Системы " (ОГРН 

<

***>)

к АО " НТЦ Промтехаэро " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 141 796 руб. 13 коп. – долга,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 11 от 31.12.2017 г.; от ответчика – не явился.

Изучив, имеющиеся в деле, документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск  заявлен о взыскании 3 141 796 руб. 13 коп. – долга, на основании статей 307, 309, 758 ГК РФ. 

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; сообщил о том, что истец не намерен заключать мировое соглашение с истцом на предлагаемых условиях на данной стадии процесса, каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, представил отзыв на исковое заявление, в котором сообщил о намерении заключить с истцом мировое соглашение без указания каких-либо возражений против предъявленного требования; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва (с изложением возражений по существу заявленного требования) и представителя ответчика.

Между ООО «Радиотехнические Системы» (Истец, Подрядчик) и АО «НТЦ Промтехаэро» (Ответчик, Заказчик) заключен Договор 236/05.6/2015 от 22.10.2015 года, по которому Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, во исполнение договора № 192/05.6/25015 от 22.10.2015 года, заключенного ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Генеральный подрядчик) и Заказчиком, выполнить проектно-изыскательские работы (Работы) по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Экимчан, включая оснащение системой ближней навигации моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Экимчан, Амурская область», в части оснащения системой ближней навигации» (Объект).

В соответствии с п. 2.1. Договора стоимость Работ в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 4 к Договору) составляет 5 592 277,00 рублей.

Согласно п. 2.1.1. Договора стоимость работ по Этапу № 1 включает в себя стоимость инженерных изысканий для разработки проектной и рабочей документации; стоимость разработки проектной документации и составляет 4 488 280,13 руб.

Оплата работ по Этапу № 1 осуществляется в следующем порядке: 30 % от стоимости работ по Этапу № 1 в размере 1 346 484,04 руб. Заказчик оплачивает после получения, выставленного Подрядчиком счета при условии получения финансирования на эти цели от Генерального подрядчика в течение 10 банковских дней после зачисления соответствующих сумм на счет Заказчика (п. 2.3.1. Договора); 40 % от стоимости работ по Этапу № 1 в размере 1 795 312,05 руб. Заказчик оплачивает после получения счета, выставленного Подрядчиком в соответствии с п. 4.6. Договора (после получения от Заказчика уведомления о начале экспертных работ в ФАУ «Главгосэкспертиза России») при условии получения финансирования на эта цели от Генерального подрядчика в течение 10 банковских дней после зачисления соответствующих сумм на счет Заказчика (п. 2.3.2. Договора);

Окончательный расчет по Этапу № 1 в размере 1 346 484,04 руб. осуществляется Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу № 1 в соответствии с п. 4.10. (после получения подрядчиком от Заказчика уведомления о приемке Заказчиком и Генеральным подрядчиком проектной документации и материалов инженерных изысканий, оформленных в соответствии с положительным заключением Экспертизы) Договора после получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета в течение 10 банковских дней после получения Заказчиком соответствующих денежных средств от Генерального подрядчика, но не позднее 12 месяцев с даты, когда в соответствии с Договором работы по Этапу № 1 должны быть выполнены Подрядчиком, (п. 2.3.3. Договора).

Согласно п. 2.1.2. Договора стоимость работ по Этапу № 2 включает в себя стоимость разработки рабочей документации и составляет 1 103 996,87 руб.

Оплата работ по Этапу № 2 осуществляется в следующем порядке:

30 % от стоимости работ по Этапу № 2 в размере 331 199,06 руб. Заказчик оплачивает после получения выставленного Подрядчиком счета в соответствии с п 4.7. Договора при условии получения финансирования на эти цели от Генерального подрядчика в течение 10 банковских дней после зачисления соответствующих сумм на счет Заказчика (п. 2.3.4. Договора);

Окончательный расчет по Этапу № 2 в размере 772 797,81 руб. осуществляется Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу № 2 в соответствии с п. 4.11. (после получения подрядчиком от Заказчика уведомления о приемке Заказчиком и Генеральным подрядчиком рабочей документации) Договора после получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета в течение 10 банковских дней после получения Заказчиком соответствующих денежных средств от Генерального подрядчика, но не позднее 12 месяцев с даты, когда в соответствии с Договором работы по Этапу № 2 должны быть выполнены Подрядчиком (п. 2.3.5. Договора);

Условиями Договора предусмотрена поэтапная сдача результатов Работ.

По смыслу ст. 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

13.01.2017 года сторонами был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу № 1 Договора, подтверждающий оплату со стороны Заказчика стоимости работ, установленных в п. 2.3.1. Договора и обязательство Заказчика осуществить окончательный расчет с Подрядчиком в соответствии с п. 2.3.2.  - 2.3.3. Договора.

10.07.2017 года сторонами был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ от по Этапу № 2 Договора, подтверждающий оплату со стороны Заказчика стоимости работ, установленных в п. 2.3.4. Договора и обязательство Заказчика осуществить окончательный расчет с Подрядчиком в соответствии с п. 2.3.5. Договора.

Между тем, выполненные работы Ответчиком не оплачены, задолженность составляет 3 141 796 руб. 13 коп.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в сумме 3 141 796 руб. 13 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на Ответчика, в  соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с АО " НТЦ Промтехаэро " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Радиотехнические Системы " (ОГРН 

<

***>) 3 141 796 руб. 13 коп. – долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 38 709 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов