Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46791/2018

28 января 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  28 января 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "УНР-41" (адрес:  Россия 190121, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>; Россия 197198, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> (Адвокатская консультация №11), ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (адрес:  Россия 199106, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/52; Россия 197374, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>, лит. Ф, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ПОТЕНЦИАЛ" (адрес:  Россия 196066, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР А, ОГРН:  

<

***>)

о взыскании и встречный иск ответчика к истцу 

 

при участии

-от истца: ФИО2 по доверенности от 18.10.17,

-от ответчика: ФИО3 по доверенности от 21.09.18,

-от третьих лиц: ФИО4 по доверенности от 01.06.18, 

 

установил:

ООО "УНР-41" предъявило иск о взыскании с ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 16 103 941 руб. 30 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора подряда №ПСК-УНР-ЭР-20/07 от 20.07.15.

Ответчик иск признал частично и предъявил встречный иск о взыскании с учетом уточнения 116 609 руб. 44 коп. ущерба от повреждения дверей и кабеля, 109 152 руб. 79 коп. расходов по оплате электроэнергии, 1 069 386 руб. 29 коп. задолженности по оплате материалов, 4 871 155 руб. 01 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ и 2 000 000 руб. 00 коп. штрафа, наложенного заказчиком.

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст.132 АПК РФ.

Определением от 05.09.18 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ООО "ПОТЕНЦИАЛ".

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор подряда №ПСК-УНР-ЭР-20/07 от 20.07.15.

Согласно п.1.1 договора подрядчик – ЗАО "УНР-41" обязался выполнить работы по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков, установке внутриквартирных дверных блоков многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.9, лит. Ж, первая очередь строительства (корпус 1, подземная автостоянка 1), секция №3.

Стоимость работ с учетом дополнительного соглашения №4 составляет 64 833 265 руб. 43 коп. 

Срок начала работ – 20.07.15.

Срок окончания работ – 30.04.16.

Подрядчик выполнил работы в период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. и передал их генподрядчику – ООО «ПСК».

Оплата произведена частично. Истец просит взыскать задолженность по оплате выполненных работ по двусторонним актам в размере 10 910 427 руб. 46 коп. 

Генподрядчик представил акт зачета взаимных требований от 02.05.17, составленный между ООО "ПОТЕНЦИАЛ", ООО «ПСК» и ООО "УНР-41", согласно которому обязательство ООО «ПСК» по оплате задолженности за выполненные работы в размере 7 704 467 руб. 21 коп. прекращено подписанием данного акта. Следовательно, остаток задолженности генподрядчика составляет 3 205 959 руб. 94 коп., которая подлежит взысканию.

ООО "УНР-41" просит взыскать 5 193 513 руб. 85 коп. по односторонним актам формы КС-2, КС-3, переданных генподрядчику 15.09.17. Генподрядчик факт выполнения этих работ подрядчиком отрицает, ссылаясь на мотивированный отказ от подписания указанных актов письмом от 21.09.17 исх. №1912 и выполнение этих работ третьими лицами. С учетом изложенного, суд считает, что выполнение работ на сумму 5 193 513 руб. 85 коп. подрядчиком не доказано.

По встречному иску подрядчик признает задолженность по оплате электроэнергии на сумму 109 152 руб. 79 коп. и размер ущерба, причинённого повреждением кабеля и дверей, в сумме 116 609 руб. 44 коп.

Задолженность по оплате поставленных материалов в размере 1 069 386 руб. 29 коп. подтверждается товарной накладной №775 от 28.09.16 и актом сверки взаимных расчетов от 31.12.16.

Начисленные генподрядчиком пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 871 155 руб. 01 коп. явно несоразмерны последствиям нарушения обязательства. Фронт работ не был своевременно предоставлен генподрядчиком, поэтому работы приостанавливались. С учетом заявленного ходатайства о применении ст.333 ГК РФ суд уменьшает неустойку до 2 300 000 руб. 00 коп.

Заявленный по встречному иску штраф в размере 2 000 000 руб. 00 коп. фактически генподрядчиком не уплачен, поэтому право требования уплаты данного штрафа у него не возникло.

На основании изложенного суд считает, что встречный иск подлежит удовлетворению частично, а именно: с ООО "УНР-41" подлежит взысканию в пользу ООО «ПСК» 116 609 руб. 44 коп. ущерба, 109 152 руб. 79 коп. расходов по оплате электроэнергии, 1 069 386 руб. 29 коп. стоимости материалов и 2 300 000 руб. 00 коп. пеней, всего 3 595 148 руб. 52 коп., а также 2 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Государственная пошлина в размере 38 976 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ООО "УНР-41" в доход федерального бюджета.

Суд производит зачет встречных однородных требований.

В порядке зачета с ООО "УНР-41" подлежит взысканию в пользу ООО «ПСК» 352 158 руб. 58 коп.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "УНР-41" по первоначальному иску 3 205 959 руб. 94 коп. задолженности и 39 030 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УНР-41" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" по встречному иску 3 595 148 руб. 52 коп., из них: 116 609 руб. 44 коп. ущерба, 109 152 руб. 79 коп. расходов по оплате электроэнергии, 1 069 386 руб. 29 коп. стоимости материалов и 2 300 000 руб. 00 коп. пеней, а также 2 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УНР-41" в доход федерального бюджета 38 976 руб. 00 коп. государственной пошлины по встречному иску.

Произвести зачет встречных требований.

В порядке зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УНР-41" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 352 158 руб. 58 коп.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.