5/2019-106042(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-452/2019

г. Владивосток

22 июля 2019 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску негосударственного  учреждения здравоохранения "Узловая больница на станции Уссурийск  открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 27.07.2004)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвестРесурс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 05.12.2012)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  "ДальИнвестРесурс" не позднее двух месяцев с даты принятия настоящего  решения безвозмездно устранить недостатки работ, выразившиеся в  нарушении обязательных требований пожарной безопасности при монтаже  внешнего фасада здания поликлиники, выполненных по договору  генерального подряда № 01-11/2017 от 27.11.2017 года путем:  

- предоставления негосударственному учреждению здравоохранения  "Узловая больница на станции Уссурийск открытого акционерного  общества "Российские железные дороги" Технического Свидетельства  

Минстроя России на строительную продукцию, примененную к фасаду  здания поликлиники № 1, подтверждающую возможность применения  НФС (навесной фасадной системы) в здании поликлиники 2-ой степени  огнестойкости, в соответствующем климатическом районе и  месторасположении, либо путем:  

- производства работ по демонтажу навесной фасадной системы,  путем исключения паропроницаемой мембраны Изоспан-А группы  горючести Г3 из состава НФС, с предоставлением Заказчику Технического  Свидетельства Минстроя России на строительную продукцию,  примененную в ходе демонтажа фасада здания поликлиники № 1  негосударственного учреждения здравоохранения "Узловая больница на  станции Уссурийск открытого акционерного общества "Российские  железные дороги", подтверждающую возможность применения НФС  (навесной фасадной системы) в здании поликлиники 2-ой степени  огнестойкости, в соответствующем климатическом районе и  месторасположении.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ДальИнвестРесурс" в пользу негосударственного учреждения  здравоохранения "Узловая больница на станции Уссурийск открытого  акционерного общества "Российские железные дороги" 6 000 рублей  расходов по оплате государственной пошлины по иску, 42 700 рублей  расходов по оплате услуг эксперта.  

Возвратить негосударственному учреждению здравоохранения  "Узловая больница на станции Уссурийск открытого акционерного  общества "Российские железные дороги" из федерального бюджета 84 592  рубля государственной пошлины по иску, уплаченной по платежному  поручению от 10.01.2019 № 13.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную  силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 27.05.2019 2:28:44

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна