4763/2021-419364(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53098/2021

14 сентября 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

в составе: судьи Гуляева С.Б., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей»  к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области  

о признании незаконным и отмене постановления от 04.06.2021 по делу об  административном правонарушении № 047/04/9.21-907/2021  

при участии: от заявителя – ФИО2 по доверенности от 12.01.2021 

от заинтересованного лица – ФИО3 по доверенности от 11.01.2021  

у с т а н о в и л:

Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей»  (далее – Предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления  Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (далее –  УФАС, Управление) от 04.06.2021 по делу об административном правонарушении   № 047/04/9.21-907/2021.  

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд завершил предварительное судебное  заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.  

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования  по основаниям, изложенным в заявлении.  

Заинтересованное лицо против удовлетворения требований возражало по  основаниям, изложенным в отзыве.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, 17.08.2020 между ИП ФИО4 и  Предприятием заключён договор № ОД-20/Д-319 от 17.08.2020 об осуществлении  технологического присоединения (далее – Договор) к электрическим сетям объекта,  расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, пл.  Привокзальная, д. 2.  

17.08.2020 ИП ФИО4 осуществлена оплата счёта по заявке № 20/3-319 от  03.08.2020 осуществления технологического присоединения, что свидетельствует о  заключении договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям.  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанных в  пункте 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств  

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ   № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861), установлен пунктом 16 Правил № 861.  

Т.е. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению  составляет 6 месяцев со дня заключения договора (оплаты счёта), соответственно, срок  выполнения Предприятием обязательств по данному договору – 17.02.2021.  

Управление усмотрело в действиях Предприятия нарушение пункта 16 Правил №  861, ввиду чего 19.05.2021 составило протокол по делу № 047/04/9.21-907/2021 об  административном правонарушении.  

С учетом наличия постановления о привлечении к административной  ответственности за аналогичные правонарушение, Управление привлекло Предприятие по  ч. 2 ст. 9.21 КоАП и назначило штраф в размере 600 000 руб.  

Не согласившись с постановлением УФАС от 04.06.2021 по делу об  административном правонарушении № 047/04/9.21-907/2021, Предприятие обратилось в  арбитражный суд с настоящим заявлением.  

Оценив позиции сторон и представленные в материалы дела доказательства, суд  приходит к следующему.  

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной  монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или  установленного порядка подключения (технологического присоединения) к  магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам,  электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или  централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и  водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта  электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче  электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным  владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их  водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным  сетям влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от ста тысяч до  пятисот тысяч рублей.  

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного  частью 1 статьи 9.21 влечет наложение административного штрафа на юридических лиц -  от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого  хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов  по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое  присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и носит однократный характер.  

Технологическое присоединение проводится на основании договора об  осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства,  заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный  договор является публичным.  

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им  федеральным органом исполнительной власти. Порядок технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определен в  Правилах № 861.  

В соответствии с пунктом 18 Правил технического присоединения мероприятия по  технологическому присоединению включают в себя:  

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их  согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского  управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических  системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с  системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в  технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со  смежными сетевыми организациями;  

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно  обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного  участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за  исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о  градостроительной деятельности разработка проектной документации не является  обязательной;  

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая  осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих  устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а  также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию  (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке,  предусмотренном Правилами технологического функционирования  электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства  Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил  технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила  технологического функционирования электроэнергетических систем);  

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в  соответствии с разделом IX настоящих Правил;  

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя,  сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных,  модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому  присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств  релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в  работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами  технологического функционирования электроэнергетических систем.  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанным в  пункте 18 Правил № 861, определен в пункте 16 указанных правил: договор должен  содержать следующие существенные условия: срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не  может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34  настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к  электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и  если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения  до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые  энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках  городского типа и не более 500 метров в сельской местности.  

В рассматриваемой ситуации 17.08.2020 между ИП ФИО4 и  Предприятием был заключен Договор, в соответствии с условиями которого Предприятие  должно было осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к  электрическим сетям в срок до 17.02.2021.  

Однако на момент подачи заявления в Управление мероприятия по  технологическом присоединению, указанные в пункте 18 Правил № 861 не выполнены со  стороны Предприятия.  

Учитывая изложенное, суд полагает, что Управление пришло к правильному  выводу о нарушении Обществом требований пункта 16 Правил № 861.  

Поскольку Общество ранее привлекалось к административной ответственности по  статье 9.21 КоАП РФ, Управление правомерно квалифицировало действия Общества по  части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.  

Факт совершенного правонарушения подтверждается протоколом от 19.05.2021 по  делу № 047/04/9.21-907/2021 об административном правонарушении.  

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в  совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него  имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ  предусмотрена административная ответственность, однако данным лицом не были  приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Виновность юридического лица считается установленной, если доказано событие  правонарушения и лицом, привлекаемым к ответственности, не заявлены возражения об  отсутствии возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  предусмотрена административная ответственность, либо о принятии всех зависящих от  него мер по их соблюдению.  

Обстоятельства данного дела свидетельствуют о том, что Предприятием не были  приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований указанных нормативных  документов.  

С учетом изложенного, арбитражный суд приходит к выводу о доказанности  материалами дела события административного правонарушения, ответственность за  которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, и вины Предприятия в его  совершении.  

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности и  обстоятельств, исключающих производство по делу об административном  правонарушении, судом не установлено. Срок давности привлечения к ответственности на  момент вынесения постановления не истек.  

Исходя из конкретных обстоятельств дела и допущенного Предприятием  нарушения, суд не усматривает исключительных оснований для применения статьи 2.9  КоАП РФ.  

Наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб. назначено  Предприятию в пределах санкции части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.  

Вместе с тем, суд считает возможным изменить оспариваемое постановление в  части назначения наказания, снизив размер назначенного Предприятию  административного штрафа до 300 000 руб. исходя из следующего.  

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных  обстоятельств, связанных с характером совершенного административного  правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением  привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган,  должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо  жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных  правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в  размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного  соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если  минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не  менее ста тысяч рублей.  

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2  настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее  

половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для  юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего  Кодекса (часть 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ).  

Оценив обстоятельства дела, принимая во внимание характер правонарушения,  конституционный принцип соразмерности административного наказания, арбитражный  суд полагает, что назначенное Предприятию оспариваемым постановлением наказание  (штраф в размере 600 000 руб.) является чрезмерным, не соответствует тяжести  совершенного правонарушения и носит неоправданно карательный характер.  

Учитывая изложенное, суд считает возможным снизить размер назначенного  Предприятию штрафа до 300 000 рублей.  

По мнению арбитражного суда, наказание в указанном размере будет являться  справедливым и соразмерным характеру и тяжести совершенного Предприятием  правонарушения, отвечает принципам разумности и неотвратимости юридической  ответственности и обеспечивает достижение целей административного наказания,  предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований надлежит отказать. 

Руководствуясь статями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Изменить постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по  Ленинградской области от 04.06.2021 о наложении штрафа по делу об административном  правонарушении № 047/04/9.21-907/2021 в части размера наказания, снизив размер штрафа  до 300 000 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение десяти дней со дня принятия.  

Судья Гуляев С.Б. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.08.2020 8:11:39

Кому выдана Гуляев Сергей Борисович