Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-26809/2020

01 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  08 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  01 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью  "РВК стройинжиниринг" (адрес:  Россия 195213, Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков дом 25 литера а, помещение 2н кабинет 4, ОГРН: 1137847041397)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  "СК-Континент" (адрес:  Россия 195297, Санкт-Петербург, Тимуровская улица дом 20, квартира 6, ОГРН:  1157847389754)

о взыскании 1 497 003 руб. 

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: представитель ФИО2 (доверенность)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "РВК стройинжиниринг" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СК-континент" (далее – ответчик) о взыскании 1 497 003 руб. неотработанного аванса, перечисленного по договору субподряда от 28.08.2019 №2808/РВК.  

Ответчик в иске просил отказать, ссылаясь на выполнение работ. 

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, возражений на отзыв  не представил. 

В соответствии со ст. 123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя истца.

Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между истцом и ответчиком был заключен договор субподряда №2808/РВК от 28.08.2019.

В соответствии с условиями договора ответчик обязался выполнить комплекс работ по устройству усиления газона, устройство площадок под хранение соломы (12 площадок), устройство под хранение (8 площадок) на объекте: цех по производству компоста в составе «Тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов площадью до 3.9 Га, в том числе компоста для их выращивания объемом производства до 50 тонн» по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачевское городское поселение. Работы должны быть выполнены в срок не позднее 30.12.2019. Стоимость работ составляет 1 497 003 руб. 

Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами с подписанием акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3. 

Истец 12.12.2019 перечислил ответчику предварительную оплату в размере  1 497 003 руб., что подтверждается платежным поручением №171. 

По утверждению истца ответчик не исполнил работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором, в связи с чем у него образовалась задолженность в виде неотработанного аванса в сумме 1 497 003 руб. 

Истец направил в адрес ответчика претензию от 20.01.2020.

Неисполнение требований послужило основанием для обращения истца с иском в суд. 

В соответствии с пунктом  1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата выполненных подрядчиком работ в силу статьи 746 ГК РФ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Ответчик представил акт выполненных работ №61 от 10.12.2019, подписанный сторонами на сумму 1 497 003 руб.

Данный документ подтверждает выполнение ответчиком работ для истца в полном объеме и сроки, предусмотренные договором. 

В связи чем суд, полагает в удовлетворении иска отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                        Евдошенко А.П.