Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-38660/2025

19 сентября 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 сентября 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  19 сентября 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецов М.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ООО "ТЕХНО СТРАНА" (адрес:  Россия 194292, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. 5-Й ВЕРХНИЙ, Д. 1, К. 5 ЛИТЕРА А, ОФИС 310, ОГРН:  );

ответчик: :ООО "СК "КОСМОС" (адрес:  Россия 199106, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург,, линия 19-Я В.О., д. 32 к. 6 литера Л, помещ. 3-н офис 413, р.м. 2, ОГРН:  );

при участии согласно протоколу

установил:

ООО «ТЕХНО СТРАНА» обратилось в суд с иском к ООО «СК «Космос» об обязании Обязать Ответчика исполнить условия Договора подряда на выполнение монолитных работ при строительстве Морского отгрузочного терминала по отгрузке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга №0402-09-ТС/24 от 02.04.2024 г. в части предоставления документов и в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда по настоящему делу предоставить ООО «ТЕХНО СТРАНА» оригиналы следующих документов, оформленных   в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и подписанных Ответчиком: Акт выполненных работ за период с 02.04.2024 г. по 11.06.2024 г.; Универсальный передаточный документ за период с 02.04.2024 г. по 11.06.2024 г.

Также истец просил за неисполнение решения Арбитражного суда в указанный срок установить судебную неустойку Ответчику в размере, определенном на усмотрение Арбитражного суда.

Истец уточнил требования, просил: 1. Обязать Ответчика исполнить условия Договора подряда на выполнение монолитных работ при строительстве Морского отгрузочного терминала по отгрузке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга №0402-09-ТС/24 от 02.04.2024 г. в части предоставления документов и в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда по настоящему делу предоставить ООО «ТЕХНО СТРАНА» оригиналы следующих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписанных Ответчиком: Акт выполненных работ за период с 02.04.2024 г. по 11.06.2024 г.; Универсальный передаточный документ за период с 02.04.2024 г. по 11.06.2024 г. 2. За неисполнение решения Арбитражного суда в указанный срок установить судебную неустойку Ответчику в размере 2 898 500 рублей. 3. Взыскать с Ответчика уплаченную госпошлину в размере 50 000 рублей.

Уточнения приняты судом.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в заседание своего представителя не направил, ввиду чего судебное заседание проведено в его отсутствие по правилам статьи 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, арбитражный суд установил следующее.

Между ООО «ТЕХНО СТРАНА, Заказчик, Истец, и ООО «СК «КОСМОС», Подрядчик, Ответчик, был заключен Договор подряда на выполнение монолитных работ при строительстве Морского отгрузочного терминала по отгрузке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга №0402-09-ТС/24 от 02.04.2024 г. (далее - Договор), согласно которому Ответчик обязуется выполнить по заданию Истца комплекс монолитных работ при строительстве Морского отгрузочного терминала по отгрузке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга (Объект).

ООО «ТЕХНО СТРАНА» перечислило ООО «СК «Космос» денежные средства в общем размере 10 966 150 рублей, что подтверждается платежными поручениями №1125 от 05.04.2024 г., №1342 от 22.04.2024 г., №1415 от 25.04.2024 г., №1474 от 06.05.2024 г., №1499 от 06.05.2024 г., №2564 от 14.05.2024 г., №1671 от 24.05.2024 г., №1709 от 28.05.2024 г., №1788 от 06.06.2024 г.

Ответчиком выполнены работы на общую сумму 8 695 500  рублей. 

Истцом и Ответчиком были достигнуты договоренности о прекращении Договора, в связи с чем ООО «ТЕХНО СТРАНА» в адрес ООО «СК «Космос» направило уведомление исх.№ 124/24 от 31.05.2024 г. о прекращении Договора с указанием, что Истец просит Ответчика считать Договор расторгнутым с 20:00 часов 11.06.2024 г., а в части исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами до указанного момента, Договор сохраняет свое действие до полного и надлежащего их исполнения Сторонами.

Ссылаясь на то, что по состоянию на 31.03.2025 г. ООО «СК «Космос» так и не исполнило принятые на себя обязательства по передаче Истцу учетных документов и УПД, Истцом в адрес Ответчика направлена претензия исх. №234/24 от 06.11.2024 г. с требованием предоставить в срок до 11.11.2024 г. оформленные в соответствии с действующим законодательством и подписанные ООО «СК «Космос» учетные документы, подтверждающие выполнение Ответчиком Работ на общую сумму 8 695 500,00 рублей - Акты приемки выполненных работ и универсальные передаточные документы (УПД) за соответствующие отчетные периоды. В соответствии с отчетом об отслеживании отправлений, указанная претензия была доставлена получателю по адресу, указанному в ЕГРЮЛ в качестве места нахождения Ответчика. Однако, документ не был получен ООО «СК «Космос» и впоследствии по истечении срока хранения был возвращен отправителю, а после - передан на временное хранение в отделение Почты России.

Несмотря на предпринятые меры, договоренности между Сторонами достигнуты не были. Ответчик продолжает уклоняться от предоставления учетных документов, что явилось основанием для обращения в суд.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

Учитывая, что доказательств исполнения обязательств ответчиком не представлено, требование подлежит удовлетворению. 

Согласно ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор также вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Учитывая длительное уклонение Ответчика от исполнения принятой на себя обязанности по предоставлению учетных документов и УПД, Истец полагает разумным сроком исполнения обязательства 7 (семь) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда по настоящему делу.

Кроме того, принимая во внимание длительное непредоставление учетной документации, финансовые риски, которые легли на Истца вследствие такого непредоставления, установить судебную неустойку в сумме 2 898 500рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать ООО «СК «Космос» исполнить условия Договора подряда на выполнение монолитных работ при строительстве Морского отгрузочного терминала по отгрузке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга №0402-09-ТС/24 от 02.04.2024 г. в части предоставления документов и в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда по настоящему делу предоставить ООО «ТЕХНО СТРАНА» оригиналы следующих документов, подписанных ООО «СК «Космос»: Акт выполненных работ за период с 02.04.2024 г. по 11.06.2024 г.; Универсальный передаточный документ за период с 02.04.2024 г. по 11.06.2024 г.

За неисполнение решения Арбитражного суда в указанный срок установить судебную неустойку ООО «СК «Космос» в размере 2 898 500 рублей.

Взыскать с ООО «СК «Космос» ИНН 

<

***>, в пользу ООО «ТЕХНО СТРАНА» ИНН 

<

***>, 50 000 рублей расходов по пошлине.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Кузнецов М.В.