АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, 

<

...> http://www.kaliningrad.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А21- 12492 /2024

22 декабря 2025 года

г. Калининград

Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2025 года. Решение в полном объёме изготовлено 22 декабря 2025года. Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Глухоедова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарём Гулецкой О.В., при участии представителей по доверенности от истца ФИО1 – генерального директора (участие в судебном заседании путём использования системы веб-конференции), от ответчика ФИО2, рассмотрел в закрытом судебном заседании общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМЛЕНД» (адрес: 198195, 

<

...>, лит. А, оф. 313, ОГРН: 

<

***>; деле – Общество) к акционерному обществу «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (адрес: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. площадь Гуськова, д.1; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; далее – АО «ПСЗ «Янтарь», Завод) о взыскании 34 396 385,14 рублей долга по Договору № 17705596339160001951/1/23700 от 15.10.2018, неустойку за несвоевременную оплату в размере 490 984 рубля 18 копеек, с учетом уточнений от 01.10.2025, и

встречное заявление акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» к обществу с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМЛЕНД» о взыскании пени по договору в размере 33 303 200,23 руб. неустойки за нарушение сроков работ по Договору № 17705596339160001951/1/23700 от 15.10.2018.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 07.04.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных

требований относительно предмета спора, привлечено Министерство обороны Российской Федерации. Определением Арбитражного суда Калининградской области от 08.09.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Министерство), Министерство обороны Российской Федерации исключено из состава третьих лиц.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2025 встречное исковое заявление принято судом к рассмотрению.

Впоследствии от Общества «ФЕРРУМЛЕНД» поступило уточнение исковых требований в связи с добровольной оплатой основного долга.

Рассмотрев заявление истца о частичном отказе от исковых требований, суд считает, что следует принять отказ от иска в части и прекратить производство по делу в части взыскания основного долга.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия решения по делу отказаться от иска полностью или частично.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Учитывая, что указанное действие истца не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, отказ от исковых требований в указанной части судом принят.

В судебном заседании истец по первоначальному иску поддержал заявленные требования в полном объеме, во встречном иске просил отказать по доводам, изложенным в отзыве. Ответчик по первоначальному иску поддержал доводы отзыва, просил удовлетворить встречный иск.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 04.12.2025 года объявлялся перерыв до 08.12.2025 года до 08 часов 40 минут.

Заслушав представителей сторон, исследовав доказательства по делу, суд

УСТАНОВИЛ:

Между Заводом (Заказчик) и Обществом (Исполнитель) заключен Договор № 17705596339160001951/1/23700 от 15.10.2018г. (далее – Договор) по

оборудованию помещений повышенной комфортности судна зав. № 04370 проекта 23700.

Согласно п.1.1 Договора, предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работ по комплексному оборудованию судовых помещений повышенной комфортности судна с использованием собственных материалов и оборудования на заказе зав. № 04370 пр. 23700 в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Согласно п. 1.4 Договора, срок начала выполнения работ: октябрь 2018 года, срок окончания работ март 2019 года.

В соответствие с пунктом 1.5 Договор, Договор заключен в целях выполнения Государственного контракта № 16411.4432017.09.04 от 15.12.2016.

Сторонами заключено Дополнительное соглашение № 4 от 10.07.2020, которым изменен пункт 1.4 Договора, и изложен в следующей редакции: «1.4. Срок начала выполнения работ - октябрь 2018 года, срок окончания работ: 120 календарных дней с момента передачи Заказчиком исполнителю по акту приема-передачи всех предусмотренных техническим заданием судовых помещений для выполнения монтажных работ, а также соблюдения графика авансовых платежей согласно п. 2.6».

Сторонами заключено Дополнительное соглашение № 6 от 29.09.2022 к Договору, предметом которого являлись дополнительные работы, выполняемые сверх объема работ, предусмотренных основным Договором.

Согласно пункту 1 Дополнительного соглашения № 6, в связи с занижением уровня подволоков в подготовленных к комплексному оборудованию судовых помещений коридоров № 15, 16, кают-компании конференц-зала, Стороны договорились о выполнении дополнительных работ по корректировке стеновых каркасов и панелей зашивки в соответствии с плановой калькуляцией затрат (Приложение № 1 к настоящему соглашению).

Указанные дополнительные работы выполняются сверх объема работ по договору, предусмотренных ведомостью исполнения, являющейся Приложением № 3 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 5 от 15.12.2021.

Согласно пункту 2 Дополнительного соглашения № 6, стоимость дополнительных работ определена как ориентировочная (предельная) и составляет

10 963 434,94 рубля. Пунктом 5 Дополнительного соглашения № 6, срок выполнения дополнительных работ - не позднее 90 календарных дней с момента получения аванса, предусмотренного пунктом 2 Дополнительного соглашения. Работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 6, Исполнителем выполнены в полном объёме.

В адрес Заказчика письмом исх. № 517-ч от 16.07.2024 направлены подписанные со стороны Общества Дополнительное соглашение № 16 от 16.07.2024 о переводе стоимости дополнительных работ по Дополнительному соглашению № 6 в фиксированную, акт сдачи-приемки работ от 16.07.2024 по Дополнительному соглашению № 6, а также расчетные материалы, обосновывающие размер фиксированной стоимости работ.

Фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашение № 6 предложена в Дополнительном соглашении № 16 от 16.07.2024 в размере 10 801 079,69 рублей.

С учётом перечисленного аванса в размере 8 770 747,95 рублей, за выполненные работы по Дополнительному соглашению № 6 подлежат к оплате 2 030 331,74 рублей.

Сторонами также заключено Дополнительное соглашение № 9 от 10.11.2023, предметом которого являлись дополнительные работы, выполняемые сверх объёма работ, предусмотренных основным Договором.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 9, стороны пришли к соглашению о внесении изменения в Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ по комплексному оборудованию судовых помещений повышенной комфортности судна проект 23700», дополнив его Дополнением № 3 к Техническому заданию. Согласно п.2 Дополнительного соглашения № 9, в соответствии с Дополнением № 3 к Техническому заданию на выполнение работ по комплексному оборудованию судовых помещений повышенной комфортности судна проект 237000, Стороны договорились о выполнении дополнительных работ по разработке проектной документации согласно Приложения № 1 к Дополнению № 3 Технического задания.

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 9, указанные дополнительные работы выполняются сверх объема работ по Договору. Согласно п.4

Дополнительного соглашения № 9, стоимость дополнительных работ определена как ориентировочная и составляет 15 151 772,92 рублей.

Работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 9, Исполнителем выполнены в полном объёме.

В адрес АО «ПСЗ «Янтарь» письмом исх. № 517-ч от 16.07.2024 направлены подписанные со стороны ООО «Феррумленд» Дополнительное соглашение № 15 от 16.07.2024 о переводе стоимости дополнительных работ по Дополнительному соглашению № 9 в фиксированную, акт сдачи-приемки работ от 16.07.2024 по Дополнительному соглашению № 9, а также расчетные материалы, обосновывающие размер фиксированной стоимости работ.

Фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашение № 9 предложена в Дополнительном соглашении № 16 от 16.07.2024г. в размере 19 784 626,55 рублей. С учётом перечисленного аванса в размере 12 121 418,34 рубля, за выполненные работы по Дополнительному соглашению № 9 подлежат к оплате 7 663 208,21 рубля.

Сторонами также заключено Дополнительное соглашение № 10 от 10.11.2023, предметом которого являлось уточнение стоимости работ по основному Договору. Согласно п.1 Дополнительного соглашения № 10, п.2.1 основного Договора изложен в новой редакции, согласно которой ориентировочна стоимость работ по Договору составляет 196 502 000 рублей.

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 10, окончательный расчет по Договору с учетом выплаченного аванса производится Заказчиком после подписания Дополнительного соглашения о переводе цены работ из ориентировочной в фиксированную, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ по Договору, в размере, указанном в Дополнительном соглашении по фиксированной цене.

К дополнительному соглашению по переводу цены в фиксированную, Исполнитель в обоснование фактических затрат предоставляет Заказчику РКМ оформленные по формам Приказа ФАС от 16.12.2022г. № 995/22, оборотно-сальдовую ведомость по сч.20 20 и прочие обосновывающие документы по запросу Заказчика.

Работы, предусмотренные основным Договором, Исполнителем выполнены

в полном объеме.

В адрес АО «ПСЗ «Янтарь» письмом исх. № 517-ч от 16.07.2024 направлены подписанные со стороны ООО «Феррумленд» Дополнительное соглашение № 17 от 16.07.2024г. о переводе стоимости работ по основному Договору в фиксированную, акт сдачи-приемки работ от 16.07.2024. по основному Договору, а также расчетные материалы, обосновывающие размер фиксированной стоимости работ.

Фиксированная стоимость работ по основному Договору определена в Дополнительном соглашении № 17 от 16.07.2024г. в размере 196 502 000 рубля.

С учётом перечисленных авансовых платежей в размере 177 789 711,87 рублей, за выполненные работы по основному Договору подлежат к оплате 18 712 288,13 рублей.

Сторонами заключено Дополнительное соглашение № 12 от 22.03.2024, предметом которого являлись дополнительные работы, выполняемые сверх объема работ, предусмотренных основным Договором. Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 12, в связи с необходимостью реализации дополнительных требований ФГУПП НПП «Гамма» в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по комплексному оборудованию судовых помещений повышенной комфортности на проект 23700 (в редакции Дополнения № 3), являющегося Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 9 от 10.11.2024г. к Договору № 17705596339160001951/1/23700 от 15.10.2018., Стороны договорились о выполнении дополнительных работ по реализации дополнительных требований ФГУПП НПП «Гамма» в соответствии с плановой калькуляцией затрат (Приложение № 1 к настоящему соглашению).

Указанные дополнительные работы выполняются сверх объема работ по договору, предусмотренных в Ведомости исполнения, являющейся Приложением № 3 к Договору поставки № № 17705596339160001951/1/23700 от 15.10.2018.

Согласно п.2 Дополнительного соглашения № 12, стоимость дополнительных работ определена как ориентировочная (предельная) и составляет 29 952 785,35 рублей. Согласно п. 4 Дополнительного соглашения № 12, срок выполнения указанных в настоящем соглашении работ – 30 календарных дней с момента зачисления 1-го аванса на счет Исполнителя в порядке, предусмотренном

п. 3 настоящего соглашения. Работы, предусмотренные дополнительным соглашением № 12, Исполнителем выполнены в полном объеме.

В адрес АО «ПСЗ «Янтарь» письмом исх. № 517-ч от 16.07.2024 направлены подписанные со стороны ООО «Феррумленд» Дополнительное соглашение № 14 от 16.07.2024г. о переводе стоимости дополнительных работ по Дополнительному соглашению № 12 в фиксированную, акт сдачи-приемки работ от 16.07.2024г. по Дополнительному соглашению № 12, а также, расчетные материалы, обосновывающие размер фиксированной стоимости работ. Фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашению № 12 предложена в Дополнительном соглашению № 14 от 16.07.2024г. в размере 29 952 785,35 рублей.

С учётом перечисленных авансовых платежей в размере 23 962 228,29 руб., за выполненные работы по Дополнительному соглашения № 12 подлежат к оплате 5 990 557,06 рублей. Исполнитель письмами исх. № 234-ч от 22.04.2024 и исх. № 442-ч от 16.06.2024 уведомил Заказчика о готовности к предъявлению помещений повышенной комфортности к сдаче по Договору.

Согласно п. 5.2 договора, Заказчик производит приемку результатов работ на основании письменного уведомления Исполнителя о готовности помещений к предъявлению. Местом приемки-сдачи работ является территория Заказчика.

Пунктом 5.3 Договора предусмотрено, что сдача-приемка выполненных работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается и утверждается Сторонами, заверяется печатями и является основанием для проведения расчета на выполненные работы. Основанием для составления двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ служит Технический акт, оформленный в соответствии с порядком, установленным у Заказчика.

Письмом исх. № 467-ч от 27.06.2024 в адрес АО «ПСЗ «Янтарь» были направлены калькуляционные материалы по Договору согласно дополнительному соглашению № 9 от 10.11.2023. Письмом исх. № 476-ч от 02.07.2024г. в адрес АО «ПСЗ «Янтарь» были направлены подписанные со стороны ООО «Феррумленд» Технические акты от 02.07.2024г. освидетельствования работ в помещениях по основному Договору. Письмом исх. № 511-ч от 11.07.2024г. в адрес АО «ПСЗ «Янтарь» были направлены подписанные со стороны ООО «Феррумленд»

Технический акт № 1 от 26.06.2024 освидетельствования дополнительных работ по дополнительному соглашению № 9 от 10.11.2023 и Технический акт № 1 от 24.06.2024 освидетельствования дополнительных работ по дополнительному соглашению № 12 от 22.03.2024, а также калькуляционные материалы.

Также, письмом исх. № 517-ч от 16.07.2024г. в адрес АО «ПСЗ «Янтарь» был направлен Технический акт № 1 от 12.07.2024 освидетельствования дополнительных работы по дополнительному соглашению № 6 от 29.09.2022.

Согласно п.5.4 Договора, в случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (рабочих) дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные в процессе сдачи-приемки работ дефекты Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет, если таковые произошли по вине Исполнителя.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Исполнителем работ в случае обнаружения недостатков, которые полностью исключают возможность использования результата работы и не могут быть устранены Исполнителем.

Заказчику были направлены односторонне подписанные акты от 16.07.2024. Заказчик уклонялся от их подписания. В связи с уклонением от подписания актов Исполнитель направил досудебную претензию исх. № 545-от 01.08.2024. От Заказчика поступила встречная претензия № 534/2508 от 08.08.2024, в которой он указывает, что работы на момент составления претензии (на 08.08.2024) не сделаны. Основанием обращения в суд послужило уклонение Заказчика от подписания направленных документов и приемки работ. Уже после принятия искового заявления к производству, Заказчик подписал ранее направленные акты и оплатил принятые работы. Исполнитель в порядке уточнения искового заявления представил в суд следующие документы. 6 Сторонами подписано Дополнительное соглашение № 16 от 16.07.2024, которым определена фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашение № 6 от 29.09.2022, предметом которого являются дополнительные работы по корректировке стеновых каркасов и панелей зашивки.

Согласно Дополнительному соглашению № 16 от 16.07.2024 фиксированная стоимость дополнительных работ составляет 9 924 763,59 рублей. Стороны 16.07.2024 подписали Акт сдачи-приемки работ к Дополнительному соглашению

№ 6 от 29.09.2022. Согласно акту, претензий по объему, срокам и качеству выполненных Исполнителем работ, Заказчик не имеет. С учётом перечисленного аванса в размере 8 770 747,95 рубля, за выполненные работы по Дополнительному соглашению № 6 подлежат к оплате 1 154 015,64 рубля.

Платежным поручением № 689 от 25.12.2024 ответчик произвел окончательную оплату по акту в размере 1 154 015,64 рубля.

Сторонами подписано Дополнительное соглашение № 15 от 16.07.2024, которым определена фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашение № 9 от 10.11.2023, предметом которого являлись дополнительные работы по разработке проектной документации. Согласно Дополнительному соглашению № 15 от 16.07.2024 фиксированная стоимость дополнительных работ составляет 18 996 855,02 рубля.

Стороны 16.07.2024 подписали Акт сдачи-приемки работ к Дополнительному соглашению № 9 от 10.11.2023. Согласно акту, претензий по объему, срокам и качеству выполненных Исполнителем работ, Заказчик не имеет. С учетом перечисленного аванса в размере 12 121 418,34 рублей, за выполненные работы по Дополнительному соглашению № 9 подлежат к оплате 6 875 436,68 рублей.

Платежным поручением № 688 от 25.12.2024 Ответчик произвел окончательную оплату по акту в размере 6 875 436,68 рублей.

Сторонами подписано Дополнительное соглашение № 17 от 16.07.2024, которым определена фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашение № 10 от 10.11.2023, предметом которого являлось уточнение ориентировочной стоимости работ по основному Договору.

Согласно Дополнительному соглашению № 17 от 16.07.2024 фиксированная стоимость основных работ по Договору составляет 196 502 000 рублей. Стороны 16.07.2024 подписали Акт сдачи-приемки работ к Дополнительному соглашению № 10 от 10.11.2023. Согласно акту, претензий по объему, срокам и качеству выполненных Исполнителем работ, Заказчик не имеет.

С учетом перечисленных авансовых платежей в размере 177 789 711,87 рубля, за выполненные работы по основному Договору подлежат к оплате 18 712 288,13 рублей. Платежным поручением № 690 от 25.12.2024 Ответчик

произвел окончательную оплату по акту в размере 18 712 288,13 рублей. Сторонами подписано Дополнительное соглашение № 14 от 16.07.2024, которым определена фиксированная стоимость работ по Дополнительному соглашение № 12 от 22.03.2024, предметом которого являлась реализация дополнительных требований ФГУПП НПП «Гамма».

Согласно Дополнительному соглашению № 14 от 16.07.2024 фиксированная стоимость дополнительных работ составляет 29 952 785,35 руб. Стороны 16.07.2024 подписали Акт сдачи-приемки работ к Дополнительному соглашению № 12 от 22.03.2024. Согласно акту, претензий по объему, срокам и качеству выполненных Исполнителем работ, Заказчик не имеет.

С учетом перечисленных авансовых платежей в размере 23 962 228,29 руб., за выполненные работы по Дополнительному соглашению № 12 подлежат к оплате 5 990 557,06 руб. Платежным поручением № 687 от 25.12.2024 Ответчик произвел окончательную оплату по акту в размере 5 990 557,06 руб.

Таким образом, Ответчик 27.12.204 полностью оплатил задолженность за выполненные работы в размере 32 732 297,51 рубль, чем признал исковые требования.

В силу статей 329, 330 ГК РФ, неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательства, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 4.2 Договора, при нарушении Заказчиком срока оплаты окончательного расчета по Договору на срок более 20 (двадцати) банковских дней Заказчик уплачивает исполнителю пени в размере 0,01% от стоимости просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного платежа.

Согласно пункту 2.6 Договора (в редакции дополнительных соглашений №№ с 1 по 12) окончательный расчет производится с учетом выплаченного Заказчиком аванса в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ и после подписания дополнительного соглашения о переводе цены в фиксированную. Акты выполненных работ подписаны 16.07.2024,

следовательно последний день оплаты 30.07.2024. Фактически оплата произведена 27.12.2024. Исполнителем в материалы дела представлен расчет договорной неустойки.

Расчёт проверен судом и признан верным как по размеру, так и по праву. В удовлетворении встречного иска следует отказать.

Согласно п. 1.4. Договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 10.07.2020) срок начала выполнения работ: октябрь 2018, срок окончания работ: 120 календарных дней с момента передачи Заводом Обществу по акту приема-передачи всех предусмотренных техническим заданием судовых помещений для 8 выполнения монтажных работ, а также соблюдения графика авансирования платежей согласно п. 2.6. Договора.

Дополнительным соглашением № 9 к договору внесены изменения в Приложение № 1 к Договору окончательным дополнением № 3 к Техническому заданию на выполнение работ по комплексному оборудованию судовых помещений повышенной комфортности судна проекта 23700 (Приложение № 1), авансовый платеж осуществлен 21.11.2023.

Заказчик во встречном исковом заявлении исчисляет срок проведения работ 120 календарных дней (дополнительное соглашение № 4) с 22.11.2023 по 20.03.2024 с учетом дополнения № 3 к Техническому заданию. П. 5 Дополнительного соглашения № 6 установлен срок выполнения работ - не позднее 90 календарных дней с момента получения аванса размере 80% от ориентировочной стоимости 10 963 434,94 руб. (п. 2 Дополнительного соглашения № 6). 07.10.2022 выплачен аванс.

Заказчик во встречном исковом заявлении исчисляет срок проведения работ по Дополнительному соглашению № 6 с 08.10.2022 по 05.01.2023. П. 4 Дополнительного соглашения № 12 о пределен срок выполнения работ по указанному дополнительному соглашению - 30 календарных дней с момента зачисления 1-го аванса в размере 50% от ориентировочной стоимости 29 952 785,35 руб. (п. 2 Дополнительного соглашения № 12). 29.03.2024 выплачен вышеуказанный аванс. Заказчик во встречном исковом заявлении исчисляет срок проведения работ по Дополнительному соглашению № 12 с 30.03.2024 по 29.04.2024.

Согласно п. 3.1.2 Договора, Заказчик обязался передать Исполнителю готовые помещения с оформлением двустороннего акта передачи, в которых воспрещается хождение посторонних лиц до полного окончания работ. Исполнитель еще в марте 2019 уведомлял о готовности поставить панели зашивки, о чем направил письмо исх. 297-ч от 13.03.2019.

Дополнительное соглашение № 4 к Договору от 10.07.2020 установило срок окончания работ в 120 календарных дней с момента передачи Заказчиком Исполнителю всех предусмотренных техническим заданием судовых помещений для выполнения монтажных работ. Акты приема-передачи помещений были подписаны сторонами только в марте 2022 года, при этом не все помещения были переданы в соответствии с условиями Договора.

В отношении помещений по актам готовности № 11101 (кают-компания), № 11109 (коридор № 15), 11108 (коридор № 16), 11124 (конференц-зал) представителем исполнителя ФИО3 были зафиксированы замечания о наличии отступлений от проектных размеров помещений в части занижения уровня подволоков.

В связи с выявленными замечаниями было заключено Дополнительное соглашение № 6 от 29.09.2022, предметом которого являлись дополнительные работы по зашивке стеновых каркасов и панелей в связи с занижением уровней подволок. Согласно п. 5 указанного дополнительного соглашения, срок выполнения дополнительных работ составлял 90 дней с момента получения Исполнителем аванса.

В ходе осуществления работ был выявлен комплекс неразрешенных технических проблем, которые потребовали внесение изменений в исходную техническую документацию. В результате стороны заключили Дополнительное соглашение № 9 от 10.11.2023, которым было введено Дополнение № 3 к Техническому заданию, в результате чего изменился объем работ, добавились новые работы, в том числе по изготовлению комплекта РКД и выполнению дополнительных работ по требованиям ФГУП НПП «Гамма». Заказчик связывает начало работ по Договору с заключением Дополнительного соглашения № 9 от 10.11.2023, о чем и указывает во встречном исковом заявлении.

Так, Заказчик начало работ по Договору исчисляет с 22.11.2023, однако при

исчислении окончания сроков работ необходимо учитывать следующее.

Заключенное Дополнительное соглашение № 6 от 29.09.2022, предусматривает работы, которые находятся во взаимосвязи с основным Договором и могут быть выполнены только после того, как будут выполнены определенные этапы работ по основному Договору.

Изначально, срок выполнения работ по Дополнительному соглашению № 6 от 29.09.2022 предусматривался в 90 дней уже после того, когда должны были быть выполнены работы по основному Договору, на которые было отведено 120 дней.

Заключением Дополнительного соглашения № 9 от 10.11.2023 стороны подтвердили, что внесены серьезные изменения в техническое задание. Также, в ходе исполнения Договора к помещениям повышенной комфортности были предъявлены дополнительные требования на основе требований ФГУПП НПП «Гамма», в результате чего был определен дополнительный объем работ по Договору и подписано Дополнительное соглашением № 12.

Истец по встречному иску исчисляет срок начала работ по основному Договору 22.11.2023, следовательно, плановый срок работ в 120 дней по его расчету истекает 21.03.2024. На следующий день сразу было заключено Дополнительное соглашение № 12 от 22.03.2024 которым был установлен срок выполнения дополнительных работ в 30 дней. Также, необходимо учитывать Дополнительное соглашение № 12 от 22.03.2024. Данное соглашение подписано во исполнение Дополнение № 3 к Техническому заданию, введенного в действие Дополнительным соглашением № 9 от 10.11.2023. Так, в Дополнении № 3 к Техническому заданию, в пунктах 5.3 и 6.1.3 указано, что эти требования выполняются Исполнителем при наличии подписанного дополнительного соглашения к договору, определяющего объем и стоимость работ. Во исполнение этих дополнительных требований было заключено Дополнительное соглашения № 12 от 22.03.2024, которым и были определены объем и стоимость таких работ.

Таким образом, в силу прямых условий Дополнения № 3 к техническому заданию, реализовать полностью его условия до заключения и исполнения Дополнительного соглашения № 12 было невозможно.

Представителем ООО «Феррумленд» 21.05.2025 опрошен специалист ФИО4, диплом ВСВ 1275220 Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», квалификация морской инженер, специальность «кораблестроение», Сертификат № 0464-2020 о повышении квалификации, стаж работы по специальности 19 лет.

Специалист пояснил следующее: «ООО «Феррумленд» и АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» заключен Договор № 17705596339160001951/1/23700 от 15.10.2018, по которому ООО «Феррумленд» выполняет комплекс работ по оборудованию помещений повышенной комфортности. В ходе выполнения дополнительного соглашения № 6 от 29.09.2022 г., о занижении подволоков в помещениях коридоров 15-16, конференц-зале и кают-компании, выполнялись работы по переделке уже изготовленных элементов зашивки и дверей, а также переделка скрытых конструкций (укорачивание каркасов стеновых в коридорах 15-16, доработка каркасов подволока в конференц зале и кают-компании, доработка узла примыкания каркасов подволока и каркасов стен в конференц-зале по всему периметру, перенос ниже на 150 мм верхнего ряда элементов, скрытого крепежа панелей зашивки). В результате уменьшения высоты помещений была произведена доработка шпонированных панелей и полная переделка каменных и кожаных панелей зашивки, а также изменение длины стыковочных нержавеющих профилей панелей зашивки и изменение панелей отделки всех дверных порталов. Двери, открывающиеся в коридоры 15-16 в количестве 8 шт., должны были быть изготовлены по требованиям, которые были согласованы только дополнительными соглашениями № 9 от 10.11.2023 г. и № 12 от 22.03.2024 г. с учетом предъявляемых требований ФГУП «НПП «ГАММА» Требования ФГУП «НПП «ГАММА» предъявляемые к дверям: - двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиком); - дверное полотно, выбивные филенки, вентиляционные решетки и замочные скважины должны иметь устройства для опечатывания. В качестве устройств для опечатывания допускается применение голографических пломб; - двери должны быть однопольными и оборудованы притворами с уплотнениями по всему периметру. - наличие дополнительного ключевого замка в двери. Указанные выше требования направлены на улучшение характеристик двери в части живучести и стойкости к внешним воздействиям. Изготовление дверей в соответствии с

предъявленными требованиями стало возможным, только после заключения дополнительного соглашения № 9 от 10.11.2023 г. и дополнительного соглашения № 12 от 22.03.2024 г. Указанные выше требования к дверям распространяются и еще на 8 входных дверей в ЖБ1-ЖБ8, которые к тому моменту были изготовлены, что также вызвало необходимость доработки для соответствия указанным в ДС № 12 от 22.03.2024 требованиям. Работы по дополнительному соглашению № 6 от 29.09.2022 г. являются неотъемлемой частью работ по основному договору и не могут быть сданы отдельно, поскольку затрагивают конструкции разных этапов монтажа, предусмотренных основным договором. Например, зашивка помещений должна производиться после монтажа дверей, к которым предъявляются соответствующие требования. Кроме того, дополнительным соглашением № 12 от 22.03.2024 г были установлены дополнительные требования к повышенной звукоизоляции помещений ЖБ1-ЖБ8 и конференц-зала, а это 2/3 всего объема помещений блока повышенной комфортности, что вызвало необходимость переделать 70% всех конструкций зашивки. 11 Для выполнения этих требований необходимо было произвести замену решетчатых каркасов ЖБ1-ЖБ8 в районе смежных стен с коридорами 15-16 и кают-компанией, а также изолировать все дверные коробки по периметру.

Таким образом, выполнение зашивки помещений, что является предметом основного договора, стало возможным только после выполнения требований дополнительного соглашения № 12 от 22.03.2024 г., так как технология монтажа предусматривает определенную последовательность, в которой зашивка монтируется после каркасов зашивки и монтажа дверей.

В связи с тем, что требования предъявляемые доп ТЗ № 3 относятся к конструкциям ранних стадий монтажа зашивки, выполнение всех видов работ по комплексному оборудованию помещений блока повышенной комфортности возможно после выполнения требований дополнительного соглашения № 12 от 22.03.2024 г.».

Таким образом, при системном толковании условий основного Договора, условий Дополнительных соглашений №№ 6, 9 и 12, суд приходит к следующему выводу.

Работы по Дополнительному соглашению № 6 не могут выполняться

самостоятельно и в отрыве от выполнения работ по основному Договору. Следовательно, работы по Дополнительному соглашению № 6 не могут быть закончены ранее окончания работ по основному Договору, поскольку должна соблюдаться определенная этапность работ, о чем указал специалист.

Следовательно, срок окончания работ следует исчислять не ранее 30.04.2024, так как часть работ по основному Договору может быть выполнена только после выполнения дополнительных работ, предусмотренных Дополнительным соглашением № 12, о чем указал специалист. Таким образом, срок выполнения работ в 120 дней по основному Договору следует исчислять с заключения Дополнительного соглашения № 12.

При этом, ни Договором, ни дополнительными соглашениями не предусмотрена сдача отдельных этапов работ. Все работы, включая работы по дополнительным соглашениям, должны сдаваться одновременно.

Заказчиком не представлено убедительных доказательств пропуска срока исполнения обязательств Исполнителем, с учетом специфики предмета работ и сложившихся отношений.

Таким образом, встречный иск не подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Статьёй 112 АПК РФ предусмотрено, что в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом разрешается вопрос о судебных расходах.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче искового заявления истцу предоставлена отсрочка оплаты государственной пошлины.

В соответствии с частью 3 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с

ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 46 указано, что в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.

В данном случае, поскольку исковые требования признаны судом обоснованными в полном объёме, истцу предоставлялась отсрочка оплаты государственной пошлины, а ответчик не освобожден от её уплаты, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 573 874 рубля.

При подаче встречного искового заявления ответчик уплатил государственную пошлину по платёжному документу № 5023 от 01.04.2025 в размере 558032 рублей.

В данном случае, поскольку в удовлетворении встречного иска ответчику отказано в полном объёме, расходы по оплаченной государственной пошлине ответчиком при подаче заявления, относятся на ответчика и возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Калининградской области

Р Е ШИ Л:

Принять отказ от иска общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМЛЕНД» в части взыскания основного долга в размере 34 396 385 рублей

14 копеек.

Производство в этой части по делу прекратить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМЛЕНД» удовлетворить полностью.

Взыскать с акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМЛЕНД» пени в размере 490 984 рубля 46 копеек.

В удовлетворении встречного иска акционерному обществу «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» отказать.

Взыскать с акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» в доход федерального бюджета 573 874 рубля.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Калининградской области.

Судья М.С. Глухоедов