Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-10531/2023

г. Петрозаводск

29 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 29 февраля 2024 года.

 

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Киселева О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственное училище (Техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 186223, 

<

...>)

к закрытому акционерному обществу «Гера» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 185003, 

<

...>)

о взыскании 1 647 452 руб. 87 коп.,

 

при участии представителей:

истца – ФИО2 по доверенности от 26.06.2023 № 15, 

 

установил:

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Государственное училище (Техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (далее – истец, Училище) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к закрытому акционерному обществу «Гера»  (далее – ответчик, Общество) о взыскании 1 647 452 руб. 87 коп.

неустойки за нарушение обязательств по гражданско-правовому договору №03064000006200000440002 от 29 марта 2021 года на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания делового центра по ул. Пролетарской, д. 20 в г. Кондопога.

Ответчик заявил письменное ходатайство о снижении неустойки на 50 %, а именно до 823 726 руб. 44 коп. Заявленное ходатайство мотивировано тем, что при заключении и исполнении спорного договора, Общество находилось в процедуре банкротства, вместе с тем, несмотря на эти обстоятельства, Учреждение заключило с Обществом договор, приняв на себя риски наступления неблагоприятных последствий, вызванных несостоятельностью подрядчика.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, возражал против снижения неустойки, ввиду отсутствия оснований.

Заслушав пояснения представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) между ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога» (далее - Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ГЕРА» (далее - Подрядчик) заключен гражданско-правовой договор № 03064000006200000440002 от 29 марта 2021 года на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания делового центра по ул. Пролетарской, д. 20 в г. Кондопога (далее - договор, Контракт), по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту фасадов здания делового центра по ул. Пролетарской, д. 20 в г. Кондопога в соответствии с проектной документацией, Шифр 500.19-АС (приложение №3 к контракту) и локальной сметой (приложение № 1 к контракту), согласно Приложению № 2 «Этапы работ по объекту «Капитальный ремонт фасадов здания делового центра по ул. Пролетарской, д. 20 в г. Кондопога», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Цена контракта составляет 16499000 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - в течение 4 (четырех) календарных дней с даты заключения контракта, окончание выполнения работ - не позднее 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней с даты заключения контракта. Стороны устанавливают промежуточные сроки выполнения работ в Приложении № 2 «Этапы работ по объекту «Капитальный ремонт фасадов здания делового центра по ул. Пролетарской, д. 20 в г. Кондопога» (п. 1.2 контракта, в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2021 № 1 к Контракту).

Место выполнения работ: Республика Карелия, 

<

...> (п. 1.4 контракта).

Таким образом, срок окончания выполнения работ по Контракту - 4 декабря 2021 года.

Соблюдение    Подрядчиком     промежуточных     сроков     исполнения     работ характеризовалось следующим образом:

 

Наименование этапа

Стоимость работ по этапу, рублей

Промежуточные сроки выполнения работ

Фактические сроки выполнения работ

Этап 1

501 206.62

Дата начала: в течение 4 календарных дней с даты заключения контракта -29.03.2021

Дата окончания: 34 календарных дня с даты заключения контракта -02.05.2021

12.05.2021, акт о приемке выполненных работ от 12.05.2021 № 1

Этап 2

4 073 658.43

Дата начала: не позднее 35 календарных дней с даты заключения контракта-03.05.2021

Дата окончания: 95 календарных дней с даты заключения контракта -02.07.2021

По состоянию на 28.12.2021 работы по Этапу 2 контракта не завершены.

Этап 3

4 101 540.32

Дата начала: не позднее 96 календарных дней с даты заключения контракта -03.07.2021

Дата окончания: 126 календарных дней с даты заключения контракта -02.08.2021

По состоянию на 28.12.2021 работы по Этапу 3 контракта не завершены.

Этап 4

2 251 477.78

Дата начала: не позднее 127 календарных дней с даты заключения     контракта     -

03.08.2021

Дата окончания: 157 календарных дней с даты заключения     контракта     -

02.09.2021

По состоянию на 28.12.2021 работы по Этапу 4 контракта не завершены.

Этап 5

1 936 862.80

Дата начала: не позднее 158 календарных дней с даты заключения контракта -03.09.2021

Дата окончания: 188 календарных дней с даты заключения контракта -03.10.2021

По      состоянию       на

28.12.2021   работы  по

Этапу 5 контракта не завершены.

Этап 6

2 161 739.63

Дата начала: не позднее 189 календарных дней с даты заключения контракта -04.10.2021

Дата окончания: 219 календарных дней с даты заключения контракта -03.11.2021

По состоянию на 28.12.2021 работы по Этапу 6 контракта не завершены.

Этап 7

1 472 514.42

Дата начала: не позднее 220 календарных дней с даты заключения контракта -04.11.2021

Дата окончания: 250 календарных дней с даты заключения контракта -04.12.2021

По состоянию на 28.12.2021 работы по Этапу 7 контракта не завершены.

 

В связи с нарушением Подрядчиком промежуточных и конечного сроков выполнения работ, руководствуясь положениями п. 2 статьи 405, статьи 450.1 ГК РФ, ч.ч. 8, 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и п. 9.2 Контракта, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения контракта, направив Подрядчику и конкурсному управляющему ФИО3 01.12.2021 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Указанное решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта было получено Подрядчиком 15 декабря 2021 года, внешним управляющим ФИО3 -15 декабря 2021 года. Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта вступило в силу 28 декабря 2021 года. Информация о расторжении контракта была размещена в единой информационной системе закупок.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и  одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Согласно абз. 2 п. 1 статьи 708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно приложению № 2 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.05.2021) срок исполнения этапа 2 Договора был определен Сторонами следующим образом: дата начала работ - не позднее 35 календарных дней с даты заключения контракта; дата окончания работ - 95 календарных дней с даты заключения контракта.

На этапе 2 выполнению подлежали работы на общую сумму 4073658 рублей 43 копейки.

Таким образом, работы по Этапу 2 Договора должны быть начаты Подрядчиком не позднее 3 мая 2021 года и окончены не позднее 2 июля 2021 года.

Работы Этапа 2 Договору на сумму 4 073 658 рублей 43 копейки не были завершены по состоянию на 28 декабря 2021 года.

Условие договора о сроке выполнения работ было нарушено. Просрочка составила 179 дней (с 3 июля 2021 года по 28 декабря 2021 года) в отношении обязательства на сумму 4 073 658 рублей 43 копейки.

В соответствии с пунктом 6.3 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени).

В соответствии с пунктом 6.3.1 Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

Размер пени за просрочку исполнения обязательства на сумму 4 073 658 рублей 43 копейки на 179 дней (с 3 июля 2021 года по 28 декабря 2021 года) составляет 206 602 рубля 38 копеек:

4073658,43x 8,5% х 1/300 х 179 дней = 206602 рубля 38 копеек.

В связи с вступлением в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик также потребовал уплаты штрафа за невыполнение работ по этапу 2 Договора.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в соответствии с Постановлением № 1042, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа за невыполнение работ по этапу 2 Договора общей сметной стоимостью 4 073 658 рублей 43 копейки составляет 203 682 рубля 92 копейки.

Согласно приложению № 2 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.05.2021) срок исполнения этапа 3 Договора был определен Сторонами следующим образом: дата начала работ - не позднее 96 календарных дней с даты заключения контракта; дата окончания работ - 126 календарных дней с даты заключения контракта.

На этапе 3 выполнению подлежали работы на общую сумму 4 101 540 рублей 32 копейки.

Таким образом, работы по Этапу 3 Договора должны быть начаты Подрядчиком не позднее 3 июля 2021 года и окончены не позднее 2 августа 2021 года.

Работы Этапа 3 Договора на сумму 4 101 540 рублей 32 копейки не были завершены по состоянию на 28 декабря 2021 года.

Условие договора о сроке выполнения работ было нарушено. Просрочка составила 148 дней (с 3 августа 2021 года по 28 декабря 2021 года) в отношении обязательства на сумму 4 101 540 рублей 32 копейки.

Размер пени за просрочку исполнения обязательства на сумму 4 101 540 рублей 32 копейки на 148 дней (с 3 августа 2021 года по 28 декабря 2021 года) составляет 171 991 рубль 26 копеек:

4101540,32x 8,5% х 1/300 х 148 дней = 171991 рубль 26 копеек.

В связи с вступлением в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик также потребовал уплаты штрафа за невыполнение работ по этапу 3 Договора.

Размер штрафа за невыполнение работ по этапу 3 Договора общей сметной стоимостью 4 101 540 рублей 32 копейки составляет 205 770 рублей 16 копеек.

Согласно приложению № 2 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.05.2021) срок исполнения этапа 4 Договора был определен Сторонами следующим образом: дата начала работ - не позднее 127 календарных дней с даты заключения контракта; дата окончания работ - 157 календарных дней с даты заключения контракта. 

На этапе 4 выполнению подлежали работы на общую сумму 2 251 477 рублей 78 копеек.

Таким образом, работы по Этапу 4 Договора должны быть начаты Подрядчиком не позднее 3 августа 2021 года и окончены не позднее 2 сентября 2021 года.

Работы Этапа 4 Договора на сумму 2251477 рублей 78 копеек не были завершены по состоянию на 28 декабря 2021 года.

Условие договора о сроке выполнения работ было нарушено. Просрочка составила 117 дней (с 3 сентября 2021 года по 28 декабря 2021 года) в отношении обязательства на сумму 2251477 рублей 78 копеек.

Размер пени за просрочку исполнения обязательства на сумму 2251477 рублей 78 копеек на 117 дней (с 3 сентября 2021 года по 28 декабря 2021 года) составляет 74636 рублей 49 копеек:

2251477,78x 8,5% х 1/300 х 117 дней = 74636 рублей 49 копеек.

В связи с вступлением в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик также потребовал уплаты штрафа за невыполнение работ по этапу 4 Договора.

Размер штрафа за невыполнение работ по этапу 4 Договора общей сметной стоимостью 2251477 рублей 78 копеек составляет 225147 рублей 78 копеек.

Согласно приложению № 2 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.05.2021) срок исполнения этапа 5 Договора был определен Сторонами следующим образом: дата начала работ — не позднее 158 календарных дней с даты заключения контракта; дата окончания работ — 188 календарных дней с даты заключения контракта.

На этапе 5 выполнению подлежали работы на общую сумму 1936862 рубля 80 копеек.

Таким образом, работы по Этапу 5 Договора должны быть начаты Подрядчиком не позднее 3 сентября 2021 года и окончены не позднее 3 октября 2021 года.

Работы Этапа 5 Договора на сумму 1936862 рубля 80 копеек не были завершены по состоянию на 28 декабря 2021 года.

Условие договора о сроке выполнения работ было нарушено. Просрочка составила 86 дней (с 4 октября 2021 года по 28 декабря 2021 года) в отношении обязательства на сумму 1936862 рубля 80 копеек,

Размер пени за просрочку исполнения обязательства на сумму 1936862 рубля 80 копеек на 86 дней (с 4 октября 2021 года по 28 декабря 2021 года) составляет 47194 рубля 89 копеек:

1936862,80 х 8,5% х 1/300 х 86 дней = 47194 рубля 89 копеек.

В связи с вступлением в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик также потребовал уплаты штрафа за невыполнение работ по этапу 5 Договора.

Размер штрафа за невыполнение работ по этапу 5 Договора общей сметной стоимостью 1936862 рубля 80 копеек составляет 193686 рублей 28 копеек.

Согласно приложению № 2 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.05.2021) срок исполнения этапа 6 Договора был определен Сторонами следующим образом: дата начала работ — не позднее 189 календарных дней с даты заключения контракта; дата окончания работ — 219 календарных дней с даты заключения контракта.

На этапе 6 выполнению подлежали работы на общую сумму 2161739 рублей 63 копейки.

Таким образом, работы по Этапу 6 Договора должны быть начаты Подрядчиком не позднее 4 октября 2021 года и окончены не позднее 3 ноября 2021 года.

Работы Этапа 6 Договора на сумму 2161739 рублей 63 копейки не были завершены по состоянию на 28 декабря 2021 года.

Условие договора о сроке выполнения работ было нарушено. Просрочка составила 55 дней (с 4 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года) в отношении обязательства на сумму 2161739 рублей 63 копейки.

Размер пени за просрочку исполнения обязательства на сумму 2161739 рублей 63 копейки на 55 дней (с 4 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года) составляет 33687 рублей 11 копеек:

2161739,63 х 8,5% х 1/300 х 55 дней = 33687 рублей 11 копеек.

В связи с вступлением в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик также потребовал уплаты штрафа за невыполнение работ по этапу 6 Договора.

Размер штрафа за невыполнение работ по этапу 6 Договора общей сметной стоимостью 2161739 рублей 63 копейки составляет 216173 рубля 96 копеек

Согласно приложению № 2 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.05.2021) срок исполнения этапа 7 Договора был определен Сторонами следующим образом: дата начала работ — не позднее 220 календарных дней с даты заключения контракта; дата окончания работ — 250 календарных дней с даты заключения контракта.

На этапе 7 выполнению подлежали работы на общую сумму 1472514 рублей 42 копейки.

Таким образом, работы по Этапу 7 Договора должны быть начаты Подрядчиком не позднее 4 ноября 2021 года и окончены не позднее 4 декабря 2021 года.

Работы Этапа 7 Договора на сумму 1472514 рублей 42 копейки не были завершены по состоянию на 28 декабря 2021 года.

Условие договора о сроке выполнения работ было нарушено. Просрочка составила 24 дня (с 5 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года) в отношении обязательства на сумму 1472514 рублей 42 копейки.

Размер пени за просрочку исполнения обязательства на сумму 1472514 рублей 42 копейки на 24 дня (с 5 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года) составляет 10013 рублей 10 копеек:

1472514,42 х 8,5% х 1/300 х 24 дня = 10013 рублей 10 копеек.

В связи с вступлением в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик также требует уплаты штрафа за невыполнение работ по этапу 7 Договора.

Размер штрафа за невыполнение работ по этапу 7 Договора общей сметной стоимостью 1472514 рублей 42 копейки составляет 147251 рубль 44 копейки.

Таким образом, общий размер неустойки (пени и штрафов) за неисполнение этапа 2, этапа 3, этапа 4, этапа 5, этапа 6, этапа 7 договора, подлежащий взысканию с Подрядчика, составляет 1 735 837 руб. 77 коп., в том числе: пени — 544 135 руб. 23 коп.; штрафы — 1 191 712 руб. 54 коп.

Требование об уплате неустойки по Договору было направлено в адрес Подрядчика и внешнего управляющего ФИО3 письмом от 28.12.2021 №1119. Срок уплаты неустойки был установлен в 10 рабочих дней со дня получения требования.

Требование об уплате неустойки было получено внешним управляющим ФИО3 - 18 января 2022 года, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления № 80088667671708. Подрядчиком почтовое отправление, содержавшее требование об уплате неустойки, получено не было и, по истечении срока хранения в отделении связи, 9 февраля 2022 года, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления № 80088667678295 и копией конверта.

Требование об уплате неустойки не было исполнено, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В             качестве           обеспечения          гражданско-правового         договора

№ 03064000006200000440002 от 29 марта 2021 года ЗАО «ГЕРА» платежным поручением от 29.03.2021 № 26 предоставило денежные средства в размере 88 384 руб. 90 коп.

В соответствии с пунктом 7.7 контракта «денежные средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, в том числе при начислении Подрядчику неустойки (штрафа, пени), предъявлении требования о расторжении контракта.». 

Денежные средства в размере 88 384 руб. 90 коп. были удержаны заказчиком в счет неустойки. Остаток задолженности ЗАО «ГЕРА» по уплате неустойки, с учетом удержанных средств обеспечения исполнения контракта, составляет 1 647 452 руб. 87 коп.

Учитывая, что размер неустойки и порядок ее расчета установлен пунктами 6.3, 6.3.1, 6.3.2 Договора, факт просрочки ответчиком не отрицается, суд полагает, что взыскиваемая неустойка (пени и штрафы) в размере 1 647 452 руб. 87 коп. начислена обоснованно и является соразмерной последствиям нарушенного обязательства. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств, опровергающих доводы истца.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса РФ. 

Данное ходатайство отклоняется судом ввиду его необоснованности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п. 69, 71, 73 постановлении Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (ч. 1 ст. 333 Гражданского кодекса). 

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, изложенной в определении № 263-О от 21.12.2000, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Именно поэтому в части 1 статьи 333 Гражданского кодекса речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что не может рассматриваться как нарушение статьи 35 Конституции РФ.

На основании изложенного, принимая во внимание отсутствие доказательств несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора, суд не считает возможным снижать размер подлежащей взысканию неустойки. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия 

 

РЕШИЛ:

1.            Иск удовлетворить.

2.            Взыскать с закрытого акционерного общества «Гера» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государственное училище (Техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 1 647 452 руб. 87 коп. неустойки за нарушение обязательств по гражданско-правовому договору № 03064000006200000440002 от 29 марта 2021 года на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания делового центра по ул. Пролетарской, д. 20 в г. Кондопога, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 29 475 руб.

3.            Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Киселева О.В.