Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1300/2021

город Горно-Алтайск

18 марта 2022 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства регионального  развития Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  В.И.Чаптынова, д. 2, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 319040000001873,  ИНН 

<

***>, ул. Геологическая, д. 21, с. Курай, район Кош-Агачский,  

<

...>) об обязании за счет собственных средств устранить  выявленные недостатки работ, выполненных по государственным контрактам №  Ф.2017.588780, Ф.2017.569101, № Ф.2017.588753, № Ф.2017.569083 от 10 января 2018  года на поставку для детей-сирот жилых помещений, расположенных по адресу:  Республика Алтай, 

<

...> и кв. 2; ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г» кв. 1, 2, а именно:  

1. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв.1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач произвести демонтаж отмостки  обследуемых зданий, произвести монтаж новой отмостки, так как имеются трещины в  отмостке шириной раскрытия до 5 мм, искривления горизонтальных линий и  отсутствие уклона;  

2. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач ввиду несоответствия типа  отделки потолка требованиям технического задания, необходимо произвести демонтаж  

отделки потолка из ПВХ панелей, произвести устройство потолка из гипсокартона,  произвести покраску, выполнить устройство потолочного плинтуса;  

3. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести локальный ремонт  напольного покрытия, так как имеется неплотное прилегание линолеума к основанию  пола, отсутствие выполненного примыкания кафель-линолеум;  

4. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д. 1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести замену  поврежденных кафельных плиток, так как имеются трещины напольных кафельных  плиток в санузлах;  

5. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести регулировку дверных  блоков, заменить уплотнители, так как имеется промерзание дверных блоков;  

6. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести монтаж системы  вентиляции, осуществить монтаж трубной части сквозь кровлю зданий, так как  отсутствуют смонтированные вентиляционные каналы/трубы на кухнях, санузлах;  

7. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести монтаж греющего  кабеля в канализационные трубы до выгребных ям, так как имеется  неработоспособность систем канализации;  

8. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв,2 по ул. Горно-Алтайская, д. 1 «Г», Республика  Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести ревизию насосных станций,  осуществить замену повреждённых вследствие замерзания элементов, так как имеется  неработоспособность систем водоснабжения;  

9. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай,  Кош-Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская,  д. 1 «Г», Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести  

инъектирование трещин, произвести ремонт установленных зольников, так  как имеются трещины в кладке печей, дефекты зольника;  

10. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести замену  поврежденных откосов, наличников, так как откосы оконных блоков из сэндвич  панелей местами повреждены, наличники утрачены;  

11. В квартире № 2 по ул. Горно-Алтайская, д. 1 «г». Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач произвести вскрытие части фасада, произвести ремонт  монтажного шва, так как имеется неплотность утепления проема окна в помещении  спальной;  

12. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести разработку грунта по  периметру с наружной части здания, произвести утепление фундаментов  теплоизоляционными плитами типа «Пенополистирол» толщиной не менее 100мм, так  как имеется отсутствие теплоизоляции конструкций фундаментов;  

13. В квартире № 1 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В» и по кв. 1 и кв.2 по ул.  Горно-Алтайская, д.1 «Г», Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач  устранить различные повреждения на входной двери (двери на веранде).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

полностью удовлетворить исковые требования Министерства регионального  развития Республики Алтай.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 319040000001873, ИНН 

<

***>, ул. Геологическая, д. 21, с. Курай,  район Кош-Агачский, 

<

...>) за счет собственных средств  устранить выявленные недостатки работ, выполненных по государственным  контрактам № Ф.2017.588780, Ф.2017.569101, № Ф.2017.588753, № Ф.2017.569083 от  10 января 2018 года на поставку для детей-сирот жилых помещений, расположенных по  адресу: Республика Алтай, 

<

...> и кв. 2; ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г» кв. 1, 2, а именно:  

По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв.1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач произвести демонтаж отмостки  обследуемых зданий, произвести монтаж новой отмостки, так как имеются трещины в  отмостке шириной раскрытия до 5 мм, искривления горизонтальных линий и  отсутствие уклона;  

2. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач ввиду несоответствия типа  отделки потолка требованиям технического задания, необходимо произвести демонтаж  отделки потолка из ПВХ панелей, произвести устройство потолка из гипсокартона,  произвести покраску, выполнить устройство потолочного плинтуса;  

3. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести локальный ремонт  напольного покрытия, так как имеется неплотное прилегание линолеума к основанию  пола, отсутствие выполненного примыкания кафель-линолеум;  

4. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош-  Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д. 1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести замену  поврежденных кафельных плиток, так как имеются трещины напольных кафельных  плиток в санузлах;  

5. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести регулировку дверных  блоков, заменить уплотнители, так как имеется промерзание дверных блоков;  

6. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести монтаж системы  вентиляции, осуществить монтаж трубной части сквозь кровлю зданий, так как  отсутствуют смонтированные вентиляционные каналы/трубы на кухнях, санузлах;  

7. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести монтаж греющего  

кабеля в канализационные трубы до выгребных ям, так как имеется  неработоспособность систем канализации;  

8. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв,2 по ул. Горно-Алтайская, д. 1 «Г», Республика  Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести ревизию насосных станций,  осуществить замену повреждённых вследствие замерзания элементов, так как имеется  неработоспособность систем водоснабжения;  

9. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай,  Кош-Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская,  д. 1 «Г», Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести  инъектирование трещин, произвести ремонт установленных зольников, так  как имеются трещины в кладке печей, дефекты зольника;  

10. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести замену  поврежденных откосов, наличников, так как откосы оконных блоков из сэндвич  панелей местами повреждены, наличники утрачены;  

11. В квартире № 2 по ул. Горно-Алтайская, д. 1 «г». Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач произвести вскрытие части фасада, произвести ремонт  монтажного шва, так как имеется неплотность утепления проема окна в помещении  спальной;  

12. По кв. 1 и кв. 2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В», Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач; по кв. 1 и кв.2 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «Г»,  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач произвести разработку грунта по  периметру с наружной части здания, произвести утепление фундаментов  теплоизоляционными плитами типа «Пенополистирол» толщиной не менее 100мм, так  как имеется отсутствие теплоизоляции конструкций фундаментов;  

13. В квартире № 1 по ул. Горно-Алтайская, д.1 «В» и по кв. 1 и кв.2 по ул.  Горно-Алтайская, д.1 «Г», Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач  устранить различные повреждения на входной двери (двери на веранде).  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 319040000001873, ИНН 

<

***>, ул. Геологическая, д.  21, с. Курай, район Кош-Агачский, 

<

...>) в доход федерального  бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей  жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья И.В. Окунева