АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-210911/22-149-1632

г. Москва

24 марта 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 24 марта 2023 года 

Арбитражный суд в составе судьи Кузина М.М.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ПАО  «Московская объединенная энергетическая компания» (119526, 

<

...>, эт/каб 20/2017, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 772901001)  

к ФГБОУ Высшего образования «Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова» (119234, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2003, ИНН: 

<

***>, КПП:  772901001)  

третье лицо: ООО «ЦТП МОЭК» о взыскании денежных средств с участием: от истца: ФИО2 (дов. от 16.12.2022) 

от ответчика: ФИО3 (дов. от 26.12.2022 № 428-22/010-50)  от 3-го лица: не явился, извещен  

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – истец, ПАО  «МОЭК») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ФГБОУ  Высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.  Ломоносова» (далее – ответчик) о расторжении договора о подключении к системам  теплоснабжения от 11.06.2015 № 10-11/15-186, о взыскании неустойки в размере  38 260,77 руб.  

Истец поддержал требования в полном объеме по доводам, изложенным в  исковом заявлении.  

Ответчик против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным  в отзыве.  

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, в материалах дела  имеются документы, подтверждающие его надлежащее извещение о времени и месте  

судебного разбирательства. Суд счел возможным рассмотреть дело без участия  третьего лица в порядке, предусмотренном ст.156 АПК РФ.  

Информация о принятии заявления к производству, движении дела, о времени и  месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте  Арбитражного суда г. Москвы в информационно -телекоммуникационной сети  "Интернет", в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Изучив материалы дела, выслушав доводы истца и ответчика, оценив  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а  также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании  ст.71 АПК РФ, суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению по  следующим основаниям.  

Как следует из позиции Истца, 11.06.2015 между ПАО «МОЭК» и ФГБОУ  Высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.  Ломоносова» заключен договор № 10-11/15-186 о подключении к системам  теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>., действующий в редакции Дополнительного соглашения   № 3 от 25.07.2019.  

В соответствии с пунктом 2.3.3 Договора о подключении Ответчик обязан  предоставить Истцу утвержденную в установленном порядке проектную документацию  (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и  содержание технологических решений в течении 4 (четырех) месяцев с момента  заключения договора.  

Согласно пункту 3.2 Договора о подключении срок фактического подключения  по договору - до 11.12.2016. Из данного пункта вытекает, что Ответчик обязан  выполнить все свои обязательства, предусмотренные условиями подключения, не  позднее 11.12.2016.  

По состоянию на дату подачи иска Ответчик не выполнил организационные и  технологические мероприятия по Договору в полном объеме.  

Ответчиком не выполнены предусмотренные разделом 6.2 Правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго  Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115) работы по  гидравлическому испытанию на прочность и плотность тепловой сети и  гидропневматической проверки тепловой сети. Также Ответчиком не представлены  доказательства строительства тепловой сети, её принятие службами технического  надзора и выполнение Ответчиком мероприятий в рамках технологического  присоединения объекта.  

Ответчиком не получено в МТУ Ростехнадзора ни временное разрешение для  проведения пусконаладочных работ, ни постоянный допуск энергоустановки в  эксплуатацию.  

При этом, фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения ПАО  «МОЭК» может быть осуществлено только при выполнении сторонами своих  обязательств по договору о подключении, и в настоящее время не исполним по  причине отсутствия встречного исполнения обязательств.  

В обоснование требования о взыскании неустойки, Истец ссылается на п. 5.2  договора.  

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении требований ПАО «Московская  объединенная энергетическая компания», суд исходит из следующего.  

Правоотношения сторон по теплоснабжению регулируются Федеральным  законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также  действовавшими в спорном периоде Правилами подключения к системам  

теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации от 16.04.2012 № 307.  

В соответствии с пунктом 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение (технологическое  присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей  тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения  осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной  деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом  особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами  подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения,  утвержденными Правительством Российской Федерации.  

К правоотношениям по технологическому присоединению помимо специальных  норм применимы положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со ст. ст. 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика  оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые  указаны в договоре.  

В соответствии с пунктом 1 части 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской  Федерации, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или  расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой  стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами  или договором.  

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет  для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что  была вправе рассчитывать при заключении договора.  

Согласно ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, после  получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо  неполучения ответа на такое предложение в установленный срок, требование о  расторжении договора может быть заявлено в суд.  

В соответствии с пунктом 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской  Федерации, последствием расторжения договора является прекращение обязательств  сторон, предусмотренных расторгнутым договором.  

Согласно пункта 5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное  нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения  убытков, причиненных изменением или расторжением договора.  

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим  образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),  кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания  ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям  оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (пункт 1  статьи 401 ГК РФ).  

На основании п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом,  нарушившим обязательство.  

Судом установлено, что интерес к исполнению договора у ответчика не утрачен,  программа строительства не завершена и не прекращена, увеличение сроков  строительства не зависит от ответчика. Указанное следует в том, числе из того, что  

инициатором расторжения договора ответчик не является, а также в том, что оплата  договора произведена в полном объеме до наступления обязательств по оплате.  

В силу положений статьи 65 АПК РФ каждая сторона должна доказать те  обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и  возражений.  

Согласно статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Поскольку со стороны ПАО «Московская объединенная энергетическая  компания» не представлены бесспорные доказательства, подтверждающие  существенные нарушения, допущенные ответчиком при исполнении обязательств по  договору о технологическом присоединении, суд приходит к выводу об отсутствии  правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.  

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в  порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и подлежат отнесению на  Истца.  

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 64-68, 70-71, 75, 110, 112,  123, 156, 176, 180, 181АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы  

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: М.М. Кузин