Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-78383/17

24 января 2018 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального казенного  предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия» к обществу с ограниченной  ответственностью «Москапстрой» об устранении недостатков выполненных работ,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Москапстрой» до 01 марта  2018 года устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения  строительно-монтажных работ по государственному контракту от 11.11.2014 №  0548100000214000023/251.3803.К14 в рамках гарантийных обязательств, а именно:  

Недостатки 

Мероприятия по устранению  

ЗД.951 

1. Не установлены полотенцесушители  

Установить полотенцесушители  

2. Дверь в пом.3.2 (форкамера) не  установлена  

Установить герметичную дверь  

3. Не выполнены работы по монтажу  системы телефонизации и пожарной сигнализации  

Выполнить монтаж системы  телефонизации и пожарной  

сигнализации 

4. Не выполнены работы по монтажу  дренчерной системы пожаротушения  

Закончить монтаж дренчерной  системы пожаротушения  

5. Не выполнены работы по монтажу  системы автоматического пожаротушения  

Выполнить монтаж системы  автоматического пожаротушения  

6. Не выполнены работы по автоматизации  систем отопления и вентиляции  

Выполнить работы по 

автоматизации систем отопления и  вентиляции  

МОЛНИЕОТВОДЫ ЗД.951  

1. Не выполнены работы по устройству  

Выполнить устройство  

молниеотводов (2шт.) 

молниеотводов по проекту 

СООРУЖЕНИЕ 962  

1. Швы бетонных блоков не обработаны  гидроизоляционным раствором Пенекрит  

Выполнить гидроизоляцию  швов  

2. Не выполнена гидроизоляция стен ниже  отм.0.000 раствором Пенетрон  

Выполнить гидроизоляцию стен 

3. Стены ниже отм.0.000 не оштукатурены  и не окрашены  

Стены необходимо оштукатурить и окрасить 

4.Трубопровод системы хозпитьевого,  противопожарного водоснабжения не окрашен за  2-ой раз  

Окрасить трубопровод за  второй раз  

5.Бетонно - мозаичная плитка пола не  уложена  

Уложить бетоно-мозаичную  плитку  

6. Обеззараживатель хозпитьевого  водопровода (В1) не установлен  

Установить обеззараживатель  

7. Металлические поверхности пола,  лестницы не очищены и не окрашены  

Металлические поверхности  окрасить с предварительной очисткой  щетками  

8. Не выполнены работы по отделке  фасадов  

Выполнить наружные  отделочные работы  

9. Не выполнены работы по устройству  отмостки  

Выполнить устройство 

отмостки 

10. Не установлены конвекторы 

Установить конвекторы  

11. Не выполнены работы по монтажу  электроосвещения  

Выполнить электроосвещение  

12. Не выполнены работы по монтажу  силового электрооборудования  

Выполнить монтаж силового  электрооборудования  

13. Не выполнены работы по монтажу  пожарной сигнализации  

Выполнить монтаж пожарной  сигнализации  

14. Не выполнены работы по монтажу  системы автоматизации водопровода (В1), (В2)  

Выполнить монтаж системы  автоматизации водопровода (В1), (В2)  

15. Не установлен дренажный насос  LOWARA DOC 7/A  

Установить дренажный насос  LOWARA DOC 7/A  

16. Не установлен погружной насос ЭЦВ 8- 25-180 для скважины  

Установить погружной насос  ЭЦВ 8-25-180  

СООРУЖЕНИЕ 963  

1. Не обработаны поверхности внутренних  стен обмазочной гидроизоляцией  

Обработать 

гидроизоляционным раствором все  поверхности стен  

2. Лестницы в резервуар не смонтированы  и не окрашены  

Выполнить монтаж лестниц и  окрасить  

3. Не выполнены работы по  восстановлению штукатурки стен камер лаза  

Выполнить штукатурку стен  лаза  

4. Не выполнены работы по замене зонта  дефлектора  

Выполнить замену зонта  дефлектора  

5. Не выполнена замена задвижки ø 150мм  

Заменить задвижку 150мм  

КПП (об.952) 

1. Не окрашены стены за второй раз  

Окрасить стены за второй раз  

2. Не выполнен монтаж пожарной  сигнализации  

Выполнить монтаж пожарной  сигнализации  

Наружные сети водоснабжения  

1.Не выполнен монтаж запорной арматуры  в колодцах  

Установить запорную арматуру  

2.Не выполнены работы по установке  пожарных гидрантов в колодцах  

Установить пожарные гидранты  

Наружные сети связи и 

сигнализации  

1.Не выполнены работы по монтажу  системы связи и сигнализации  

Выполнить монтаж системы  

связи и сигнализации 

. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Москапстрой» в пользу  федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия»  6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья М.В. Досова