Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-21523/2024

г. Хабаровск

31 марта 2025 года

Резолютивная часть решение объявлена 18 марта 2025

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.А. Оржеховской

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Асадуллиным

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стандартстрой инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680003, 

<

...>)

к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>)

о взыскании 2 133 474 руб. 01 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующего по доверенности от 03.08.2024 б/н,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

Общество с ограниченной ответственностью «Стандартстрой инжиниринг» (далее – ООО «ССИ», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее – АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ответчик) о взыскании основного долга в размере 2 133 474 руб. 01 коп.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истцом заявлено ходатайство об уменьшении размера исковых требований, просил суд взыскать основной долг в размере 2 133 474 руб.

Уменьшение размера иска судом принимается, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договоров № ХБ38-02-08/53, № ХБ38-02-08/63, № ХБ38-02-08/64, № ХБ38-02-08/65, ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договорам, наличие основного долга в размере 2 133 474 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и возражений на иск не представил.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заказчик и ООО «ССИ», подрядчик заключен договор № ХБ38-02-08/53, в соответствии с которым подрядчик обязуется на основании заявок заказчика выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, а заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ.

Цена работ по настоящему договору составляет 14 400 000 руб., в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 2 400 000 руб. (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 2.4 договора оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с прейскурантом цен (Приложение № 2 к настоящему договору) на основании предоставленного комплекта документов согласно п. 4.2 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 договора оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора, в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

По окончании работ по заявке заказчика подрядчик передает заказчику акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту, подписанный сторонами акт промежуточной приемки скрытых работ, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, журнал производства работ по форме КС-6, счет на оплату за объем выполненных работ в отчетном месяце, согласованную с Ростехнадзором исполнительную документацию, оформленную в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 на выполненный объем работ, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 5 календарных дней с даты получения такого акта от подрядчика (пункт 4.2 договора).

Пунктом 4.3 договора установлено, что в случае мотивированного отказа заказчика от принятия результата работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в таком акте, подрядчик вновь передает заказчику акт приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту в порядке, предусмотренном в п. 4.1 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 4.4 договора работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) обеими сторонами и передачи заказчику результата выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

Согласно пункту 5.1 договора подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика в порядке и сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Как следует из пункта 5.2 договора срок выполнения каждой отдельной заявки: в течение 30 календарных дней от даты начала выполнения работ. Срок подачи последней заявки заказчиком за 30 календарных дней до даты окончания общего срока выполнения работ по договору. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

Срок выполнения работ по каждой отдельной заявке начинается с момента отправки заявок заказчиком по электронной почте.

В приложении № 2 к договору стороны согласовали сумму единичных расценок за каждый вид выполняемых работ.

Истцом в качестве доказательств выполнения работ по договору, представлены акты о приемке выполненных работ № 1 от 13.02.2024, № 1 от 31.01.2024, № 1 от 19.01.2024, № 1 от 22.12.2023, № 1 от 01.07.2024, № 1 от 12.03.2024, № 1 от 19.01.2024, № 1 от 13.02.2024, № 1 от 13.02.2024, № 1 от 01.07.2024; справки о стоимости выполненных работ и затрат,  счета-фактуры; акты приемки законченного строительством объекта № 1 от 30.11.2023, № 1 от 16.11.2023, № 1 от 28.02.2024, № 1 от 20.03.2024, № 1 от 16.11.2023, № 1 от 28.02.2024 с пометкой, что заказчик от приемки работ уклонился, акты подписаны в одностороннем порядке.

10.10.2023 между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заказчик и ООО «ССИ», подрядчик заключен договор № ХБ38-02-08/63, в соответствии с которым подрядчик обязуется на основании заявок заказчика выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, а заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ.

Цена работ по настоящему договору составляет 3 000 000 руб., в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 500 000 руб. (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 2.4 договора оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с прейскурантом цен (Приложение № 2 к настоящему договору) на основании предоставленного комплекта документов согласно п. 4.2 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 договора оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора, в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

По окончании работ по заявке заказчика подрядчик передает заказчику акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту, подписанный сторонами акт промежуточной приемки скрытых работ, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, журнал производства работ по форме КС-6, счет на оплату за объем выполненных работ в отчетном месяце, согласованную с Ростехнадзором исполнительную документацию, оформленную в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 на выполненный объем работ, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 5 календарных дней с даты получения такого акта от подрядчика (пункт 4.2 договора).

Пунктом 4.3 договора установлено, что в случае мотивированного отказа заказчика от принятия результата работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в таком акте, подрядчик вновь передает заказчику акт приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту в порядке, предусмотренном в п. 4.1 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 4.4 договора работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) обеими сторонами и передачи заказчику результата выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

Согласно пункту 5.1 договора подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика в порядке и сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Как следует из пункта 5.2 договора срок выполнения каждой отдельной заявки: в течение 30 календарных дней от даты начала выполнения работ. Срок подачи последней заявки заказчиком за 30 календарных дней до даты окончания общего срока выполнения работ по договору. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

Срок выполнения работ по каждой отдельной заявке начинается с момента отправки заявок заказчиком по электронной почте.

В приложении № 2 к договору стороны согласовали сумму единичных расценок за каждый вид выполняемых работ.

Истцом в качестве доказательств выполнения работ по договору представлены акт о приемке выполненных работ № 24 от 17.05.2024, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 24 от 17.05.2024, счет-фактура № 24 от 17.05.2024, счет на оплату № 24 от 17.05.2024 с пометкой, что заказчик от приемки работ уклонился, акты подписаны в одностороннем порядке.

10.10.2023 между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заказчик и ООО «ССИ», подрядчик заключен договор № ХБ38-02-08/64, в соответствии с которым подрядчик обязуется на основании заявок заказчика выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, а заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ.

Цена работ по настоящему договору составляет 3 000 000 руб., в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 500 000 руб. (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 2.4 договора оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с прейскурантом цен (Приложение № 2 к настоящему договору) на основании предоставленного комплекта документов согласно п. 4.2 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 договора оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора, в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

По окончании работ по заявке заказчика подрядчик передает заказчику акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту, подписанный сторонами акт промежуточной приемки скрытых работ, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, журнал производства работ по форме КС-6, счет на оплату за объем выполненных работ в отчетном месяце, согласованную с Ростехнадзором исполнительную документацию, оформленную в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 на выполненный объем работ, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 5 календарных дней с даты получения такого акта от подрядчика (пункт 4.2 договора).

Пунктом 4.3 договора установлено, что в случае мотивированного отказа заказчика от принятия результата работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в таком акте, подрядчик вновь передает заказчику акт приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту в порядке, предусмотренном в п. 4.1 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 4.4 договора работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) обеими сторонами и передачи заказчику результата выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

Согласно пункту 5.1 договора подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика в порядке и сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Как следует из пункта 5.2 договора срок выполнения каждой отдельной заявки: в течение 30 календарных дней от даты начала выполнения работ. Срок подачи последней заявки заказчиком за 30 календарных дней до даты окончания общего срока выполнения работ по договору. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

Срок выполнения работ по каждой отдельной заявке начинается с момента отправки заявок заказчиком по электронной почте.

В приложении № 2 к договору стороны согласовали сумму единичных расценок за каждый вид выполняемых работ.

Истцом в качестве доказательств выполнения работ по договору представлены акты о приемке выполненных работ № 25 от 01.04.2024, № 26 от 01.04.2024, № 27 от 17.05.2024, № 28 от 17.05.2024; справки о стоимости выполненных работ и затрат; счета-фактуры с пометкой, что заказчик от приемки работ уклонился, акты подписаны в одностороннем порядке.

10.10.2023 между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заказчик и ООО «ССИ», подрядчик заключен договор № ХБ38-02-08/65, в соответствии с которым подрядчик обязуется на основании заявок заказчика выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, а заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ.

Цена работ по настоящему договору составляет 6 000 000 руб., в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 1 000 000 руб. (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 2.4 договора оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с прейскурантом цен (Приложение № 2 к настоящему договору) на основании предоставленного комплекта документов согласно п. 4.2 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 договора оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора, в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

По окончании работ по заявке заказчика подрядчик передает заказчику акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту, подписанный сторонами акт промежуточной приемки скрытых работ, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, журнал производства работ по форме КС-6, счет на оплату за объем выполненных работ в отчетном месяце, согласованную с Ростехнадзором исполнительную документацию, оформленную в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 на выполненный объем работ, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат не позднее 5 календарных дней с даты получения такого акта от подрядчика (пункт 4.2 договора).

Пунктом 4.3 договора установлено, что в случае мотивированного отказа заказчика от принятия результата работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в таком акте, подрядчик вновь передает заказчику акт приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), счет-фактуру отдельно по каждому объекту в порядке, предусмотренном в п. 4.1 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 4.4 договора работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) обеими сторонами и передачи заказчику результата выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

Согласно пункту 5.1 договора подрядчик выполняет работы по заявкам заказчика в порядке и сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Как следует из пункта 5.2 договора срок выполнения каждой отдельной заявки: в течение 30 календарных дней от даты начала выполнения работ. Срок подачи последней заявки заказчиком за 30 календарных дней до даты окончания общего срока выполнения работ по договору. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

Срок выполнения работ по каждой отдельной заявке начинается с момента отправки заявок заказчиком по электронной почте.

В приложении № 2 к договору стороны согласовали сумму единичных расценок за каждый вид выполняемых работ.

Истцом в качестве доказательств выполнения работ по договору представлены акты о приемке выполненных работ № 1 от 01.04.2024, № 20 от 17.05.2024, № 21 от 17.05.2024, № 1 от 17.05.2024, № 1 от 17.05.2024, № 1 от 17.05.2024, № 1 от 01.04.2024, № 22 от 01.04.2024, № 19 от 01.04.2024, № 1 от 01.04.2024, № 23 от 17.05.2024; справки о стоимости выполненных работ и затрат; акты приемки законченного строительством объекта № 1 от 01.04.2024; акты о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению от 09.03.2024, от 12.03.2024, от 13.03.2024; акты о подключении от 09.03.2024, от 12.03.2024, от 13.03.2024 с пометкой, что заказчик от приемки работ уклонился, акты подписаны в одностороннем порядке.

Заказчиком направлялись на адрес электронной почты подрядчика письма с просьбами устранить недостатки в исполнительной документации.

Истцом в адрес ответчика направлялись письма от 03.11.2023 № 25/23, от 07.11.2023 № 24/23, от 14.11.2023 № 27/23, от 20.11.2023 № 30/23, от 20.11.2023 № 31/23, от 07.12.2023 № 32/23, от 11.12.2023 № 41/23, от 11.12.2023 № 42/23, от 18.12.2023 № 43/23, от 25.12.2023 № 44/23, от 25.12.2023 № 42/23, от 26.12.2023 № 45/23, от 17.01.2024 № 02/24, от 24.01.2024 № 04/24, от 25.01.2024 № 03/24, от 05.02.2024 № 06/24, от 12.02.2024 № 09/24, от 14.02.2024 №11/24, от 14.02.2024 № 12/24, от 19.02.2024 № 14/24, от 28.02.2024 № 16/24, от 07.03.2024 № 22/24, от 15.03.2024 № 16/24, от 28.03.2024 № 22/24, от 01.04.2024 № 23/24, от 02.04.2024 № 25/24, от 02.04.2024 № 24/24, от 03.04.2024 № 26/24, от 03.04.2024 № 27/24, от 10.06.2024 № 46/24, от 10.06.2024 № 45/24 с просьбой принять и подписать комплект исполнительной документации с устраненными недостатками, либо направить мотивированный отказ от подписания с замечаниями, а также рассмотреть вопрос об оплате выполненных работ.

04.10.2024 истцом в адрес ответчика направлено уведомление о приемке выполненных работ с вложением всей исполнительной документации по объектам.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором EN178789221RU уведомление получено ответчиком 09.10.2024.

Платежными поручениями от 22.05.204 № 8182, от 22.05.2024 № 8739 АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» частично оплатило задолженность в размере 42 979 руб. 20 коп.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг составил 2 133 474 руб.

30.10.2024 истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о приемке фактически выполненных работ и об оплате задолженности.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда») (далее – Информационное письмо № 51).

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ, пунктом 14 Информационного письма № 51 односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Указанной нормой установлена презумпция действительности одностороннего акта сдачи или приемки работ. Такой акт может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Бремя доказывания обоснованности отказа от приемки результата работ возлагается на заказчика (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статей 67, 68 АПК РФ судом принимаются в качестве надлежащих доказательств акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты приемки законченного строительством объекта, подтверждающих факт выполнения работ по договорам.

Доказательств составления двустороннего акта с перечнем замечаний, сроков их устранения на основании пункта 4.3 договоров в материалы дела не представлено.

Оценив и исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд установил, что истцом выполнены работы по договорам № ХБ38-02-08/53, № ХБ38-02-08/63, № ХБ38-02-08/64, № ХБ38-02-08/65 на сумму 2 133 474 руб.

Доказательств оплаты основного долга в размере 2 133 474 руб. в материалы дела ответчиком не представлено.

На основании изложенного, исковое требование истца о взыскании основного долга в размере 2 133 474 руб. подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина в размере 89 004 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, поскольку истцу предоставлена отсрочка по ее уплате.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стандартстрой инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680003, 

<

...>) основной долг в размере 2 133 474 руб.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 89 004 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                       М.А. Оржеховская