АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-24319/2019

г. Ярославль

13 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена  18 августа 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давыдовой М.В.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "СК Протей" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 5204292.71 руб.,

при участии

от истца – не явился

от ответчика – не явился

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СК Протей" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания №2" с требованием  о взыскании суммы задолженности по оплате выполненных работ в размере 4 882 891,44руб., 321 401,27 руб. неустойки за период с 30.01.2019 по 20.12.2019 с продолжением начисления с 21.12.2019 по день фактической оплаты долга, 49021,46 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Ответчик представил отзыв, контррасчет неустойки, в том числе за период с 30.01.2019 по 02.03.2020 в размере 378 786, 11 руб.

Истец направил письменное заявление об отказе от иска в части 4 882 891,44руб. задолженности,  просит взыскать 379 022, 41 руб. неустойки за период с 29.01.2019 по 01.03.2020.

Уточнение в части увеличения размера неустойки до 379 022, 41 руб. неустойки за период с 29.01.2019 по 01.03.2020 судом рассмотрено, уточнение принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд установил. 

09.07.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью "СК Протей" (подрядчик) и ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (заказчик) подписан договор подряда №001786-1102/ДогР18, согласно которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика комплекс строительно-монтажных работ по строительству теплотрассы между т/м "Т" 2Ду1000мм и т/м 2Ду700мм от котельной РК-6 для Ярославских тепловых сетей ПАО "ТГК-2" и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. По письменному требованию Заказчика может составляться Проект производства работ.

3.1.Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:Начало работ: 05 июня 2018 года

Окончание работ: 15 ноября 2018 года.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору в действующих ценах 2018 г. определяется на основании Локального сметного расчёта (Приложение № 2 к настоящему договору), и на момент подписания Договора составляет 38 339 131,00 (Тридцать восемь миллионов триста тридцать девять тысяч сто тридцать один рубль 00 коп.) рублей, кроме того НДС 18 % в сумме 6 901 043,58 (Шесть миллионов девятьсот одна тысяча сорок три рубля 58 коп.) рублей

4.2. Цена договора составляет не более 45 240 174,58 (Сорока пяти миллионов двухсот сорока тысяч ста семидесяти четырех рублей 58 коп.) рублей.

5.1.Расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 (в установленных действующим законодательством случаях) с гарантированным удержанием в размере 10% от суммы акта, при условии получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 30 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета- фактуры.

5.2.Окончательная оплата работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также при условии поступления на расчетный счет Заказчика от Подрядчика в полной сумме денежных средств в оплату неустоек (либо прекращения обязательства по оплатеданных неустоек способами, предусмотренными действующим законодательством РФ),обязанность по уплате которых установлена п. 9.4 Договора (в случае, если требование об оплате неустоек было направлено Заказчиком в адрес Подрядчика).

Гарантированное удержание выплачивается Заказчиком в течение 30 календарных дней после приемки выполненных работ по всем этапам в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 30 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры.

В случае неуплаты Заказчиком причитающейся Подрядчику оплаты за выполненные работы, Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ, в случае наличия встречного неисполненного обязательства Подрядчика по уплате Заказчику неустоек, предусмотренных п. 9.4 Договора.

Согласно п. 6.1.Приемка работы и оценка качества производится представителем Заказчика в соответствии с СО 34.04.181-2003 ежемесячно и после истечения общего срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

Приемка-сдача ежемесячного и после окончания выполнения работ объема выполненных работ оформляется актом КС-2, справкой КС-3.

Акт Формы КС-2 и Справка по Форме КС-3 должны быть предоставлены Подрядчиком до 25 числа текущего месяца.

Согласно п.9.6 В случае просрочки оплаты выполненных работ против сроков, установленных настоящим Договором по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку, рассчитанную в порядке, установленном статьей 395 Гражданского кодекса РФ, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Ответственность по уплате неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не распространяется на обязательства по уплате Заказчиком авансовых платежей и предварительной оплаты.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

Сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №001786-1102/ДогР18.

Сторонами подписан акт выполненных работ № 1  от 24.09.2018 , №2,3,7,8 от 30.10.2018, №9, 10, 11,12,13 от 30.11.2018, №15-25 от 24.12.2018, справка о стоимости выполненных работ №3 от 30.10.2018, №2 от 30.10.2018, №4 от 30.11.2018, №5 от 24.12.2018.

07.10.2019 года истец направил в адрес ответчика претензию №219 с требованием об оплате задолженности.

Оставление претензии без удовлетворения, послужило основанием обращения с иском в суд.  

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению частично в силу следующего.

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьей 71 названного Кодекса предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В  силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Наличие задолженности подтверждается представленными в дело доказательствами, в том числе подписанными актами выполненных работ № 1 от 24.09.2018, № 2,3,7,8 от 30.10.2018, №9, 10, 11,12,13 от 30.11.2018, №15-25 от 24.12.2018, справка о стоимости выполненных работ №3 от 30.10.2018, №2 от 30.10.2018, №4 от 30.11.2018, №5 от 24.12.2018., требование о взыскании задолженности судом признается обоснованным.

Производство по делу в части требования о взыскании 4 882 891,44 руб. задолженности по оплате выполненных работ подлежит прекращению в силу отказа истца от иска в данной части и принятия его судом.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Факт сдачи результата работ подтверждается документами, представленными истцом в материалы дела: актами сдачи-приемки выполненных работ, имеющими печати и подписи уполномоченных представителей сторон договора.

Истцом также заявлено требование о взыскании 379 022, 41 руб. неустойки за период с 29.01.2019 по 01.03.2020.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Нарушение сроков оплаты подтверждается представленными в дело доказательствами, требование о взыскании неустойки судом признается соответствующим условиям договора и обоснованным в размере 379 022,41 руб.

В соответствии  ст. 110 АПК РФ распределены расходы по уплате государственной пошлины.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СК Протей" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 379 022,41 руб. неустойки.

В части требования о взыскании 4 882 891,44 руб. основного долга производство по делу прекратить.

Взыскать с публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 10 580 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Шадринова Л.А.