АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8(4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8(4842) 599-457

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-2878/2023

14 сентября 2023 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 14 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

при участии:

от истца до перерыва ФИО2 (доверенность от 10.01.2023),

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248007, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой-40" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248030, 

<

...> д. 33, стр. 3, пом. 2,5,6,7) об обязании передать документацию,

УСТАНОВИЛ:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница" (далее – учреждение "Калужская областная клиническая больница") обратилась в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой-40" (далее – общество "Ремстрой-40") об обязании в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу передать исполнительную документацию на работы, выполненные по гражданско-правовому договору на выполнение работ от 29.11.2021№ 331/21 (далее - договор), а именно:

- журнал производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ, строительных конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты приемки ответственных конструкций;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытании выполненных работ;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- общий журнал работ.

Согласно ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ответчик надлежаще извещен о судебном разбирательстве, времени и месте судебных заседаний, не обеспечил своевременную явку в суд представителя с надлежаще оформленными полномочиями, что в соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Поскольку суд направил ответчику извещение о судебном разбирательстве, времени и месте судебных заседаний по указанным в едином государственном реестре юридических лиц адресам, почтовые отправления хранились в месте вручения и возвращены в связи с истечением срока хранения в соответствии с п. 11.12 Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного приказом федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" от 07.03.2019 № 98-п, то в соответствии с абз. первым ч. 4 ст. 121 АПК РФ, п. 3 ст. 54, п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом разъяснений, изложенных в абз. втором п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица", он несет риск наступления последствий неполучения юридически значимых сообщений.

Ответчик не представил отзыв, что в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения искового заявления по имеющимся доказательствам.

Представитель истца поддержал иск.

Суд в порядке ст. 163 АПК РФ объявил перерыв в судебном заседании.

Оценив представленные доказательства, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее.

Во исполнение договора подрядчик общество "Ремстрой-40" выполнило работы, не предоставило исполнительную документацию, заказчик учреждение "Калужская областная клиническая больница" приняло работы, просило представить исполнительную документацию (письма от 15.11.2022 № 01-06/4809, от 29.11.2022 № 01-06/5033, от 12.01.2023 № 01-06/54, т. 1 л. 30-33).

Ссылаясь на добровольное неисполнение обязательств по договору, истец предъявил иск (претензия 06.02.2023 № 01-06/5/9, т. 1 л. 34-35).

Предметом иска является требование заказчика к подрядчику об обязании передать исполнительную документацию по договору.

Рассмотрев исковое заявление, суд пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации(далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В п. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

В п.п. 3.1.2, 3.1.20, 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3, 4.10, 4.11 договора стороны согласовали, что подрядчик обязан выполнить работы по контракту в соответствии с действующими регламентами, нормами, правилами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими данный вид деятельности.

Подрядчик обязан информировать и предоставлять заказчику по его запросу отчетные данные и другую необходимую информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

С момента начала работ и до их завершения генеральный подрядчик ведет общий и специальный журнал работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения о принятии скрытых работ и о проведенных испытаниях, задержки в выполнении работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на объект, выходом из строя строительной техники, технические просчеты и т.д.).

Уполномоченный заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями генерального подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.

Генеральный подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных заказчиком.

Общий и специальный журналы работ является обязательным приложением к акту приемки выполненных работ и является неотъемлемой частью исполнительной документации.

Приемка всего объема выполненных работ по контракту осуществляется на основании акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3, который подписывается уполномоченными представителями заказчика и генерального подрядчика, а в случае создания приемочной комиссии - всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

Заказчик приступит к приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления генеральным подрядчиком о завершении работ в полном объеме. В указанный срок заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из 5 (пяти) человек.

Суд предложил ответчику представить отзыв, доказательства в обоснование доводов, заявить о назначении экспертизы, разъяснил правовые последствия несовершения процессуальных действий (определения от 15.05.2023, 05.07.2023, 02.03.2022, т. 1 л. 3, т. 3).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ ответчик не представил отзыв, доказательства направления документов, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ несет риск наступления последствий несовершения процессуальных действий.

Поскольку во исполнение договора подрядчик не представил исполнительную документацию, то он должен представить ее в установленном порядке.

Оценив представленные доказательства по правилам ст.ст. 67, 68 и 71 АПК РФ, с учетом указанных конкретных обстоятельств данного дела суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для обязания подрядчимка представить исполнительную документацию.

В связи с удовлетворением иска полностью в соответствии с абз. первым ч. 1ст. 110 АПК РФ 6 000 руб. расходов истца на уплату государственной пошлины за его подачу подлежат отнесению на ответчика (платежное поручение от 04.04.2023 № 1684,т. 1 л. 65).

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-40" в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу передать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница" исполнительную документацию на работы, выполненные по гражданско-правовому договору на выполнение работ от 29.11.2021 № 331/21, а именно:

- журнал производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ, строительных конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты приемки ответственных конструкций;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытании выполненных работ;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- общий журнал работ.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой-40" в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница" 6 000 руб. расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

Судья

Е.А. Пашкова