Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-4612/2020

г. Хабаровск

24 ноября 2020 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 17 ноября 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи Трещевой В.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в заседании суда дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 314272423900013, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Эйва» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680014, 

<

...>) 

о взыскании 774 334 руб. 00 коп. 

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились

от ответчика – не явились

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Эйва» (далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 774 334 руб. 00 коп. по договорам подряда № 11 от 09.01.2018г., № 24 от 28.05.2018г., № 27 от 19.06.2018г.,        № 28 от 19.06.2018г., № 29 от 19.06.2018г., № 34 от 13.08.2018г., № 42 от 09.10.2018г.

Определением суда от 30.03.2020 года дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов. 

22.04.2020 года от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Определением суда от 01.06.2020г. суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебное заседание представитель истца не явился, представил ходатайство об уточнении размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ. Просил суд взыскать задолженность по договорам подряда в размере 522 407 руб. 60 коп., исходя из размера долга по договору № 11 от 09.01.2018г. в сумме 56 323 руб. 60 коп., № 24 от 28.05.2018г. в сумме 17 040 руб. 00 коп., № 27 от 19.06.2018г. в сумме 1 851 руб. 00 коп., № 28 от 19.06.2018г. в сумме 13 073 руб. 00 коп., № 29 от 19.06.2018г. 172 620 руб. 00 коп., № 34 от 13.08.2018г. в сумме 60 000 руб. 00 коп., № 42 от 09.10.2018г. в сумме 201 500 руб. 00 коп. 

Суд принял уточнение размера исковых требований.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя не обеспечил, отзыва и возражений не предоставил.

В соответствии с частью 1 статьи 156 АПК РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В силу части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела,  установил следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что 09.01.2018г., 28.05.2018г., 19.06.2018г., 13.08.2018г., 09.10.2018г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключены договоры подряда №№ 11, 24, 27, 28, 29, 34, 42 (далее – договоры, договор № 11, договор № 24, договор № 27, договор № 28, договор № 29, договор № 34, договор № 42).

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 11 подрядчик обязуется выполнить работы по устройству мембранной кровли площадью 3537м2  на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу: 

<

...>», и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 14.02.2018 года и завершены не позднее 30 апреля 2018 года (пункт 3.1 договора № 11).

Цена договора составляет 1 322 834 руб. 00 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 11). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 11). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 11-С1 от 11.05.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 11 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 1 322 834 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 24 подрядчик обязуется выполнить работы по устройству мембранной кровли галереи площадью 96 кв.м на объекте: «Склад хранения готовой продукции», расположенном по адресу: 

<

...>, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 28 мая 2018 года. Срок выполнения работ: 7 календарных дней после начала работ (пункт 3.1 договора № 24).

Цена договора составляет 67 040 руб. 00 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 24). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 24). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 24 от 01.06.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 24 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 67 040 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 27 подрядчик обязуется выполнить работы по устройству мембранной кровли КПП№1 площадью 86 кв.м. и КПП № 2 площадью 59 кв.м. на объекте: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» в г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1-й этап. I очередь строительства», и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 19 июня 2018 года. Срок выполнения работ: 10 календарных дней после начала работ (пункт 3.1 договора № 27).

Цена договора составляет 51 851 руб. 80 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 27). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 27). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 27 от 29.06.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 27 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 51 851 руб. 80 коп.

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 28 подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу профнастила на объекте: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» в г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1-й этап. I очередь строительства», и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 25 июня 2018 года. Срок выполнения работ: 10 календарных дней после начала работ (пункт 3.1 договора № 28).

Цена договора составляет 110 000 руб. 00 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 28). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 28). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 28 от 05.07.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 28 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 107 800 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 29 подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия кровли спорткорпуса в осях 1/1-11/А-и из профнастила площадью 1842 кв.м. на объекте: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» в г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1-й этап. I очередь строительства», и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 20 июля 2018 года. Срок выполнения работ: 15 календарных дней после начала работ (пункт 3.1 договора № 29).

Цена договора составляет 202 620 руб. 00 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 29). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 29). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 29 от 31.07.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 29 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 202 620 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 34 подрядчик обязуется выполнить работы по устройству мембранной кровли КПП № 1 и КПП № 2 на объекте: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» в г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1-й этап. I очередь строительства», и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 15 августа 2018 года. Срок выполнения работ: 10 календарных дней после начала работ (пункт 3.1 договора № 34).

Цена договора составляет 60 000 руб. 00 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 34). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 34). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 34 от 20.08.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 34 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 60 000 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 1.1. договора № 42 подрядчик обязуется выполнить работы по устройству мембранной кровли площадью 531 кв.м. на объекте: «Жилой дом на 44 квартиры», расположенный по адресу: Хабаровский край, р.п. Корфовский, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Работы должны быть начаты не позднее 09 октября 2018 года. Срок выполнения работ: 10 календарных дней после начала работ (пункт 3.1 договора № 42).

Цена договора составляет 201 500 руб. 00 коп., без НДС (пункт 4.1 договора № 42). 

Окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (пункт 5.2 договора № 42). 

Предоставленным в материалы дела подписанным с обеих сторон актом сдачи – приемки работ № 42 от 20.10.2018г. подтверждается выполнение подрядчиком работ по договору № 42 и их приемку заказчиком в полном объеме на сумму 201 500 руб. 00 коп.

В связи с частичной оплатой стоимости выполненных работ, у ответчика образовалась задолженность по договорам в общем размере 522 407 руб. 60 коп. (с учетом принятого судом уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

14.10.2019г. истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность.

Однако претензия осталась неисполненной, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Учитывая представленные доказательства, суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 740 (пункта 1) Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Из статьи 746 (пункта 1) Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Предоставленными в материалы дела актами сдачи-приемки работ подтверждается, что истец выполнил работы по договорам подряда и передал результат работ ответчику, а ответчик принял результат работ на общую сумму 774 334 руб. 60 коп. Возражений по объему, стоимости и качеству выполненных работ, ответчиком не заявлено. 

В связи с частичной оплатой стоимости выполненных работ у ответчика образовалась задолженность 522 407 руб. 60 коп.

Доказательства оплаты указанной задолженности ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлены, следовательно, требование истца о взыскании основного долга в размере 522 407 руб. 60 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме, судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 18 487 руб. 00 коп. по чек-ордеру от 27.03.2020г. подлежит возмещению с ответчика в размере 13 448 руб. 00 коп., а госпошлина в сумме 5 039 руб. 00 коп. подлежит возврату из федерального бюджета как излишне уплаченная.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эйва» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 основной долг в размере 522 407 руб. 60 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эйва» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 13 448 руб. 00 коп.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 из федерального бюджета уплаченную госпошлину в сумме 5 039 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья                                                                                         В.Н. Трещева