АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

25 марта 2025 года

Дело № А33-978/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 49691-09-22/КРАС от 14.09.2022 г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объектов расположенных (которые будут располагаться) по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, к.н.: 24:04:0507001, в точке присоединения:

- наименование энергопринимающих устройств заявителя – РЩ-0,4 кВ.

- наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – электроустановки, расположенные по адресу: Красноярский край, Березовский район, Маганский сельсовет, кадастровый квартал 24:04:0507001.

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт.

- категория надёжности: третья.

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2022 г.

- точка присоединения: линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемая от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А.

- основной источник питания: комплектная трансформаторная подстанция КТП № 6А (центр питания – тяговая подстанция Камарчага).

- резервный источник питания отсутствует.

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям:

- замену в комплектной трансформаторной подстанции КТП № 6А силового трансформатора 27,5/0,4 кВ мощностью 25 кВА на трансформатор расчетной мощности;

- реконструкцию участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС»;

- строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера «ПАО «МТС» до границы участка заявителя;

- монтаж прибора учета электроэнергии и присоединение от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, указанной в п. 10.3;

- организацию учёта электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих требования к учету электроэнергии;

- тип, параметры оборудования, протяженность и сечение линий электропередачи определить при проектировании;

- обеспечение возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- в случае необходимости отступления от технических условий, в том числе в ходе проектирования, такие отступления подлежат внесению в данные технические условия.

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 906,25 руб. неустойки за период с 16.03.2023 по 25.12.2024, а также неустойку с 26.12.2024 по день фактического исполнения обязательств по договору технологического присоединения из расчёта 305,54 руб. за каждый день просрочки, а также 64 945 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В случае неисполнения решения суда в части неимущественного требования в полном объёме в течение календарного месяца с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице структурного подразделения «Красноярская дирекция по энергообеспечению» филиала «Трансэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, судебную неустойку в размере 700 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдаётся только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1