1382/2017-212471(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 13 сентября 2017 года 

по делу А33-19485/2017 Красноярск 

13 сентября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сибкоминвест»  удовлетворить.  

Внести изменения в муниципальный контракт от 04.10.2016 № Ф.2016.283240,  заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Сибкоминвест» и  муниципальным казённым учреждением города Красноярска «Управление дорог,  инфраструктуры и благоустройства», и изложить пункт 3.2. контракта в следующей  редакции: «Срок завершения работ – до 30.09.2017».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья И.В. Яковенко