35/2018-250615(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-35139/2018

г. Новосибирск

26 декабря 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального  казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог  «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>), г.  Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Сибавтобан»  (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, при участии в деле 3-го лица:  общества с ограниченной ответственностью «ДорСиб плюс» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, о понуждении к исполнению гарантийных  обязательств,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Сибавтобан»  (ОГРН 

<

***>) в срок до 01 июня 2019 года исполнить гарантийные  обязательства по государственному контракту № 80-15 на выполнение работ  по ремонту автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска  через Бийск до границы с Монголией км 33+500 - км 38+000 (Р-256  «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно- Алтайск - граница с  Монголией км 33+500 - км 38+000), Новосибирская область, а именно:  

1. Выполнить работы по устранению дефектов (колейность на  асфальтобетонном покрытии проезжей части) в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документацией  протяженностью 600 метров, шириной 4 метра, площадью 2 400 кв.м;  

2. Выполнить работы по устранению дефектов (выкрашивание  асфальтобетонного покрытия и просадку люка h=60мм) протяженностью 2  метра, шириной 2 метра, площадью 4 кв.м на км 35+479 прямой ход;  

3. Выполнить работы по устранению дефектов (выкрашивание  асфальтобетонного покрытия и просадку решетки ливневой канализации  h=70мм) в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической  документацией протяженностью 2 метра, шириной 2 метра, площадью  

4 кв.м на км 37+763 прямой ход; 

4. Выполнить работы по устранению дефектов (просадка  асфальтобетонного покрытия проезжей части h=50мм) в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документацией  протяженностью 25 метров, шириной 2 метра, площадью 50 кв.м на км  37+736-км 37+761 прямой ход;  

5. Выполнить работы по устранению дефектов (разрушение бетонного  бортового камня БР 100.30.18) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией протяженностью 1 008 метров на  км 35+400 - км 37+500;  

6. Выполнить работы по устранению дефектов (просадка и  выкрашивание шва между проезжей частью и бардюрным профилем h=  120мм) в соответствии с требованиями проекта и нормативно-технической  документацией протяженностью 1 538 метров, 0,12 метра, площадью 184,56  кв.м на км 35+400 - км 37+500;  

7. Выполнить работы по устранению дефектов (раскрытие шва до 10  мм между между бардюрным камнем и асфальтобетонным покрытием на  тротуаре) в соответствии с требованиями проекта и нормативно- 

технической документацией протяженностью 1 538 метров, шириной 0,01  метр, площадью 15,38 кв.м на км 35+400 - км 37+500;  

8. Устранить выкрашивание монолитного бетонного фундамента  перильного ограждения (600 шт.) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией протяженностью 1 201 метр, на км  35+384 - км 37+613 прям. - обр.ход;  

 9. Выполнить работы по устранению дефектов (коррозия металла  автопавильона 1 шт.) в соответствии с требованиями проекта и нормативно- технической документацией в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией площадью 3 кв.м на км 36+773.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибавтобан»  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской  Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Судья С.А. Исакова