Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-102051/17

06 февраля 2018 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 30 января 2018 

Полный текст решения изготовлен 06 февраля 2018

Судья Арбитражного суда Московской области Гузеева О.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-102051/17 по иску ООО  НПО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 170008, 

<

...>)  к ООО «МСК-ОПТИМА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 117574, 

<

...>) о взыскании долга по договору № 10/10/2016 от 10 октября 2016 года, штрафных санкций, долга по договору № 13-13КР/2016 от 30 декабря 2016 года, процентов за пользование чужими денежными средствами

При участии в судебном заседании  сторон согласно протоколу с/з от 30.01.2018

УСТАНОВИЛ:

ООО  НПО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" (Исполнитель) обратилось в Арбитражный суд Московской области  с требованием к ООО "МСК-ОПТИМА" (Заказчик) о взыскании 1 990 900 руб. долга  по договору № 10/10/2016 от 10.10.2016, 7 264 876 руб. штрафных санкций  за просрочку исполнения обязательства  по оплате работ,  6 728 643 руб. 15 коп. долга  по договору № 13-13КР/2016 от 30.12.2016, 292 324 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик в судебном заседании ходатайствовал о снижении суммы штрафных санкций по договору № 10/10/2016 от 10.10.2016  в порядке статьи 333 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача по акту результата работ заказчику и принятие его последним.

Как следует из материалов дела,  между сторонами заключен договор  № 10/10/2016 от 10.10.2016  (далее – Договор № 1) в соответствии с п. 2.1.   которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации для обеспечения проведения работ по насосной станции ВЗУ в г. Купавна, проведению экспертизы разработанной проектно-сметной документации в согласующем органе, согласованию актов обследования объектов и дефектных ведомостей в органах местного самоуправления (далее – Работы), в сроки, установленные настоящим Договором, в полном объеме и в соответствии с п. 1.5. Договора.

Стоимость Работ, указанных в п. 2.1. Договора № 1 составляет 1 990 900 ( один миллион девятьсот девяносто тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, В том числе НДС 18% - 303 696 (Триста три тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. 

Срок выполнения Работ 20 (двадцать) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем вступления настоящего Договора  в силу (п. 4.1. Договора № 1). 

В соответствии с условиями Договора № 1, Исполнитель в рамках принятых на себя обязательств добросовестно выполнил работы и сдал Заказчику, а Заказчик принял выполненные Работы, согласно Акту сдачи-приемки проектной документации № 01 от «31» октября 2016 года, подписанными представителями обеих сторон, стоимость выполненных работ составила 1 990 900 (один миллион девятьсот девяносто тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 303 696 (Триста три тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

Согласно п. 6.9. Договора № 1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику полного комплекта ПСД (Проектно-сметная документация), при отсутствии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий факт выполнения работ и приемки их Заказчиком. 

Таким образом, Заказчик обязан оплатить принятые и выполненные работы Исполнителя по итогу приемки работ, а именно по истечению 10 (дневного) срока. 

Также между сторонами  заключен договор №  13-13КР/2016 от «30» декабря 2016 года (далее – Договор № 2).

Согласно п. 1.2. Договора № 2 Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) выполнить работы по капитальному ремонту КТС, МК пс. Сосенское, Десеновское, Филимонковское, Первомайское, Московский, Марушкинское Толстопальцево, Мосрентген в части основного и вспомогательного оборудования и строительных конструкций, за исключением несущих (система ХВП, солевое хозяйство, барботажные узлы, насосное оборудование, баки, емкости и пр.) (далее-Работы) с использованием своих средств, материалов и оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

Стоимость Работ, указанных в п. 1.2. Договора № 2, составляет 35 373 319 (Тридцать пять миллионов триста семьдесят три тысяч триста девяносто) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% в размере 5 395 930 (пять миллионов триста девяносто пять тысяча девятьсот тридцать) рублей 12 копеек.

В соответствии с п. 3.1.1. Договора № 2 аванс в размере 10 611 995 (девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1618 779 (один миллион шестьсот восемнадцать семьсот семьдесят девять) рублей 04 копейки, от общей стоимости работ по капитальному строительству по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. оговора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора, для приобретения материалов и оборудования.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) абз. 3 п. 14. «промежуточная и окончательная оплата, с учетом выплаченного аванса, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон по каждому объекту Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, исполнительной сметы, ведомости дефектов, счета и счета-фактуры, а также после предоставления Подрядчиком комплекта технической и эксплуатационной документации и фотоотчета всех этапов выполнения работ по каждому объекту.».

В соответствии с условиями Договора Исполнитель в рамках принятых на себя обязательств добросовестно выполнил и сдал Заказчику работы по капитальному ремонту КТС, а Заказчик принял выполненные Работы, согласно Актам о приемке выполненных работ (КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанными представителями обеих сторон:

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2016 г. за период с 30.12.2016 г. по 30.12.2017 г. на сумму 4 161 706 руб. 25 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КОЗ) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 559 763, руб. 36 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 1 111 684 руб. 47 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 1 611 943 руб. 71 коп.:

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 319 001 руб. 06 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 3 166 785 руб. 59 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 1 360 369 руб. 42 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.04.2017 г. за период с 30.12.2016 г. по 10.04.2017 г. на сумму 190 979 руб. 25 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 28.04.2017 г. за период с 01.02.2017 г. по 28.04.2017 г. на сумму 10 441 408 руб. 18 коп.;

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 28.04.2017 г. за период с 01.02.2017 г. по 28.04.2017 г. на сумму 1 210 245 руб. 75 коп..

-  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 28.04.2017 г. за период с 01.02.2017 г. по 28.04.2017 г. на сумму 894 758 руб. 11 коп..

В период действия Договора Исполнителем были выполнены работы на общую сумму 25 028 643 руб. 15 коп., из которых Заказчиком оплачено 18 300 000 руб. 00 коп., согласно следующим платежным поручениям:

- № 27 от 19.01.2017 г. в сумме 10 400 000, 00 руб.;

- № 80 от 09.03.2017 г. в сумме 1 000 000, 00 руб.; -№113 от 21.03.2017 г. в сумме 400 000, 00 руб.;

- № 173 от 05.05.207 г. в сумме 1 500 000, 00 руб.;

- № 218 от 09.06.2017 г. в сумме 5 000 000, 00 руб.

Таким образом, Заказчиком с учетом выплаченного аванса и последующих оплат не оплачены работы Исполнителя в сумме 6 728 643,15 рублей,

Срок исполнения обязательства ООО «МСК-ОПТИМА» по оплате принятых работ ООО НПО «МСС», определяется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сдачи - приемки и подписания форм КС-2 и КС-3 (п. 14 Приложения 1 к Договору № 2).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Факт надлежащего исполнения ООО НПО «МСС» обязательств по договорам подтвержден актами о приемке выполненных работ, подписанными сторонами без разногласий и возражений.

Оплата за выполненные работы ответчиком в полном объеме не произведена, в связи с чем его долг на дату рассмотрения дела судом составляет 8 719 543 руб. 15 коп., а именно  по договору № 10/10/2016 от 10.10.2016 – 1 990 900  руб., а по договору № 13-13КР/2016 от 30.12.2016 – 6 728 643 руб. 15 коп.,  который подлежит взысканию в пользу истца.

В соответствии с пунктом 8.2 договора № 10/10/2016 от 10.10.2016 истец вправе требовать уплаты штрафных санкций в размере 1% от стоимости договора  за каждый день исполнения нарушенного условия договора.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафных санкций по состоянию на 13.11.2017 в размере 7 264 876 руб. 

Ответчик в судебном заседании ходатайствовал о снижении суммы штрафных санкций по договору№ 10/10/2016 от 10.10.2016  в порядке статьи 333 ГК РФ.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о применении статьи 333 ГК РФ, учитывая компенсационную природу неустойки, которая не должна становиться средством обогащения кредитора, приняв во внимание высокий размер ставки неустойки и штрафа, а также то, что начисленная истцом неустойка явно превысила размер возможных для истца убытков, суд пришел к выводу о необходимости снижения  общего размера штрафных санкций до 2 000 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Истцом  за ненадлежащее исполнение обязательств по договору №  13-13КР/2016 от «30» декабря 2016 года рассчитаны проценты в размере 292 234  руб. 19 коп. по состоянию на 30.04.2017. 

Расчет истцом размера процентов проверен судом, соответствует условиям договора, ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «МСК-ОПТИМА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 117574, 

<

...>) в пользу ООО  НПО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 170008, 

<

...>) 1 990 900  рублей долга по договору М10/10/2016 от «10» октября 2016 года, 2 000 000 рублей  штрафных санкций по договору М10/10/2016 от «10» октября 2016 года,  6 728 643 рубля 15 копеек долга по договору М13-13КР/2016 от «30» декабря 2016 года, 292 324 рубля 19 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами по договору М13-13КР/2016 от «30» декабря 2016 года, а также 104 294 рубля расходов по оплате государственной пошлины. 

В остальной части требований отказать. 

            Решение может быть обжаловано в месячный срок в Десятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                         О.С. Гузеева