Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-48205/2020

09 марта 2021 г.

г. Челябинск

Резолютивная часть решения принята 28 января 2021 г.

Мотивированное решение изготовлено 09 марта 2021 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Первых Н.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Монтажный участок», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Флагман», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск

о взыскании 479 897 руб. 12 коп.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Монтажный участок» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Флагман» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 445 284 руб. 09 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.12.2019 по 17.11.2020 в сумме 34 613 руб. 03 коп., всего 479 897 руб. 12 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами с 18.11.2020 по день фактической оплаты долга.

Стороны об арбитражном процессе по делу извещены надлежащим образом в соответствии с ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (л.д. 55-56). 

Ответчик представил отзыв, указал, что по его данным задолженность, указанная в исковом заявлении у него отсутствует, ходатайствовал о рассмотрении дела в общем порядке (л.д. 52-54).

При этом доказательств оплаты задолженности ответчиком не представлено, контррасчет не представлен, оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленных ч. 5 ст. 227 АПК РФ, ответчиком не названо, а судом не установлено.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключены следующие договоры:

- договор субподряда от 15.11.2019 № 48-19 (л.д. 10-14), по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на выполнение монтажа навесной фасадной системы (НФС) с облицовкой (далее – работа) на объекте: «Строительство объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, районные больницы, амбулатории), в том числе проектно-изыскательские работы» - «Челябинская область. Копейский городской округ. Фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий население численностью до 800 человек в 

<

...>» (далее – объект), а подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить за выполненные работы обусловленную договором цену.

Работы выполняются из материалов субподрядчика (п. 1.5. договора).

Стоимость работ составляет 794 000 руб., а именно:

- стоимость работ по монтажу НФС откосов, оконных отливов, отливов сверху по периметру, а с облицовкой из оцинкованной стали 0,5 мм с покрытием полиэстер в защитной пленке (21 м2) – 54 100 руб.;

- стоимость работ по монтажу НФС с облицовкой фиброцементными фасадными панелями с утеплением 150 мм (167 м2) – 613 900 руб.;

- стоимость работ по монтажу НФС с облицовкой фиброцементыми фасадными панелями без утепления (40 м2) – 126 000 руб.

В стоимость работ включены все затраты на строительно-монтажные работы, оборудование, стоимость использования машин и механизмов, содержание рабочих, все налоги, сборы и другие расходы субподрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств по договору (п. 2.1. договора).

Сроки выполнения работ: начало работ – 15.11.2019, окончание работ – 10.12.2019 (п. 5.1. договора).

Подрядчик производит авансирование субподрядчика в размере  50% от стоимости работ на сумму 397 000 руб. (п. 9.1. договора).

Подрядчик оплачивает субподрядчику выполненные и принятые работы в течение 15 рабочих дней (п. 9.2. договора).

- договор субподряда от 14.08.2019 № 14-19 (л.д. 15-19), по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на выполнение монтажа навесной фасадной системы (НФС) с облицовкой (далее – работа) на объекте: «Строительство объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, районные больницы, амбулатории), в том числе проектно-изыскательские работы» - «Челябинская область. Брединский район. Фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий население численностью до 800 человек в 

<

...>» (далее – объект), а подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить за выполненные работы обусловленную договором цену.

Работы выполняются из материалов субподрядчика (п. 1.5. договора).

Стоимость работ составляет 794 000 руб., а именно:

- стоимость работ по монтажу НФС откосов, оконных отливов, отливов сверху по периметру, а с облицовкой из оцинкованной стали 0,5 мм с покрытием полиэстер в защитной пленке (21 м2) – 54 100 руб.;

- стоимость работ по монтажу НФС с облицовкой фиброцементными фасадными панелями с утеплением 150 мм (167 м2) – 613 900 руб.;

- стоимость работ по монтажу НФС с облицовкой фиброцементыми фасадными панелями без утепления (40 м2) – 126 000 руб.

В стоимость работ включены все затраты на строительно-монтажные работы, оборудование, стоимость использования машин и механизмов, содержание рабочих, все налоги, сборы и другие расходы субподрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств по договору (п. 2.1. договора).

Сроки выполнения работ: начало работ – 16.10.2019, окончание работ – 11.11.2019 (п. 5.1. договора).

Подрядчик производит авансирование субподрядчика в размере 50% от стоимости работ на сумму 397 000 руб. (п. 9.1. договора).

Подрядчик оплачивает субподрядчику выполненные и принятые работы в течение 15 рабочих дней (п. 9.2. договора).

- договор субподряда от 14.08.2019 № 18-19 (л.д. 19-23), по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя подряд на выполнение монтажа навесной фасадной системы (НФС) с облицовкой (далее – работа) на объекте: «Строительство объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, районные больницы, амбулатории), в том числе проектно-изыскательские работы» - «Челябинская область. Агаповский район. Фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий население численностью до 800 человек в 

<

...> уч. № 10/1» (далее – объект), а подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить за выполненные работы обусловленную договором цену.

Работы выполняются из материалов субподрядчика (п. 1.5. договора).

Стоимость работ составляет 794 000 руб., а именно:

- стоимость работ по монтажу НФС откосов, оконных отливов, отливов сверху по периметру, а с облицовкой из оцинкованной стали 0,5 мм с покрытием полиэстер в защитной пленке (21 м2) – 54 100 руб.;

- стоимость работ по монтажу НФС с облицовкой фиброцементными фасадными панелями с утеплением 150 мм (167 м2) – 613 900 руб.;

- стоимость работ по монтажу НФС с облицовкой фиброцементыми фасадными панелями без утепления (40 м2) – 126 000 руб.

В стоимость работ включены все затраты на строительно-монтажные работы, оборудование, стоимость использования машин и механизмов, содержание рабочих, все налоги, сборы и другие расходы субподрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств по договору (п. 2.1. договора).

Сроки выполнения работ: начало работ – 30.10.2019, окончание работ – 20.11.2019 (п. 5.1. договора).

Подрядчик производит авансирование субподрядчика в размере  50% от стоимости работ на сумму 397 000 руб. (п. 9.1. договора).

Подрядчик оплачивает субподрядчику выполненные и принятые работы в течение 15 рабочих дней (п. 9.2. договора).

В материалы дела представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат, двусторонние акты о приемке выполненных работ (л.д. 24-29).

Платежным поручением от 04.03.2020 № 57 истец произвел ответчику оплату по счету от 04.03.2020 № 1 в сумме 48 000 руб. (л.д. 37).

Требованием от 05.10.2020 общество «Монтажный участок» обратилось к обществу СК «Флагман» о поставке оплаченного товара (л.д. 38).

Претензией от 14.10.2020 общество «Монтажный участок» обратилось к обществу СК «Флагман» о возврате денежных средств за оплаченный, но не поставленный товар в сумме 48 000 руб. (л.д. 39). 

Письмом от 10.09.2020 общество СК «Флагман» признало задолженность в пользу общества «Монтажный участок» в сумме 445 284 руб. 09 коп. гарантировало оплату выполненных работ до 30.09.2020. указало, что претензий по договорам субподряда №№ 14-19, 18-19, 48-19 не имеет (л.д. 40).

По расчету истца, задолженность ответчика составляет 445 284 руб. 09 коп.

Истец направил ответчику претензию от 05.10.2020 с требованием о погашении задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами и предупреждением о взыскании задолженности, процентов в судебном порядке в случае неоплаты (л.д. 9).

Неисполнение подрядчиком обязательства по оплате выполненных в рамках договора работ, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Согласно положениям статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В материалы дела представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат, двусторонние акты о приемке выполненных работ.

Судом установлено, что ООО «Монтажный участок» надлежащим образом выполнило все обязательства по заключенным договорам.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком доказательств оплаты задолженности не представлено, требование истца о взыскании стоимости выполненных работ в размере 397 284 руб. 09 коп. подтверждено материалами дела.

Платежным поручением от 04.03.2020 № 57 истец произвел ответчику оплату по счету от 04.03.2020 № 1 в сумме 48 000 руб. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Указанная норма права предполагает неосновательное обогащение одного лица за счет другого (пострадавшего) при отсутствии обязательственных правоотношений между участниками.

Принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств возврата денежных средств либо выполнения работ, суд приходит к выводу о том, что у подрядчика отсутствуют правовые основания для удержания перечисленных заказчиком денежных средств.

Поскольку доказательств полной и своевременной оплаты ответчиком выполненных работ в материалы дела не представлено, суд взыскивает с ответчика сумму задолженности в общей сумме 445 284 руб. 09 коп.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.12.2019 по 17.11.2020 в сумме 34 613 руб. 03 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 Кодекса в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Контррасчет основного долга и процентов ответчиком в материалы дела не представлен, также как и не представлены доказательства оплаты задолженности в полном размере. 

При расчете процентов за пользование чужими денежными средствами истцом использовалась сумма задолженности, применена ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая в соответствующие периоды.

Поскольку ответчиком допущено нарушение денежного обязательства, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ обосновано и подлежит удовлетворению в размере 34 613 руб. 03 коп., согласно расчету истца.

Также с ответчика подлежат взысканию за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты долга.

При обращении в суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 12 958 руб., что подтверждается платежным поручением от 17.11.2020 № 127 (л.д. 6).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ при цене иска 479 897 руб. 12 коп. размер государственной пошлины составляет 12 598 руб.

Государственная госпошлина подлежит распределению по правилам ст. 110 АПК РФ, в сумме 12 598 руб. взыскивается с ответчика в пользу истца, в сумме 360 руб. возвращается истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Флагман» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Монтажный участок» задолженность в размере 445 284 руб. 09 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.12.2019 по 17.11.2020 в сумме 34 613 руб. 03 коп., всего 479 897 руб. 12 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами с 18.11.2020 по день фактической оплаты долга 445 284 руб. 09 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 12 598 руб. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяН.А. Первых