19/2023-112002(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А70-16985/2022

г. Тюмень

21 июля 2023 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Трилем С.А., рассмотрев в судебном  заседании иск от 22.07.2022 № 27/121-2022  

Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени  (далее – истец)  

к ООО «ТЦ Турана» (далее – ответчик) к ООО «ТрастКом» (далее – соответчик) 

третьи лица - Главное управление строительства Тюменской области (далее – третье лицо-1),  ООО «Управляющая компания «ЗАПАД» (далее – третье лицо-2)  

об обязании совершить определенные действия 

при участии: от истца: ФИО1, доверенность от 09.01.2023 № 1 от ответчика: ФИО2, доверенность от 26.04.2022 № б/н 

от соответчика: ФИО2, доверенность от 26.04.2022 № б/н  от третьего лица-1: не явился, извещен  

от третьего лица-2: ФИО3, доверенность от 30.12.2022 № 4/2295   ФИО4, доверенность от 16.12.2022 № 4/2251  

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать ООО «ТЦ Турана» (ОГРН 

<

***>) и ООО «ТрастКом» (ОГРН  

<

***>) в течение 6-ти месяцев с момента вступления решения суда в законную силу,  в соответствии с экспертным заключением судебной строительно-технической экспертизы по  делу № А70-16985/2022 от 28.04.2023, выполненным ООО «АльянсЭксперт», обеспечить в  отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

...>,  под помещениями с кадастровыми номерами 72:23:0216002:8513; 72:23:0216002:8886;  72:23:0216002:8514; 72:23:0216002:8883 (далее также - пристрой):  

1) разработку проектной документации силами специализированной организации,  имеющей допуск на выполнение работ в области инженерных изысканий и проектирования,  на выполнение следующего комплекса строительно-монтажных работ:  

- по восстановлению несущей способности фундаментов пристроя,  - по усилению ослабленных ростверков;  

2) выполнение комплекса строительно-монтажных работ силами специализированной  организации, имеющий допуск на выполнение работ в области строительства,  

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:  

- по восстановлению несущей способности фундаментов пристроя и усилению  ослабленных ростверков, в соответствии с разработанной проектной документацией,  

- по возврату демонтированных фундаментных блоков, выполнению засыпки подвала  до отметки существующего под домом подвала.  

2. В случае неисполнения судебного решения в установленный срок взыскать с ООО  «ТЦ Турана» (ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента земельных отношений и  градостроительства Администрации города Тюмени 5000,00 рублей компенсации за  ожидание исполнения судебного акта за каждый день просрочки до момента фактического  исполнения судебного решения.  

3. В случае неисполнения судебного решения в установленный срок взыскать с ООО  «ТрастКом» (ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента земельных отношений и  градостроительства Администрации города Тюмени 5000,00 рублей компенсации за  ожидание исполнения судебного акта за каждый день просрочки до момента фактического  исполнения судебного решения.  

4. Взыскать с ООО «ТЦ Турана» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 3000,00 рублей государственной пошлины.  

5. Взыскать с ООО «ТрастКом» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 3000,00 рублей государственной пошлины.  

6. Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

7. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской  области.  

 Судья Маркова Н.Л.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.03.2023 7:41:00

 Кому выдана Маркова Наталья Леонидовна