АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, 

<

...> 

Тел./ факс 

<

***>, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-6383/2024

г. Белгород

28 июля 2025 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Чистяковой С.Г., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Дроженко Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению гарантийных обязательств,  

третьи лица: МБДОУ "Наголенский детский сад "Березка", при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 20.12.2024, срок действия по 31.12.2025, копия диплома, паспорт;  

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 19.05.2025, срок действия по 31.12.2025, копия диплома, паспорт (до перерыва в судебном заседании);  

от третьего лица: представитель не явился, извещены надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить недостатки и дефекты по государственному контракту № 17/1345 от 20.12.2019 выявленные в ходе эксплуатации объекта: Детский сад с. Нагольное Ровеньского района площадью 1 050,4 кв.м. с кадастровым номером 31:24:1002004:116, расположенного по адресу: 

<

...>, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области, а именно:  

Подготовительная группа "Почемучки" (синяя): 

1. Устранить трещины на стенах: в игровой, туалете, спальне, раздевалке, коридоре, раздаточной.  

Старшая группа "Звёздочки" (зелёная): 

1. Устранить трещины на стенах: в игровой, туалете, спальне, раздевалке.  

Средняя группа "Непоседы" (оранжевая): 

1. Устранить трещины на стенах: в игровой, туалете, спальне, раздевалке. Младшая группа "Кнопочки" (розовая):  

1. Устранить трещины на стенах: в игровой, туалете, спальне, раздевалке, коридоре, раздаточной.  

Комната охраны: 

1. Устранить трещины по стенам и потолке. Кабинет заведующей:  

1. Устранить трещины по стенам и потолке. Медицинский кабинет:  

1. Устранить трещины по стенам и потолке. Изолятор:  

1. Устранить трещины по стенам и потолке. Актовый зал:  

1. Устранить трещины по стенам и потолке. Основной коридор:  

1. Устранить трещины по стенам. Пищеблок: 1. Устранить трещины на потолке и стенах. Кровля: 1. Установить сорванные снегозадержатели - 3 шт. Входные группы: 1.Устранить проседание плиточного покрытия. 2. Устранить отслоение керамогранита от боковой стены лестницы. Отмостка из тротуарной плитки: 1. Устранить проседания плиточного покрытия. 

Взыскать с ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья С.Г. Чистякова