39/2017-167394(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-15598/2017

город Саратов

20 сентября 2017 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи О.В. Никульниковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление товарищество собственников жилья «Миллеровское-1»,  г.Саратов,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г.Саратов, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора – общество с ограниченной ответственностью «Дитеско»,  Саратовская область, п.Расково, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, г.Саратов,  

об обязании устранить выявленные недостатки выполненных работ по договору от 04.09.2014 г. при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, по доверенности от 26.09.2016 года. от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, от ООО «Дитеско» - не явился, извещен надлежащим образом, от Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству – не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г.Саратов, безвозмездно в срок до 10 ноября 2017 года устранить  недостатки выполненных работ по договору от 04.09.2014 года, выявленные в пределах гарантийного срока, проведя восстановительный  ремонт мягкой кровли здания, расположенного по адресу 

<

...>, в следующих объемах:  

 №  пп  

Обоснование 

Наименование работ и затрат  

Ед. изм. 

Кол. 

Стоимость  единицы, руб.  

Обоснование, индекс 

Общая стоимость, руб.  

Всего  

Экспл. маш. 

Всего  

в т.ч.  

оплата  

труда  

Экспл. маш. 

оплата 

труда  

в т.ч.  

оплата 

труда  

в т.ч.  

оплата 

труда  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Раздел 1. Новый Раздел 

1 

ФЕРр58-7-2 

Ремонт отдельными местами  рулонного покрытия с  

промазкой: битумными 

составами с заменой 2 слоев  

100 м2 

1.089 7.26*0.15 

2373,44  

64,97 

2584,68  

409,65 

70,75 

376,17 

5,74 

6,25 

2 

ФССЦ- 12.1.02 .08- 

0094 

Линокром: ТКП, гранулят серый  

м2 

126.8685 253.737/2 

27,72 

3516,79  

3 

ФССЦ- 12.1.02 .08- 

0096 

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего слоя)  

м2 

126.8685 253.737/2 

19,78 

2509,46  

4 

ФЕРр5 8-16-3  

Ремонт цементной стяжки  площадью заделки: до 1,0 м2  

100 мест 

1,089 

1201,44  

50,53 

1308,37  

1253,34  

55,03 

1150,91  

5 

ФССЦ- 03.2.01 .01- 

0001 

Портландцемент 

общестроительного назначения  бездобавочный, марки: 400  

т 

0,022869 

412 

9,42 

6 

ФССЦ- 04.3.01 .09- 

0001 

Раствор готовый кладочный  тяжелый цементный  

м3 

2,33046 

424,88 

990,17 

7 

ФЕР12 -01- 

016-01  

Огрунтовка оснований из  бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный  

ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением 

100 м2 

1,089 

237,56 

3,29 

258,7 

48,82 

3,58 

44,83 

0,58 

0,63 

8 

ФЕР46 -04- 

008-01  

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий к парапетам и вентканалам) 

100 м2 

1.0529 2.1058*0.5 

153,59 

41,43 

161,71 

118,09 

43,62 

112,16 

9 

ФЕР12 -01- 

004-04  

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 

100 м 

2.1058 0.4728+1.633 

664,83 

92,2 

1400 

789,19 

194,15 

374,77 

14,16 

29,82 

10  

ФССЦ- 04.3.01 .09- 

0001 

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 

м3 

1,073958 

424,88 

456,3 

11  

ФССЦ- 12.1.02 .08- 

0094 

Линокром: ТКП, гранулят серый 

м2 

265.3308  530.6616/2  

27,72 

7354,97  

12  

ФССЦ- 12.1.02 .08- 

0096 

Линокром: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 

м2 

265.3308  530.6616/2  

19,78 

5248,24  

13  

ФЕР15 -02- 

001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 

100 м2 

1,0529 

1828,56  

64,71 

1925,29  

825,63 

68,13 

784,15 

30,96 

32,6 

14  

ФЕРр5 8-20-5  

Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам 

100 м 

2,1058 

679,55 

3,53 

1431 

1171,33  

7,43 

556,24 

1,03 

2,17 

15  

ФССЦ- 08.3.05 .05- 

0051 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм 

т 

0,189522 

11200 

2122,65  

16  

ФЕРр5 8-20-3  

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых 

100 м 

1,443 

753,65 

10,23 

1087,52  

864,69 

14,76 

17  

ФССЦ- 08.3.05 .05- 

0051 

Сталь листовая оцинкованная  толщиной листа: 0,5 мм  

т 

0,594516 

11200 

6658,58  

18  

ФССЦ пг-01- 01-01- 041  

Погрузо-разгрузочные работы  при автомобильных перевозках:  Погрузка мусора строительного  с погрузкой вручную  

1 т груза 

5.310588 0.265338*3.6+0.265338*4.6+0.709956+0.10529+1.61172+0.70785 

42,98 

42,98 

228,25 

228,25 

19  

ФССЦ пг-03- 21-01- 006  

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами  грузоподъемностью 10 т  

работающих вне карьера на  расстояние: I класс груза до 6  км  

1 т груза 

7,158258 

7,64 

7,64 

54,69 

54,69 

Итого по разделу 1 Новый Раздел 

47617,89  

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 

39306,79  

5480,74 

740,39 

76,15 

Накладные расходы 

4946,93  

 В том числе, справочно: 

 83% ФОТ (от 3712.11) (Поз. 1, 4, 14, 16) 

3081,05  

 105%*0.9 ФОТ (от 858.23) (Поз. 13) 

811,03 

 110%*0.9 ФОТ (от 118.09) (Поз. 8) 

116,91 

 120%*0.9 ФОТ (от 868.46) (Поз. 7, 9) 

937,94 

Сметная прибыль 

3364,17  

 В том числе, справочно: 

 55%*0.85 ФОТ (от 858.23) (Поз. 13) 

401,22 

 65% ФОТ (от 3712.11) (Поз. 1, 4, 14, 16) 

2412,87  

 65%*0.85 ФОТ (от 868.46) (Поз. 7, 9) 

479,82 

 70%*0.85 ФОТ (от 118.09) (Поз. 8) 

70,26 

Итоги по смете: 

 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 

11905,49  

 Материалы 

28866,58  

 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 

348,88 

 Отделочные работы 

3137,54  

 Погрузо-разгрузочные работы 

228,25 

 Перевозка грузов автотранспортом 

54,69 

 Итого 

47617,89  

 В том числе: 

 Материалы 

33085,64  

 Машины и механизмы 

740,39 

 ФОТ 

5556,89  

 Накладные расходы 

4946,93  

 Сметная прибыль 

3364,17  

 Индекс 2 кв. 2017 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 47 617.89 * 6,32 

300945,06  

 НДС 18% 

54170,11  

 ВСЕГО по смете 

355115,17  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой», г.Саратов в доход федерального бюджета госпошлину по иску в  размере 6000 руб.  

Выдать исполнительный лист. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в  течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда 

Саратовской области О.В. Никульникова