АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-7726/2020

29 августа 2023 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  22.08.2023    

Полный текст решения изготовлен  29.08.2023

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «Альт-Эра» к ООО «Прометей» о взыскании

встречное исковое заявление ООО «Прометей» к ответчику ООО «Альт-Эра», при участии в качестве третьего лица, не заявляюещго самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Крымстройэксперт», Администрация города Ялты Республики Крым о взыскании

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2023;

от ответчика – не явился;

          Обстоятельства дела:          ООО «Альт-Эра» обратилось в суд с исковым заявлением к ответчику  о взыскании пени в сумме 136 394,25 руб., штрафа в сумме 400 000,00 руб.

От ООО «Прометей» поступило встречное исковое заявление о взыскании 1 651 250,39 руб., пеню в сумме 56 477,12 руб., продолжить начисление пени по день фактического исполнения обязательств.

В рамках дела А83-13193/2021 ООО «Альт-Эра» обратилось к ООО «Прометей» о взыскании задолженности в сумме 1 654 223,07 руб.

В рамках дела А83-13193/2021 от ООО «Прометей» поступило встречное исковое заявление о взыскании 3 053 263,02 руб., пеню в сумме 297 235,14 руб., продолжить начисление пени по день фактического исполнения обязательств.

Определением суда от 05.03.2022 объединены в одно производство дела Арбитражного суда Республики Крым № А83-7726/2020 и А83-13193/2021.

С учетом изложенного, в рамках первоначальных исковых требований (совместно с делом А83-13193/2021)  рассматриваются требования о взыскании задолженности в сумме 1 654 223,07 руб., пени в сумме 136 394,25 руб., штрафа в сумме 400 000,00 руб.

В рамках встречных исковых требований (совместно с делом А83-13193/2021) рассматриваются требования о взыскании задолженности в сумме 4 704 513,41 руб., пени в сумме 353 712,26 руб.,  с продолжением начисление пени по день фактического исполнения обязательств.

В процессе рассмотрения спора истцом по первоначальному иску заявлено о том, что между сторонами не производилось каких-либо взаимозачетов, поскольку не возможно установить даты таких зачетов, если бы они имелись.

В судебном заседании, которое состоялось 15.08.2022, объявлен перерыв по 22.08.2022.

Рассмотрев материалы дела, суд

                                                      УСТАНОВИЛ:

30.10.2019 г. между ООО «АЛЬТ-ЭРА» (далее - Генподрядчик) и  ООО «Прометей» (далее - Субподрядчик) заключен Договор субподряда № 2019.15-(СП2) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог с тротуарами по ул. Блюхера, ул. Кирова, ул. Свердлова муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым»   от 30 октября 2019 года (далее – Договор) на выполнение работ.

Согласно п. 1.1 Договора Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту подпорных стен по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог с тротуарами по ул. Блюхера, ул. Кирова, ул. Свердлова муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» (далее - Работы), в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной Генподрядчиком Подрядчику в порядке, установленном п. 5.2.1 настоящего Договора, в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора и Графиком производства работ, по цене указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

Согласно п. 2.1 Договора его цена составляет 16 382 274,00 руб., в том числе НДС 20% - 2 730 379,00 руб.

Согласно п. 4.1 Договора работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ (по форме согласно Приложению № 3 к Договору), согласованным Сторонами в порядке, предусмотренном Договором.

- начало работ – со дня заключения Договора,

- окончание работ – не позднее «20» декабря 2019 года.

Общая стоимость фактически выполненных Субподрядчиком работ составила            10 843 421,46 руб., что подтверждается Актом о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года (форма № КС-2) № 1 от 23 декабря 2019 года и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 23 декабря 2019 года подписанными участниками процесса.

ООО «Прометей» просит взыскать задолженность за выполненные, но не оплаченные работы в сумме 3 053 263,02 руб.

Как указывает ООО «Прометей», им в период с 01 декабря 2019 года по                                  31 декабря 2019 года выполнена часть работ, предусмотренных условиями Договора                                             № 2019.15-(СП2).

Общая стоимость фактически выполненных ООО «Прометей» за указанный период работ составила 3053263,02, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года (форма № КС-2) № 2 от 31 декабря 2019 года и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 31 декабря 2019 года, которые не подписаны ООО «Альт-Эра».

Суд считает, что указанные требования удовлетворению не подлежат, при этом исходит из следующих обстоятельств.

Согласно п. 3.2. Договора оплата производится поэтапно, за фактически выполненные объемы работ, в пределах цены Договора в виде промежуточных и окончательных платежей. Оплата промежуточных платежей за принятые в соответствии с п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора фактически выполненные работы, осуществляется Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, выставления Субподрядчиком счёта на оплату работ, после оплаты указанных работ Заказчиком (Муниципальным образованием городской округ Ялта Республики Крым).

Согласно п. Договора 7.1. Для учета выполненных Работ и целей осуществления текущей оплаты Работ в порядке, предусмотренном Договором, Субподрядчик ежемесячно не позднее 25-го числа соответствующего календарного месяца направляет Генподрядчику следующие отчетные документы, необходимые для сдачи-приемки выполненных работ.

Сдача результатов выполненных работ Субподрядчиком и принятие их Генподрядчиком осуществляется путем подписания Субподрядчиком, Представителем Генподрядчика, а после - Генподрядчиком, 4 (четырех) экземпляров актов о приемке выполненных работ (КС-2), 4 (четырех) экземпляров справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 3 (трех) комплектов исполнительной документации, журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

Согласно п. 7.2. Договора Генподрядчик и/или Представитель Генподрядчика в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Субподрядчика уведомления о завершении этапов работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.1. Договора:

-  осуществляет осмотр выполненных работ с участием Субподрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации;

- подписывает представленные акты о приемке выполненной Работы по унифицированной форме КС-2, направляет Субподрядчику возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

Согласно п. 7.7. Договора к моменту передачи Генподрядчику любого отчетного документа (в том числе акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта, акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, и других документов) Субподрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Генподрядчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Генподрядчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные Сторонами, Генподрядчиком не принимаются.

Из указанных выше норм следует, что Субподрядчик направляет Генподрядчику, для текущей оплаты после 25-го числа соответствующего календарного месяца комплект необходимый комплект документов, подписанный сторонами и строительным контролем.

В связи с невыполнением Субподрядчиком своих обязательств Генподрядчик расторгнул договор субподряда направив в адрес Субподрядчика уведомление о расторжении Договора от 07 сентября 2020 года, которое получено 05 октября 2020 года, а также претензию о возврате полученных материалов или возмещения стоимости материалов.

В силу положений пункта 9.7 договор считается расторгнутым по истечение 10 календарных дней с даты уведомления подрядчика об одностороннем расторжении договора.

Указанные односторонний отказ не обжалован, не принимать его во внимание у суда оснований не имеется.

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно разделу 9 договора установлено, что расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как указано в пункте 3 Постановлении Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.).

Данная норма нашла подтверждение и в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018, исходя из п. 2 ст. 453, п. 3 ст. 450 ГК РФ, по общему правилу, односторонний отказ от договора влечет прекращение обязательств на будущее время (прекращается обязанность подрядчика выполнять работы в будущем). Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ (п. 2 ст. 755 ГК РФ, абзац второй п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора».

В соответствии с пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Из материалов дела следует, что КС-2 № 2 от 31 декабря 2019 года и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 31 декабря 2019 года были направлены Истцу без необходимого комплекта документов и получены им 19.01.2021 года, то есть спустя один год после их составления и спустя 4 месяца после расторжения Договора не в полном объеме, как того требуют условия Договора.

В материалах дела отсутствует и Субподрядчиком не предоставлены какие-либо доказательства (исполнительная документация, журналы производства работ) подтверждающие факт выполнения Субподрядчиком работ указанных в акте по форме КС-2 в период указанный в актах выполнения работ от 31 декабря 2019 года.

Довод Субподрядчика о том, что указанные акты были оставлены Генподрядчиком без ответа не опровергаются предоставленными Генподрядчиком ответом, направленным в адрес Субподрядчика 05 февраля 2021 года, с ответом о том, что работы были выполнены Генподрядчиком самостоятельно.

Поскольку оснований для взыскания задолженности не имеется, оснований для взыскания пени также не имеется.

Субподрядчиком подтверждено выполнение работ на сумму  10 843 421,46 руб., таким образом, истцом по первоначальному иску начислена пеня на сумму неисполненных обязательств в размере 5 538 852,84 руб.

В соответствии с п.11.4.1. Договора в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 11.4.2. Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

Таким образом, как указывает истец по первоначальному иску просрочка исполнения обязательства составляет 121 день, с 21.12.2019 по 19.04.2020г.

Суд считает, что истцом по первоначальному иску допущены ошибки при расчете пени.

Пеня истцом рассчитана по ставкам ЦБ РФ в размере 6,25%, 6%.

Определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной ответчиком просрочкой по договору, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств (момент одностороннего отказа и прекращение договорных отношений), в связи с чем при расчете неустойки необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства.

Данная правовая позиция соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного суда Российской Федерации от  04.12.2018 по делу                                  № 302-ЭС18-10991.

На момент прекращения договорных отношений действовала ставка ЦБ РФ в размере 4,25%

С учетом изложенного, пеня подлежит взысканию в сумме 94 945,16 руб.

Кроме этого, истец по первоначальному иску просит взыскать штраф в сумме 400 000,00 руб.

Как указывает истец, в соответствии с п. 3.5.1. Погашение 100% суммы выданного аванса осуществляется Субподрядчиком в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику документы об использовании авансового платежа, в соответствии с п.7.1. и 7.2 Договора. В случае неиспользования, частичного использования или невозможности подтверждения использования авансового платежа в установленный срок Субподрядчик обязан вернуть неиспользованную сумму авансового платежа.

Как указывает истец, согласно актов выполненных работ, аванс погашен 23.12.2019 года, что в свою очередь является нарушением условий Контракта.

П. 5.4.3. Контракта предусмотрено, что Субподрядчик обязан:

В течение 2 (двух) рабочих дней, после дня подписания Договора, предоставить Генподрядчику:

а) приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица;

б) приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общий журнал, специальных журналов;

г) официальное уведомление с указанием Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемых ими должностей у Субподрядчика, полномочия, срок действия полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Субподрядчика.

В п. 11.4.3.2. Договора указано, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке: 100 000 рублей.

Учитывая выше перечисленные факты нарушения контракта, истец просит взыскать сумму штрафа Субподрядчика составляет 400 000 рублей.

Суд считает, что указанное требование удовлетворению не подлежит, при этом исходит из следующих обстоятельств.

Условиями Договора не предусмотрена ответственность конкретно за непредставление Генподрядчику документов об использовании авансового платежа.

Поскольку мера ответственность за конкретные нарушения не предусмотрена, оснований для начисления штраф не имеется.

Данная правовая позиция соответствует позиции, изложенной в Определении Верховного суда Российской Федерации от 07.05.2020 по делу № 308-ЭС20-5666, Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 08.10.2020 N Ф09-5707/20 по делу N А60-44855/2019, Определении Верховного Суда РФ от 28.08.2019 N 307-ЭС19-13834 по делу N А13-13783/2018.

При этом суд отмечает, что после одностороннего отказа у истца по первоначальному иску возникло право требовать уплаты штрафа, однако не пункту и основанию, указанном истцом по первоначальному иску в своем заявлении.

У суда отсутствуют полномочия самостоятельно переквалифицировать размер штрафа и основание его начисление, поскольку указанное повлечет нарушение процессуальных прав ответчика по первоначальному иску.

В случае если истец по первоначальному иску считает, что его права нарушены, он вправе обратиться с отдельным соответствующим исковым заявлением.

Также истец по первоначальному иску просит взыскать задолженность в сумме                         1 654 223,07 руб.

Согласно накладной № 30 от 09.01.2020 по Договору № 2019.15-(СП2) от 30. 10.2019г., подписанной между сторонами Генподрядчик передал, а Субподрядчик принял материалов на общую сумму 1 654 223,07 (один миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать три рубля 07 копеек) с использованием которых были выполнены работы указанные Ответчиком во встречном исковом заявлении.

В подтверждение указанных обстоятельств Истцом предоставлены суду исполнительная документация, в которой согласно актам освидетельствования скрытых работ от: 3 декабря 2019г, 10 декабря 2019г., 23 декабря 2019г., 18 декабря 2019г. указан материал с помощью которого выполнялись работы соответствующий материалам переданным по накладно. В исполнительной документации также указано, где был использован материал, и приложены паспорта качества к материалу.

Кроме того, в подтверждение указанных обстоятельств Истцом предоставлены договора о покупке инертных материалов, платежные поручения, а также товара-транспортные накладные.

Ответчик получение материалов не отрицает, однако утверждает, что использовал полученные материалы при производстве иных работ.

Однако, ответчиком по первоначальному иску не представлено доказательств приобретения и наличие собственных материалов, с использованием которых были выполнены работы.

Согласно ст. 65 АПК РФ сторона должна предоставить доказательства до начала судебного заседания, и, согласно правовой позиции изложенного в Определении Верховного суда Российской Федерации от 26.03.2021 № 303-ЭС20-20303 по делу А51-19963/2019, а также правовой позиции Арбитражного суда Центрального Округа от 19.04.2021 по делу А83-12453/2020  нет оснований приобщать их в последствии.

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, о чем прямо указано в абзаце 2 указанного пункта, в том числе в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу пункта 1 статьи 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (статья 714 ГК РФ).

В силу положений статьи 728 Гражданского кодекса в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

На основании статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Пунктом 1 статьи 1105 ГК РФ установлено, что в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Согласно правовой позиции, приведенной в абзаце 2 пункта 6.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» при невозможности возврата имущества в натуре сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне его стоимость по цене, указанной в расторгнутом договоре, а при ее отсутствии - стоимость имущества, определяемую по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ на момент приобретения.

Представленная истцом накладная на отпуск материалов на сторону № 30 от  09.01.2020 позволяет установить стоимость материалов, переданных заказчиком подрядчику. При этом непредставление ответчиком отчета о расходовании материалов не исключает возможность установить стоимость израсходованных материалов при наличии сведений о составе и объемах выполненных работ, не опровергнутых заинтересованной в этом стороной представлением достоверных и допустимых доказательств.

Так, в соответствии с названной накладной ответчику переданы материалы стоимостью 1 654 223,07 (один миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать три рубля 07 копеек) рублей.

Вместе с тем, ответчик документально не подтвердил использование всего объема полученного по договору давальческого материала (отчет об использовании данного сырья в материалах дела отсутствует), а также не представил вопреки положениям статьи 65 АПК РФ доказательств наличия остатка материала в натуре и возврата его истцу.

Поскольку спорный договор прекращен, основания для удержания ответчиком давальческого материала не имеются. В отсутствие доказательств наличия давальческого материала у ответчика в натуре, равно как и доказательств его возврата истцу, суд пришел к выводу об обязанности ответчика возместить истцу стоимость такого материала на основании статьи 1102 ГК РФ.

С учетом изложенного, с ответчика по первоначальному иску подлежат взысканию денежные средства в сумме 1 654 223,07 руб.

Истец по встречному исковому заявлению просит взыскать задолженность в сумме  1 651 250,39 руб., пеню в сумме 56 477,12 руб.

Как установлено судом, работы выполнены на сумму  10 843 421,46 руб., что подтверждается Актом о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года (форма № КС-2) № 1 от 23 декабря 2019 года и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 23 декабря 2019 года.

Указанные работы оплачены ООО «Альт-Эра» частично в общем размере                                    8 650 000,00, что подтверждается платежными поручениями № 215560 от 05 ноября 2019 года, № 413 от 06 ноября 2019 года, № 215678 от 11 ноября 2019 года, № 215763 от 18 ноября 2019 года, № 215841 от 21 ноября 2019 года, № 215872 от 25 ноября 2019 года, № 216099 от 11 декабря 2019 года, № 216183 от 13 декабря 2019 года, № 216325 от 25 декабря 2019 года.

Согласно п. 3.9 Договора Субподрядчик оплачивает Генподрядчику генподрядные услуги, связанные с организацией ведения работ на объекте, в размере 5% от стоимости фактически выполненных работ на основании подписанных двусторонних актов.

Таким образом, обязательства ООО «Альт-Эра» с учетом причитающейся Генподрядчику в соответствии с условиями пункта 3.9 Договора № 2019.15-(СП2) оплаты генподрядных услуг, связанных с организацией ведения работ на объекте, в размере 5 (пяти) процентов от стоимости фактически выполненных работ, что составляет 542 171,07 руб., остаются неисполненными в части 1 651 250,39  руб. (10 843 421,46 рублей –                   542 171,07 рублей – 8 650 000,00 рублей = 1 651 250,39 рублей.

С учетом изложенного, задолженность подлежит взысканию в сумме                     1 651 250,39 руб.

Также ответчик просил взыскать с Истца пеню в соответствии с пунктом 11.3.1 Договора № 2019.15-(СП2) в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 11.3.2 Договора № 2019.15-(СП2)).

Размер пени за нарушение Генподрядчиком срока исполнения обязательства по оплате выполненных Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора № 2019.15-(СП2) работ по состоянию на 15 июля 2020 года составил 56 477,12 руб.

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (ответ на вопрос № 3), закон не содержит прямого указания на применимую ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в случае взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства в судебном порядке.

По смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

Истцом по встречному иску используется ставка ЦБ РФ от 4,5% до 6,25%, что является его правом и не превышает допустимую к применению ставку (на момент вынесения решения действует ставка ЦБ РФ в размере 12%).

 Истец по встречному иску просит продолжить начисление пени по день фактического исполнения обязательств.

Согласно п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Поскольку в настоящем споре производится зачет однородные денежных требований необходимо произвести расчет пени по день фактического исполнения обязательств.

Первоначальные исковые требования удовлетворены на сумму основной задолженности 1 654 223,07 руб., встречные исковые требований на сумму                     1 651 250,39 руб., при этом суд не усматривает оснований для проведения зачета данных сумм до оглашения резолютивной части решения суда.

Таким образом, момент фактического исполнения обязательств ответчиком по встречному исковому заявлению является 22.08.2023 (дата оглашения резолютивной части решения).

С учетом изложенного, пеня должна быть рассчитана судом за период с 16.07.2020 по 22.08.2023.

Между тем, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Согласно подпункту 2 пункту 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 30.12.2021г., с изменениями от 03.02.2022г.) «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022 до окончания срока моратория начисление неустойки на установленную судебным актом задолженность в порядке исполнения судебного акта не производится (аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях 11 ААС суда от 12.02.2022г. № А65-19850/2021, 17 ААС от 04.05.2022г. по делу № А60-59132/2021, от 11.05.2022г. по делу № А60-61091/2021).

В соответствии пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (далее - Постановление) постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Данный документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 01.04.2022.

Таким образом, период действия моратория - с 01.04.2022 по 01.10.2022.

С учетом изложенного, пеня рассчитана за периоды с 16.07.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 22.08.2023 и составляет 626 814,64 руб. (1 651 250,39 ? 949 ? 1 / 300 ? 12%).

Таким образом, всего пеня по встречному иску подлежит взысканию в сумме 683 291,76 руб.

Оснований для снижения пени как по первоначальному, так и по встречному исковому заявлению, по ст. 333 ГК РФ не имеется.

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

          Взыскать с       ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу  ООО «АЛЬТ-ЭРА» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  неосновательное обогащение в сумме 1 654 223,07 руб., пеню в сумме 94 945,16 руб.,  расходы по оплате госпошлины в сумме 27 111,00 руб.

В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требований удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «АЛЬТ-ЭРА» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)   в пользу ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) задолженность в сумме             1 651 250,39 руб., пеню в сумме 683 291,76 руб.,  расходы по оплате госпошлины в сумме 21 117,00 руб.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

В результате зачета взаимных требований взыскать с ООО «АЛЬТ-ЭРА» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)   в пользу ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  денежные средства в сумме 579 379,92 руб.

Вернуть ООО «АЛЬТ-ЭРА» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)   из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 9 317,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 36278 от 04.06.2021.

Вернуть ООО «ПРОМЕТЕЙ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 18 404,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 267 от 07.09.2021.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                В.И. Гайворонский