Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-34690/2023

10 июня 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  09 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  10 июня 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коноваленко Я.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Старостиной Е.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: садоводческое некоммерческое товарищество "Оредежское" массива "Чаща" (188376, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Чаща массив, тер. СНТ Оредежское, дом 430, ОГРН: 

<

***>); 

ответчик: акционерное общество "Объединенная энергетическая компания" (197376, 

<

...>, литер х, офис 1, ОГРН: 

<

***>);

третье лицо: публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 

об обязании совершить действия, 

при участии от ответчика ФИО1 (доверенность от 09.01.2024),

установил:

Садоводческое некоммерческое товарищество "Оредежское" массива "Чаща"  (далее – Товарищество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Объединенная энергетическая компания" (далее – Компания) об обязании выполнить весь комплекс обязательств по договору от 04.10.2019 № 304-0102-19/ТП (далее – Договор) в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

Определением от 28.09.2023 публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Компания в отзыве возражает относительно удовлетворения иска, указывая на то, что выполнение условий Договора невозможно, в том числе до выполнения технических условий со стороны заявителя.

В судебном заседании представитель ответчика подтвердил доводы, изложенные в отзыве.

Представители истца и третьего лица, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явились, ввиду чего дело рассмотрено в их отсутствие по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Судом установлено, что между Компанией (сетевая организация) и Товариществом (заявитель) заключен Договор, согласно условиям которого, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ «Оредежское» в количестве 490 членов (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им. объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектовэлектроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 500 кВт; категория надежности:                    3 (третья); класс   напряжения   электрических   сетей,   к   которым   осуществляется   технологическое присоединение: 1 точка присоединения - 0,4 кВ, 2 точка присоединения - 10 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 232 кВт.

В силу пункта 6 Договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены соединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях в течении 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации                              о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения, акт выполненных работ и направить их заявителю.

В соответствии с пунктом 8 Договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно техническим условиям сетевая организация осуществляет следующие мероприятия: 

- выполнить организационно-технические мероприятия по присоединению дополнительной мощности к сетям вышестоящей смежной сетевой организации.

- подключение электроустановок заявителя выполнить: точка присоединения: от нижних контактов защитных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-250 кВА; точка присоединения: от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ «Новинка».

Осуществить фактическую подачу напряжения и мощности заявителю по уведомлению гарантирующего поставщика электроэнергии (энергосбытовой компании).

 На Товарищество возложено выполнение следующих мероприятий:  

 заявитель осуществляет следующие мероприятия: 

Подключение электроустановки заявителя выполнить:

1 точка присоединения: от нижних контактов защитных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-250 кВА.

2 точка присоединения: от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ «Новинка».  

Мероприятия по 1 точке присоединения:

- проверить сечение существующих проводов на территории садового некоммерческого товарищества на соответствие проектным нагрузкам при необходимости провести реконструкцию/строительство ЛЭП-0,4 кВ с использованием СИП. Сечение и схему прохождения линии определить проектом и согласовать со всеми заинтересованными лицами и организациями.

Мероприятия по 2 точке присоединения:

- выполнить строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором расчетной мощности на земельном участке заявителя. Тип, мощность, конструктивное исполнение определить проектом.

- выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ «Новинка» до ТП 10/0,4 кВ. Тип, трассу, сечение, конструктивное исполнение определить проектом.

- проверить сечение существующих проводов на территории садового некоммерческого товарищества на соответствие проектным нагрузкам при необходимости провести реконструкцию/строительство ЛЭП-0,4 кВ с использованием СИП. Сечение и схему прохождения линии определить проектом и согласовать со всеми заинтересованными лицами и организациями.

Перед началом реконструкции/строительства разработать необходимую проектную документацию на все выполняемые работы и согласовать ее с ОАО «ОЭК». Проектирование выполнить в соответствии с требованием действующих нормативно-технических документов.

Вблизи точек присоединения организовать расчетные узлы учета электрической энергии, удовлетворяющие нормативным требованиям ПУЭ, ПБЭЭ, РД 34.09.101-94, ПТЭЭП, Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.12 г. с возможностью работы в системе АИИС КУЭ:

Узлы учета смонтировать в щитах наружной установки, со степенью защиты IP не ниже 54, в которых предусмотреть установку автоматических выключателей в соответствии с распределением максимальной мощности, с возможностью опломбирования.

Установить электронные счетчики электрической энергии класса точности не менее 1, соответствующие требованиям ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012. Прибор учета должен иметь метрологическую аттестацию (поверку) давностью не более 12 месяцев.

При необходимости применить трансформаторы тока, соответствующие требованиям ГОСТ 7746-2001, с классом точности не менее 0,5 и имеющие действующее свидетельство о поверке. Конструкция клеммных зажимов трансформаторов тока должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

Организовать допуск прибора учета в эксплуатацию в соответствии с постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.

Обеспечить режим потребления реактивной мощности в точках присоединения с tg  не выше 0,35 (при уровне напряжения 0,4 кВ), не выше 0,4 (при уровне напряжения 10 кВ), в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 23.06.2015 №380. При необходимости предусмотреть установку устройств компенсации реактивной мощности.

Выполнить электромонтажные работы наружных и внутренних сетей объекта от точки присоединения в соответствии с ПУЭ, СНиП, ПТЭЭП и требованиями иных нормативных документов.

Уведомить ОАО «ОЭК» о выполнении технических условий. 

Представить в ОАО «ОЭК» исполнительную документацию, протоколы испытаний, копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации и акты на скрытые работы. Организовать осмотр энергопринимающих устройств с участием представителей ОАО «ОЭК».

Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск объекта в эксплуатацию.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения Договора.

Истец, ссылаясь на истечение срока выполнения мероприятий по Договору, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

При этом доводы Компании о невозможности выполнения условий Договора с его стороны до совершениях каких-либо действий со стороны смежной сетевой организации не могут быть приняты судом во внимание, поскольку в силу правил пункта 3 статьи 308 ГК РФ Договор  не создает обязанностей для публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго", не участвующего в нем в качестве стороны.

Компания также указала, что не имеет возможности выдать акт об осуществлении технологического присоединения, в том числе в связи с неисполнением технических условий со стороны заявителя.

В качестве документов, подтверждающих выполнение со своей стороны технических условий Товариществом представлены: заключение о рассмотрении проектной документации, в котором Компания согласовала Товариществу рабочую документацию на Реконструкцию сетей 10/0,4 кВ в СНТ «Оредежское» с установкой ТП 400/10/0,4», выполненную по заказу истца подрядной организацией; уведомление Компании о выявленных замечаниях от 20.11.2020 № 50-02-09/2894; копия АТП, направленная ответчиком в адрес Товарищества.

Однако в материалы дела Товариществом не представлены документы, подтверждающие направление сетевой организации уведомления об устранении  выявленных замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий, акт о выполнении заявителем технических условий в соответствии с пунктом 88 Правил № 861.

Сведений о том, что сетевая организация уклонилась от составления акта о выполнении технических условий со стороны заявителя в деле не содержится.

Электронное письмо от 24.12.2020, представленное истцом в дело, не содержит информации об устранении заявителем замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий, и о необходимости повторного осмотра с целью составления акта о выполнении технических условий заявителем.

Направленный сетевой организацией для согласования с заявителем проект акта об осуществлении технологического присоединения не свидетельствует о выполнении Товариществом технических условий.

В данном случае суд принимает во внимание доводы Компании о том, что истец не представил в материалы дела доказательств выполнения технических условий к Договору и доказательств уведомления ответчика об их выполнении с приложением подтверждающих документов.

Данное обстоятельство препятствует выполнению условий Договора сетевой организацией.

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коноваленко Я.А.