АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-11123/2021

г. Астрахань

11 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена  09 марта 2022

Арбитражный суд Астраханской области

в составе:

судьи: Соколова А.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  ООО "Промстройконтроль" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2012, ИНН: 

<

***>)  к  АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2013, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности по договору от 19.05.2020г. в размере 1 599 310 руб.65 коп., неустойки в размере 79 965 руб.53 коп.

при участии:

от истца: ФИО2- представитель по доверенности от 17.11.2021 г. 

от ответчика: ФИО3 –  представитель по доверенности  № 144 от 29.12.2021 г., 

            ООО "Промстройконтроль" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2012, ИНН: 

<

***>) обратилось в арбитражный суд Астраханской области с иском к Акционерному обществу "Южный центр судостроения и судоремонта" о взыскании задолженности по договору от 19.05.2020г. в размере 1 599 310 руб.65 коп., неустойки в размере 79 965 руб.53 коп.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить. 

Представитель ответчика сумму задолженности не оспорил, доказательств оплаты не представил.

Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, выслушав доводы сторон, суд 

УСТАНОВИЛ:

19 мая 2020 между акционерным обществом «Южный центр судостроения и судоремонта»    (Заказчик)    и    обществом    с    ограниченной    ответственностью

«ПромСтройКонтроль» (Подрядчик) был заключен договор подряда № SSRC-2020-174 от 19 мая 2020 на выполнения собственными силами и средствами работ по ремонту кровли цеха № 1 акционерного общества «Южный центр судостроения и судоремонта».

          Согласно п. 1.1. договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами работы по ремонту кровли цеха № 1 АО «ЮЦСС» в объеме, определенном Договором, Техническим заданием (Приложение №. 1 к Договору) и Сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять результат этих Работ и оплатить определенную Договором цену.

           Цена договора подряда № SSRC-2020-174 от 19 мая 2020 составляет 11 788 993,12 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля 12 коп.), в том числе НДС 20% - 1 964 832,19 (один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два рубля 19 коп.) (п.2.1 договора).

          Оплата выполненного Подрядчиком очередного этапа работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформленных с учетом произведенной ранее выплаты аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (н.2.8. договора).

          Окончательный расчет с Подрядчиком по Договору производится после завершения последнего этапа работ в течение 15 (пятнадцати) дней и подписания сторонами Актов по форме КС-2, справки по форме КС-3 и Акта сдачи-приемки работ, на основании документов указанных в договоре (п.2.10 договора).

           Срок выполнения работ по Договору составляет (п. 3.1):начало - со дня заключения Договора; завершение работ - 90 календарных дней со дня заключения Договора.       

          Дополнительным соглашением № 1 к договору № SSRC-2020-174 от 19 мая 2020, сроки выполнения работ продлены и составили 135 календарных дней со дня заключения Договора», таким образом, срок завершения выполнения работ составил 01.10.2020.

          В соответствии с условиями договора № SSRC-2020-174 от 19 мая 2020 Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройКонтроль» поэтапно выполнило комплекс работ по ремонту кровли цеха № 1 акционерного общества «Южный центр судостроения и судоремонта» на общую сумму 11 788 993,12 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля 12 коп.), в том числе НДС 20% -1 964 832,19 (один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два рубля 19 коп.) (подтверждающие документы: КС-2, КС-3 № 1 от 21.07.2020, КС-2, КС-3 №2 от 31.08.2020, КС-2, КС-3 № 3 от 29.10.2020).

          29 октября 2020 был составлен и подписан Акт сдачи-приемки работ, подтверждающий выполнение работ в полном объеме по договору № SSRC-2020-174 от 19 мая 2020. В соответствии с п. 3 указанного акта работы выполнены полностью. Заказчик претензий по объему, качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.

Работы оплачены Акционерным обществом «Южный центр судостроения и судоремонта» на сумму 8 189 682,47 (восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 47 коп.) в том числе НДС-20% в сумме 1 364 947,08 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок семь руб. 08 копеек).

          Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройКонтроль» неоднократно обращалось в адрес акционерного общества «Южный центр судостроения и судоремонта» с требованием о добровольной оплате задолженности по договору № SSRC-2020-174 от 19 мая 2020 в размере 3 599 310 (три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч триста руб.

65 копеек), о чем свидетельствует письмо исх. №30 от 08.12.2020, а также претензия от 17.03.2021.

         Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.10.2020 на сумму 5 141 872,37 и копия акта о приемке выполненных работ от 29.10.2020 сумму 5 141 872,37, предоставлена 29.10.2020 (сумма задолженности составляет 3 599 310 (три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч триста руб. 65 копеек), оплата за выполненные работы должна быть произведена не позднее 14.12.2020 г.

           В настоящее время работы оплачены на сумму 10 189 682,47 (десять миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 47 коп.), в том числе НДС-20% в сумме 1 698 280,41 (один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят руб. 41 коп.). Остаток платежа по указанному договору составляет 1 599 310,65 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч триста десять руб. 65 коп.) в том числе НДС-20%.

20.08.2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройКонтроль» вновь обратилось с претензией по вопросу оплаты оставшегося платежа в размере 1 599 310,65 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч триста десять руб. 65 коп.) в том числе НДС-20%.

          Однако до настоящего времени обязательства Заказчика по указанному договору выполнены не в полном объеме, задолженность не оплачена.

          В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

          В силу п. 2.10. Договора окончательный расчет с Подрядчиком производится после завершения последнего этапа работ в течение 15 (пятнадцати) дней и подписания сторонами Актов по форме КС-2, справки по форме КС-3 и Акта сдачи-приемки работ, на основании документов указанных в договоре.

          В течение 5 (пяти) дней после подписания Актов по форме КС-2 и справок КС-3 Подрядчик предоставляет счет и счет - фактуру (п.2.9 договора).

         Последний платеж в размере 2 000 000 (два миллиона) был произведен 25.06.2021.

         В настоящее время Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» не выполнило обязательств по оплате в размере 1 599 310,65 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч триста десять руб. 65 коп.)

          За нарушение сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов от неуплаченной суммы (п.8.2. договора).

В судебном заседании представитель ответчика не оспорил сумму задолженности, доказательств оплаты долга в дело ответчиком не представлено. 

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца о взыскании с ответчика основного долга  и пени в заявленной сумме обоснованными, доказанными документально и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-171. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества "Южный центр судостроения и судоремонта" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2013, ИНН: 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Промстройконтроль" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2012, ИНН: 

<

***>)   задолженность  в размере 1 599 310 руб.65 коп., неустойку в размере 79 965 руб.53 коп., судебные расходы в сумме 28993 руб.

            Взыскать с Акционерного общества "Южный центр судостроения и судоремонта" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2013, ИНН: 

<

***>)   в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 800 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru

Судья

А.М. Соколова