АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24 апреля 2017 года                                                                Дело № А42-489/2015

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Васильевой Е.С.,               Соколовой С.В., 

при участии от общества с ограниченной ответственностью «Кольские путешествия» Симакова М.В. (доверенность от 01.06.2016 без номера), 

рассмотрев 19.04.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная Компания» на решение Арбитражного суда Мурманской области от 18.10.2016 (судья Кузнецова О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2017 (судьи Третьякова Н.О., Дмитриева И.А., Згурская М.Л.) по делу № А42-489/2015,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная Компания», место нахождения: 183052, г. Мурманск, ул. Фадеев ручей, д. 27, ОГРН 1115190009340, ИНН 5190933474 (далее - ООО «СЗСК»), обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Кольские путешествия», место нахождения: 183038, г. Мурманск,                                ул. Челюскинцев, д. 30А, ОГРН 1025100591372, ИНН 5105002332 (далее -                   ООО «Кольские путешествия»), 47 126 737 руб. 02 коп. неосновательного обогащения по договору генерального подряда от 07.02.2014 № 01/01-14 (далее – договор).

Решением суда первой инстанции от 18.10.2016, оставленным без изменения постановление апелляционного суда от 16.01.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.  

В кассационной жалобе ООО «СЗСК», ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие их выводов обстоятельствам дела, просит отменить решение и постановление и принять новый судебный акт. Как указывает податель жалобы, требования истца основаны на фактическом выполнении дополнительного объема работ, который хотя и не был предусмотрен договором, но необходимость в выполнении которого с увеличением общей стоимости работ  согласовывалась сторонами в электронной переписке. От подписания же дополнительного соглашения ответчик необоснованно уклонился. 

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу истца – без удовлетворения, считая приведенные в ней доводы несостоятельными. 

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы ООО «СЗСК» по мотивам, изложенным в отзыве.  

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте слушания дела, своих представителей в судебное заседание не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, между ООО «СЗСК» (генподрядчик) и             ООО «Кольские путешествия» (заказчик) заключен договор, согласно которому генподрядчик по поручению заказчика принял на себя обязательства по  выполнению комплекса подрядных восстановительных работ по строительству зданий/строений, расположенных на базе отдыха «Оленья» в районе железнодорожной станции Лопарская Кольского района Мурманской области.

Стоимость работ согласована сторонами в пункте 2.1 договора и составила                               10 000 000 руб. (включая  НДС 18%). При этом стороны оговорили, что стоимость дополнительных и неучтенных работ не входит в указанную сумму и определяется дополнительно; стоимость работ может быть изменена в случае изменения проектных решений заказчиком, уточнения объемов работ и перенесения сроков выполнения работ не по вине генподрядчика.

Пунктом 2.2 договора стороны предусмотрели авансирование работ  в размере 50 процентов от стоимости договора для закупки материалов и оплаты средств малой механизации, после получения которого генподрядчик в течение 5 рабочих дней обязался приступить к выполнению производства работ.

Во исполнение условий договора заказчик произвел оплату выполненных ответчиком работ в общей сумме 10 000 000 руб. по платежным поручениям от 10.02.2014 № 1 на сумму  1 990 000 руб., от 11.02.2014 № 2 на сумму 3 010 000 руб., от 11.03.2014 № 7 на сумму 3 000 000 руб. и от 24.03.2014 № 16 на сумму 2 000 000 руб. 

Сопроводительным письмом от 11.12.2014 № 135 (том 1 л.д. 21) генподрядчик направил в адрес ответчика акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 от 11.12.2014 № 1-8 на общую сумму                                             57 126 737 руб. 02 коп., соответствующую справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.12.2014 № 1, а также ведомость сметной стоимости работ.

Полагая, что заказчик должен дополнительно оплатить выполненные работы в сумме 47 126 737 руб. 02 коп., истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика указанной суммы в качестве неосновательного обогащения. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали истцу в удовлетворении иска, не усмотрев оснований основания для их удовлетворения при отсутствии между сторонами согласования об увеличении  объема и стоимости работ по договору. 

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения норм материального и процессуального права, считает решение и постановление не подлежащими отмене по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 709 ГК РФ цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения указываются в договоре подряда.

Цена работы может быть определена путем составления сметы, которая, в свою очередь, может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (пункты 3 и 4 статьи        709 ГК РФ).

Как предусмотрено пунктом 6 статьи 709 ГК РФ, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (пункт 4 статьи 743 ГК РФ).

Таким образом, в случае, если подрядчик на свой страх и риск выполнил дополнительные работы, не известив об этом заказчика, он лишается права на получение их стоимости, в том числе в виде неосновательного обогащения.

Пунктом 6.2 договора стороны предусмотрели, что любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны заказчиком и генподрядчиком.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, при заключении договора стоимость работ, исходя из их объема, определена сторонами согласно ведомости в качестве твердой цены договора.

Дополнительные соглашения по согласованию увеличения объема и стоимости работ сторонами не заключались, работы подрядчиком в порядке пункта 3 статьи 743 ГК РФ не приостанавливались. 

Доказательств того, что выполнение дополнительного объема работ было связано с необходимостью немедленных действий в интересах заказчика, поскольку их приостановление могло привести к гибели или повреждению объекта строительства, истцом в материалы дела не представлено.

Как правильно указали суды, ни договором подряда, ни Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено право подрядчика на одностороннее увеличение сметы и твердой цены работ.

Пунктом 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что в случае нарушения подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 3 статьи 743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ и в том случае, если акт приемки строительно-монтажных работ подписан представителем заказчика, так как этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на оплату дополнительных работ.

Таким образом, наличие актов выполненных работ по форме КС-2 на сумму, превышающую твердую цену работ по договору, само по себе не означает  возникновение у заказчика обязанности оплатить выполненные работы сверх цены договора.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 744 ГК РФ подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов, только в соответствии со статьей 450 ГК РФ, то есть посредством внесения изменений в договор, а не путем предъявления иска о взыскании стоимости не согласованного с заказчиком, но фактически выполненного дополнительного объема работ.

Между тем consultantplus://offline/ref=E2BA92F00473987252BFBABE580D6E65F707BFCC1211EC31634D46BB1BF832C8444C240B367E0BAAsE13Mв рассматриваемом случае соглашение об изменении сметной стоимости работ и твердой цены договора сторонами не достигнуто. С требованием об изменении договора в этой части подрядчик в арбитражный суд не обращался.

При этом суды первой и апелляционной инстанций, оценивая по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, правомерно приняли во внимание экспертное заключение                                                 № 010546/12/51001/512015/А42-489/15 комплексной судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы, производство которой поручалось Автономной Некоммерческой Организации «Центр Строительных Экспертиз» и Автономной Некоммерческой Организации «Центр оценки недвижимости и бизнеса» членам Некоммерческого партнерства «Федерация судебных экспертов».

Согласно указанному экспертному заключению, определить фактический объем выполненных генподрядчиком работ и объем материалов, израсходованных истцом на их выполнение, не представляется возможным, поскольку значительная часть предъявленных истцом работ относится к «скрытым» (скрываемым последующими работами), выполненными силами как  ООО «СЗСК», так и другими подрядными организациями, осуществляющими работы на туристической базе «Оленья», в отсутствие исполнительной документации необходимой для выполнения строительно-монтажных работ,  то есть при отсутствии общего журнала работ, журнала земляных работ, исполнительных схем, актов освидетельствования скрытых работ, геодезической съемки (исполнительной схемы), паспорта и сертификатов на материалы, транспортных накладных. 

При таких обстоятельствах суды, учитывая, что выполнение генподрядчиком дополнительных работ по договору, их объем и стоимость, а равно изменение твердой цены, предусмотренной договором, сторонами в установленном порядке не согласовывался, документально обоснованный результат дополнительных работ заказчику не предъявлялся, пришли к обоснованному выводу об отсутствии у заказчика обязанности по оплате этих работ.

Доводы заявителя, изложенные в жалобе, не содержат фактов, которые не проверены и не учтены судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела и имели бы значение для вынесения судебных актов по существу, влияли на обоснованность и законность, либо опровергали выводы судов.

Поскольку дело рассмотрено судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения жалобы ООО «СЗСК» и отмены принятых по делу судебных актов.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа,  

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 18.10.2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2017 по делу № А42-489/2015 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная Компания» - без удовлетворения.

Председательствующий                                                                 Л.И. Корабухина

Судьи                                                                                                Е.С. Васильева 

                                                                                                С.В. Соколова