Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18754/2020

11 декабря 2020 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  17 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  11 декабря 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Инбрэс» (адрес: 428018, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» (адрес: 191124, 

<

...>, лит. А, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании денежных средств, 

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 26.07.2019), 

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 17.12.2019), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Инбрэс» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с акционерного общества «Энергосервисная компания Ленэнерго» 1 294 950 руб. задолженности по оплате выполненных работ по договорам подряда от 23.04.2019 № 19-189 и от 26.06.2019 № 19-307. 

Ответчик предъявил встречный иск о взыскании 1 504 832 руб. 50 коп. штрафных санкций по договору подряда от 23.04.2019 № 19-189 и 1 227 600 руб. штрафных санкций по договору подряда от 26.06.2019 № 19-307, просит произвести зачет встречных требований, а оставшуюся сумму в размере 209 882 руб. 50 коп. взыскать с ООО «Инбрэс» в его пользу. 

Определением от 11.06.2020 встречный иск принят к производству для рассмотрения вместе с первоначальным на основании статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Судом установлено, что между сторонами заключены договоры подряда от 23.04.2019 № 19-189 и от 26.06.2019 № 19-307 (далее – Договоры).

Содержание и объем работ определены в техническом задании (приложения № 1 к Договорам). 

Факт выполнения истцом работ в полном объеме надлежащим образом подтверждается подписанными ответчиком актами сдачи-приемки работ. 

Ответчик факт выполнения истцом работ на сумму 1 294 950 руб. не оспаривает. 

Учитывая изложенное, первоначальный иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по уплате государственной пошлины на акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». 

Встречный иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2.2 договора подряда от 23.04.2019 № 19-189 срок окончания выполнения работ по Договору - не позднее 24.05.2019. 

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору)

Согласно пунктам 1.6, 2 Технического задания предусмотрено несколько этапов проектирования. На I этапе необходимо определить и выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для выполнения работ. Осуществляется без выезда на сетевые объекты (ТП и РЩ объекты, на основании предоставленных исходных данных, (подпункт 2.1 Технического задания). Далее необходимо выполнить расчеты показателей сети (SAIDI, SAIFI и т.д.) для различных вариантов сети:

-для текущего состояния сети без учета автоматизации на 2021 и 2026 год;

-для сети с учетом автоматизации на 2021 и 2026 год по нескольким сценариям реализации проекта (подпункт 2.2 Технического задания)

Определить оптимальный сценарий реализации проекта в том числе: 

- рассмотреть несколько сценариев реализации проекта: Различное количество точек автоматизации (управляемых объектов), различный объем модернизации;

- сформулировать    критерии    для    реконструкции    сетевых    объектов (управляемые/наблюдаемые/не реконструируемые);

-выбрать оптимальный сценарий (подпункт 2.2 Технического задания).

Каждому этапу работ предшествует выполнение определенного вида работ по предыдущему этапу при наличии всей необходимой информации и документации.

Перечень исходных данных и необходимой информации для выполнения работ предусмотрен Приложением №4 Договора.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Договора Заказчик обязался передать подрядчику имеющуюся в его распоряжении информацию и документы, необходимые для производства работ в соответствии с Приложением №4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором, в том числе в согласовании подготовленной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Между тем, в сроки, обеспечивающие выполнение работ в установленный Договором срок, информация и документы Заказчиком переданы не были.

Подрядчик вынужден был длительное время посредством переписки по электронной почте и телефонограмм запрашивать исходные данные и другую информацию, необходимую для выполнения работ. При этом необходимая информация предоставлялась частями, не в полном объеме. Указанное привело за собой увеличение сроков выполнения работ.

Не получив запрошенные сведения исходных данных в полном объеме, необходимые для начала выполнения работ, письмом №329 от 15.05.2019 и посредством направления электронного сообщения от 15.05.2019 в адрес ответственного работника АО «ЭСКЛ» Сысоева А.В. ООО «ИНБРЭС» вновь запросило у Заказчика исходные данные по 6 пунктам указанного в них перечня, необходимые для выполнения первого этапа работ.

Часть исходных данных по пунктам 1, 2, 5 перечня были переданы 15.05.2019 посредством электронного сообщения. При этом в сообщении было указано, что по пунктам 3, 4 пока нет такой информации, а по пункту 6 - непонятно что нужно.

В адрес Заказчика 21.05.2019 вновь был направлен запрос о предоставлении исходных данных по пункту 6 первичного перечня.

Из письма АО «ЭСКЛ» от 23.05.2019 №ЭСКЛ/16-29/956, направленного в адрес филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» с просьбой предоставить исходные данные, следует, что необходимая информация была запрошена письмами 11.03.2019 №ЭСКЛ/16-29/409 и от 13.03.2019 №ЭСКЛ/16-29/423 до заключения договора с ООО «ИНБРЭС» и до 23.05.2019 ответа на запрос не поступало.

На момент заключения Договора Заказчику было известно об отсутствии исходных данных, необходимых для выполнения работ. Между тем, Заказчик попытался возложить обязанность по сбору этих данных непосредственно на Исполнителя, который не может повлиять на их получение без содействия самого Заказчика.

 Заказчик 04.06.2019 направил в адрес Подрядчика письмо ЖЭСКЛ/16-29/1077, в котором указал, что исходные данные по объекту будут предоставлены после получения их из филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Посредством электронного сообщения 06.06.2019 частично были представлены предварительные данные по Flisr, а 10.06.2019 были предоставлены данные по АВР.

Таким образом, исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, были предоставлены только в июне 2019 года.

Кроме того, после фактического выполнения работ 28.06.2019, Заказчик длительное время их согласовывал, и только 04.09.2019 ПАО «Ленэнерго» направил в адрес АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» письмо № ЛЭ/02-013/1823 о необходимости внесения корректировок.

Подрядчик вынужден был выполнить корректировки проектной документации по предложениям ПАО «Ленэнерго», которые были направлены письмом от 23.09.2019 №783, которые опять же после длительного изучения и согласования были приняты 29.10.2019. 

Согласно пункту 8.5 Договора, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, и это приведет к просрочке в выполнении работ, подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на период просрочки. Отсутствие вины подрядчика освобождает от договорной ответственности, предусмотренной для Подрядчика положениями настоящего Договора.

По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора (пункт 3 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

В связи с тем, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине самого Заказчика, Подрядчик не может нести ответственность, предусмотренную пунктами 8.1.1 -8.1.3 Договора. 

Кроме того, пункт 9.1Договора предусматривают освобождение Стороны договора за неисполнение какого-либо из своих обязательств в случаях, если такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля, если от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения контракта принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения контракта.

Исходя из указанных обстоятельств, штрафные санкции по договору подряда от 23.04.2019 № 19-189 в размере 1 504 832 руб. 50 коп. взысканию не подлежат. 

В соответствии с пунктом 2.2 договора подряда от 26.06.2019 № 19-307 срок окончания выполнения работ по Договору - не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора, т.е. не позднее 16.07.2019. 

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору)

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору)

Согласно пунктам 1.6, 2 Технического задания предусмотрено несколько этапов проектирования.

Так, на I этапе необходимо определить и выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для выполнения работ. Осуществляется без выезда на сетевые объекты (ТП и РП) объекты, на основании предоставленных исходных данных (подпункт 2.1 Технического задания). Далее необходимо выполнить расчеты показателей сети (СAPEX, ОРЕХ, SAIDI, SAIFI и т.д.) для различных вариантов сети:

-для текущего состояния сети без учета автоматизации на 2021 и 2026 год;

-для сети с учетом автоматизации на 2021 и 2026 год по нескольким сценариям реализации проекта, (подпункт 2.2 Технического задания)

Определить оптимальный сценарий реализации проекта в том числе:

-рассмотреть несколько сценариев реализации проекта:

Различное количество точек автоматизации (управляемых объектов), различный объем модернизации;

сформулировать    критерии    для    реконструкции    сетевых    объектов (управляемые/наблюдаемые/не реконструируемые);

-выбрать оптимальный сценарий (п.п.2.3 Технического задания)

Каждому этапу работ предшествует выполнение определенного вида работ по предыдущему этапу при наличии всей необходимой информации и документации.

Перечень исходных данных и необходимой информации для выполнения работ предусмотрен Приложением №4 Договора.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Договора Заказчик обязался передать подрядчику имеющуюся в его распоряжении информацию и документы, необходимые для производства работ в соответствии с Приложением №4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором, в том числе в согласовании подготовленной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Согласно Приложению №4 к Договору Заказчик обязан был передать Подрядчику следующую информацию и документацию, необходимую для выполнения работ:

1. Информация по оснащенности АВР и Flisr;

2. Перечень КЛ/6-10 кВ распр.сети пилотного района с диспетчерскими

наименованиями, датами ввода в эксплуатацию и протяженностями;

3. Точки поставки от каждой электроустановки пилотного района;

4. Форма 8.1 за 2015-2017 с объектами пилотной зоны;

5. Однолинейные схемы распред.сети ЮкВ пилотного района;

6. Планы по реконструкции электроустановок пилотного района

В сроки, обеспечивающие надлежащее выполнение работ по Договору, информация и документы Заказчиком переданы не были.

В связи с чем, Подрядчик вынужден был длительное время посредством переписки по электронной почте и телефонограмм запрашивать исходные данные и другую информацию, необходимую для выполнения работ. При этом необходимая информация предоставлялась частями, не в полном объеме. Указанное привело за собой увеличение сроков выполнения работ.

В рамках преддоговорных отношений 13.05.2019 Подрядчик заблаговременно запросил исходные данные по объекту для выполнения первого этапа работ посредством направления электронного письма ответственным работникам АО «ЭСКЛ» по 6 пунктам перечня.

Посредством электронного сообщения 03.06.2019 была представлена часть исходных данных по объекту, 01.07.2019 были представлены сведения по пункту 6 запрашиваемого перечня.

В связи с тем, что для дальнейшего выполнения работ требовалось согласовать у ПАО «Ленэнерго», в чьем ведении находятся сети, технические решения, АО «ЭСКЛ» направило в ПАО «Ленэнерго» соответствующие письма от 05.07.2019 №ЭСКЛ/16-19/1354 и от 31.07.2019 № ЭСКЛ/16-29/1630

Без согласования этих принципиальных решений по предлагаемой модернизации сети дальнейшее выполнение работ не представлялось возможным.

Согласованные с ПАО «Ленэнерго» общие технические решения по объекту Заказчик направил Подрядчику лишь 20.08.2019 и 21.08.2019.

Таким образом, сбор информации по исходных данным, без которых невозможно было перейти к последующим этапам выполнения работ составил 2,5 месяца. При этом ООО «Инбрэс» не могло каким-то образом повлиять на сокращение сроков получения исходных данных.

АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 27.09.2019 направило Подрядчику письмом № ЭСКЛ/16-29/2084 откорректированные схемы сети на 2019 и 2026 гг., в связи с чем потребовалось внести изменения в проектную документацию с учетом данных корректировок.

АО «ЭСКЛ» 02.10.2019 направило ООО «Инбрэс» посредством электронного сообщения вновь откорректированные схемы сети на 2021 год, в связи с чем потребовалось внести изменения в проектную документацию с учетом данных корректировок.

Таким образом, общая концепция реконструкции сети пересматривалась АО «ЭСКЛ» неоднократно, в связи с чем, ООО «ИНБРЭС» было вынуждено корректировать документацию на основании предоставляемых исходных данных - схем распределительной сети

АО «ЭСКЛ» 17.10.2019 предоставило информацию о недостающих РП-ТП В связи с этим, Подрядчик вынужден был выполнить корректировки проектной документации по предложениям ПАО «Ленэнерго», которые были направлены письмом от 21.10.2019 №855

Между Сторонами 31.10.2019 были подписаны акт о сдаче-приемке результатов выполненных работ №1 и накладная №1.

Согласно пункту 8.5 Договора, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, и это приведет к просрочке в выполнении работ, подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на период просрочки. Отсутствие вины подрядчика освобождает от договорной ответственности, предусмотренной для Подрядчика положениями настоящего Договора.

В связи с тем, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине самого Заказчика, Подрядчик не может нести ответственность, предусмотренную пунктами 8.1.1 -8.1.3 Договора. 

Кроме того, пункт 9.1 Договора предусматривают освобождение Стороны договора за неисполнение какого-либо из своих обязательств в случаях, если такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля, если от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения контракта принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения контракта.

В силу пункта 1 статьи 718 ГК РФ в ходе выполнения подрядных работ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 718 ГК РФ при неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Таким образом, встречное исковое заявление не подлежит удовлетворению, поскольку отсутствуют основания для взыскания штрафных санкций. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества «Энергосервисная компания Ленэнерго» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инбрэс» по первоначальному иску 1 294 950 руб. задолженности и 25 950 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.