И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-81928/24-89-352

города Москва

30.07.2024 года                                                                      

Резолютивная часть решения оглашена 23.07.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 30.07.2024 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола секретарем судебного заседания Голоскоковой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕХРЕГИОН" (ИНН: 

<

***>) к ответчику ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 

<

***>) о взыскании  22 061 884 ,45 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 27.07.2023 г.;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 10.11.2023 г. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №2223187375842554164000000/1133/2022/3587 от 27.12.2022 в размере 22 061 884 руб. 45 коп.   

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца требования поддержал. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Согласно доводам искового заявления, между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибтехрегион» (далее - истец) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства» (далее - ответчик) заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству площадок 22, 23 на объекте строительства 379/РК-2р, 1 очередь от 27.12.2022 №2223187375842554164000000/1133/2022/3587 (далее - договор).

Согласно условиям договора субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по благоустройству площадок 22,23, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Субподрядчик обязуется выполнить работы на Объекте собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями договора, в том числе Технического задания (Приложение№ 1), утвержденной Рабочей и Проектной Документацией, другими исходными данными, необходимыми для выполнения субподрядчиком работ и сдать подрядчику выполненные работы в сроки, предусмотренные договором (п. 1,1, п, 1.2. договора).

Пунктом 1.3. договора установлено, что договор заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа.

Общая цена договора составляет 43 536 922,80 руб. с НДС (пункт 3.1 договора).

Оплата выполненных подрядчиком работ по договору производится подрядчиком в порядке, установленном разделом 4 договора, за вычетом генподрядных услуг и аванса, до предела, не превышающего 95% от цены договора (пункт 4.6 договора).

На основании п.4.3 договора подрядчик вправе перечислить субподрядчику авансовый платеж в размере до 80% от цены договора, но не более суммы денежных средств, перечисленных государственным заказчиком в качестве авансовых платежей в рамках исполнения обязательств по строительству объекта, на основании счета и заявки на авансирование, составленной по форме, приведенной в приложении №3 к договору, предоставленных подрядчиком, при наличии у подрядчика заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом от 29.12.22012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельного счета. Аванс может выплачиваться частями по мере поступления денежных средств от государственного заказчика.

Пунктом 4.5 договора предусмотрено, что оплата выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ по договору производится генподрядчиком в течение 7 рабочих  дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета и счета-фактуры.

Все выполненные работы засчитываются пропорционально оплаченному авансу в счет погашения аванса. Порядок и условия погашения аванса могут изменяться по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к договору (пункт 4.9 договора).

Согласно пунктам 4.16, 4.17 договора, субподрядчик оплачивает подрядчику оказанные им услуги, связанные с координацией выполненных подрядных работ по договору (генподрядные услуги) в размере 8% от стоимости выполненных подрядных работ в отчетном периоде. Оказание генподрядных услуг оформляется двусторонним актом оказанных генподрядных услуг.

В договоре от 27.12.2022 № 2223187375842554164000000/1133/2022/3587 определены все существенные условия договора подряда.

Истец выполнил и сдал работы, что подтверждается подписанными Сторонами документами:

- акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 23.01.2023 на сумму 3 175 660,80 руб., № 2 от 21.04.2023 на сумму 81 344,40 руб., № 3 от 24.05.2023 на сумму 6 527 671,20 руб., № 4 от 23.06.2023 на сумму 10 811 115,60 руб., № 5 от 24.06.2023 на сумму 635 400 руб., № 6 от 24.06.2023 на сумму 267 985,66 руб., № 7 от 24.07.2023 на сумму 4 256 275,20 руб.; № 8 от 20.11.2023 на сумму 851 066,40 руб., № 9 от 20.11.2023 на сумму 634 778,40 руб.

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 1 от 23.01.2023 на сумму 3 175 660,80 руб., № 2 от 21.04.2023 на сумму 81 344,40 руб., № 3 от 24.05.2023 на сумму 6 527 671,20 руб., № 4 от 23.06.2023 на сумму 10 811 115,60 руб., № 5 от 24.06.2023 на сумму 903 265,66 руб., № 6 от 24.07.2023 на сумму 4 256 275,20 руб.; № 7 от 20.11.2023 на сумму 1 485 844,80 руб.

Всего было выполнено работ на общую сумму: 27 241 177,66 руб.

Все вышеперечисленные акты и справки о стоимости работ свидетельствуют, о выполнении истцом предусмотренных условиями договора работ и принятии ответчиком результата без замечаний и возражений.

Услуги генподряда согласно подписанным, сторонами актами сдачи-приемки оказанных генподрядных услуг составляют: 2 179 294,21 руб. на основании актов: акт № 6623 от 31.07.2023 на сумму 340 502,02 руб., № 6403 от 30.06.2023 на сумму 864 889,25 руб., № 6405 от 30.06.2023 на сумму 72 261,25 руб., № 6291 от 31.05.2023 на сумму 522 213,70 руб., № 6218 от 21.04.2023 на сумму 6 507,55 руб., № 5804 на сумму 254 052,86 руб.; счет фактура от 04.12.2023 на сумму 118 867,56 руб.

Ответчиком оплачена работа в сумме: 2 999 999,00 руб., что подтверждается: платежным поручением от 21.02.2023 № 3807 (аванс).

Стоимость  по договору (руб.)

Принято заказчиком (руб)

АВАНС получен

Аванс

%

Оплата

Депозит 5%

Генподрядные услуги (8%)

ГП    (6%) оплачены

Задолженность (руб.)

43536922,80

27 241 177,66

2999999,00

6,89

0

1287766,64

2179294,21

0

22 061 884,45

Сумма задолженности за выполненные работы в размере 22 061 884,45 руб. ответчиком не была оплачена.

Подпунктом 6.2.1 договора предусмотрена обязанность подрядчика по обеспечению финансирования работ по договору.

В соответствии с подпунктом 16.1 договора при нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и договором.

Таким образом, обязательства должны исполняться надлежащим образом, подрядчик свои обязательства надлежащим образом исполнил, генподрядчик обязательства по оплате выполненных и принятых работ не выполнил.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств (ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ) подтверждает обоснованность требований истца к ответчику о взыскании задолженности в размере 22 061 884 руб. 45 коп. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (ст. 70 АПК РФ).

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕХРЕГИОН" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 22 061 884,45 руб., госпошлину в размере  133 309 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

О.А. Акименко