Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-3760/2017

г.Липецк

09 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2017 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 09 октября 2017 года.     

 

            Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,                   при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Канаевой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая Компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения юридического лица): 

<

...>, адрес филиала – 

<

...>)

 

к закрытому акционерному обществу «Строительная компания «Липецкметаллургстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)

 

о расторжении договора,

 

при участии в заседании:

от истца – ФИО1, доверенность № 6/2017 от 01.01.2017,

от ответчика – ФИО2, доверенность от 12.05.2017, 

 

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая Компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Строительная компания «Липецкметаллургстрой» о расторжении договора № 92 о подключении к системам теплоснабжения от 26.01.2015. 

Определением арбитражного суда от 11.04.2017 исковое заявление принято к производству.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования, ответчик иск оспорил.

Арбитражный суд, выслушав истца и ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее.   

Как следует из материалов дела, между закрытым акционерным обществом «Строительная компания «Липецкметаллургстрой» (заявитель) и открытым акционерным обществом «Квадра – Генерирующая компания» (в настоящее время – публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания», исполнитель) заключен договор № 92 о подключении к системам теплоснабжения от 26.01.2015 (далее – договор), согласно которому исполнитель принял на себя обязательства выполнить действия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к подключению объекта капитального строительства заявителя в точке подключения, указанной в условиях подключения, и обеспечить возможность подключения этого объекта к эксплуатируемым исполнителем сетям инженерно-технического обеспечения, а заявитель – внести плату за подключение в соответствии с утвержденным тарифом, выполнить действия по подготовке объекта к подключению, выполнить подключение этого объекта.

Согласно пункту 3.3.1 договора заявитель обязуется разработать проектную документацию теплоснабжения объекта и узла коммерческого учета и в течение 10 дней после утверждения представить проектную документацию исполнителю на согласование.

Пунктом 3.3.4 договора предусмотрено, что заявитель обязуется в срок до 01.09.2016 выполнить условия подключения и направить исполнителю уведомление о готовности к подключению (одновременно предоставить  документацию о проведенной проверке и допуске в эксплуатацию объектов заявителя до точки подключения с отметками органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический и технологический надзор, а также документацию гарантии качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет).

В силу пункта 3.3.7 договора заявитель обязуется произвести оплату подключения, в соответствии с разделом 4 договора.

Согласно пункту 4.1 договора стоимость подключения составляет                          5 519 135 руб. 94 коп., в том числе НДС – 841 902 руб. 09 коп. (на основании постановления Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 18.12.2014                  № 56/32).

Заявитель вносит плату за подключение на следующих условиях:

- 10% от платы, предусмотренной пунктом 4.1, в течение 20 дней с даты заключения договора;

- 40% от платы, предусмотренной пунктом 4.1, в течение 100 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заявителя, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов (пункт 4.2 договора в редакции протокола разногласий).

Истец выдал ответчику условия подключения от 26.01.2015 № 340/55-Т.

В связи с невыполнением ответчиком условий договора истец направил ему соглашение от 25.12.2015 о расторжении договора (письмо от 31.12.2015                                № АА-341/13407).

Впоследствии истец направил ответчику претензию от 30.01.2017                              № АА-330/1130, в которой указал на неисполнение последним своих обязательств по договору, в связи с чем просил подписать ранее направленное соглашение о расторжении договора.

Неисполнение ответчиком своих обязательств по договору послужило основанием для обращения истца в суд с требованием о расторжении договора.

Частью 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Указанное в части 1 настоящей статьи подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (далее также - договор на подключение (технологическое присоединение), который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации (часть 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Согласно пункту 37 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307, при исполнении договора о подключении заявитель обязан:

выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем (пункт 38 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307).

   Из пояснений истца следует, что ответчиком не исполнены обязательства по договору, предусмотренные пунктами 3.3.1, 3.3.4 и 4.2 договора.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из возражений ответчика следует, что им возмещены фактические расходы истца по разработке проектно-сметной документации в сумме 90 000 руб. (платежное поручение № 69 от 25.02.2016).

В ходе рассмотрения дела ответчик вручил истцу на рассмотрение и согласование проектную документацию (письмо от 04.09.2017 № 241).

Учитывая, что срок действия условий подключения и разрешения на строительство не истек, ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Вместе с тем, ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.4 и 4.2 договора.

Пунктом 3.3.4 договора стороны предусмотрели, что заявитель обязуется в срок до 01.09.2016 выполнить условия подключения.

Доказательств выполнения условий подключения ответчиком не представлено. Учитывая, что на момент рассмотрения спора срок исполнения данного обязательства нарушен ответчиком более чем на год, суд приходит к выводу о существенном нарушении ответчиком данного обязательства.

В пункте 4.2 договора стороны указали, что заявитель вносит плату за подключение на следующих условиях:

- 10% от платы, предусмотренной пунктом 4.1 (551 913 руб. 59 коп.), в течение 20 дней с даты заключения договора (то есть не позднее 15.02.2015);

- 40% от платы, предусмотренной пунктом 4.1 (2 207 654 руб. 38 коп.), в течение 100 дней с даты заключения договора о подключении (то есть не позднее 06.05.2015), но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заявителя, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов (пункт 4.2 договора в редакции протокола разногласий).

Ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств по внесению платы за подключение в установленных пунктом 4.2 договора размере и сроках.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

   В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Довод ответчика о наличии действующего разрешения на строительства и не истечения срока действия условий подключения не имеет правового значения по делу с учетом неисполнения ответчиком иных обязательств по договору.

В пункте 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Из материалов дела усматривается, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора путем направления соглашения о расторжении договора.

Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд признает требование о расторжении договора законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.   

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.   

При обращении в суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. 

Учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

            Расторгнуть договор № 92 о подключении к системам теплоснабжения от 26.01.2015, заключенный между публичным акционерным обществом «Квадра – Генерирующая Компания» и закрытым акционерным обществом «Строительная компания «Липецкметаллургстрой».

 

            Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительная компания «Липецкметаллургстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>) в пользу публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая Компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения юридического лица): 

<

...>, адрес филиала – 

<

...>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

 

            На решение в месячный срок может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                             А.А.Коровин