254/2019-111941(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18211/2018

город Саратов

19 июня 2019 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая  

компания «Гермес» удовлетворить. 

Обязать Жилищно-строительный кооператив «Северный» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в течении одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда  

безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных при строительстве многоквартирного  

жилого дома № 10А по ул.Уфимцева в г.Саратова, а именно: 

- установить, предусмотренные проектом, показывающие термометры на трубопроводах;  - установить, предусмотренный проектом, сбросной предохранительный клапан;  

- установить, предусмотренный проектом, дренажный насос с обвязкой;  - устроить слив в канализацию или раковину с системы сливных трубопроводов;  

- установить регулятор температуры ECL 210 в тепловом пункте; 

- провести работы, предусмотренные проектом, по изоляции и антикоррозийной обработке  

на трубопроводах Т3 и Т4; 

- установить предусмотренные проектом краны для опорожнения теплообменника  

горячего водоснабжения; 

- установить датчик температуры теплосчетчика на отопление встроено-пристроенных  

помещений в предусмотренном проектом месте; 

 - подключить электроконтактное реле давления (прессостат) к соленоидному клапану;  

- устроить в помещениях теплового пункта управления предусмотренные проектом  

приямки размером в плане 500х500 мм и глубины 800 мм с защитной решеткой; 

- провести работы по восстановлению бетонного пола в б/с «В» в тепловом пункте  

управления;. 

- в б/с «Е» выгородить помещение с дверью для теплового пункта управления;  - восстановить асфальтовое покрытие двора и придомовой территории;  

- произвести монтаж системы молниезащиты № 1 и № 2; - заделать плиточные швы подъездов № 1 и № 2; - восстановить примыкание кровли жилого дома с ливнеотводами в количестве 6 шт.; - установить решетки на системе водоотведения с крыши в количестве 4 шт.; - провести ремонт цоколя по периметру жилого дома; 

- провести работы по водоотведению грунтовых вод с подвальных помещений жилого  

дома; 

- провести работы по устройству цементной стяжки на крыше подъездов № 1 и № 2;  - произвести монтаж кровельного покрытия подъездов № 1 и № 2.  

Взыскать с Жилищно-строительный кооператив «Северный» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая  

компания «Гермес» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 41012, г.  

Саратов, ул. им. Челюскинцев, д.128, литер А) судебные расходы по уплате государственной  

пошлины в размере 6000 рублей, расходы по оплате экспертизы в размере 38000 рублей. 

Исполнительные листы в ыдать после вступления решения в законную силу.  Копии решения направить лицам, участвующим в деле.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  

инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  

инстанции. 

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1