Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 19.04.2023 года Дело № А50-1333/23 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фадеевой  Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению муниципального учреждения "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  14.05.2010, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИКАМЬЕ" (ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 03.10.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 591901001)  

об обязании выполнить гарантийные обязательства. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требований удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИКАМЬЕ" (ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 03.10.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 591901001)  устранить недостатки, производством следующих видов работ в срок до  31.07.2023 г.:  

1.Устранить протечки кровли, провести дополнительные работы по  монтажу листа ОЦ ОНО 0,7 ГОСТ 19904-80 ОН-МТ-1ГОСТ 14918-80 над  ендовами, лестничными маршами, согласно проекту;  

2. Установить светильники аварийного освещения BS-7793, согласно  проекту;  

3. Произвести замену термометра в соответствии с проектом; 

4.Провести работы по установке запорной арматуры в соответствии с  проектом;  

5. Установить крышки Юна канализационных колодцах в соответствии  с проектом ЗСК — 2014-11-ИОС.3.1, лист 5;  

6. Во всех учебных помещениях обеспечить плотное сопряжение  покрытия линолеума - проварить швы;  

7. Провести работы по ремонту штукатурного слоя стен в раздевалке  большого спортивного зала, фойе библиотеки, кабинета № 346;  

8. Провести работы по восстановлению наружной водосточной системы,  водосточных воронок в соответствии с проектом;  

9. Обеспечить герметичность мягкой кровли в осях 11-12 ЕП. Провести  работы по замене мягкой кровли в соответствии с проектом;  

10. Выполнить работы по замене дверного блока в соответствии с  проектом;  

11. Заменить стеклопакеты в наружных дверных блоках входной  группы в количестве 2 шт. в соответствии с проектом;  

12. Обеспечить герметичность оконных блоков. Заменить стеклопакеты  оконных блоков (кабинет психолога, лаборантская физики, сан узлах  «большого» спортивного зала), в библиотеке, в большом спортивном зале,  фойе 3 этажа;  

13. Заменить потолочную плитку «Байкал» со следами протечек,  восстановить утраченную плитку «Байкал» в местах отсутствия таковой.  Работы выполнить в соответствии с проектом;  

14. Произвести ограждение подъёмной платформы KALEA А4 из  соответствующих материалов;  

15. Обеспечить работу противодымной вентиляции. Провести пусконаладочные работы;  

16. Привести ширину дверных проемов в соответствие проекта; 

17. Сливной кран системы кондиционирования смонтировать в  соответствии с проектом;  

18. Монтаж системы водоснабжения в столовой выполнить в  соответствии с проектом;  

19. Выполнить монтаж межэтажных дверей на лестничных маршах в  соответствии с проектом;  

20. В коридорах 1,2,3 этажа провести замену керамогранитной плитки,  имеющей трещины, на новую;  

21. Заменить в раздевалках спортзала № 155, № 157(2шт), в санузлах  первого, второго, третьего этажей: № 118, № 235, № 233, № 335, № 338,  пищеблоке № 194 отслоившуюся плитку;  

22. Провести регулировку оконного блока в обеденном зале; 

23. Провести ремонт штукатурки шва монолитного пояса большого  спортивного зала;  

24. Провести работы по монтажу вентиляционных шахт В7;8;9;10;11;  12; 13; 14 и шахты с помещения № 57 согласно проекту;  

25. Провести работы по монтажу слухового окна по оси 4 согласно проекту; 

26. Привести в соответствие с проектом входные группы и крыльца  путей эвакуации;  

27. Предоставить паспорта на систему вентиляции (кондиционирования  воздуха), утвержденные в установленном порядке,  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИКАМЬЕ" (ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 03.10.2012, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального  учреждения "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.05.2010, ИНН:  

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 (шесть тысяч)  руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 24.03.2023 7:33:00

 Кому выдана Дрондина Елена Юрьевна