АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

24 июня 2022 года

Дело № А33-31991/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 июня 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 24 июня 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Антроповой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройэм» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Модульпром» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в присутствии:

от истца посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных дел»: ФИО1, представителя по доверенности от 14.09.2020.

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 25.05.2021.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Стройэм» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Модульпром» (далее – ответчик) о взыскании неустойки по договору №19/18 от 08.05.2018 в размере 3 624 400 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 16.12.2021 возбуждено производство по делу.

В судебном заседании от 14.06.2022, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 16.06.2022, в дальнейшем до 17.06.2022.

В судебном заседании представитель истца заявленные исковые требования поддержал, представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по мотивам, изложенном в отзыве дополнительных пояснениях, заявил о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям и применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО «СтройЭМ» (заказчиком) и ООО «МодульПром» (исполнителем) заключён договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 19/18 от 08.05.2018, по условиям которого исполнитель обязан оказать заказчику услуги по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по теме «Разработка конструкторской документации и изготовление Сборно-разборное здание «Сезонный ресторан КFС» из композитных и других материалов коммерческого назначения в соответствии с Календарным планом (Приложение 2) являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик принять и оплатить полученные результаты работы.

Согласно пункту 3.1 договора выполнение Работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение 2): начало - дата подписания договора; окончание - окончание этапа 8 в соответствии с календарным планом (приложение 2) по не позднее 01.07.2019.

Согласно календарному плану дата окончания  выполнения работ: по 1 этапу (согласование Технического Задания) – 01.07.2018, по 2 этапу (дизайн экстерьера и интерьера) - 15.07.2018,  по 3 этапу (выполнение ЗD модели) - 30.07.2018, по 4 этапу (выполнение 2D чертежей и технической документации - 15.08.2018, по 5 этапу изготовление болванов, моделей, матриц, оснастки, технологическая подготовка и стеклопластиковых деталей (первый комплект)) - 25.03.2019, по 6 этапу (изготовление комплекта сложных формообразующих матриц с нанесением текстуры) - 01.03.2019, по 7 этапу (комплектация модульного здания) - 15.03.2019, по 8 этапу (производство и сборка опытного модульного здания) - 01.07.2019, по 9 этапу (сертификация и протоколы испытаний) - 01.07.2019.

Пунктом 5.3 договора предусмотрено авансирование в следующем порядке: 

2 950 000  до 11 мая 2018 года,

2 950 000 руб. до 15 мая 2018 года,

2 950 000 руб.  до 18 мая 2018 года,

1 950 000 до 31 мая 2018 года,

2 175 000 до 02 июля 2018 года,

1 946 000 до 03 августа 2018 года,

1 946 000 до 10 августа 2018 года,

1 946 000 до 17 августа 2018 года,

1 947 000 24  августа 2018 года,

700 000 до 28 августа 2018 года,

в течении 5 календарных дней с даты завершения 6 этапа, указанной в календарном плане заказчик выплачивает сумму в размере 2 595 000 до 15 сентября 2018 года,

в течение 10 рабочих дней по завершению 8 этапа работ, после подписания окончательного акт приема-передачи выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора и предоставления счета на оплату. Заказчик выплачивает сумму в размере 2 095 000 руб., 

оставшаяся сумма, в размере 500 000  выплачивается в течение 10 рабочих дней по завершению 9 этапа работ.

Согласно пункту 6.1 договора результатом выполнения работ является окончательный акт приема-передачи с отчетом о выполненном НИОКР или изобретении с технико-экономическими параметрам, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом задании (приложение 3).

Пунктом 7.4 договора предусмотрено, что за просрочку сдачи результата работ (услуг) как окончательного, так и промежуточного без уважительной причины. Заказчик может потребовать с исполнителя, а последний в этом случае обязан выплати, неустойку в размере 0.1 % от стоимости всего договора.

Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (пункт 7.8 договора).

Согласно пункту 7.5 договора за просрочку очередного платежа (без согласования сторон) Исполнитель может потребовать с заказчика, а последний в этом случае обязан выплатить неустойку в размере 0,1 от стоимости договора.

Сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.12.2018 №1, согласно которому исполнитель выполнил, а заказчик принял работы 2, 3 и 4 этапа. 

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по 2 этапу заказчик начислил неустойку в общей сумме 3 624 400 руб. за период с 14.08.2018 по 27.12.2018.

Заказчик направил в адрес  подрядчика  претензию с требованием уплатить  неустойку.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика 3 624 400 руб. неустойки.

Ответчик в отзыве на иск и дополнениях к нему с заявленными требованиями не согласился, указал на то, что отсутствие согласованного сторонами технического задания является просрочкой кредитора, в связи с чем, начисление истцом неустойки за указанный период является необоснованным; сумма задолженности по договору не доказана истцом; расчет неустойки от стоимости всего договора, а не от стоимости этапа работ является несправедливым; размер неустойки является несоразмерным последствиям нарушенного обязательства, в связи с чем подлежит уменьшению на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации; полагает, что истец обратился с исковым заявлением по истечении срока исковой давности. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что заключенный между сторонами договор является по своей правовой природе договором подряда, правоотношения в рамках которого регулируются  положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между сторонами заключен договор, являющейся по своей правовой природе договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из положений статей 702, 711, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных работ по договору подряда является сдача результата работ заказчику и принятие его последним.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) в соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.4 договора предусмотрено, что за просрочку сдачи результата работ (услуг) как окончательного, так и промежуточного без уважительной причины. Заказчик может потребовать с исполнителя, а последний в этом случае обязан выплати, неустойку в размере 0.1 % от стоимости всего договора.

Из материалов дела следует, что подрядчик выполнил работы по 2 этапу с нарушением предусмотренных договором сроков: при установленном в графике сроке выполнения работ по 2 этапу (дизайн экстерьера и интерьера) - 15.07.2018,  фактически работы выполнены ответчиком 27.12.2018, что подтверждается представленным в материалы дела актом, подписанным заказчиком и подрядчиком.

В связи с чем истец обоснованно привлек ответчика к гражданско-правовой ответственности  в виде пени, начисленной  за период с 14.08.2018 по 27.12.2018  в  общей сумме  3 624 400 руб.

Неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 16.07.2018 по 13.08.2018 взыскана с ответчика в рамках дела № А33-11928/2021.

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности к заявленным требованиям о взыскании неустойки за период с 14.08.2018 по 20.11.2018. 

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 названного Кодекса общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 Кодекса, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Из системного толкования статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует правило, в соответствии с которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении), непоступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день, либо в последний день срока, установленного договором. Таким образом, если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию.

Согласно пункту 10.1 договора срок ответа на претензию составляет 15 дней со дня получения претензии.

Как следует из пояснений истца и представленных в материалы дела претензии от 22.01.2020 исх. № 5 и доказательств ее направления на электронную почту исполнителя, указанную в договоре (y-vibirau@yandex.ru), претензия получена ООО «Модульпром» 22.01.2020.   

Истец обратился в арбитражный суд с иском 06.12.2021. 

Таким образом, по требованию о взыскании неустойки за период с 14.08.2018 по 20.11.2018 срок исковой давности истек.

Как следует из пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения; истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

С учетом изложенного, требование истца подлежит удовлетворению за период с 21.11.2018 по 27.12.2018 (37 дней) в размере 986 050 руб. 

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 77 Постановления № 7 снижение размера договорной неустойки допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение.

При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь принципами разумности и соразмерности, соблюдая баланс интересов сторон, учитывая конкретные обстоятельства дела, в том числе, отсутствие согласованного сторонами технического задания, несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, начисление неустойки на общую стоимость работ по договору (26 650 000 рублей), размер которой составляет 986 050 руб., в то время как стоимость невыполненных исполнителем в срок работ по второму этапу составляет 250 000 руб. (согласно спецификации № 1), компенсационную природу неустойки как меры ответственности за нарушение гражданско-правового обязательства, нарушение ответчиком неденежного обязательства, отсутствие доказательств причинения истцу убытков просрочкой выполнения ответчиком работ по второму этапу работ, учитывая заявление ответчика об уменьшении размера неустойки, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении предъявленной истцом неустойки до суммы 500 000 руб.

С учетом изложенного суд апелляционной полагает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании неустойки в размере 500 000 руб., в остальной части иск удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с частичным удовлетворением первоначального иска на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами пропорционально сумме заявленных и удовлетворенных требований.

С учетом частичного удовлетворения исковых требований с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 11 188 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Модульпром» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Стройэм»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 500 000 руб. неустойки, 11 188 руб. судебных расходов.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.А. Антропова