107_35577327 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ) 

 

Дело № А40-146197/22-107-959

02 мая 2023 года

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело № А40-146197/22-107-959 по иску ООО  "Электрумстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику ГУП  "Мосгортранс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании суммы  задолженности по договору № 228560 от 21.06.2021 в размере 32 564 565,3 р.,  неустойки за период с 07.09.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.12.2022 в размере  2 238 813,86 р. и неустойки с 10.12.2022 исходя из размера 1/300 ключевой ставки ЦБ  РФ от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа до момента  фактической оплаты, встречному иску ГУП "Мосгортранс" к ООО "Электрумстрой" о  взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 21 850 126,95 р. и процентов  за пользование чужими денежными средствами за период с 01.11.2021 по 31.03.2022 и с  02.10.2022 по 09.12.2022 в размере 1 241 566,11 р., процентов с 10.12.2022 по дату  фактического исполнения обязательств, при участии представителя истца: ФИО2, доверенность от 20.03.2022, паспорт, представителей ответчика: ФИО3,  доверенность от 24.12.2021, паспорт, диплом, ФИО4, доверенность от  24.12.2021, паспорт, диплом, ФИО5, доверенность от 24.12.2021, паспорт,  диплом,  

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования ООО "Электрумстрой" к ГУП "Мосгортранс"  

частично. 

Взыскать с ГУП "Мосгортранс" в пользу ООО "Электрумстрой" сумму  

задолженности по договору № 228560 от 21.06.2021 в размере 20 307 676,29 р. В остальной части отказать в удовлетворении иска. 

Удовлетворить встречные исковые требования ГУП "Мосгортранс" к ООО  

"Электрумстрой" частично. 

Взыскать с ООО "Электрумстрой" в пользу ГУП "Мосгортранс" сумму  неосновательного обогащения в виде стоимости не сданных по договору № 228560 от  21.06.2021 материалов в размере 21 850 126,95 р., процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 01.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по  09.12.2022 в размере 1 241 566,11 р. (всего задолженность и проценты в размере  23 091 693,06 р.), процентов с 10.12.2022 исходя из учетной ставки Банка России на  сумму задолженности за каждый день просрочки до даты фактического исполнения  обязательств, государственную пошлину в размере 138 458 р.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований. 

Взыскать с ООО "Электрумстрой" в пользу ГУП "Мосгортранс" сумму  неосновательного обогащения в виде стоимости не сданных по договору № 228560 от  21.06.2021 материалов в размере 1 542 450,66 р., процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 01.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по  09.12.2022 в размере 1 241 566,11 р. (всего задолженность и проценты в размере  2 784 016,77 р.), процентов с 10.12.2022 по 02.05.2023 на сумму задолженности в  размере 21 850 126,95 р., за период с 03.05.2023 на сумму задолженности в размере  1 542 450,66 р. исходя из учетной ставки Банка России за каждый день просрочки до  даты фактического исполнения обязательств, государственную пошлину в размере  138 458 р.  

Взыскать с ГУП "Мосгортранс" в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 114 993 р.  

Взыскать с ООО "Электрумстрой" в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 82 024 р.  

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении месяца со дня принятия.  

СУДЬЯ М.В. Ларин