﻿ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-11209/2016

Дело № А57-27583/2015

г. Казань

15 марта 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 марта 2021 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Махмутовой Г.Н., 

судей Бубновой Е.Н., Сибгатуллина Э.Т.,

при участии представителей:

истца по первоначальному иску – Сергеева Е.В., доверенность от 22.05.2018,

ответчика по первоначальному иску – Шопыгина О.В., доверенность от 07.09.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг» на решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.03.2018 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2020 

по делу № А57-27583/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг», г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-Торговая Компания «Трансснабстрой», г. Москва, о взыскании задолженности по договору, пени; по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительно-Торговая Компания «Трансснабстрой», г. Москва, к обществу с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг», г. Саратов, о взыскании пени за несвоевременное выполнение работ по договору,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг» (далее – ООО «Химсталькон-Инжиниринг», истец) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-Торговая Компания «Трансснабстрой» (далее – ООО СТК «Трансснабстрой», ответчик) о взыскании 7 750 000 руб. задолженности за выполненные работы и 3 500 000 руб. пени.

ООО СТК «Трансснабстрой» обратилось к ООО «Химсталькон-Инжиниринг» с встречным иском о взыскании 3 500 000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 01.01.2014 по 14.01.2016.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 22.03.2016, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2016, первоначальные исковые требования удовлетворены. Встречные исковые требования ООО СТК «Трансснабстрой» оставлены без рассмотрения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 04.10.2016 принятые судебные акты отменены в части взыскания с ООО СТК «Трансснабстрой» в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» 7 750 000 руб. задолженности, 3 500 000 руб. пени, 79 250 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

При новом рассмотрении дела истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 7 681 793 руб. задолженности, 3 500 000 руб. пени.

ООО СТК «Трансснабстрой» обратилось со встречным исковым заявлением к ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о взыскании пени за несвоевременное выполнение работ по договору № 60/2013, дополнительному соглашению № 3 к договору в размере 3 966 429 руб.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 20.03.2018 в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.03.2018 в части отказа во взыскании с ООО СТК «Трансснабстрой» в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» 7 179 774 руб. 48 коп. задолженности, а также в части взыскания с ООО «Химсталькон-Инжиниринг» судебных расходов на проведение экспертизы в размере 20 000 руб. отменено. Исковые требования в отмененной части удовлетворены. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 01.10.2019 постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 отменено в части взыскания с ООО СТК «Трансснабстрой» в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» 7 179 774 руб. 48 коп. задолженности и распределения судебных расходов. В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2020 решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.03.2018 в части отказа во взыскании с ООО СТК «Трансснабстрой» в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» задолженности, а также в части взыскания с ООО «Химсталькон-Инжиниринг» судебных расходов за проведение экспертизы в размере 20 000 руб. оставлено без изменения.

С ООО «Химсталькон-Инжиниринг» в пользу автономной некоммерческой экспертной организации «Судебная Экспертиза «СУДЕКС» взысканы денежные средства за проведение экспертиз в размере 195 000 руб.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Химсталькон-Инжиниринг» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить в части отказа во взыскании с ООО СТК «Трансснабстрой» в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» задолженности по договору, а также в части взыскания с ООО «Химсталькон-Инжиниринг» судебных расходов за проведение экспертизы в размере 20 000 руб., 195 000 руб., исковые требования удовлетворить, указывая, что к началу эксплуатации спорных резервуаров дефекты обнаружены не были.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в соответствии со статьей 286 АПК РФ, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав явившихся представителей в судебном заседании, судебная коллегия считает жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и подтверждается материалами дела, между ООО «Химсталькон-Инжиниринг» (поставщик, подрядчик) и ООО СТК «Трансснабстрой» (покупатель, заказчик) был заключен договор от 23.08.2013 № 60/2013 (далее – договор), поименованный как договор поставки, в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик обязался поставить товар (металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС 5000 куб. м для хранения битума в количестве 2-х штук и 2-х комплектов металлоконструкций подогревателя для резервуара стального РВС 5000 куб. м) покупателю – ООО СТК «Трансснабстрой», смонтировать и передать их в эксплуатацию.

В обоснование заявленных исковых требований ООО «Химсталькон-Инжиниринг» сослалось на то, что монтажные работы по договору не были оплачены заказчиком в полном объеме и в установленные сроки.

Как установлено судами, в рамках договора ООО «Химсталькон-Инжиниринг» до поставки товара должно провести работы по разработке следующих проектов: конструкций железобетонных (КЖ); металлоконструкций резервуара (КМ); проект антикоррозийной защиты (АКЗ); проект теплоизоляции (ТИ); металлоконструкций подогревателя.

После поставки товара ООО «Химсталькон-Инжиниринг» должно произвести следующие работы: по монтажу (сборке) металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 куб. м для хранения битума в количестве 2-х штук и 2-х комплектов металлоконструкций подогревателя для резервуара стального РВС 5000 куб.м; гидроиспытания смонтированного резервуара вертикального стального РВС 5000 куб. м в количестве 2-х штук; пусконаладочные работы резервуара вертикального стального РВС 5000 куб. м в количестве 2-х штук.

Проектные работы, поставка резервуаров и подогревателей, монтажные и пуско-наладочные работы должны быть проведены в сроки, согласованные сторонами в графике производства работ, согласно которому начало работ – с момента заключения договора 23.08.2013, срок окончания работ – 31.12.2013.

Общая стоимость работ и продукции по договору составляет 35 000 000 руб. (пункт 13.12) и складывается из стоимости каждого отдельного этапа.

В силу пункта 13.13 договора покупатель производит оплату по договору путем перечисления денежных средств в следующем порядке: денежные средства в сумме 17 500 000 руб., что составляет 50% от общей стоимости работ, перечисляются в течение 5 банковских дней с момента подписания договора; денежные средства в сумме 8 750 000 руб. или 25% перечисляются в течение 5 банковских дней с момента поставки товара на объект покупателя; денежные средства в сумме 8 750 000 руб. или 25% перечисляются в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по гидроиспытаниям.

29.05.2014 сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1 к договору, по условиям которого ООО «Химсталькон-Инжиниринг» приняло на себя обязательство по выполнению дополнительных работ по разработке проекта электроснабжения и проекта автоматизации склада битума вместимостью 10 000 куб.м, стоимость которых составила 350 000 руб.

02.07.2014 сторонами было подписано дополнительное соглашение № 2 к договору, по условиям которого ООО «Химсталькон-Инжиниринг» приняло на себя обязательство в связи с внесенными покупателем изменениями в перечень оборудования поставить дополнительное оборудование общей стоимостью 2 164 295 руб. 04 коп. Соглашением был определен срок поставки с учетом сроков авансирования.

16.09.2014 сторонами было подписано дополнительное соглашение № 3 к договору, по условиям которого ООО «Химсталькон-Инжиниринг» приняло на себя обязательство поставить дополнительное оборудование автоматизации и электроснабжения согласно разработанному проекту и выполнить дополнительные работы общей стоимостью 2 150 000 руб. 

Согласно пункту 17.1 договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

Из содержания условий договора следует, что он по своей правовой природе является смешанным договором, содержит элементы договора на выполнение проектных работ, поставки и подряда. 

 

Согласно доводам ООО «Химсталькон-Инжиниринг» им были выполнены работы по разработке проектной документации: проект КМ, КЖ, АКЗ, ТИ, подогревателя на общую сумму 830 000 руб., которые приняты по акту от 24.04.2014 № 29 (т. 2, л.д. 48), также были выполнены обязательства по поставке оборудования, что подтверждается товарной накладной от 13.11.2013 № 126 на сумму 22 950 000 руб. (металлоконструкции резервуара в количестве 2-х комплектов), товарной накладной от 18.07.2014 № 70 на сумму 2 600 000 руб. (металлоконструкции подогревателя в количестве 2-х комплектов).

Им также были выполнены работы по разработке проектной документации по дополнительному соглашению от 29.05.2014 № 1 на сумму 350 000 руб., которые приняты по акту от 25.06.2014 № 55 (том 2 л.д. 47), произведена поставка оборудования по дополнительному соглашению  от 02.07.2014 № 2, что подтверждается товарной накладной от 05.09.2014 № 104 на сумму 2 164 295 руб. 04 коп., произведена поставка оборудования по дополнительному соглашению от 16.09.2014 № 3, что подтверждается товарной накладной от 11.12.2014 № 204 на сумму 1 637 992 руб.

Согласно уточненным исковым требованиям подрядчиком были выполнены работы по монтажу металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 м3 для хранения битума рулонного исполнения в количестве 2-х комплектов на общую сумму 7 988 801 руб. 41 коп., что подтверждается актами КС-2 от 15.02.2014 № 1 на сумму 2 284 318 руб. 78 коп., от 25.02.2014 № 1 на сумму 2 284 318 руб. 78 коп., от 20.09.2014 № 1 на сумму 3 420 163 руб. 85 коп.

До момента обращения в арбитражный суд с исковым заявлением ООО СТК «Трансснабстрой» были оплачены денежные средства в размере 30 839 295 руб. 04 коп.

По мнению ООО «Химсталькон-Инжиниринг», с учетом произведенной оплаты, задолженность ООО СТК «Трансснабстрой» составляет 7 681 793 руб., и складывается из стоимости неоплаченных выполненных работ по монтажу металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 м3 для хранения битума рулонного исполнения в количестве 2-х комплектов по актам от 15.02.2014 № 1, от 25.02.2014 № 1, от 20.09.2014 № 1.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ (оказанных услуг) является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Письмом от 28.10.2015 подрядчик уведомил заказчика о готовности к сдаче работ по монтажу и необходимости приступить к приемке. К уведомлению приложен акт сдачи-приемки на сумму 8 620 000 руб., подписанный ООО «Химсталькон-Инжиниринг» в одностороннем порядке.

Письмом от 30.10.2015 № 443-оф ООО СТК «Трансснабстрой» отказало в приемке работ по монтажу в связи с выявленными недостатками выполненных работ, а именно: в регистрах РВС 1 имеются разрывы, что препятствует сливу продукта; в окне ГПСС зафиксирована утечка битума; после ликвидации утечки битума необходима замена профлиста; один из регистров РВС 1 не имеет выхода на крышу, что не соответствует согласованному в рамках договора проекту.

Согласно пункту 13.13 договора, полная оплата стоимости работ не связана с окончательным выполнением подрядчиком работ, а производится в установленном сторонами порядке - поэтапно. Окончательный расчет по договору должен быть завершен после проведения гидроиспытания, но до начала пуско-наладочных работ.

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 утверждены «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», которые с 01.01.2013 не являются обязательными к применению.

Вместе с тем, осуществляя свои гражданские права своей волей и в своем интересе, стороны при заключении договора добровольно определили порядок учета отдельных выполняемых работ (работы по монтажу, работы по гидравлическим испытаниям, пусконаладочные работы) и порядок сдачи-приемки этих работ на основе первичной учетной документации унифицированных форм (формы КС-2, КС-3) (пункты 10.16, 11.14, 12.8 договора).

Остальные виды работ, в том числе приемка металлоконструкций резервуара для монтажа, контроль качества смонтированных конструкций резервуара, освидетельствование скрытых работ по антикоррозийному покрытию резервуаров, по тепловой изоляции и металлопокрытию крыши резервуара, по герметизации сварочных швов должны были оформляться в соответствии с требованиями Ведомственных строительных норм «Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и (нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3», утв. Минмотажспецстрой СССР, 30.10.1989 (далее – ВСН 311-89), т.е. по обязательным типовым формам, но без оформления акта по форме КС-2.

В подтверждение факта выполнения работ по монтажу и гидроиспытаниям подрядчиком были представлены два пакета документов по каждому резервуару, включающие в себя: акт приемки металлоконструкций резервуара для монтажа; акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара; акт гидравлического испытания резервуара; акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум; акт завершения монтажа (сборки) конструкций; акты освидетельствования скрытых работ по антикоррозийному покрытию резервуаров, по тепловой изоляции и металлопокрытию крыши резервуара, по герметизации сварочных швов резервуаров, подписанные представителем ООО «Химсталькон-Инжиниринг» Чурочкиным С.В. и представителем ООО СТК «Трансснабстрой» Ребровым И.И.

Таким образом, в ходе выполнения работ акты формы КС-2 не составлялись; работы по гидравлическим испытаниям резервуаров не были оформлены подрядчиком с использованием акта приемки-сдачи работ по форме КС-2, как того требуют положения договора.

Письмами от 19.02.2013 № 1152 и 4740 ООО «Химсталькон-Инжиниринг» известило заказчика только о готовности к проведению гидроиспытаний (а не о готовности к сдаче результатов работ согласно пунктам 10.15, 11.14 договора), причем только одного резервуара № 1.

При этом указанное уведомление направлено, когда монтаж резервуара № 1 еще не был завершен (акт о завершении монтажа конструкции резервуара от 25.02.2014 № 1).

Кроме того, по условиям договора (пункт 11.4) извещение о готовности к проведению гидроиспытаний заказчик должен направлять подрядчику, а не наоборот.

В соответствии с пунктом 11.1 договора работами по гидроиспытаниям стороны понимают испытания смонтированного резервуара вертикального стального РВС 5000 м3 рулонного исполнения для хранения битума в количестве 2-х штук наливом воды на проектный уровень залива продукта или до уровня контрольного отверстия, которое предусмотрено для ограничения высоты наполнения резервуара.

Исходя из буквального содержания названного пункта договора, гидроиспытание производится лишь в отношении смонтированного резервуара.

Согласно пункту 10.16.1 «Межгосударственного стандарта резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов» (далее – ГОСТ 31385-2008) только после завершения монтажных работ и их приемки заказчиком (этап контроля качества смонтированных конструкций) возможно начало проведения работ по гидравлическому испытанию резервуара.

В обоснование своего иска ООО «Химсталькон-Инжиниринг» представило в арбитражный суд акты гидравлических испытаний резервуаров от 15.02.2014 (резервуар № 2) и от 15.03.2014 (резервуар № 1).

ООО СТК «Трансснабстрой» в порядке статьи 161 АПК РФ было заявлено о фальсификации актов гидравлических испытаний резервуаров от 15.02.2014, 15.03.2014.

Фальсификация доказательств предполагает сознательное искажение представляемых доказательств путем их подделки, подчистки, внесения в них исправлений, искажающих действительный смысл. Утверждение заявителя о том, что факты и обстоятельства, изложенные в письменном доказательстве, не соответствуют действительности, само по себе не является заявлением спора о фальсификации, а представляет собой отрицание наличия фактов, на которых основаны требования или возражения на них. Такого рода заявление не подлежит рассмотрению в порядке статьи 161 АПК РФ. В связи с чем оснований для удовлетворения заявления о фальсификации и исключении актов гидравлического испытания из числа доказательств судом первой инстанции не установлено. Следовательно указанные акты подлежат оценке наряду с иными доказательствами.

Письмом от 28.10.2015 ООО «Химсталькон-Инжиниринг» известило ООО СТК «Трансснабстрой» о готовности к сдаче работ по монтажу конструкций.

Между тем, как было указано выше, сдача работ по монтажу конструкций предшествует проведению и сдаче работ по гидравлическим испытаниям, акты о проведении которых составлены гораздо раньше (15.02.2014 по резервуару № 2 и 15.03.2014 по резервуару № 1).

В соответствии с пунктом 3 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7, зарегистрирован в Минюсте РФ 06.03.2007, регистрационный № 9051 (далее – Порядок РД-11-05-2007), общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Общий журнал, который велся и подрядчиком, и заказчиком, не содержит сведений о фактическом проведении гидроиспытания.

Возражая против удовлетворения исковых требований, заказчик также указал, что в соответствии с нормативными положениями налив воды в резервуар осуществляют со скоростью не более 500 м3/ч во избежание появления вибрации подводящих трубопроводов. Самый минимальный расчетный срок для налива одного резервуара объемом 5000 м3 составляет 10 часов, выдержка резервуара под нагрузкой – 24 часа, минимальное время слива – 22 часа, в результате минимальное общее время гидравлических испытаний составляет – 56 часов или 2, 3 суток (расчет ООО «Региональный инженерно-технический центр» от 12.02.2016). При этом на практике требуется значительное время (от 3-х до 5 суток) для налива резервуара водой на проектный уровень залива продукта или до контрольного отверстия.

Как установлено судами, температура окружающей среды не позволяла в зимнее время проводить гидроиспытания, а также отсутствовало достаточное количество воды для их проведения.

В соответствии с пунктом 10.7 ГОСТ 31385-2008, пунктом 8.8 ВСН 311-89 и пунктом 4.1.2. ППР гидравлическое испытание резервуара проводят при температуре окружающего воздуха не ниже 5 градусов по Цельсию. При испытаниях резервуаров при более низкой температуре разрабатывается программа испытаний, предусматривающая мероприятия по I предотвращению замерзания воды в трубах, задвижках, а также обмерзания стенки резервуара.

14-15 февраля 2014 года температура окружающего воздуха была гораздо ниже указанной отметки (справка о среднесуточной температуре воздуха Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 03.02.2016 № 28-мт).

Температура окружающего воздуха также отражалась в журнале общих работ ООО «Химсталькон-Инжиниринг», и согласно записей в указанном журнале, она была ниже необходимой отметки.

Поскольку работы по гидравлическому испытанию резервуара № 2 не проводились, то и соответствующая программа испытаний, предусматривающая мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубах, задвижках, а также обмерзания стенки резервуара, подрядчиком не разрабатывалась.

Согласно пункту 8.8. ВСН 311-89 испытание резервуаров при низких температурах (в зимних условиях) можно производить водой или нефтепродуктом по специальному согласованию с заказчиком.

Именно ООО «Химсталькон-Инжиниринг» должно было получить у заказчика согласие на проведение испытаний водой резервуаров в зимних условиях при низких температурах, и при этом представить заказчику программу испытаний, предусматривающую мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубах, задвижках, а также обмерзания стенки резервуара. Указанную программу испытаний, а также доказательств получения согласия заказчика, подрядчик суду не представил.

Кроме того, согласно справке ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 17.02.2016 № 662-16 на указанную площадку, расположенную по адресу: Калужская область, дер. Мстихино, проезд Домостроителей д. 9, в первом квартале 2014 года было поставлено 251 куб. м воды, в то время как для заполнения только одного резервуара требуется 5000 куб. м воды.

Пунктом 10.6 ГОСТ 31385-2008 предусмотрена возможность проведения гидравлического испытания резервуаров продуктом: «резервуары для хранения жидкостей с плотностью, превышающей плотность воды, а также на объекте, где отсутствует возможность заполнения его водой, допускается испытывать продуктом».

Возможность испытания резервуаров при низких температурах (в зимних условиях) нефтепродуктом по специальному согласованию с заказчиком предусмотрена также пунктом 8.8. ВСН 311-89.

Поэтому, как установлено судами, 15.02.2014 в связи с низкой температурой окружающего воздуха и отсутствием воды для гидроиспытаний по устному согласованию с представителями подрядчика с целью испытаний резервуара продуктом было начато заполнение резервуара № 2 жидким битумом, а 25.02.2014 начато заполнение продуктом резервуара № 1. 

Вместе с тем указанное обстоятельство одновременно подтверждает не проведение 15.03.2014 гидроиспытаний водой резервуара № 1.

Согласование вопроса заполнения продуктом (битумом) резервуаров № 1, 2 из-за отсутствия воды подтверждается и последующей электронной перепиской, в т.ч. через официальный почтовый ящик подрядчика gridchi№@himstalco№.ru, а именно между начальником асфальтобетонного завода ООО СТК «Трансснабстрой» Судаковым Андреем Александровичем и заместителем коммерческого директора ООО «Химсталькон-Инжиниринг» Гридчиным Артемом Викторовичем.

При этом сам факт заполнения резервуаров битумом нельзя рассматривать и как начало эксплуатации резервуаров, это подтверждает лишь попытку проведения гидравлических испытаний продуктом, которые по техническим причинам (невозможность разогрева и слива продукта из-за выхода из строя регистров подогревателей) не были завершены.

Изучив все представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к обоснованному выводу, что факт проведения гидроиспытаний резервуаров в порядке, предусмотренном договором, не подтверждается материалами дела. Сведения, указанные в актах гидравлического испытания резервуара от 15.02.2014, 15.03.2014, противоречат имеющимся доказательствам.

Согласно уточненным исковым требованиям ООО «Химсталькон-Инжиниринг» просило взыскать задолженность за выполненные работы по монтажу металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 м3 для хранения битума рулонного исполнения в количестве двух комплектов по актам от 15.02.2014 № 1, от 25.02.2014 № 1, от 20.09.2014 № 1. Требований о взыскании задолженности за выполнение работ по гидроиспытаниям, пуско-наладочных работ истец при новом рассмотрении дела не заявил.

В связи с нарушением со стороны ООО «Химсталькон-Инжиниринг» конечного срока выполнения работ по монтажу резервуаров, ООО СТК «Трансснабстрой» 11.03.2016 в соответствии с пунктом 2 статьи 405, пунктом 3 статьи 450, пунктом 3 статьи 708 ГК РФ заявило об одностороннем отказе от исполнений договора, письменно уведомив об этом ООО «Химсталькон-Инжиниринг».

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ, в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 2 статьи 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Содержание письма от 11.03.2016 заказчика подрядчику, полученного последним, свидетельствует об однозначно выраженном намерении заказчика отказаться от исполнения договора в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по выполнению работ. 

Таким образом, на основании вышеназванных правовых норм обязательства сторон по договору прекращены 11.03.2016 в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения.

В соответствии со статьей 729 ГК РФ в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720 ГК РФ), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

Таким образом, после расторжения договора у ООО СТК «Трансснабстрой» возникло новое право требовать передачи ему результата незавершенной работы и новое обязательство, а именно, по компенсации подрядчику ООО «Химсталькон-Инжиниринг» фактически произведенных затрат по указанному договору.

В уведомлении об отказе от договора содержалось предложение заказчика о направлении представителя подрядчика для определения объема и стоимости фактически выполненных работ по договору.

Как было указано ранее, исковые требования ООО «Химсталькон-Инжиниринг» основаны на факте неисполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, отраженных в актах от 15.02.2014 № 1, от 25.02.2014 № 1, от 20.09.2014 № 1.

В соответствии со статьей 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В случае отступления подрядчика от этого требования обязательство считается исполненным ненадлежащим способом, следовательно, работы, выполненные с отступлением от требований строительных норм и правил не могут считаться выполненными.

Письмом от 12.05.2016 № 259-оф ООО СТК «Трансснабстрой» повторно уведомило ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о необходимости в соответствии со статьей 729 ГК РФ передать заказчику результаты незавершенной работы по договору.

ООО «Химсталькон-Инжиниринг» было предложено направить своего представителя для участия в обследовании смонтированных резервуаров вертикального стального РВС 5000 куб.м. для хранения битума в количестве 2-х штук, расположенных по адресу: Калужская область, деревня Мстихино.

Поскольку между сторонами имелся спор по вопросу качества выполненных работ по монтажу резервуаров, судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено ООО «Стройэксперт», эксперт Аушева Ю.С.

Как следует из заключения эксперта, последний пришел к выводу о неисполнении ООО «Химсталькон-Инжиниринг» обязательств по разработке проектной документации, в связи с чем, как указал эксперт,  работы нельзя признать фактически выполненными, так как результат этих работ, который можно использовать по назначению, не был достигнут: резервуары № 1 и 2 неработоспособны.

При этом экспертом не даны ответы по вопросу определения объема и стоимости фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ, вопросу их качественности, возможности устранения недостатков и их стоимости. Эксперт оценивал проектные работы на предмет соответствия Положению о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008, без учета согласованных условий договора в части принятых на себя обязательств ООО «Химсталькон-Инжиниринг».

Согласно условиям договора проекты разрабатываются на основании технического задания.

В материалы дела представлено техническое задание на проектирование резервуара в соответствии с ГОСТ31385-2008.

«ГОСТ 31385-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» (утв. приказом Ростехрегулирования от 31.07.2009 № 274-ст) устанавливает требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию вертикальных цилиндрических стальных резервуаров номинальным объемом от 100 до 120 000 м3, используемых при добыче, транспортировании, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов.

Проектная документация, предусмотренная условиями договора, принята заказчиком без замечаний, что подтверждается актами от 24.04.2014 № 29 (т. 2 л.д. 48), от 25.06.2014 № 55  (т. 2 л.д. 47).

Кроме того, в качестве неустранимого недостатка эксперт указал на отсутствие разрешения на строительство, отсутствие проведенных геологических исследований, отсутствие экспертизы проектной документации, которые по условиям договора не вменялись в обязанности ООО «Химсталькон-Инжиниринг».

Согласно условиям договора (пункт 10.5) согласовано место проведения работ по монтажу: объект покупателя, расположенный по адресу Калужская область, деревня Мстихино.

Согласно пункту 10.6 договора покупатель обязан, в том числе, получить все разрешения и пропуска на специалистов, оборудование и автотранспорт поставщика для проведения работ по монтажу в месте их проведения, получить все необходимые разрешения, в том числе по использованию подъемных устройств и кранов для проведения работ по монтажу, выполнить все работы по устройству оснований (фундаментов) в месте проведения работ по монтажу в соответствии с пунктом 5.6 ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов, которые подлежит передаче поставщику в месте проведения работ по монтажу.

В суде апелляционной инстанции при первоначальном рассмотрении дела назначена судебная экспертиза с постановкой на разрешение эксперта следующих вопросов:

1. Каковы объемы и стоимость фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ в соответствии с условиями договора от 25.08.2013 № 60/2013?

2. Соответствует ли качество фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ, условиям договора, а также требованиям норм и правил, установленным применительно к данным видам работ?

3. Каковы объем и стоимость работ, указанных в договоре, выполнены ООО «Химсталькон-Инжиниринг» качественно? Каковы объем и стоимость работ, указанных в договоре, выполнены ООО «Химсталькон-Инжиниринг» некачественно?

4. Имеются ли недостатки в выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работах по договору? Являются ли данные недостатки скрытыми или явными? Являются ли данные недостатки работ существенными и неустранимыми?

5. Если выявленные недостатки являются устранимыми, определить стоимость устранения недостатков работ, выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» по договору.

В последующем судом по делу назначена дополнительная судебная экспертиза, проведение которой поручено тому же эксперту.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

Какова причина течи РВС № 1?

Имеются ли отступления от проекта в части выполненных работ по конструкции молниезащиты?

Имеются ли дефекты монтажа теплоизоляции резервуаров?

Имеются ли дефекты в сварных швах и креплениях (фланцевых соединениях) люков резервуаров?

Имеются ли дефекты в сварных монтажных швах резервуаров?

Соответствуют ли конструкции лестниц резервуаров предъявляемым к ним требованиям?

Соответствуют ли болтовые крепления предъявляемым к ним требованиям?

Определить качество работ по антикоррозийной обработке. Соответствуют ли указанные работы предъявляемым к ним требованиям?

Выполнена ли установка регистров в соответствии с проектом?

При наличии недостатков в работах, обязанность выполнения которых согласно условиям договора и принятых проектных решений, возложена на подрядчика ООО «Химстальконинженеринг» определить стоимость их устранения.

Определить стоимость работ по гидроиспытаниям и стоимость пусконаладочных работ.

По результатам экспертного исследования получено заключение от 25.02.2019 № 71/2019.

По результатам проведенной повторной и дополнительной экспертиз эксперт пришел к выводу, что часть работ выполнена с отступлением от проекта, частично работы выполнены некачественно. При этом экспертом сделан вывод, что недостатки являются устранимыми.

Как пояснил допрошенный в судебном заседании эксперт и как следует из экспертного исследования, в целях полного исследования резервуаров необходима очистка резервуаров от битума, что заказчиком не было обеспечено.

В ходе нового рассмотрения дела определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 по делу назначена повторная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Союзу лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» (СУДЭКС) (ИНН 7714321563, ОГРН 1087799030076; 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15), эксперту Лебедеву Валерию Ивановичу.

По результатам проведенной экспертизы суду представлено экспертное заключение от 07.09.2020 (т. 20, л.д. 1-212).

В результате проведенного исследования эксперт пришел к следующим выводам.

По вопросу № 1 -  стоимость фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ в соответствии с условиями договора составляет 34 368 801 руб. 41 коп.

По вопросу № 4 - «Имеются ли недостатки в выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работах? Являются ли данные недостатки скрытыми или явными? Являются ли данные недостатки работ существенными и неустранимыми?» экспертом сделаны следующие выводы:

Имеется ли течь РВС № 1? Если да, то какова причина течи?

Вывод по результатам исследования: На стенке РВС-1 имеются следы разлива нефтепродуктов. Причина течи - негерметичное фланцевое соединение на патрубке пеногенератора РВС-1.

Имеются ли отступления от проекта в части выполненных работ по конструкции молниезащиты?

Вывод по результатам исследования: В выполненных работах по монтажу конструкции молниезащиты имеются отступления от проекта. На РВС-1 отсутствуют оба токоотвода (1); на РВС-2 длина сварного шва на каждом креплении токоотвода не соответствует требования проекта (2).

Имеются ли дефекты монтажа теплоизоляции резервуаров?

Вывод по результатам исследования: В выполненных работах по монтажу теплоизоляции резервуаров имеются следующие дефекты: несоблюдение проектного расстояния между кронштейнами крепления кольцевых поясов на стенке РВС-1 (3); несоблюдение проектного расстояния между стенкой резервуара и наружным краем кольцевого пояса на РВС-2 (4); несоблюдение проектного способа крепления кольцевых поясов к кронштейнам на РВС-2 (5); несоблюдение проектного способа крепления уголков между собой в кольцевых поясах на РВС-1 и РВС-2 (6); несоблюдение шага установки заклепок для крепления покровных листов между собой в фальцевом соединении на РВС-1 и РВС-2 (7); нарушение целостности фальцевого соединения покровных листов на крыше РВС-1 и РВС-2 (8); несоблюдение проектного способа соединения покровных листов в 1 ярусе (от центра) РВС-1 (внахлест, а не фальцем) (9); нарушение целостности покровных листов в нахлесточным соединении между 1 и 2 ярусом РВС-1 (разрезы в покровных листах) (10); несоблюдение проектного способа раскроя покровных листов и проектной схемы монтажа покровных листов на РВС-1 и РВС-2 (11); отсутствие примыкания в нахлесточном соединении между 1 и 2 ярусами покровных листов на РВС-2 (12); несоблюдение проектного способа крепления нахлесточных соединений покровных листов между ярусами на РВС-1 и РВС-2 (13); использование непроектных материалов при устройстве поддерживающей конструкции для покровных листов на крыше РВС-1 и РВС-2 (14); применение неокрашенных элементов в поддерживающей конструкции для покровных листов на крыше РВС-1 и РВС-2 (15); крепление элементов поддерживающей конструкции для покровных листов к трубам люков на крыше РВС-1 и РВС-2 (16); отсутствие полиэтиленовой пленки вокруг минераловатных плит, расположенных вдоль периферии крыши РВС-1 и РВС-2. Отсутствие полиэтиленовой пленки поверх всех минераловатных плит на РВС-1 и РВС-2 (17).

Имеются ли дефекты в сварных швах и креплениях (фланцевых соединениях) люков резервуаров?

Вывод по результатам исследования: При обследовании в сварных швах усиливающих листов люков выявлены следующие дефекты:

РВС-1.

1. В сварных соединениях усиливающих листов люков световых на крыше, обследованных визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: поверхностные поры, чешуйчатость, наплывы металла, несплавление кромок (акты № 1, 2 приложения № 1).

Вывод по результатам исследования: сварные соединения усиливающих листов люков световых на крыше РВС-1 по всей длине не соответствуют требования ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

2. В сварном соединении усиливающего листа люка-лаза (600) в 1 поясе стенки, обследованного визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: поверхностные поры, чешуйчатость, наплывы металла, уменьшение катета шва (акт № 3 приложения № 1). При обследовании сварного шва с помощью цветной дефектоскопии выявлены дефекты: поверхностные поры, поверхностная пористость (цепочки пор), подрезы основного металла (заключение № 6 приложения № 1).

Вывод по результатам исследования: сварное соединение усиливающего листа люка-лаза (600) в 1 поясе стенки РВС-1 по всей длине не соответствует требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

3. В сварном соединении усиливающего листа люка-лаза (600x900) в 1 поясе стенки, обследованного визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: чешуйчатость, поверхностные поры, наплывы металла, уменьшение катета шва (акт № 4 приложения № 1). При обследовании сварного шва с помощью цветной дефектоскопии выявлены дефекты: поверхностные поры, поверхностная пористость (цепочки пор), (заключение № 7 приложения № 1).

Вывод по результатам исследования: сварное соединение усиливающего листа люка-лаза (600x900) в 1 поясе стенки РВС-1 по всей длине не соответствует требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

РВС-2.

1. В сварных соединениях усиливающих листов люков световых на крыше, обследованных визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты поверхностные поры, чешуйчатость, наплывы металла, не сплавление кромок, кратер, превышение катета шва (акты № 9,10 приложения № 1).

Вывод по результатам исследования: сварные соединения усиливающих листов люков световых на крыше РВС-2 по всей длине не соответствуют требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

2. В сварном соединении усиливающего листа люка-лаза (600) в 1 поясе стенки, обследованного визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: поверхностные поры, чешуйчатость, наплывы металла, уменьшение катета шва (акт № 11 приложения № 1). При обследовании сварного шва с помощью цветной дефектоскопии выявлены дефекты: поверхностные поры, поверхностная пористость (цепочки пор), подрезы основного металла (заключение № 15 приложения № 1).

Вывод по результатам исследования: сварное соединение усиливающего листа люка-лаза (600) в 1 поясе стенки РВС-2 по всей длине не соответствует требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

3. В сварном соединении усиливающего листа люка-лаза (600x900) в 1 поясе стенки, обследованного визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: поверхностные поры, наплывы металла, уменьшение катета шва, подрезы основного металла (акт № 12 приложения № 1). При обследовании сварного шва с помощью цветной дефектоскопии выявлены дефекты: поверхностные поры, поверхностная пористость (цепочки пор), подрезы основного металла (заключение № 16 приложения № 1).

Вывод по результатам исследования: сварное соединение усиливающего листа люка-лаза (600x900) в 1 поясе стенки РВС-2 по всей длине не соответствует требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

Имеются ли дефекты в сварных монтажных швах резервуаров?

Вывод по результатам исследования: При обследовании в сварных монтажных швах резервуаров выявлены следующие дефекты: РВС-1.

В монтажном шве «стенка-днище» обследованном визуальным и измерительным методами, выявленные дефекты: трещина в ЗТВ сварного шва, плохое повторное возбуждение дуги, поверхностные поры, поверхностная пористость (цепочки пор). При этом из 32 участков, на которые была разделена вся длина сварного шва (каждый участок - по 2 метра), дефектов не выявлено только на 5 участках (участок № 12,17,24,25,32) (см. Схему контроля сварного соединения в приложении № 2), то есть, из 64 погонных метров сварного шва на 10-и погонных метрах сварного шва дефектов не выявлено (акт № 5 приложения № 2). Обследование сварного шва с помощью цветной дефектоскопии подтвердило выводы, полученные с помощью ВИК (заключение № 8 приложения № 2).

Вывод по результатам исследования: сварное соединение «стенка-днище» РВС-1 не соответствуют требования ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771 в участках 1-11, 13-16, 18-23, 26-31.

РВС-2.

1.В монтажном шве «стенка-днище», обследованном визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: чешуйчатость шва, плохое повторное возбуждение дуги, поверхностные поры, превышение катета шва, наплыв металла. При этом, из 32-х участков, на которые была разделена вся длина сварного шва (каждый участок - по 2 метра), дефектов не выявлено только на 6 участках (участок № 7,9,19,25,26,27), то есть, из 64 метров сварного шва на 12-и метрах сварного шва дефектов не выявлено (акт № 13 приложения № 2). Обследование сварного шва с помощью цветной дефектоскопии подтвердило выводы, полученные с помощью ВИК (заключение № 17 приложения № 2).

Вывод по результатам исследования: сварное соединение «стенка-днище» РВС-2 не соответствуют требования ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771 в участках 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32.

2.В вертикальном монтажном шве, обследованном визуальным и измерительным методами, выявлены дефекты: чешуйчатость шва, поверхностные поры, поверхностная пористость (цепочка пор), превышение ширины сварного шва (е), превышение выпуклости сварного шва (д), смещение кромок (F), подрез основного металла, подрезы от механических инструментов в околошовной зоне, кратер. При этом, дефекты выявлены во всех 10 участках, на которые была разделена вся длина сварного шва (каждый участок - по 1,5 метра) (акт № 14 приложения № 2).

Вывод по результатам исследования: вертикальное сварное соединение РВС-2 не соответствуют требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771.

Соответствуют ли конструкции лестниц резервуаров предъявляемым к ним требованиям?

Вывод по результатам исследования: При обследовании конструкций лестниц резервуаров выявлены следующие дефекты: смещение в соединении поручня лестницы и поручня площадки на шахтной лестнице РВС-1 и РВС-2 (22); несоблюдение проектного количества промежуточных площадок в конструкции шахтной лестницы на РВС-1 и РВС-2 (23); несоблюдение проектного количества «растяжек» крепления шахтной лестницы к стенке резервуара на РВС-1 и РВС-2 (24); несоблюдение проектного значения межосевого расстояния между анкерными болтами крепления шахтной лестницы к фундаменту на РВС-1 и РВС-2 (25); не закрепленное болтовое соединение в креплении шахтной лестницы к фундаменту на РВС-2 (26); отсутствие шайб в монтажных соединениях анкерных болтов крепления шахтной лестницы к фундаменту на РВС-1 (27); отсутствие шайб в монтажных соединениях крепления шахтной лестницы к стенке резервуара на РВС-1 и РВС-2 (28); несоблюдение проектного способа крепления растяжки шахтной лестницы к кронштейну на стенке резервуара РВС-2 (29); наличие на шахтной лестнице элементов, подлежащих демонтажу на РВС-1 и РВС-2 (30).

Соответствуют ли болтовые крепления предъявляемым к ним требованиям?

Вывод по результатам исследования: Согласно требованиям пункта 2.4.1.1. раздела 2.4 «Маркировка» ГОСТ 1759.0-87 «Болты с шестигранной головкой, винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, шпильки и гайки шестигранные следует маркировать знаком класса прочности (или группы материала) и клеймом (товарным знаком) завода-изготовителя, а изделия с левой резьбой дополнительно знаком левой резьбы».

Согласно пункту 2.4.1.3. раздела 2.4 «Маркировка» ГОСТ 1759.0-87: «Знаки маркировки могут быть выпуклыми или углубленными».

При обследовании выявлено, что из всех имеющихся в наличии на РВС-1 и РВС-2 болтов только 9 болтов соответствуют указанным требованиям ГОСТ 1759.0-87: имеют знак класса прочности и клеймо завода изготовителя. У всех остальных осмотренных болтов на головку болта нанесен только знак класса прочности.

На основании проведенного исследования эксперт пришел к выводу, что болтовые крепления крышек люков на РВС-1 и РВС-2 не соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Определить качество работ по антикоррозийной обработке. Соответствуют ли указанные работы предъявляемым к ним требованиям?

Вывод по результатам исследования:

1. Согласно пункту 9.1.2.1 раздела 9.1 «Срок службы резервуаров» ГОСТ 31385: «9.1.2.1 При наличии антикоррозионной защиты несущих и ограждающих конструкций срок службы резервуара должен обеспечиваться принятой системой защиты от коррозии, имеющей гарантированный срок службы не менее 10 лет, совпадающий со сроком проведения полного технического диагностирования.

9.1.2.2 При использовании системы антикоррозионной защиты с гарантированным сроком службы менее 10 лет для элементов резервуара, защищенных от коррозии, а также для незащищенных элементов должно назначаться увеличение их толщины за счет припуска на коррозию».

Согласно пунктам 15, 16, 17 таблицы «Эксплуатационные параметры резервуара» листа Р001 Проекта РК (том 7 лист 124) припуск на коррозию стенки, днища и крыши резервуаров не предусмотрен. Следовательно, гарантированный срок службы системы антикоррозионной защиты резервуаров по ГОСТ 31385 должен составлять не менее 10 лет.

Кроме этого, согласно пункту 5.1 раздела 5 «Защита от коррозии» «Общих указаний» (том 7 лист 125): «Гарантированный срок службы систем покрытия должен составлять не менее 10 лет».

Однако при осмотре были выявлены зоны с коррозией днища, стенки и крыши РВС-1 и РВС-2.

Исходя из того, что на всех элементах конструкции резервуаров выявлены следы коррозии основного металла, а с момента проведения работ по нанесению антикоррозионного покрытия прошло 6 лет, эксперт сделал вывод, что качество работ по антикоррозийной обработке резервуаров не соответствует предъявляемым к ним требованиям (32).

Согласно части II Проекта АКЗ (т. 7 л.д. 118) в перечень защищаемых конструкций входят: шахтная лестница, площадка перехода, стремянки и площадки пеногенератора, площадки и ограждения на крыше.

При этом защита от коррозии указанных элементов производится лакокрасочным покрытием, которое состоит из двух слоев грунтовки ФЛ-ОЗК и трех слоев эмали ХВ-125.

Согласно ТУ 6-27-87-98 на Эмаль ХВ-125: «Покрытие, состоящее из трех слоев эмали ХВ-125, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет».

В материалах дела имеется информация о том, что в 2017 году на шахтных лестницах и площадках резервуаров уже имелись очаги интенсивной коррозии (т. 10 л.д. 97, 98, 100-102).

Исходя из вышеизложенного, выполненное антикоррозионное покрытие шахтных лестниц, площадок перехода, стремянок и площадок пеногенератора, площадок и ограждений на крыше не обеспечивает защиту указанных металлоконструкций от коррозии в течение срока службы лакокрасочного покрытия (Эмали ХВ-125).

Следовательно, качество работ по антикоррозийной обработке шахтных лестниц, площадок перехода, стремянок и площадок пеногенератора, площадок и ограждений на крыше не соответствует предъявляемым к ним требованиям

Выполнена ли установка регистров в соответствии с проектом?

Вывод по результатам исследования: При обследовании змеевиков подогревателя битума (регистров) выявлены следующие дефекты: несоблюдение проектного способа крепления змеевиков подогревателя к кронштейнам на РВС-1 и РВС-2 (34); отсутствие подкладных листов при креплении кронштейнов змеевиков подогревателя к стенке на РВС-1 и РВС-2 (35); наличие на внутренней поверхности стенки резервуара элементов, подлежащих демонтажу, а так же остатков сварных швов, не зачищенных заподлицо с основным металлом на РВС-2 (36); несоблюдение проектного межосевого расстояния между трубами змеевиков соседних секций подогревателя на РВС-1 и РВС-2 (37).

Кроме этого, при проведении обследования резервуаров выявлены следующие дефекты: несоблюдение проектной геометрической формы резервуара с учетом предельно допустимых отклонений (вдавленная кромка стенки) на РВС-1 (38); наличие на внешней стенке РВС-1 и РВС-2 элементов, использованных для сборки, монтажа, транспортирования и подлежащих демонтажу (39); несоблюдение проектного значения толщины листов окрайки днища на РВС-1, трещина в металле окрайки в ЗТВ сварного шва «стенка-днище» на РВС-1 (40); несоблюдение проектного значения выступа листов окрайки днища за стенку РВС-1 и РВС-2 (41); несоблюдение проектного значения толщины металла стенок резервуара из-за механического воздействия на РВС-2 (42); несоблюдение проектного способа монтажа трубопроводов пеногенератора на РВС-1 и РВС-2 (43); несоответствие межосевых расстояний крепежных отверстий на фланцевых соединениях пеногенератора ГПСС-2000 и межосевых расстояний крепежных болтов на РВС-1 (применение фланцев меньшего размера) (44); несоблюдение проектного значения количества люков на крыше и патрубков в стенке на РВС-1 и РВС-2 (45); несоблюдение размеров и формы смонтированной стенки РВС-1 требованиям ГОСТ 31385 - отклонение значений внутреннего диаметра превышает предельное значение (46); несоответствие Проекта РК требованиям ГОСТ 31385 по характеру вертикального сварного шва и форме поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва (47); несоответствие Проекта РК требованиям ГОСТ 31385 по расположению вертикальных осей поясов стенки резервуара (48); отсутствие сведений об аттестации специалистов, осуществляющих руководство сварочными работами и сварку металлоконструкций резервуаров.(49).

Все дефекты, выявленные в результате обследования на РВС-1 и РВС-2, являются явными.

Определение вида дефектов (значительный/критический) произведено в соответствии с «Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов».

В результате анализа выявленных на РВС-1 и РВС-2 дефектов эксперт пришел к следующим выводам.

В конструкции резервуара РВС-1 выявлено 37 дефектов, из которых 30 являются критическими, а 7 - значительными. При этом 2 дефекта оценены экспертом как неустранимые.

Согласно п. 4.4.1.1 ГОСТ 31385: «К основным несущим конструкциям резервуара относятся: стенка, включая врезки патрубков и люков, окрайка днища, бескаркасная крыша, каркас и опорное кольцо каркасной крыши, анкерное крепление стенки, кольца жесткости».

На РВС-1, в том числе, были выявлены следующие дефекты: смещение вертикальных соединений листов на смежных поясах относительно друг друга (дефект № 20); несоблюдение размеров и формы смонтированной стенки (дефект № 46); несоблюдение проектного значения толщины листов окрайки днища, трещина в окрайке в ЗТВ сварного шва «стенка-днище» (дефект № 19-1); сварные соединения усиливающих листов люков резервуара на крыше и в 1 поясе стенки не соответствуют требования ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771; из 64 погонных метров сварного шва «стенка-днище» резервуара 54 погонных метра шва не соответствуют требованиям ГОСТ 31385 и ГОСТ 14771 (акт № 5 приложения № 2).

По мнению эксперта, сочетание этих дефектов не обеспечивает механическую безопасность основных несущих конструкции резервуара, то есть такое состояние сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости сооружения или их части.

Техническое состояние РВС-1 оценено экспертом как недопустимое - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Использование РВС-1 по прямому назначению из-за выявленных неустранимых дефектов недопустимо.

При этом эксперт отнес дефекты № 20 и 46 к неустранимым дефектам, поскольку для устранения этих дефектов в сочетании с необходимостью замены части окрайки днища, требуется практически полная разборка всех конструкций резервуара.

Техническое состояние РВС-2 оценено экспертом как ограниченно-работоспособное: категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо гши проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Использование РВС-2 по прямому назначению из-за выявленных дефектов недопустимо.

Для приведения РВС-2 в работоспособное техническое состояние требуется проведение капитального ремонта.

Отвечая на вопрос № 2 - Соответствует ли качество фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ, условиям договора, а также требованиям норм и правил, установленным применительно к данным видам работ? Экспертом сделан вывод:

1. Качество фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ по монтажу (сборке) металлоконструкций РВС-1 и РВС-2 не соответствует требованиям норм и правил, установленным применительно к данным видам работ по следующим причинам: техническое состояние РВС-1 - недопустимое. Использование РВС-1 по прямому назначению из-за выявленных дефектов недопустимо. Проведение ремонта РВС-1 с целью приведение его в работоспособное состояние - технически невозможно и экономически нецелесообразно; техническое состояние РВС-2 - ограниченно работоспособное. Использование РВС-2 по прямому назначению из-за выявленных дефектов недопустимо - требуется проведение капитального ремонта.

2. Качество фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ по разработке проектов не соответствует требованиям норм и правил, установленным применительно к данным видам работ по следующим причинам: оформление, состав, содержание и характер имеющейся в Проектах информации не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Проект РК противоречит требованиям ГОСТ 31385 (дефекты 47 и 48); Проект АКЗ представляет собой копию с ТУ 2312-237-05763441-98, то есть с документа, который содержит требования к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке; выявлено расхождение технических параметров и значений, представленных в разных Проектах.

3. Качество фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ по монтажу (сборке) металлоконструкций РВС-1, РВС-2 и работ по разработке Проектов (КЖ, РК, АКЗ, ТИ и ПБ) не соответствует условиям договора по следующим причинам: согласно пункту 1.1.10 договора: «Конечным результатом всех работ, предусмотренных разделом 1 договора, и исполнения поставщиком всех обязательств по договору, является сдача поставщиком покупателю полностью готовых к эксплуатации по прямому назначению (готовность «под ключ») поставленных и смонтированных поставщиком металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ рулонного исполнения для хранения битума в количестве 2-х комплектов».

Как выявлено при обследовании, техническое состояние РВС-1 - недопустимое. Использование РВС-1 по прямому назначению из-за выявленных дефектов недопустимо. Проведение ремонта РВС-1 с целью приведение его в работоспособное состояние - технически невозможно и экономически нецелесообразно; техническое состояние РВС-2 - ограниченно работоспособное. Использование РВС-2 по прямому назначению из-за выявленных дефектов недопустимо - требуется проведение капитального ремонта.

Как следует из вышеизложенного, поставщик не обеспечил поставку покупателю «полностью готовых к эксплуатации по прямому назначению (готовность «под ключ») поставленных и смонтированных поставщиком металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ рулонного исполнения для хранения битума в количестве 2 комплектов».

Исходя из вышеизложенного, качество фактически выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» работ, исследованных в рамках настоящего заключения, не соответствует условиям договора, а также требованиям норм и правил, установленным применительно к данным видам работ.

По вопросу № 3 - Каковы объем и стоимость работ, указанных в договоре, выполнены  «Химсталькон-Инжиниринг» качественно? Каковы объем и стоимость работ, указанных в договоре, выполнены ООО «Химсталькон-Инжиниринг» некачественно? - вывод по результатам исследования: объем работ, выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» качественно, в рамках проведенного исследования не выявлен; стоимость работ, выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг»  качественно, и исследованных в рамках настоящего заключения, составляет 0,00 руб.; объем и стоимость работ, выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» некачественно: 1. Работы по монтажу (сборке) металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ для хранения битума рулонного исполнения в количестве 2-х комплектов (работы по монтажу) – 7 988 801 руб. 41 коп., Работы по разработке проектов конструкций железобетонных (фундамент) (проект КЖ) для проведения работ по обустройству фундамента под металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ для хранения битума рулонного исполнения (работы по разработке проекта КЖ) в количестве 1 штуки, стадии «Р» и «П»- 380000,00 руб., работы по разработке проекта (проект КМ) металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ для хранения битума рулонного исполнения (Работы по разработке проекта КМ) в количестве 1 штуки – 200 000,00 руб., Работы по разработке проекта антикоррозионной защиты (проект АКЗ) металлоконструкций резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ для хранения битума рулонного исполнения (работы по разработке проекта АКЗ) в количестве 1 штуки – 50 000,00 руб., работы по разработке проекта теплоизоляции металлоконструкций (проект ТИ) резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ для хранения битума рулонного исполнения (работы по разработке проекта ТИ) в количестве 1 штуки – 80 000,00 руб., работы по разработке проекта металлоконструкций подогревателя (проект подогревателя) резервуара вертикального стального РВС 5000 мЗ для хранения битума рулонного исполнения (работы по разработке проекта подогревателя) с указанием технических характеристик масляной станции и с теплотехническим расчетом, в количестве 1 штуки – 120 000,00.

Всего стоимость работ, выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг» некачественно, составляет 8 818 801 руб. 41 коп.

По вопросу № 5 экспертом сделан вывод, что стоимость устранения недостатков работ, выполненных ООО «Химсталькон-Инжиниринг», для приведения РВС-2 в работоспособное техническое состояние, составляет 10 586 806 руб. 97 коп.

Полученное экспертное заключение в полной мере соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ.

Согласно части 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.

Экспертом представлены суду письменные пояснения (от 27.10.2020 № 571/2020).

По результатам анализа представленной истцом в обоснование доводов о возможности устранения дефектов Технологической карты эксперт указал, что в ней отсутствует поверочный расчет конструкции резервуара на прочность, подтверждающий, что после выполнения ремонтных работ не будут нарушены: несущая способность стенки резервуара, прочностные и эксплуатационные характеристики резервуара, механическая безопасность конструкции резервуара в целом; представленная Технологическая карта разработана на основе результатов исследования, проведенного экспертом 05.08.2020 и 06.08.2020, а не на основе сведений о состоянии вертикальных соединений листов на смежных поясах относительно друг друга на дату разработки; в представленной Технологической карте горизонтальные пояса 7, 8, 9 и 10 вообще не включены в технологическую последовательность производства работ, при том, что величина фактического смещения вертикальных соединений листов на смежных поясах относительно друг друга в поясах 7-8, 8-9 и 9-10 не определена, а состояние вертикального монтажного сварного шва в поясах 7, 8, 9 и 10 не исследовано; в представленной Технологической карте имеются противоречия в технологической последовательности производства работ.

По мнению эксперта, проведение каких-либо работ по Технологической карте невозможно, так как представленный документ не является полным Проектным решением, которое требуется при внесении существенных изменений в конструкцию производственного объекта с повышенной опасностью, не предусмотренных никакими нормативными документами. 

В силу статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда и в случае отступления от этого требования обязательство считается исполненным ненадлежащим образом. 

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к выводу, что заказчик доказал факт некачественного выполнения работ, из которых работы по резервуару № 1 имеют неустранимые недостатки.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании задолженности по договору  в заявленном истцом размере не имеется.

Приведенные в кассационной жалобе доводы правильность выводов судов первой и апелляционной инстанций, основанных на нормах права и материалах дела, не опровергают.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 20.03.2018 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2020 по делу № А57-27583/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                   Г.Н. Махмутова 

 

Судьи                                                                          Е.Н. Бубнова

 

                                                                                     Э.Т. Сибгатуллин