4342/2017-225229(1) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Резолютивная часть решения

 

11 мая 2017 года. Дело № А56-82872/2016  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать закрытое акционерное общество «Акрос» исполнить гарантийные  обязательства по государственному контракту Санкт-Петербурга от 04.06.2012  

 № ТР-11, а именно: в течение 14 дней со дня вступления решения в законную силу:  по адресу ул. Руднева от Поэтического бульвара до пр. Просвещения:  

- устранить раскрытие и разрушение технологического шва по оси проезжей  части по всей длине объекта;  

- доделать места отбора проб; - разрушение (выбоины) асфальтобетонного покрытия проезжей части напротив д. 13 и в створе с Актерским проездом; 

по адресу: ул. Есенина от пр. Луначарского до пр. Просвещения:  

- устранить разрушение (выбоины, выкрашивание, трещины и сетки трещин)  асфальтобетонного покрытия проезжей части напротив 

<

...>, и в створе с  Поэтическим бульваром;  

- устранить просадки 3х колодцев вдоль д. 26; - заделать места отбора проб; 

- устранить аварийное разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части  20 м².  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Акрос» в пользу санкт- петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного  строительства» 50 000 руб. штрафа и 8000 руб. расходов по плате государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Бутова Р.А.