ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-95353/23-67-782

г. Москва

19 июля 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 10 июля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 19 июля 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 5072

дело по исковому заявлению ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (109012, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 

<

***>)

к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (105064, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 19 955 378,97 руб.,

при участии:

от истца: ФИО2 по дов-ти от 30.09.2021

от ответчика: от ответчика: ФИО3 по дов-ти от 11.11.2022

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – ответчик) о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ неустойки по договорам от № 04/12/20 от 04.12.2020, № 35-06-20ЕП от 04.06.2020, №36-06- 20ЕП от 04.06.2020, №40-6-20ЕП от 04.06.2020, №41-06-20ЕП от 04.06.2020, №42-06-20ЕП от 04.06.2020,  №43-6-20ЕП от 04.06.2020, №138-12-20 ЕП от 22.12.2020, №139-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 140-12-20 ЕП от 22.12.2020, №141- 12-20 ЕП от 22.12.2020, № 142- 12-20 ЕП от 24.12.2020, № 143-12-20 ЕП от 24.12.2020 в размере 19 955 378 руб. 97 коп.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - Заказчик, Истец) и ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - Проектировщик, Ответчик) заключены Договоры от № 04/12/20 от 04.12.2020, № 35-06-20ЕП от 04.06.2020, №36-06- 20ЕП от 04.06.2020, №40-6-20ЕП от 04.06.2020, №41-06-20ЕП от 04.06.2020, №42-06-20ЕП от 04.06.2020,  №43-6-20ЕП от 04.06.2020, №138-12-20 ЕП от 22.12.2020, №139-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 140-12-20 ЕП от 22.12.2020, №141- 12-20 ЕП от 22.12.2020, № 142- 12-20 ЕП от 24.12.2020, № 143-12-20 ЕП от 24.12.2020.

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По первому контракту: в соответствии с условиями контракта №04/12/20 от 04.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 31.12.2020г.

Цена контракта составляет 464 075,58руб. (дополнительное соглашение №1 от 29.09.2022г.). Работы приняты по Актам от 26.12.2020г. №№1,2, от 05.10.2022г. №№3,4,5.

Оплата произведена п/п 856913 от 30.12.2020 в сумме 225 812,55 руб., п/п 164594 от 17.10.2022 в сумме 238 263,03 руб.

С 01.01.2021г. по 05.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Претензия истца от 02.03.2022г. №37-01-11/478 оставлена ответчиком без удовлетворения.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 27 102,42руб.

По второму контракту: в соответствии с условиями контракта №35-06-20ЕП от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта составляет 6 742 486,73руб (соглашение от 17.10.2022г). Работы приняты по Актам от 05.10.2022г. №№1,2,3.

Оплата произведена п/п 255869 от 07.07.2020 в сумме 2 527 966,07руб. (аванс 30%), п/п 173319 от 24.12.2020 в сумме 2 084 672,76руб. (аванс 20%), п/п 481161 от 11.10.2022 в сумме 2 129 847,9 руб.

С 22.12.2020г. по 05.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 784 026,3 руб.

По третьему контракту: в соответствии с условиями контракта №36-06-20ЕП от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта составляет 6 559 32,13руб. Работы приняты по Актам от 03.10.2022г. №№1,2.

С 22.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 855 370,03руб.

По четвертому контракту: в соответствии с условиями контракта №40-06-20ЕП от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта составляет 50 367 688,34 руб. (дополнительное соглашение от 30.09.2022 №8).

Работы приняты по Актам от 01.09.2021г. №1, от 07.10.2022 №№2,3.

С 22.12.2020 по 07.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 3 735 148,85руб.

По пятому контракту: в соответствии с условиями контракта №41-06-20ЕП от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта составляет 10 776 616,63 руб.(дополнительное соглашение от 29.09.2022 №6).

 Работы приняты по Актам от 24.12.2020 №№1,2,3, от 27.12.2020 №№4,5, от 01.09.2021 №6, от 13.10.2022 №№7,8,9,10,11.

С 22.12.2020 по 31.03.2022г. (в период с 01.04.2022г. по 01.10.2022г. пени не начислялись).

Размер пени Генерального подрядчика составляет 1 074 445,21руб.

По шестому контракту: в соответствии с условиями контракта №42-06-20ЕП от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта составляет 10 988 949,24 руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 №6). Работы приняты по Актам от 01.09.2021 №1, от 13.10.2022 №№2,3.

С 22.12.2020 по 13.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 950 828,15руб.

По седьмому контракту: в соответствии с условиями контракта №43-06-20ЕП от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта составляет 10 987 874,95 руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 №6). Работы приняты по Акту от 13.10.2022 №1.

С 22.12.2020 по 13.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 1 304 060,97руб. (расчет прилагается).

По восьмому контракту: в соответствии с условиями контракта №138-12-20 ЕП от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта составляет 1 613 202,53руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 №1). Работы приняты по Актам от 26.12.2020 №1, от 13.10.2022 №№ 2,3,4,5.

С 30.12.2020 по 13.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 175 950,58руб. 

По девятому контракту: в соответствии с условиями контракта №139-12-20 ЕП от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта составляет 34 151 270,81руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 №1). Работы приняты по Актам от 05.10.2022 №№ 1,2.

С 30.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 3 877 721,69 руб. (расчет прилагается).

По десятому контракту: в соответствии с условиями контракта №140-12-20 ЕП от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта составляет 1 327 171,34руб. (дополнительное соглашение от 21.10.2022). Работы приняты по Акту от 05.10.2022 № 1.

С 30.12.2020 по 05.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 150 855,76 руб.

По одиннадцатому контракту: в соответствии с условиями контракта №141-12-20 ЕП от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта 565 728,58 руб. (соглашение от 21.10.2022г.). Работы приняты по Акту от 06.10.2022 №1.

С 30.12.2020 по 06.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 60 560,42 руб. 

По двенадцатому контракту: в соответствии с условиями контракта №142-12-20 ЕП от 24.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта составляет 45 224 715,47руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 №1).

Работы приняты по Актам от 03.10.2022 №№1,2,3.

С 30.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 5 148 423,38 руб.

По тринадцатому контракту: в соответствии с условиями контракта №143-12-20 ЕП от 24.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта составляет 23 024 484,61руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 №2).

Работы приняты по Актам от 01.09.2021 №1, от 03.10.2022 №№1,2.

С 30.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.

Размер пени Генерального подрядчика составляет 1 810 885,21 руб.

На основании п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав, прямо предусмотренный ст. 12 ГК РФ, по своей сути является реализацией одной из мер ответственности за нарушение обязательства.

В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон №44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В силу ч.7 ст.34 Закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Согласно подпунктам «а», «б» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), утвержденных осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а)если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта.

б)если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных «в» - «д» настоящего пункта.

В соответствии с п. 4 Правил списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 7 Правил, в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.

В претензии от 02.03.2023г. №37-01-11/478 истец просил ответчика подтвердить размер пени по указанным контрактам, направив акты сверки расчетов. Ответчик акты сверки не подписал, 50% суммы пени не оплатил.

Как следует из отзыва ответчика, сроки выполнения строительно-монтажных работ были нарушены по причинам, независящим от подрядчика.

Согласно условиям Контрактов №№35-06-20 ЕП от 04.07.2020, 36-06-20 ЕП от 04.06.2020, 40-06-20ЕП от 04.06.2020, 41-06-20ЕП от 04.06.2020, 42-06-20ЕП от 04.06.2020,43-06-20ЕП от 04.06.2020, 140-12-20 ЕП от 22.12.2020 (пп. 6.7); №№141-12 ЕП от 19.12.2018, 142-12-20 ЕП от 24.12.2020, 143-12-20ЕП от 24.12.2020 (пп.6.9) Заказчик, в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта, передает по двухстороннему акту Генеральному подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ и утвержденную в производство работ проектно-сметную документацию.

Однако, в установленные договором сроки проектная документация для производства работ на Объекте не была передана Ответчику, о чем Ответчик сообщал Истцу письмом от 31.03.2022 № РСУ-1232.

Проектно-сметная документация для производства работ была передана Истцом и получена Ответчиком лишь 16.05.2022 сопроводительным письмом Истца от 12.05.2022 № 37-01-11/1116.

Таким образом, Ответчик не мог выполнять работы по капитальному ремонту на Объекте Истца с надлежащим качеством, поскольку Истец не совершил действий по передаче проектной документации в установленные Контрактами сроки, чем фактически препятствовал исполнению обязательств по выполнению работ Ответчиком.

Согласно ч. 6 ст. 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в том числе, в соответствии проектной документацией. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (п.1 ст. 743 ГК РФ).

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (п.2 ст. 743 ГК РФ).

В соответствии с п. 6.7. Договора Заказчик в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта, передает по двухстороннему акту Генеральному подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ и утвержденную в производство работ проектно-сметную документацию.

В ходе исполнения Контрактов была установлена необходимость корректировки проектно-сметной документации, в связи с чем сторонами заключались дополнительные соглашения о продлении срока производства работ до 21.12.2021, что подтверждается дополнительными соглашениями №2 от 24.11.2020 по контрактам №№35-06-20 ЕП от 04.07.2020, №36-06-20 ЕП от 04.06.2020, 40-06-20 ЕП от 04.06.2020, 41-06-20ЕП от 04.06.2020, 42-06-20 ЕП от 04.06.2020, 43-06-20 ЕП от 04.06.2020.

Указанный факт также свидетельствует о наличии обстоятельств, не позволяющих Ответчику исполнить обязательства установленный срок.

Истец обратился в адрес Ответчика с письмом от 23.05.2022 № 37-01-11/1175, в котором сообщил, что 18.03.2022 в судебные органы Республики Латвия подано заявление о внесении в Земельную книгу сведений об аресте объектов Санатория «Янтарный берег», что свидетельствует о нахождении филиала под санкциями, в связи с чем, в связи с действиями властей Латвийской Республики инвестиции в Объект, капитальный ремонт которого предусмотрен Контрактами, нецелесообразны и невозможны.

Тем самым Истец уведомил Ответчика о наступлении объективных и неустранимых обстоятельств, не зависящих от воли или действий сторон, за которые ни  одна из сторон не отвечает, которые препятствуют исполнению обязательств в обозримом будущем, а также фактически уведомил о том, что утратил интерес к исполнению Контрактов.

В связи изложенными обстоятельствами Ответчик направил в адрес Заказчика уведомление о приостановке работ (исх. РСУ-2627 от 26.07.2022).

Вместе с тем, создание необходимых условий для выполнения работ подрядчиком в соответствии со статьей 740 ГК РФ, а также выполнение иных обязательств (статьи 718, 743, 747, 750 ГК РФ), являются обязанностями Заказчика в силу закона.

Таким образом причиной неисполнения субподрядчиком обязательств по договору в сроки и объеме, согласованные сторонами, явились действия истца, не предоставившего в срок встречное исполнение по контракту.

В соответствии с пунктом 1 статьи 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Правила пункта 1 настоящей статьи соответственно применяются и в случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей вины (пункт 2 статьи 404 ГК РФ).

Смешанная вина должника и кредитора характеризуется одновременным наличием следующих признаков: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ нарушило обязательство, при этом, отсутствуют основания для полного освобождения ответчика от ответственности по правилам ст. 401 ГК РФ; а также нет оснований считать ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ не нарушившим договорное обязательство, в связи с просрочкой кредитора по правилам п. 3 ст. ст. 405, 406 ГК РФ, но при этом, нарушение обязательства ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ является отчасти следствием действий ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к выводу, что нарушение сроков выполнения работ по договорам произошло в результате смешанной вины сторон, указанных договоров.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами взысканию с ответчика подлежит неустойка по договору от № 04/12/20 от 04.12.2020, № 35-06-20ЕП от 04.06.2020, №36-06- 20ЕП от 04.06.2020, №40-6-20ЕП от 04.06.2020, №41-06-20ЕП от 04.06.2020, №42-06-20ЕП от 04.06.2020, №43-6-20ЕП от 04.06.2020, №138-12-20 ЕП от 22.12.2020, №139-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 140-12-20 ЕП от 22.12.2020, №141- 12-20 ЕП от 22.12.2020, № 142- 12-20 ЕП от 24.12.2020, № 143-12-20 ЕП от 24.12.2020 в размере 9 977 689 руб. 48 коп. В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки суд отказывает.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН: 7704008538) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН: 7710114301) неустойку по договорам от № 04/12/20 от 04.12.2020, № 35-06-20ЕП от 04.06.2020, №36-06- 20ЕП от 04.06.2020, №40-6-20ЕП от 04.06.2020, №41-06-20ЕП от 04.06.2020, №42-06-20ЕП от 04.06.2020,  №43-6-20ЕП от 04.06.2020, №138-12-20 ЕП от 22.12.2020, №139-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 140-12-20 ЕП от 22.12.2020, №141- 12-20 ЕП от 22.12.2020, № 142- 12-20 ЕП от 24.12.2020, № 143-12-20 ЕП от 24.12.2020 в размере 9 977 689 (девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 48 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 61 388 (шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят восемь) руб. 50 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев